	추진목표와 방향

2 -

【도시계획과 소관】

ꏚ 미래지향적인 도시계획추진

○ 도시기본 및 관리계획 재수립

ꏚ 지역균형개발

○ 장기미집행시설 보상추진

○ 군사시설보호구역 규제완화 추진

○ 민북․접경지역 개발사업 추진

【도시관리과 소관】

ꏚ 쾌적한 도시환경조성

○ 깨끗한 도시미관조성 사업추진

○ 주정차 질서 확립

○ 군훈련도로 및 위험도로개량사업 추진

○ 편안하고 안전한 생활환경 조성 추진

【건축과 소관】

ꏚ 내실있는 건축행정 구현

○ 건축행정 건실화 추진

○ 대형 건축물 옥상에 조경(휴게공간)확보

○ 불법건축물 예방대책

	추진목표와 방향

ꏚ 쾌적하고 살고싶은 주거공간 확보

○ 신규건립  단지에 대한 특색있는 지명사용

○ 친환경적 공동주택 건립

○ 시공중인 공동주택의 안전관리 점검 확행

ꏚ 더불어 함께사는 주거문화 정착

○ 공동주택 단지내 사랑의 효친아파트 추진

○ 농어촌 주거환경 개선사업 추진

【도로교통과 소관】

ꏚ 도로 인프라 확충 및 쾌적한 도로환경 조성

○ 지역간 연계강화를 위한 도로망 대폭 확충

○ 낙후지역 균형발전으로 소외감 해소

○ 시민의 건강증진 및 교통량감소를 위한 자전거도로 건설

ꏚ 대중교통의 체계적 개선 및 운송수단의 선진화

○ 대중교통체계 확충 및 재정지원 확대

○ 안전하고 편리한 시민위주의 교통환경 제공

○ 교통사고 예방과 안전한 교통환경 조성

	추진목표와 방향

【재난안전관리과 소관】

ꏚ 재난 및 수해로부터 안전한 도시 구축

○ 항구대책위주의 재해예방사업 지속 추진

○ 생태계가 되살아나는 친환경 치수사업 추진

○ 시민안전생활에 도움이 되는 민방위 교육 추진

【도시개발사업소 소관】

ꏚ 신도시 건설 및 택지개발 추진

○ 자연과 어우러진 친수환경 생태도시 건설

○ 자족형 도시 조성으로 시민들의 삶의 질 향상

○ 환경친화적 공법으로 건강하고 쾌적한 신주거단지 조성

○ 난개발 방지 및 효율적인 택지개발로 지역 주택난

해소와 주거생활 안정 도모

ꏅ LCD Cluster 구축 및 인프라 확충

○ 세계 최고의 첨단산업 중심의 "LCD cluster" 구축

○ 산업(협력)단지 조성을 위한 인프라 시설 조기 확충

○ 대규모 외국인 투자기업 유치로 지역경제 활성화 도모

○ 남북간 인적․물적 교류사업의 요충지로 향후 남북

통일을 위한 중추적 역할 기대

주요업무 추진계획

【 도시계획과 소관 】

1. 도시기본 및 관리계획 재수립

○『선계획 - 후개발』체계 확립을 위한 도시기본계획 재수립

○ 재정립된 도시기본계획 실현을 위한 도시관리계획 수립

○ 개발과 보전의 토지이용체계확립을 위한 토지적성평가 구축 및

수치지형도 제작

□ 수립방향

○ 파주시의 장기적인 도시발전 방향제시

○ 용도지역․지구․구역 및 도시기반시설계획 재조정

○ 관리지역 세분(계획관리․생산관리․보전관리) 결정

○ 불합리한 보전목적의 용도(자연환경 보전지역, 취락지역등) 재조정

○ 개발예정지(산업단지,택지) 수요예측 반영

□ 그간 추진상황

○ 도시기본계획 재수립 : 인구지표(87만인) 및 공간구조구상 등 최종(안)수립

○ 토지적성평가 : 농림․자연환경보전지역 확대추진

○ 수치지도 : 항공사진촬영, 평면 기준점 측량완료

□ 추진계획

○ 2005.  3 : 도시기본계획(안) 승인절차 이행

- 주민공청회(30일소요), 시의회 의견청취(10일소요), 도시계획위원회 자문(20일소요)

○ 2005.  6 : 도시기본계획확정(건교부승인)

○ 2005.  7 : 수치지형도 및 토지적성등급 확정

○ 2005.  9 : 도시관리계획(안) 수립

※ 주민공람, 시의회 의견청취, 도시계획위원회 자문

○ 2005. 12 : 도시관리계획 수립완료(경기도승인)

2. 장기미집행시설 보상추진

○ 헌법재판소의 헌법불합치결정(‘99.10.21)에 의거 국토법에 지목이      대지인 토지에 대한 매수청구제도신설 및 보상추진

□ 현   황

○ 결정시설 : 267건(5,478필지) / 4,764천㎡(도로233, 공원27, 기타7)

○ 보상대상 : 1,828필지 / 143천㎡(594억원)

○ 매수청구 : 25필지 / 6,626㎡(45억원)

※ ‘02년 4필지 / 1,504㎡, ‘03년 8필지 / 3,593㎡, ‘04년 13필지 / 1,529㎡

○ ‘05년 597백만원(대지보상특별회계) 확보

○ ‘05년 현재 3필지 보상완료

□ 추진계획

○ ‘05년 예산잔액내 재감정후(3필지) 보상 예정

○ 추경등 예산확보후 ‘03년 신청건에 대한 보상 추진

3. 군사시설보호구역 규제완화 추진

○ 군작전 수행에 지장이 없는 범위 내에서 시민의 재산권행사 보호와

지역균형발전을 위한 군사시설보호구역 규제완화 추진

□ 보호구역 현황

(단위 : ㎢)

행 정 구 역	해 제 구 역	보 호 구 역
		통 제 보 호			제 한 보 호
		소계	협의	공여지	소계	행정 위임	협의	비행안전	훈련장	사격장	공여지
672.56 (100%)	21.63 (3.2%)	129.46 (19.3%)	49.18	80.28	521.47 (77.5%)	56.63	434.27	1.43	15.12	6.75	7.27

※ 통제보호구역 : 민통선 이북지역

※ 제한보호구역 : 민통선 이남지역

□ 추진계획

○ 2005.  3      : 민관군 협의체 구성(30명내외)

- 읍면동장,시의원,도시계획전문가,이장협의회장,군부대군보담당관

○ 2005.  4 ～ 5 : 계획수립 및 실태조사실시

○ 2005.  6      : 실태조사결과 검토 및 분석

○ 2005.  7      : 규제완화건의(국방부, 관할군부대)

※ 파주시관할 군부대

- 1군단(1사단, 9사단, 25사단, 72사단, 101여단) / 6군단(28사단)

4. 민북․접경지역 개발사업 추진

○ 낙후․소외된 민북 및 접경 지역 생활 및 생산 기반시설 확충

○ 민북 및 접경지역 거주민의 소득증대와 정주의욕 고취

ꊱ 민통선 북방지역개발 : 7건 / 1,500백만원

○ 대성동마을 편익시설 설치 : 1건 / 100백만원

- 마을간이상수도 관정 1공 및 물탱크 교체(FRP → 스테인레스)

○ 농업기반시설 확충 : 농로포장 6건(L=9.40㎞) / 1,400백만원

- 탄현면 : 1건 / 군내면 : 3건 / 진동면 : 2건

ꊲ 접경지역정주환경개선 : 17건 / 5,155백만원

○ 사업대상 : 3읍 8면 92개 마을

○ 사업기간 : 2003 ～ 2012년 (10년)

○ 사업내용 : 기반시설ㆍ복지시설정비ㆍ주택개량 등

○ 총사업비 : 85,400백만원(국 59,780 도 25,620)

○ 2005년 투자예정액 : 5,155백만원 (7개 읍면 11개 마을)

▣ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	합 계	2003년	2004년	2005년	2006 ~ 2012
사 업 비	85,400	2,593	3,784	5,155	73,868

【 도시관리과 소관 】

1. 깨끗한 도시미관조성 사업 추진

○ 도시이미지 제고를 위한 건전한 광고문화 조성

○ 가로,보안등 및 표지판정비로 찾기 쉽고 편리한 가로시설 조성

□ 옥외광고물 정비사업 추진

○ 『간판이 아름다운 거리』 시범사업 추진

∙ 구    간 : 금촌동 중앙로 (시청앞 ⇔ 금촌의료원)

∙ 정비대상 : 28동 94개 업소 (상가건물)

∙ 사 업 비 : 474백만원 (도비237, 시비237)

※업소당 5백만원 지원

∙ 정비기간 : 2005. 1 ～ 2005. 10월

∙ 추진내용 : 표준모델안 선정 용역중

○ 기존 옥외광고물 일제정비

∙ 정비대상 : 불법광고물 883개소

∙ 정비기간 : 2005. 1 ～ 3월

※불법광고물정비에 따른 연립간판 표준모델안 보급

□ 가로시설 조성사업 추진

○ 새봄맞이 가로시설 일제정비

∙ 대상 : 금촌동 및 주요시가지

∙ 기간 : 2005. 3 ～ 5월(춘계),  2005. 9 ～ 11월(추계)

∙ 내용 : 표지판도색, 경계석교체, 보도정비, 난간․가드레일,도로정비

○ 도로표지판 및 가로․보안등 정비

∙ 대상조사 : 2005. 3월

∙ 정비기간 : 2005. 4 ～ 10월

※파주LCD(문산첨단) 산업단지 주변도로 우선 추진

□ 기대효과

○ 불법, 난립된 광고물정비로 깨끗한 도시이미지 제고

○ 깨끗한 가로시설조성으로 보행자 및 차량이용자 편의 도모

2. 주정차 질서 확립

○ 도심지 주차공간 확충으로 주차난 해소 및 주민편익 증진

○ 불법 주정차 단속을 통한 선진 주정차 문화 정착

□ 현  황

○ 주차장 확보율 : 53,726면 / 91,667대(확보율 58.6%)

○ 공영주차장 현황 : 6,411면(노외 5,052면  노상 1,359면)

○ 무인단속시스템 현황 : 금촌동 3개 구간  11개소 설치

□ 추진상황

○ 주차공간 확충

▪ 금촌 유료주차장 공영화 활용  2개소 100면

▪ 문산 임시공영주차장 조성  2,000평

○ 지도단속 체계 구축

▪ 인력 및 장비 보강 (인력 9 → 26명, 차량 4 → 8대)

▪ 혼잡지역 책임구간제 실시 2인 1조 / 10개조

- 금촌 5, 문산 2, 조리 1, 교하 1, 광탄 1

▪ 취약지역 특별단속 (야간 및 공휴일) 3개조

- 금촌 2, 문산 1

□ 향후계획

○ 무인단속 시스템(CCTV) 확대 설치  5개소  400백만원

- 문산시가지 상습 정체구간

○ 주차공간 확충

▪ 사유지 임차 및 사설 주차장 활용

▪ 공․민영 주차장 조성

- 법원 시유지 공영주차장  70면  100백만원

- 금촌택지지구 민영주차장  3개소  315면

○ 민간단체 참여 유도

- 명예 주차지도원제 도입 등

3. 군훈련도로 및 위험도로개량사업 추진

○ 군 훈련도로정비로 지역주민의 통행편의와 안전사고 방지

○ 도로폭이 협소하고 굴곡부가 많은 도로개선으로 통행편의 도모

□ 군 훈련도로정비사업

【2004년 사업】

∙ 위    치 : 문산읍 이천리 외 2개소

∙ 사 업 량 : 연장 7.1km, 도로폭 4～8m

∙ 사 업 비 : 3,260백만원 (도비2,353 시비907)

∙ 사업기간 : 2004. 1 ～ 2005. 10

∙ 추진내용 : 2004. 12. 23 공사착공 (동절기 공사중지중)

【2005년 사업】

∙ 위    치 : 적성면 객현리 외 1개소

∙ 사 업 량 : 연장 8.0km, 도로폭 4～8m

∙ 사 업 비 : 3,980백만원 (도비1,990  시비1,990)

∙ 사업기간 : 2005. 1 ～ 2005. 10

∙ 추진내용 : 2005. 2. 15 용역계약

□ 위험도로 개량사업 추진

∙ 위    치 : 금촌동(금촌의료원～고산교), 교하읍 하지석리

∙ 사 업 량 : 연장 2.29km 도로폭 12m

∙ 사 업 비 : 1,912백만원 (도비1,338  시비574)

∙ 사업기간 : 2003. 3 ～ 2005. 10

∙ 추진내용 : 2004.12.27 공사착공 (동절기 공사중지중)

□ 고가낙석 개선사업 추진

∙ 대    상 : 17 개소

∙ 2005추진 :  4 개소 / 373백만원

- 경기도 :  2 개소 / 360백만원 (공사중)

- 파주시 :  2 개소 /  13백만원 (용역중)

∙ 향후추진 : 13 개소

4. 편안하고 안전한 생활환경 조성

○ 신속한 도로보수 및 관리로 안전한 통행여건 조성

○ 시민생활불편을 찾아가 해결해 주는 참봉사 행정구현

□ 안전한 통행여건 조성

○ 신속한 도로보수

∙ 정비인원 : 23명 (도로관리원)

∙ 사업내용 : 도로 및 교량 유지보수, 도로순찰

∙ 정비기간 : 년중

○ 동절기 제설대책 추진

∙ 대상노선 : 91개 노선  526.4km

(지방도 11개 노선, 군도 18개 노선, 농도 62개 노선)

∙ 장비현황

- 본청 :  25대 (시보유14대, 임차10대, 소방차1대)

(살포기12대, 배토판2대, 그레이더2대, 덤프5대,봉고3대)

- 읍면 : 114대 (살포기10대, 소형배토판104대)

∙ 자재확보

- 염화칼슘 보유량 : 29,000포 (포당 25kg)

- 적사장 : 450개소 (도심지150개, 산간지 300개)

□ 현장처리기동대 운영

○ 구성현황

∙ 인원 : 2개반  9명

(반장2, 운전2, 전기2, 일용3)

∙ 기간 : 년중

○ 사업내용

∙ 시민생활불편사항의 신속한 처리

- 가로․보안등 등기구 교체 및 보수, 오물수거, 통행장애시설물등

∙ 기타 사고․위험요인 예찰․제거

【 건축과소관 】

1. 내실 있는 건축행정 구현

○ 건축행정의 투명한 업무처리와 부조리 근절로 건실화 도모

○ 대형 건축물 옥상에 조경을 통한 녹색도시 조성 및 도시미관 개선

○ 불법건축 행위의 사전 예방으로 법질서 확립

가. 건축행정 건실화 추진

○ 건축위원회심의 과정 투명화

- 설계자에게 설명기회 부여 및 실현 곤란한 조건부과 지양

○ 건축부조리 근절

- 건축공사현장 지도․점검시 실명제 이행(현장방문전 사전통보)

- 건축사대행 건축물에 대한 점검실시로 건축주와의 유착관계 근절(년2회)

나. 대형 건축물 옥상에 조경(휴게공간) 확보

○ 목    적 : 녹지공간 확보로 녹색도시 건설 및 도시미관 개선

○ 적용대상 : 연면적 5천㎡ 이상으로써 5층이상 건축물

○ 추진방향

- 관내 건축사 설계사무소에 동 내용을 통보 설계시 반영

- 관외 건축사가 설계시 동 내용을 설명 설계에 반영토록 조치

다. 불법건축물 예방대책 추진

○ 유관기관과의 협조체계 구축을 통한 불법행위 근절

- 전기, 전화, 수도, 가스 등

○ 기동성 있는 단속활동 전개 등으로 단속체계 확립

- 일일순찰 강화, 지역별 책임제 확행, 취약지역 특별관리

○ 대주민 홍보강화로 무질서심리 확산 방지 및 불법행위 사전예방

2. 쾌적하고 살고 싶은 친환경 주거공간 확보

○ 웰빙시대에 맞추어 도시미관을 살리고 녹지공간 확보로 쾌적함이 한껏      어우러진 공동주택 주거문화 정착

○ 공동주택 현장에 대한 정기 및 수시점검을 통한 견실시공 유도로 공동       주택 주거공간의 질적 향상도모

가. 신규건립 단지에 대한 특색 있는 지명(마을명)사용

○ 일 반 지 역 : 외래어 사용지양 및 고유지명 사용권장

○ 택지개발지역 : 단지별로 특색있는 지명(마을명)을 사용 자체랜드-마크 효과 거양

- 시(市) 지명위원회 상정 검토

나. 친환경적 공동주택 건립

○ APT 측벽에 벽화 등 그래픽 디자인을 통한 도시미관 향상

(지방도 , 국도변 등 대로변 위주로 추진)

○ 에어컨 실외기 설치 공간 확보로 외관개선

○ 절개지 또는 고저차가 있는 부분에 조경석 쌓기 및 산벽(법면)계획유도(옹벽설치 지양)

○ 주차장은 최대한 지하화 하고 지상부분은 녹지공간과 공원등으로 조성

다. 시공중인 공동주택의 품질 및 안전관리를 위한 점검 확행

○ 정기점검 : 년2회 이상(반기 1회이상)

○ 특별점검 : 해빙기, 장마철 동절기 대비점검

3. 더불어 함께 사는 주거문화 정착

○ 공동주택 단지에『사랑의 효친아파트』를 건립하여 홀로 사는 독거     노인과 소년․소녀가장 등에게 제공하고

○ 농어촌 지역의 노후․불량 주택개량을 통한 농어촌의 쾌적한 환경     조성을 통한 도․농 소외계층과 함께하는 주거문화 정착

가. 공동주택 단지내 사랑의 효친아파트 추진

○ 사업개요

- 설치대상 : 신규건립 공동주택단지

(500세대 이상 2세대, 500세대 미만 1세대)

- 설치규모 : 세대당 5 ～ 14평(원룸형태)

- 설치장소 : 아파트 부대복리시설(관리사무소)내 복합설치

○ ‘04년까지 추진실적 (39개단지, 63세대)

- 입주현황 : 10개단지 17세대(소년․소녀가장 3, 독거노인 14) - 총20명

- ‘05년 입주계획 : 4개단지 7세대(현대 I-PARK, 현대2차, 주공, 운정동문)

○ 추진계획

- 아파트사업계획승인 신청시 사업주체로 하여금 반영토록 권고

- 주민 만족도를 실시하여 개선사항 적극 수렴

나. 농어촌 주거환경 개선사업 추진

○ 사업량 : 31개동 930백만원(20평기준 3천만원)

※ 재특 20% 농특세 10% 주택기금 30% 도비 30% 농협 10%

○ 신청자접수중 : 문산읍 장산리 283 강인석 외34명

○ 추진계획

- ‘05. 3      : 대상자 확정

- ‘05. 3 ～ 6 : 행정절차이행(관련기관 협의 및 제반행위 등)

- ‘05. 12     : 준공 및 결산

【 도로교통과 소관 】

1. 국도 ․ 지방도 도로 사업 추진

○ 통일대비 남북교류 전초기지로서의 간선도로망 확충으로 지역간

균형발전 도모

□ 현    황 : 12건 / 105.97km 12,434억원

○ 국  도 건설사업 : 3건 / 22.32km (4,601억원)

▪계속 : 3건 / 22.32km (공사2, 보상1)

○ 국지도 건설사업 : 5건 / 62.25km (6,703억원)

▪계속 : 5건 / 62.25km (공사3, 보상2)

○ 지방도 건설사업 : 4건 / 21.40km (1,130억원)

▪계속 : 3건 / 15.40km (공사1, 보상2)

▪신규 : 1건 /  6.0 km (용역1)

□ 추진계획

○ 도로사업 추진에 따른 도로구역 결정과 사전군부대 협의, 재영향평가,    문화재 지표조사 등 유관기관 협의체제 구축운영

○ 보상독려반 운영과 기공승락서 징구등 협의 매수를 병행 추진하고         행정절차 기간 도래 즉시 토지수용협의 절차 확행

□ 기대효과

○ 경기북부지역 도로망 조기확충으로 물류비 절감과 지역간 균형개발은    물론 지역주민 삶의 질 향상

○ 친환경적인 도로건설로 쾌적한 도로환경 조성 및 교통체증 해소로    주민불편 해소

※ 포장율 : 87%(2004년 85%)

2. 군도등 각급 도로망 확충

○ 지역간 연결도로망 확충으로 원활한 교통소통 및 균형발전도모

○ 미개설 도시계획도로개설로 시민편의증진 및 장기미집행으로 인한

재산권행사 민원 해소

○ 시민의 건강증진과 교통량감소를 위한 자전거도로 건설

□ 현    황 : 25건 / 47.34km 3,356억원

○ 군        도 : 6건 / 21.95km (2,458억원)

▪계속 : 4건 / 12.85km (공사3 보상1), 신규 : 2건 / 9.10km (보상2)

○ 농어촌 도 로 : 6건 / 11.95km (283억원)

▪계속 : 6건 / 11.95km (공사5, 설계1)

○ 도시계획도로 : 12건 / 5.64km (591억원)

▪계속 : 11건 / 4.4km(공사4,계약2,설계5) 신규 : 1건 / 1.2km(보상+공사)

○ 자전거 도 로 : 1건 / 7.8km (24억원) - 공사 중

□ 추진계획

○ 마무리 및 계속사업 위주의 사업추진으로 시민편의 증진

○ 통합감리 적극 시행으로 견실시공 유도 및 예산절감 등

효율적인 현장관리

□ 기대효과

○ 사업기간 단축으로 도로이용 시민의 편의증진 도모 및 지역

개발촉진.

○ 낙후지역 균형발전으로 소외감해소 및 영농편의 도모

2005년도 도로사업 추진계획

(단위 : km, 백만원)

일련 번호	구분		사업명	위 치	사업량	사업기간	사업비				공정(%)
							계	기투자	2005	향후	공사	보상
총계 37건					153.31		1,579,233	350,516	147,911	1,080,806
소계 3건					22.32		460,146	96,121	42,053	321,972
1	국도	계속	두포～천천간 (국도37호선)	파평두포 ～적성두지	L=10.64	‘99～’06	91,630	60,333	31,297	-	56	90
2			적성우회도로 (국도37호선)	적성두지 ～적성구읍	L=4.48	‘98～’05	41,916	31,160	10,756	-	54	70
3			적성～전곡간 (국도37호선)	적성구읍 ～적성적암	L=7.2	‘02～’09	326,600	4,628	-	321,972	용역100
소계 5건					62.25		670,341	116,054	31,621	522,666
4	국지도	계속	교하～조리간 (국지도56호)	교하문발 ～조리등원	L=10.29	‘99～’06	131,114	96,868	20,621	13,625	95	90
5
			고양～광탄간 (국지도78호)	광탄신산 ～고양시계	L=9.0	‘03～’08	72,027	6,000	-	66,027	용역30
6			조리～법원간 (국지도56호)	조리등원 ～법원법원	L=13.0	‘03～’09	358,000	4,186	-	353,814	용역60
7			법원～상수간 (국지도56호)	법원갈곡 ～양주시계	L=4.66	‘02～’10	82,800	8,000	6,000	68,800	용역100
8			자유로확포장 (국지도23호)	고양이산포～탄현낙하	L=25.3	‘03～’06	26,400	1,000	5,000	20,400	용역100
소계 4건					21.40		113,011	16,633	7,991	88,387
9	지방도	계속	금촌～월롱간 (지방도368호)	파주야동 ～월롱위전	L=4.3	‘03～’07	25,900	3,626	-	22,274	용역100
10			식현～두지간 (지방도310호)	적성 식현 ～두지리	L=2.1	‘04～’06	9,691	7,400	2,291	-	10	60
11			설마～구읍간 (지방도323호)	적성 설마 ～구읍리	L=9.0	‘02～’08	23,900	4,607	5,700	13,593		30
12		신규	월롱～광탄간 (지방도368호)	월롱 위전 ～광탄방축	L=6.0	‘04～’09	53,520	1,000	-	52,520	용역20
소계 6건					21.95		245,847	71,143	37,250	137,454
13	군도	계속	통일로～파주리 (군도7호선)	파주봉암 ～파주파주	L=2.26	‘97～’07	20,800	7,494	2,500	10,806	40	100
14			출판단지 ～삽다리간 (군도1호선)	교하동패 ～서패리	L=3.3	‘03～’07	15,180	1,620	-	13,560	용역70
15			금승～위전간 (군도3호선)	탄현금승 ～월롱위전	L=5.95	‘03～’05	70,367	51,529	15,200	3,638	30	80
16			선유～문산여고 (LCD협력단지) (군도31호선)	문산선유 ～파주봉서	L=1.34	‘04～’05	18,000	4,500	13,500	-	용역100

일련 번호	구분		사업명	위 치	사업량	사업기간	사업비				공정(%)
							계	기투자	2005	향후	공사	보상
17	군도	신규	문산～연풍간 (군도31호선) 상습정체해소사업	파주 파주 ～연풍리	L=4.2	‘04～’08	72,100	4,000	4,000	64,100	용역70
18			문발공단～교하 (군도1호선) 상습정체해소사업	교하문발 ～지310호	L=4.9	‘04～’07	49,400	2,000	2,050	45,350	용역70
소계 6건					11.95		28,346	20,161	2,380	5,805
19	농어촌도로	계속	봉암～파주간 (농어촌202호)	파주봉암 ～파주파주	L=3.75	‘95～’05	8,740	6,840	1,900	-	20	95
20			장릉 진입로 (농어촌101호)	탄현갈현 ～이주단지	L=1.8	‘02～’05	4,646	4,541	-	105	50	100
21			능안리진입로 (농어촌101호)	조리능안 ～능안리	L=1.13	‘02～’05	5,680	4,580	-	1,100	47	95
22			대원～설문간 (농어촌202호)	조리대원 ～설문동	L=0.67	‘02～’05	2,380	1,900	480	-	76	100
23			운천～장산간 (농어촌203호)	문산운천 ～장산리	L=1.1	‘03～’05	2,000	2,000	-	-	25	90
24			파주～부곡간 (농어촌201호)	파주파주 ～부곡리	L=3.5	‘03～’06	4,900	300	-	4,600	용역80
소계 13건					13.44		61,542	30,404	26,616	4,522
25	도시계획도로	계속	선유광장개설 (도시계획2호)	문산선유 삼거리	A=6,358㎡	‘03～’05	3,550	3,100	450	-	90	100
26			파라다이스-순달교 (중로1-5호선)	금촌동	L=0.89	‘01～’05	3,470	2,870	600		40	100
27			당동～여우고개 (LCD협력단지) (중로1-1호선)	문산당동 ～여우고개	L=0.86	‘03～’05	12,000	8,000	4,000	-	계약	95
28			금촌~삽교교간	금촌동	L=0.54	‘02～’05	10,062	10,062	-	-	95	100
29			문산동초교진입	문산선유리	L=0.36	‘04～’05	2,600	1,000	-	1,600	용역30
30			자전거전용도로	교하교하 ～조리장곡	L=7.8	‘04～’05	2,400	1,300	-	1,100	50	-
31			마지리 도시계획도로	적성 마지리일원	L=0.264	‘04～’05	2,006	600	1,406	-	용역100
32			신산리 도시계획도로	광탄 신산리일원	L=0.206	‘04～’05	1.300	400	900	-	용역100
33			법원리 도시계획도로	법원 법원리일원	L=0.194	‘04～’05	800	240	560	-	용역100
34			신산우회도로	광탄 신산리일원	L=0.44	‘04～’06	2,854	32	1,000	1,822	용역30
35			연풍1리 도시계획도로	파주 연풍리일원	L=0.4	‘03～’05	1,700	1,700	-	-	60	100
36			선유4리 도시계획도로	문산 선유리일원	L=0.15	‘03～’05	800	800	-	-	용역100
37		신규	통일공원～중에교 (LCD협력단지) (대로1류)	파주봉서리	L=1.2	‘04～’05	18,000	300	17,700	-	계약	-

3. 대중교통 노선 확충 추진

○ 대단위 택지 개발사업 시행으로 서울 등 인접 도시간 연결 대중교통 노선 사전확보로 시민불편 해소

□ 현  황

○ 서울 방면 버스 현황 : 22개 노선, 295대

○ 일산 방면 버스 현황 : 7개 노선, 42대

○ 의정부 방면 버스 현황 : 3개 노선, 45대

○ 파주시내 운행 등 기타 버스 현황 : 45개 노선, 169대

□ 추진계획

○ 노선신설 : 3개 노선

․교하출판문화단지 - 백석역 (200번)

․교하출판문화단지 - 자유로 - 신촌 (2000번)

․금촌 - 축현리 - 헤이리 - 이주단지 - 갈현리 - 금촌 (500번)

○ 노선연장 및 조정 : 8개 노선

․통일동산(유승)- 자유로 - 출판단지 - 백석역 (200번)

․금촌택지지구 서울시내버스 9707번, 7735번 경유추진

․금촌7단지 입주전(‘05년 5월) 150번, 567번, 300번 경유추진

․금촌택지지구내 56번국지도 연결램프 개통시 900번, 919번 노선조정

□ 기대효과

○ 서울, 일산 등 지역의 접근성 제고로 편리한 생활권 조성

○ 교통낙후지역의 운행체계 조정으로 대중교통 불편 해소

4. 교통사고 예방과 안전한 교통환경 조성

○ 교통사고 다발지역과 어린이 보호구역의 사고예방을 위한 교통 안전

시설 개선

○ 자동차 및 보행인 안전성 확보를 위한 교통안전시설 정비 확충

○ 대중교통 이용시민의 편의 제공으로 쾌적한 교통 환경조성

□ 추진방침

○ 차량통행과 보행자가 많은 지역 우선정비

○ 교통사고 다발지역 교통체계개선

○ 어린이 보호를 위한 안전통학로 확보

○ 보행인 안전을 위한 취약지 개선

□ 추진계획

○ 교통사고 잦은곳 개선사업 : 2개소 / 190백만원

- 교차로 가각정리, 신호등 설치와 체계개선, 차선 및 보도정비

※경찰서 및 도에서 사고지수에 의하여 대상지 선정

○ 어린이 보호구역 정비사업 : 1개교 / 200백만원

- 칼라포장, Hump식 횡단보도, 안전휀스등 통학로 안전시설

※'06년까지 41개교 정비예정('03년4개교 정비완료, 04년10개교 이월사업추진중)

○ 교통안전시설 정비 및 확충 : 700백만원

- 신호등 설치와 연동체계 구축 및 유지보수 : 70개소 / 200백만원

- 차선도색 및 교통안전 표지판 설치 :  400㎞ 400개/ 350백만원

- 일반통행로 및 교통부속시설 개선 : 1,100개 / 150백만원

○ LED교통신호등 교체 : 10개소 20등 / 140백만원

○ 버스승강장 설치 : 20동 / 170백만원

- 광고유치 협약으로 40동 설치

□ 기대효과

○ 안전한 교통환경 조성으로 안전운행 및 보행자 편의 도모

○ 대중교통 이용시민의 편의제공으로 대중교통 이용 활성화

【 재난안전관리과 소관 】

1. 재난 예방대책 지속 추진

○ 재난 안전 시스템 확충과 철저한 수방대책으로 수해 안전 도시 구축

○ 재난, 방재시설물의 중점관리와 상황 발생시 신속한 대응 태세 확립

□ 현    황

○ 배수펌프장 : 49개소(시 8 ,간이 18, 농업기반공사 21, 기타 2)

○ 배  수  문 : 384개소(국가하천 150, 지방하천 234)

○ 특정관리대상 : 174개소

교 량	공공시설	가스위험시설	다중이용시설	유선장	기 타
18	16	54	43	3	40

○ 제설장비 : 살포기 22, 배토판 109,그레이다 2,덤프 5, 봉고 6

○ 수방자재 및 제설자재

▪양수기 246대, PP마대 400,000매, 천막 100개, 비닐 100롤

▪염화칼슘 76,000포, 적사함 450개소, 모래주머니 5,000개

□ 추진계획

○ 임진강 항구 수해방지 종합대책사업 지속추진

○ 재해위험지구정비사업(두지지구, 율곡지구) 추진

○ 재해 예․경보 구축을 통한 임진강유역 저지대 주민사전 대피

○ 배수펌프장 일상점검․정비의 생활화로 상시 가동체계 구축

○ 특정관리대상시설 관련분야 전문가(소방, 전기, 가스 등)  상시합동 점검

○ 방재훈련실시와 재난안전 홍보방을 개설하여 시민의 안전의식 고취

□ 기대효과

○ 방재시설물 확충과 재해․재난사전 대비 철저로 주민의 생명 및 재산보호

○ 재난 예방부터 사태 수습까지 신속․효율적인 재난대응체계 확립

2. 친환경적 자연형 치수사업 추진

○ 미 개수된 하천의 개수를 통해 근본적인 재해예방을 위한 치수

사업 지속추진

○ 환경 친화적인 자연형 하천으로 조성

□ 현    황 : 16개 사업 57.58km 305,657백만원

○ 국가하천 : 3개사업 21.47km 81,917백만원

▪계속사업   : 3개사업  21.47km 81,917백만원(용역1, 공사2)

○ 지방하천 : 6개사업 12.34km 62,595백만원

▪마무리사업 : 1개사업  0.67km 4,687백만원(공사1)

▪계속사업   : 4개사업  10.7km 45,190백만원(공사4)

▪신규사업   : 1개사업  0.97km 12,718백만원(용역1)

○ 소하천 : 4개사업 7.1km 8,945백만원

▪계속사업   : 4개사업  7.1km 8,945백만원(공사4)

○ 하천환경정비사업 : 2개사업  13.67km 60,200백만원(용역2)

○ 하천유황개선사업 : 1개사업  3.0km 92,000백만원(용역1)

□ 추진계획

○ 마무리 사업은 ‘05년 6월 우기전 사업 완료 추진

○ 계속 및 신규 사업은 조기에 사업비를 확보하여 치수 및 환경을           고려한 자연형 하천으로 개수

□ 기대효과

○ 하천 개수로 수해예방에 만전을 기하여 귀중한 재산과 생명보호

○ 친환경적인 하천 개수를 통해 주민들의 친수공간 제공

※개수율 : 국가하천 100%  (2004년 100%)

지방하천 87.9% (2004년 84.9%)

소 하 천   36% (2004년   26%)

2005년 하천사업 추진현황

(단위 : km, 백만원)

일련 번호	구 분		사업명	위 치	사업량	사업기간	사업비				공정(%)
							계	기투자	2005	향후	공사	보상
총계 16건					57.58		305,657	14,460	29,170	262,027
소계 3건					21.47		81,917	806	7,265	73,846
1	국가하천	계속	임진강하도준설사업	탄현 낙하리 ～진동 동파리	17.69	‘04～’07	68,880	330	2,465	66,085	-	-
2			낙하제 개수공사	탄현 낙하리	1.28	‘04～’06	6,710	176	1,800	4,194	용역100
3			작골제 개수공사	탄현 성동리	2.5	‘04～’06	6,327	300	3,000	3,027	용역80
소계 6건					12.34		62,595	11,790	18,163	32,642
4	지방하천	마무리	금촌천 개수공사	아동동～ 월롱 영태리	0.67	‘02～’05	4,687	3,524	1,163	-	70	100
5		계속	삽교천 개수공사	야동동～ 월롱 덕은리	2.4	‘03～’06	14,614	3,766	2,000	8,848	-	75
6			대위지천 개수공사	맥금동～ 탄현 갈현리	3.1	‘03～’06	9,900	2,100	4,000	3,800	용역100
7			소위지천 개수공사	맥금동	3.4	‘03～’06	12,376	2,100	6,000	4,276	용역100
8			장진천 개수공사	조리 대원리	1.8	‘03～’06	8,300	300	5,000	3,000	용역100
9		신규	분수천 개수공사	광탄 신산리	0.97	‘05～’07	12,718	-	-	12,718	-	-
소계 4건					7.1		8,945	1,464	342	7,139
10	소하천	계속	팔봉천 개수공사	조리 봉일천리	0.38	‘03～’05	2,150	464	110	1,576	-	76
11			선고개천 개수공사	적성 객현리	1.53	‘03～’05	1,929	450	232	1,247	-	100
12			밥제천 개수공사	파평 덕천리	3.45	‘04～’06	3,410	300	-	3,110	-	71
13			새능천 개수공사	문산 선유리	1.74	‘04～’06	1,456	250	-	1,206	-	10
소계 2건					13.67		60,200		2,400	57,800
14	국가	신규	곡능천환경정비사업	검산동～ 조리 봉일천리	9.97	‘05～’07	41,400	-	1,400	40,000	-	-
15			문산천합류부개선사업	문산 당동리 ～문산 내포리	3.7	‘04～’07	18,800	-	1,000	17,800	-	-
소계 1건					3.0		92,000	400	1,000	90,600
16			초평도유황개선사업	문산 장산리	3.0	‘03～’08	92,000	400	1,000	90,600

3. 사태 대응력 배양을 위한 다양한 교육 실시

○ 각종 재난 발생에 따른 민방위대원, 청소년등에 대하여 실습위주의

훈련을 강화하여 민방위사태 대응능력 향상

□ 기본방향

○ 실생활에 도움이 되는 교양과목 집중 교육

○ 생활주변에서 일어날 수 있는 재난사고 대처요령 교육

○ 관내 중․고등학생을 대상으로 청소년 민방위교실 운영

○ 학교실정에 맞게 희망학교별 교육

□ 추진계획

○ 다양한 민방위교육 운영

․상, 하반기 민방위교육

․교육대상 : 7,600명

․교육과목 : 심폐소생술, 가스안전, 전기안전, 화생방등

․청소년 민방위 교실 운영

․교육대상 :  2,000여명 (관내 중․고등학교생)

․교육과목 : 기본소양교육, 응급처치요령, 화생방방호, 화재예방

□ 기대효과

○ 비상대비 역량 강화

○ 교양과목 집중교육으로 흥미를 갖게 하여 대원들의 성취동기 부여

○ 청소년에 대하여 『청소년 민방위 교실』 운영으로 생활주변에서               일어날 수 있는 재난사고 대처 및 응급조치 요령 습득기회 제공

4. 신속한 경보태세 확립

○ 민방공경보시설의 철저한 유지관리로  민방위 사태발생시

신속한 경보전파로 주민을 대피시키고 피해를 최소화

□ 기본방향

○ 신규담당자에 대한 장비조작요령 교육 (제2청 경보통제소)

○ 전문업체로 하여금 유지보수로 안정적인 경보시설운영

○ 경보시설 예비품을 확보하여 낙뇌등으로 인한 시설보호

□ 추진계획

○ 민방위경보시설 함체 교체 : 1개소 13백만원

○ 민방위경보시설 유지보수 용역 : 6개소 14백만원

○ 민방위경보시설 예비품 확보 : 인공위성 LNB외 5종 8백만원

○ 민방위 무선앰프 정비 : 12개소 6백만원

○ 신규 민방위 경보업무 담당자 교육 : 매월 첫째주 금요일

□ 기대효과

○ 민방위경보시설을 전문업체 용역관리로 장비고장을 사전 예방하여

안정적인 경보시설 유지

○ 철저한 경보시설 유지관리로 재난시 신속한 상황전파 체제 구축

【 도시개발사업소 분야】

1. 신도시 건설 및 택지개발 추진

○ 개발압력이 가중되는 교하지역에 계획적 친수환경 생태도시 건설

○ 국제화 웰빙단지, 도심형 대학, 복합문화 체험거리로 차별화된 자족도시 조성

ꊱ 파주운정신도시 건설(계속사업)

□ 사업개요

○ 위    치 : 교하읍 와동․야당․동패․목동․다율․상지석․당하리 일원

○ 면    적 : 9,408천㎡ (2,850천평)

○ 수용인구 : 46천세대 (125천명)

○ 사업기간 : 2003 ～ 2009

○ 사업시행자 : 파주시, 대한주택공사 (대한주택공사 자체자금)

(개발방향)

◦ 친수환경 생태도시 : 실개울로 이어지는 Blue Network,

기존 구릉지 보전하는 Green Network

◦ 복합문화 체험도시 : 다양한 성격의 문화공간(상업 + 문화 + 보행천국 + 이벤트거리)

◦ 수도권 서북부 거점도시 : 남북교류 공간 및 교역을 위한 배후지원도시

◦ 완결형 자족도시 : 주변산업단지와 연계한 특화단지 조성

□ 그간의 추진경위

○ 2001.  1.  4 : 운정1지구 택지개발예정지구 지정 고시

○ 2003.  5. 20 : 운정1지구 택지개발계획 승인 고시

○ 2003. 12. 13 : 운정2지구 택지개발예정지구 지정 고시

○ 2004.  5. 18 : 보상협의 착수(17,528억원 / 영업권 제외)

○ 2004. 12. 30 : 신도시지구지정 변경, 택지개발계획 및 1단계 실시계획 승인 고시

○ 2005.  1. 31 : 보상협의(90.5%) 추진(15,878억원)

□ 추진계획

○ 2005.  6.  : 제영향평가 본안 협의, 공사착공

○ 2005. 12.  : 신도시 통합 실시계획 승인, 최초 분양

○ 2008. 12.  : 최초입주

○ 2009. 12.  : 사업완료

□ 기대효과

○ 신도시내 자연환경을 고려한 Green Network, Blue Network 구축을

통한 친수환경 생태도시 조성으로 입주민 만족 고조

○ 주변 산업단지와 연계한 특화단지, 도심형 대학, 복합문화 체험거리

등으로 차별화된 자족 신도시를 건설함으로써 시민 삶의 질 향상

ꊲ 교하 택지개발사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 교하읍 문발․다율․동패리 일원

○ 면    적 : 2,043천㎡ (618천평) / 수용인구 : 10,414세대(32,284명)

○ 사업기간 : 2000.11 ～ 2006.12

○ 시 행 자 : 한국토지공사

○ 현 공 정 : 65%

□ 추진계획

○ 2005. 12.  : 1단계 입주(동문건설 : 3,053세대)

○ 2006. 12.  : 사업준공

□ 기대효과

○ 쾌적하고 여유로운 생활공간을 제공하여 도시의 새로운 이미지 창출

○ 사업준공후 도시기능 활성화와 도시의 건전한 발전을 도모

2. LCD Cluster 구축 및 인프라 확충

○ 접경지역에 첨단업종 외국인 투자기업 유치로 국내경기 활성화 도모

○ 지방산업(협력)단지 조성으로 세계 최고의 LCD산업 클러스터 구축

ꊱ 파주LCD지방산업단지(계속사업)

□ 사업개요

○ 위    치 : 파주시 월롱면 덕은리, 탄현면 금승리 일원

○ 면    적 : 1,695천㎡(513천평)

○ 사 업 비 : 790,460백만원

- 단지 조성비 : 307,600백만원(도 11,000, 시 11,000, 기타 285,600)

- 인프라 시설비 : 482,860백만원

(단위:백만원)

구 분	군도3호선	전력	도시가스	공업용수	폐수종말 처리시설
규 모	5.95km(4차선)	345kv	54천㎥/hr (L =28.7km)	222천톤/일	230천톤/일
사업비	70,367	75,000	14,600	148,800	174,093

○ 사업기간 : ‘03. 7. 31 ～ '07. 6. 30(기공 및 착공식 : ‘04. 3. 18)

○ 시 행 자 : 파주시, 경기지방공사 공동시행

○ 현 공 정 : 부지조성공사 59%(1단계부지공사 98%-140천평)

	건축개요 (1단계사업)
○ FAB동(P7) : 45.3%, U/T동 : 40%, 복합동 및 기타 : 53.2% ○ 기 숙 사 : 57%, 345K변전소 : 57.5% ○ 폐수종말처리장 : 57% 자체폐수처리장 : 45.7%

□ 그간의 추진경위

○ 2004.  1. 14 : 도시가스 파주수급기지 건설 및 배관공사 완료

○ 2004.  7.  7 : 폐수종말처리시설 우선시공분 계약 및 착공

○ 2004.  9.  6 : 공업용수 실시계획 승인

○ 2004. 10.  1 : 군도3호선 공사착공

□ 추진계획

○ 2005.  4.  : 단지내 도로 포장 추진

○ 2005.  6.  : 인프라시설(용수, 가스, 전력, 폐수종말처리시설) 공급

○ 2005.  6.  : LPL 1단계 시험가동

○ 2006.  1.  : TFT-LCD양산

○ 2007.  6.  : 산업단지 사업준공(2010년까지 단계별 공장건설)

□ 기대효과

○ 대규모 LCD관련 투자유입으로 지역경제 활성화 및 지역균형 개발

○ 세계적인 다국적기업 유치로 외국인 관광객 증가

○ 남북간 인적․물적 교류사업의 요충지로 공간 확보

ꊲ 문산첨단산업단지(계속사업)

□ 사업개요

○ 위    치 : 파주시 문산읍 당동리, 선유리 일원

○ 면    적

- 당동지구(외투기업) 640천㎡(194천평)

- 선유지구(국내기업) 1,313천㎡(397천평)

○ 입주업체수 : LCD관련 43여개 업체(당동 8, 선유 35)

○ 사 업 비 : 959,878백만원

- 단지  조성비 : 471,724백만원

(국 75,000 도 15,318 시 15,317 기타 366,089)

- 인프라 시설비 : 488,154백만원

(단위 : 백만원)

구 분	도 로	도시가스	공업용수	폐수종말 처리시설	비 고
규 모	3개노선 (L=3.7km)	6.8천㎥/hr (L=14km)	18천톤/일	15천톤/일
사업비	48,000	7,500	395,000	37,654

○ 사업기간 : 2004 ～ 2007

○ 시 행 자 : 파주시, 경기지방공사 공동시행

□ 그간의 추진경위

○ 2004.  6.  1 : 건축허가 제한고시

○ 2004.  7.  5 : 당동지구 군부대 협의완료(선유지구 7 / 16완료)

〈조건부동의〉

○ 2004.  8.  3 : 문산(당동, 선유)공람공고 완료보고(파주시 → 경기도)

○ 2004.  8. 31 : 도시기본계획 일부변경에 따른 공청회 개최

○ 2004. 10. 26 : 문화재 발굴(시굴) 허가(문화재청)

○ 2004. 11.  5 : 중앙도시계획위원회 심의(조건부) 의결(건교부)

○ 2004. 11. 15 : 문산첨단(당동, 선유)산업단지 지구지정 승인(경기도)

○ 2004. 12.  8 : 토지보상계획공고(당동지구 : ‘04. 12. 15)

○ 2004. 12. 28 : 지장물조사 완료

○ 2005.  1.  4 : 감정평가의뢰

□ 추진계획

○ 2005.  3.  3 : 손실보상 협의 요청

○ 2005.  4.  6 : 실시설계 승인(관련기관 협의 〈23개 기관〉) 및

수용재결 신청

○ 2005.  4. 30 : 영향평가 완료 및 실시계획 승인

○ 2005.  5. ～ 10. : 부지공사 착공 및 건축공사 추진

□ 기대효과

○ 협력단지 완공으로 약 10,000명의 직접 고용 창출과 간접적 고용효과 기대

○ 접경지역으로 낙후된 문산지역경제 활성화 기대

보 고 순 서
□	추진목표와 방향		----------				2 - 1
□	주요업무 추진계획
	【도시계획과 소관】
	○ 도시기본 및 관리계획 재수립			------------			2 - 4
	○ 장기미집행시설 보상추진			------------			2 - 5
	○ 군사시설보호구역 규제완화 추진			------------			2 - 5
	○ 민북․접경지역 개발사업 추진			------------			2 - 6
	【도시관리과 소관】
	○ 깨끗한 도시미관조성사업 추진			------------			2 - 7
	○ 주정차질서 확립			------------			2 - 8
	○ 군훈련도로 및 위험도로개량사업 추진				-------		2 - 9
	○ 편안하고 안전한 생활환경 조성			------------			2 - 10

	【건축과 소관】
	○ 내실있는 건축행정 구현	------------					2 - 11
	○ 쾌적하고 살고싶은 친환경 주거공간 확보					-----	2 - 12
	○ 더불어 함께 사는 주거문화 정착	------------					2 - 13
	【도로교통과 소관】
	○ 국도․지방도 도로사업 추진	------------					2 - 14
	○ 군도 등 각급 도로망 확충	------------					2 - 15
	○ 대중교통 체계 확충 추진	------------					2 - 18
	○ 교통사고 예방과 안전한 교통환경 조성			-------			2 - 19
	【재난안전관리과 소관】
	○ 재난 예방대책 지속 추진	------------					2 - 20
	○ 친환경적 자연형 치수사업 추진	------------					2 - 21
	○ 사태 대응력 배양을 위한 다양한 교육실시			-------			2 - 23
	○ 신속한 경보태세 확립			-------			2 - 24
	【도시개발사업소 소관】
	○ 신도시 건설 및 택지개발 추진	------------					2 - 25
	○ LCD Cluster 구축 및 인프라 확충		----------				2 - 27

도시건설국 소관