	추진목표와 방향

ꏚ 시설운영과 소관

○ 환경기초시설의 확충 및 보완으로 시민이 안심하고

생활할 수 있는 쾌적하고 깨끗한 환경 조성

○ 영세축산농가 폐수처리비 지원으로 축산폐수로 인한 하천

오염을 원천적으로 차단하여 수질오염 예방

ꏚ 상수도과 소관

○ 상수도시설 확충으로 안정적인 상수원공급과 보다 나은

양질의 맑은물 공급

○ 맑은물 공급사업 일환으로 관로정비 및 노후관 교체사업을 통해 유수율제고 및 안정적인 물공급

○ 상수․ 원수 및 수돗물에 대한 수질검사를 내실화하여 시민이 안심하게 마실수 있는 물공급

ꏚ 하수과 소관

○ 하수종말처리장 건설로 택지개발, 신도시 조성 등 도시   가속화에 따른 발생 오수를 완벽하게 처리하여 방류수질  개선

○ 오․우수관 분리 및 노후하수관 정비로 공공수역 수질보전과 쾌적한 환경조성

○ 하수도사용료 부과 징수로 하수도사업 건전한 재정운영 및 주민만족 하수행정서비스 제공

4 -

주요업무 추진계획

【 시설운영과 소관 】

1. 환경의 사전예방적 기능 강화

○ 환경기초시설의 확충․개선 및 효율적 운영을 통해 예산절감 및친환경 생태도시의 기틀을 마련하고

○ 사후적․단발적․일방적인 아닌 사전적․계속적․쌍방적인 의사결정을 통한 시민참여형 환경행정 구현

ꊱ 음식물 쓰레기 처리시설 확충(비전 2006)

◯ 사업개요

- 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-4번지 일원

- 사 업 량 : 80톤/일

- 사업기간 : 2004. 2 ～ 2007. 6

- 사 업 비 : 7,200백만원(국비 2,160 도비 2,520 시비 2,520)

◯ 추진계획

- 2005. 03 : 기본 및 실시설계용역 착수

- 2005. 07 : 기본 및 실시설계용역 완료 및 공사발주

- 2005. 10 : 공사착공

- 2007. 06 : 종합시운전완료 및 공사준공

◯ 기대효과

- 인구증가 추이에 따른 음식물 쓰레기 발생량을 적기 처리하여 쾌적한 생활주거공간 조성

ꊲ 문산첨단산업단지 폐수종말처리시설 설치(신규사업)

◯ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 선유지구내

- 사 업 량 : 15,000㎥/일(1단계 : 5,000㎥/일)

- 사업기간 : 2005. 7 ～ 2007. 12

- 사 업 비 : 37,654백만원(국비)

◯ 추진계획

- 2005. 04 : 기본계획 입찰안내서 승인

- 2005. 05 : 설계시공 입찰 공고

- 2005. 09 : 설계시공

- 2005. 11 : 공사착공(Fast Track 적용)

- 2006. 10 : 초기 1단계(5,000㎥/일) 시운전개시

- 2007. 12 : 폐수종말처리시설 2단계(10,000㎥/일) 준공

- 2010. 이후 : 폐수종말처리시설 3단계(15,000㎥/일) 준공

◯ 기대효과

- 문산첨단산업단지내에서 발생하는 오․폐수를 공동처리후 방류하여 공공수역의 수질오염방지와 쾌적한 생활환경 조성

ꊳ 파주 LCD 산업단지 폐수종말처리시설 위탁운영

◯ 사업개요

- 위    치 : 월롱면 덕은리 / 탄현면 금승리 일원

- 부지면적 : 79,270㎥(약 24,021평)

- 처리공법 : Bio-Sac공법(유동성 생물막법)

- 처리용량 : 230,000㎥/일(1단계 : 70,000㎥/일)

- 사업기간 : 2004. 7. ～ 2006.(1단계)

- 사 업 비 : 174,000백만원(1단계 : 53,313백만원)

◯ 추진계획

- ‘05. 3. : 민간위탁동의안 의회제출

- ‘05. 4. : 운영 및 비용부담 관련 조례 및 시행규칙 제정

◯ 기대효과

- 민간에 위탁하여 비용절감 및 효율성 증대 도모

ꊴ 분뇨처리시설 증설(계속사업)

◯ 사업개요

- 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-1번지 일원

- 사 업 량 : 80톤/일

- 사업기간 : 2004. 2 ～ 2005. 7

- 사 업 비 : 7,284백만원(양여금 6,475 도비 404 시비 405)

◯ 추진계획

- 2005. 02 : 토목, 건축 및 기계공사 완료

- 2005.  3 : 시운전 착수

- 2005. 07 : 공사준공 및 가동

◯ 기대효과

- 분뇨의 적정처리를 통한 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

ꊵ 위생처리장 악취저감 차폐수목 식재보완사업(계속사업)

◯ 사업개요

- 위    치 : 위생처리장내(분뇨처리/축산폐수/음식물쓰레기처리시설)

- 사 업 량 : 악취제거 차페수목 식재 1식

- 사업기간 : 2005. 1 ～ 2005. 12

- 사 업 비 : 63백만원(시비 63)

◯ 추진계획

- 2005. 02 : 차폐수목 설계완료 및 공사발주

- 2005.  3 : 식재 착공

- 2005. 04 : 식재 준공

◯ 기대효과

- 위생처리장 주변 지역민의 악취로 인한 생활불편 해소

2. 수질환경보전 추진으로 하천오염 예방

○ 영세한 소규모 축산농가에 축산페수처리비 및 운반비를 지원하여 무단방류로 인한 하천오염을 예방

ꊱ 영세축산농가 축산폐수처리비 지원사업(보조사업)

◯ 사업개요

- 사 업 량 : 파주시 관내 신고대상이하 축산농가 906개소

- 사업기간 : 2005. 1 ～ 2005. 12

- 사 업 비 : 352.8백만원(도비 176.4 시비 176.4)

◯ 추진계획

- 2005. 1 : 지원대상 축산농가 지정(신규․변경)

- 2005. 5 : 지원대상 축산농가 지도․점검 실시

※ 매분기별 축산농가에 축산폐수처리 및 운반비 지원

◯ 기대효과

- 축산폐수의 무단방류로 인한 하천오염예방 및 수질환경보전

3. 성숙된 공중화장실 문화 조성

○ 시민들의 공중화장실 이용에 따른 불편 해소 등 국제화 시대에 걸맞는 깨끗하고 쾌적한 공중화장실 제공

ꊱ 모범화장실 지원사업(보조사업)

○ 사업개요

- 사 업 량 : 20개소

- 사업기간 : 2005. 1. ～ 2005. 12.

- 사 업 비 : 32.4백만원(도비 16.2 시비 16.2)

○ 기대효과

- 선정된 모범화장실에 대하여 각종 지원을 함으로써 우리시 공중

화장실 문화 개선을 적극적으로 유도

ꊲ 아름다운 화장실 조성사업(보조사업)

○ 사업개요

- 사 업 량 : 3개소(신축 2개소, 개보수 1개소)

- 사업기간 : 2005. 1. ～ 2005. 12.

- 사 업 비 : 270백만원(국비 135 시비 135)

○ 기대효과

- 다중 공중화장실에 대한 지원 및 개보수 등 지속적 관리를 통하여 시민들의 공중화장실 사용에 따른 불편 해소

【 상수도과 소관 】

1. 급수시설 확장

상수도 관로 확장으로 상수도 공급 확대 및 양질의 수돗물 공급

ꊱ 파주상수도 2단계 확장사업(계속사업)

○ 사업개요

- 사 업 량 : 배수관로(L=10.577㎞), 배수지1개소 (68,000톤/일)

- 사업기간 : 2000. 2. ～ 2005. 12.

- 사 업 비 : 27,098백만원(도 2,599, 시 24,499)

○ 추진계획

- 2005.  4 : 공사착공

- 2005. 12 : 공사준공

○ 기대효과

- 광역상수도를 수수하여 도시개발에 따른 물부족을 해소

ꊲ 파주상수도 3단계 확장사업(계속사업)

○ 사업개요

- 사 업 량 : 배수관로(L=16.4㎞), 배수지1개소(60,900톤/일)

- 사업기간 : 2004. 2. ～ 2008. 12.

- 사 업 비 : 24,640백만원(도 4,928, 시 19,712)

○ 추진계획

- 2005.  3 : 실시설계 용역

- 2005.  6 : 수도사업인가 신청

- 2006.  3 : 공사착공

- 2008. 12 : 공사준공

○ 기대효과

- 상수도시설 확충으로 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 시민의삶의 질 향상

ꊳ 농어촌 지방상수도 및 상수도 확장공사(신규사업)

○ 사업개요

- 사 업 량 : 23개소 L=54.11㎞

- 사업기간 : 2005. 1. ～ 2005. 11.

- 사 업 비 : 7,159백만원 (국 1,300, 도 1,500  시4,359)

○ 추진계획

- 2005.  4 : 설계완료

- 2005.  8 : 공사착공

- 2005. 11 : 공사준공

○ 기대효과

- 수질오염과 수량부족으로 기초적 생활여건이 열악한 군부대 및 지역주민에게 수돗물을 공급하여 보건향상과 기초생활여건을 개선

2. 안전한 맑은물 공급

상수도 관로 정비 및 노후 수도관 교체 등으로 유수율 제고 및 누수

사고를 예방하여 안전하고 깨끗한 양질의 수돗물 공급

ꊱ 노후관 교체 사업

○ 사업개요

- 사 업 량 : 총 3개소

- 사업기간 : 2005. 1 ～ 2005. 8

- 사 업 비 : 1,000백만원(도300 시700)

○ 추진계획

- 2005.  3 : 실시설계 용역완료

- 2005.  4 : 공사착공

- 2005.  8 : 공사준공

○ 기대효과

- 노후화된 상수도관을 교체하여 수돗물 누수예방 및 유수율 증대

ꊲ 간이상수도 정비사업

○ 사업개요

- 사 업 량 : 총 12개소

- 사업기간 : 2005. 1 ～ 2005. 8

- 사 업 비 : 950백만원

○ 추진계획

- 2005.  3 : 실시설계 용역완료

- 2005.  4 : 공사착공

- 2005.  8 : 공사준공

○ 기대효과

- 지역주민에게 보다 맑고 깨끗한 수돗물 공급

3. 수질관리와 물 절약 실천운동 전개

○ 물 부족 국가를 인식시켜 물의 소중함과 중요성을 널리 알려

물 수급의 불균형을 사전에 예방하고 효율적인 물관리 대책 추진

○ 시민이 안심하고 마실 수 있는 양질의 물 공급

ꊱ 수질관리 강화

○ 사업개요

- 사 업 비 : 313백만원 (시 313)

- 사업기간 : 2005. 1. ～ 2005. 12.

○ 기대효과

- 최신장비를 이용한 수질검사를 실시하여 먹는물의 안정성 확보

ꊲ 물 학교 현장학습실시

○ 사업개요

- 교육대상 : 관내 초․중․고등학생

- 교육장소 : 문산정수장

- 교육방법 : 물에 대한 강의 및 현장학습 실시

○ 추진계획

- 2005. 2. : 물 학교 운영계획 수립 및 물학교 교재 제작

- 2005. 3. ～ 12. : 물 학교 현장학습 실시

○ 기대효과

- 물에 대한 소중함을 일깨우고 아껴쓰는 마음 함양

【 하수도과 소관 】

1. 하수종말처리장 조기준공

○ 하수종말처리시설 조기 준공으로 택지개발, 신도시 조성 등 도시

개발 가속화에 따른 발생 오수를 완벽하게 처리하여 공공수역의  방류수질 개선

○ 방류수역 수질오염 방지를 통한 생태계 보호

ꊱ 금촌하수종말처리장 사업(계속사업)

○ 사업개요

- 위    치 : 금촌동 714번지 일원

- 사 업 량 : 시설용량 27,000톤/일, 차집관로 10.45㎞

- 사 업 비 : 33,181백만원(국 15,338, 도 8,192, 민자 5,549, 원인자 4,102)

- 사업기간 : 1996. 11. ～ 2005. 3.

○ 추진실적

- 2000. 10. 23 : 민간투자사업 공고

- 2002.  3. 14 : 민간투자시설사업기본계획 고시

- 2003.  3.  6 : 실시계획 승인 및 공사착공

- 2004.  9.  6 : 시운전 개시(무부하 1개월 포함 6개월간 시운전 가동)

- 2004. 11.  3 : 사용개시 공고

○ 추진계획

- 2005.  3.  5 : 공사준공

○ 기대효과

- 금촌, 봉일천 기존 시가지 및 금촌1․2택지 개발지구 발생 하수처리를

통한 금촌천 및 곡릉천 수질개선

ꊲ 문산하수종말처리장 사업(계속사업)

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 당동리 129-1외 3개소

- 사 업 량 : 시설용량 17,000톤/일, 차집관로 17.43㎞(문산외 3개소)

(문산 7,500, 파주 4,500, 법원 3,000, 광탄 2,000)

- 사 업 비 : 43,528백만원(국 24,061 도 9,734 시 178 민투 9,555)

- 사업기간 : 1999. 12. ～ 2007. 5.

○ 추진실적

- 2004.  5. 15 : 실시계획 승인

- 2004.  5. 25 : 법원, 광탄처리장 공사착공

- 2004. 11. 13 : 파주처리장 공사착공

○ 추진계획

- 2005.  2    : 문산처리장 사업착수

- 2005. 12    : 법원, 파주처리장 차집관로 시공완료(L=10㎞)

- 2006.  6    : 처리장 구조물시공 완료

- 2007.  5    : 공사준공

○ 기대효과

- 문산, 파주, 법원, 광탄 시가지의 발생하수 처리를 통하여 방류수역인

임진강, 문산천, 갈곡천, 분수천의 수질개선

ꊳ 통일동산하수종말처리장 사업(계속사업)

○ 사업개요

- 위    치 : 탄현면 법흥리 1298번지 일원

- 사 업 량 : 시설용량 16,000톤/일, 차집관로 5.02㎞

- 사 업 비 : 31,690백만원(국 4,106, 원인자 27,584)

- 사업기간 : 1996. 11. ～ 2005. 12.

○ 추진실적

- 2002. 12. 18 : 사업인가(환경부)

- 2003.  2.  7 : 공사착공

- 2003. 10.  4 : 공사중지(문화재현상변경 허가시까지 중지)

- 2004.  5. 10 : 문화재현상변경허가

※ 방류구 및 저류지 설치에 대하여 문화재위원회 검토를 받아 시행하는 조건

- 2004.  5. 17 : 공사 재착공

- 2004.  6.  7 : 공사중지 통보(현상변경 허가조건 불이행)

- 2004.  8. 25 : 문화재위원회 검토완료(방류구 및 저류지 설치)

- 2004.  8. 30 : 현상변경 조건부 허가사항 변경허가(문화재청)

- 2004.  9.  3 : 공사 재착공

○ 추진계획

- 2005. 10    : 종합시운전 개시

- 2005. 12    : 하수처리장 사용개시 공고

- 2006.  3    : 공사준공

○ 기대효과

- 통일동산 조성사업지구, 파주출판문화 정보산업단지, 교하택지개발지구의 발생하수 처리를 통하여 방류수역인 곡릉천 및 한강하류 수질개선

2. 하수처리 효율증대 및 수질개선

○ 공공수역의 수질보전을 위한 오․우수관 분리 및 노후하수관 정비

○ 하수관거에서 발생하는 침입수, 유입수 및 누수량 저감

ꊱ 금촌하수관거 정비사업(계속사업)

○ 사업개요

- 위    치 : 금촌동, 조리읍 봉일천리 일원

- 사 업 량 : L=61㎞

- 사업기간 : 2004 ～ 2008

- 총사업비 : 59,000백만원(국 35,400, 시23,600)

(단위 : ㎞/백만원)

년도별 투자계획
구분	계	2004년	2005년	2006년	2007년이후
사업량	61	용역1식	6	19	36
사업비	59,000	3,600	5,571	18,000	31,829

○ 그간 추진실적

- 2003.  5 : 하수관거 타당성 조사용역 완료

- 2004.  2 : 대형공사 입찰방식 심의

- 2004.  7 : 기본계획 용역착공

- 2004. 12 : 기본계획 용역준공

- 2005.  1 : 위 수탁협약 체결(환경관리공단)

- 2005.  2 : 설계시공 입찰공고

○ 추진계획

- 2005.  7 : 설계시공 적격자 선정

- 2005. 10 : 실시설계 완료 및 공사착공

- 2008. 12 : 공사완료 예정

ꊲ 문산하수관거 정비사업(계속사업)

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 문산리 일원

- 사 업 량 : L=8㎞

- 사업기간 : 2005 ～ 2007

- 총사업비 : 6,958백만원(국 4,174  시 2,784)

(단위 : ㎞/백만원)

년도별 투자계획
구분	계	2005년	2006년	2007년이후
사업량	8	용역1식	5	3
사업비	6,958	578	3,600	2,780

○ 추진계획

- 2005.  1 : 기본계획용역 추진수립

- 2005.  4 : 기본계획용역 착수

- 2005.  9 : 용역준공

- 2006.  4 : 공사착공

- 2007. 12 : 공사준공 예정

○ 기대효과

- 침입수/유입수 저감으로 하수처리장 효율적 운영

- 지하수오염 및 토양오염방지로 환경보전

ꊳ 노후하수관 정비사업(단위사업)

○ 사업개요

- 대    상 : 문산읍 선유리외 13개소

- 사 업 량 : L=4.4㎞

- 사업기간 : 2005. 1. ～ 2005. 12.

- 총사업비 : 3,000백만원(도 1,500 시 1,500)

○ 추진계획

- 2005.  2 : 실시설계용역 착수

- 2005.  4 : 실시설계용역 준공 및 공사착공

- 2005. 12 : 공사완료 예정

○ 기대효과

- 노후관정비로 수해예방

- 악취방지로 쾌적한 주거환경 조성

3. 하수도사용료 부과지역 확대 추진

○ 하수처리장설치, 하수관거정비사업 완료, 하수도대장 작성 등 하수도

사용료 부과여건을 조성하여 대상지역 확대추진

○ 하수도사용료의 건전한 재정운영으로 주민만족 하수행정서비스 제공

ꊱ 하수도 사용료 징수사업

○ 현    황

- 징수대상 : 12,646전

▪ 가정용 8,882 / 업무용 1,685 / 영업용 2,050 / 목욕탕용 29

- 하수발생량 : 11,468,880톤 / 년 (월 955,740톤)

- 하수도사용료 : 2,748백만원 / 년 (229백만원 / 월)

○ 추진실적

- 2004. 03월 하수도사용료 최초 부과․징수

- 부과지역 : 9개 읍면동 16개리

○ 추진계획

- 부과 대상지역 확대 : 10개 읍면동 15개리

▪ 문산읍 당동리, 파주읍 봉암리․백석리, 법원읍 가야리, 교하읍

교하리․야당리․ 상지석리․통일동산, 월롱면 덕은리․영태리,

조리읍 대원리, 탄현면 축현리․갈현리, 파평면 장파리․금파리,

검산동, 금능동

- 하수도대장 작성용역 : 2005. 3～8월

- 하수도사용 개시공고 : 2005. 9월

○ 기대효과

- 지역별 형평성 제고를 통한 하수사업의 경영합리화 및 건전재정           운영으로 주민만족 하수행정 구현

보 고 순 서
□	추진목표와 방향		----------				4 - 1
□	주요업무 추진계획
	○ 환경의 사전예방적 기능 강화			-----------			4 - 2
	○ 수질환경보전 추진으로 하천오염예방				-------		4 - 6
	○ 성숙된 공중화장실 문화 조성			-----------			4 - 7
	○ 급수시설 확장			-----------			4 - 8
	○ 안전한 맑은물 공급			-----------			4 - 10
	○ 수질관리와 물 절약 실천운동 전개					------	4 - 11
	○ 하수종말처리장 조기준공			-----------			4 - 12
	○ 하수처리 효율증대 및 수질개선			-----------			4 - 15
	○ 하수도사용료 부과지역 확대추진			-----------			4 - 18

수도환경사업소 소관