2005 행정사무감사

도시산업위원회

2005 주요업무 추진상황

수도환경사업소

목         차

【시설운영과 소관】
Ⅰ. 기본현황
1. 인력현황	-----------------------------------
2. 분장사무	-----------------------------------
Ⅱ. 2005 주요업무 추진실적
1. 환경기초시설 설치사업		-------------------------
2. 폐수종말처리시설 설치사업			-----------------------
3. 수질 환경보전 추진		-------------------------
4. 환경기초시설 위탁관리		-------------------------

【상수도과 소관】
Ⅰ. 기본현황
1. 인력현황	-----------------------------------
2. 분장사무	-----------------------------------
Ⅱ. 2005 주요업무 추진실적
1. 맑은물 공급대책 사업				-------------------------
【하수도과 소관】
Ⅰ. 기본현황
1. 인력현황		----------------------------------
2. 분장사무		----------------------------------
Ⅱ. 2005 주요업무 추진실적
1. 하수관거 정비사업			---------------------------
2. 노후하수관 개량사업			---------------------------
3. 하수처리장 건설			---------------------------

【 시설운영과 소관 】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황                                 (단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
18	17	1	1	1	1	4	4	5	3	5	6	2	2

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
시설운영담당	▪ 예산 및 회계 ▪ 보안 및 문서관리 등 일반서무 ▪ 공사,용역,물품제작 등 구입에 관한 사항 ▪ 입찰진행 및 계약체결에 관한 사항
환경시설담당	▪ 환경기초시설 주변지역 지원사업 추진 ▪ 환경기초시설 관리 및 기술업무 지도점검 ▪ 시설개선 및 보완 유지관리
오수관리담당	▪ 오수분뇨 및 축산폐수처리 기본계획 수립 ▪ 오수분뇨 및 축산폐수처리관련 신고허가 민원 ▪ 분뇨관련 영업허가 민원 ▪ 공중화장실 설치 및 관리
폐수처리담당	▪ 폐수종말처리시설 설치 및 운영 ▪ 폐수종말처리시설 시설물 관리 및 점검 ▪ 갈수기 하천수질오염 예방 및 감시

Ⅱ. 2005 주요업무 추진실적

1. 환경기초시설 설치사업

□ 음식물 쓰레기처리시설 확충사업

○ 위    치 : 파주시 파주읍 봉암리 1002-4번지 일원

○ 처리용량 : 음식물 쓰레기 80톤/일

○ 사 업 비 : 7,200백만원(국비 2,160, 도비 2,520, 시비 2,520)

○ 사업기간 : 2004. 4. ～ 2007. 12.

○ 추진현황

▪ ‘05.  1. 27 : 사업지 위치 선정

▪ ‘05.  5. 11 : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 분뇨처리시설 증설사업

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-1 일원

○ 처리용량 : 80톤/일

○ 사 업 비 : 8,631백만원(양여금 6,475, 도비 1,616, 시비 540)

○ 사업기간 : 2002. 1 ～ 2005. 10.

○ 추진현황

▪ ‘05.  3.  9 : 사업비 부족으로 공사중지

▪ ‘05.  5. 16 : 공사재착공

▪ ‘05.  6.  1 : 시운전 개시

※ 현재공정 95%

□ 분뇨처리시설 개선 및 보완사업

○ 사업대상 : 기존처리시설 140톤/일(60톤/일+80톤/일)

○ 사업내용 : 시설(140톤/일) 개선보완 1식

○ 사 업 비 : 195백만원(국비 156, 도비 19.5, 시비 19.5)

○ 사업기간 : 2005. 1. ～ 2005. 12.

○ 추진현황

▪ ‘05.  3. 23 : 설계용역 착수

□ 축산폐수처리시설 개선 및 보완사업

○ 사업대상 : 기존처리시설 200톤/일

○ 사 업 량 : 시설(200톤/일)개선 보완 1식

○ 사 업 비 : 1,550백만원(국비 1,240, 도비 155, 시비 155)

○ 사업기간 : 2005. 1 ～ 2005. 12

○ 추진현황

▪ ‘05.   3. 23 : 설계용역 착수

2. 폐수종말처리시설 설치사업

□ 파주LCD지방산업단지 폐수종말처리시설 설치사업(1단계)

○ 위    치 : 파주시 월롱면 덕은리 파주LCD지방산업단지내

○ 사 업 량 : 70,000톤/일

○ 사 업 비 : 53,313백만원(국비 100%)

○ 사업기간 : 2004. 1. ～ 2006. 6.

○ 추진현황

▪  ‘05.  6.  1 : 1단계 1계열(35,000톤/일) 시운전 개시

□ 문산첨단지방산업단지 폐수종말처리시설 설치사업

○ 위    치 : 파주시 문산읍 선유리 문산첨단지방산업단지내 선유지구내

○ 사 업 량 : 15,000톤/일

○ 사 업 비 : 37,654백만원(국비 100%)

○ 추진현황

▪  ‘05.  1. 21 : 사업시행업무 위․수탁협약 체결(환경관리공단)

▪  ‘05.  2. 22 : 대형공사 입찰방법 심의완료(T/K)

▪  ‘05.  5. 20 : 환경영향평가 협의 완료

3. 수질 환경보전 추진

□ 축산폐수 수집․운반 및 처리비 지원

○ 사업예산 : 352.8백만원(도비 176.4, 시비 176.4)

○ 지원대상 : 신고대상 규모이하의 축산농가로 축산폐수공공처리시설에 유입처리 하는 농가

○ 2005년도 지원실적

▪  수집․운반처리량 : 19,667.75㎘(2005. 1. 1 ～ 5.31기준)

▪ 지원금액 : 177,009천원(2005. 5월말 기준)

- 수집․운반비(6개업소) : 137,674천원

- 시설사용료(시설관리공단) : 39,335천원

※ 지원기준

-  신고대상 : 9원/ℓ(운반비:7원, 처리비:2원)

- 신고미만 : 7원/ℓ(운반비:7원, 처리비:없음)

- 지원방법

- 수집․운반비 : 수거실적에 따라 축산폐수 수집․운반 허가 업체에

지급(6개업소)

- 시설사용료(처리비) : 시설관리공단으로 지급(신고미만 제외)

4. 환경기초시설 위탁관리

□ 분뇨처리시설

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1040-1번지 일원

○ 처리용량 : 140㎘/일(60㎘/일+80㎘/일)

○ 위 탁 비 : 841,368천원

○ 수 탁 자 : 파주시시설관리공단

□ 음식물쓰레기 혐기성퇴비화시설

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1039-4번지 일원

○ 처리용량 : 30톤/일(혐기성)

○ 위 탁 비 : 477,788천원

○ 수 탁 자 : 한라산업개발(주) (2005. 1. 1 ～ 2005. 5. 31)

.  시설관리공단 (2005. 6. 1 ～ 현재)

□ 축산폐수공공처리시설

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1003-2

○ 처리용량 : 200톤/일

○ 사 업 비 : 1,213,756천원

○ 수 탁 자 : 파주시시설관리공단

□ 환경관리센터

○ 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

○ 처리용량 : 소각장 100톤/일×2기, 매립장1식(매립용량 378,320㎥)

○ 위 탁 비 : 3,894,991천원

○ 수 탁 자 : 코오롱건설(주)

□ 재활용선별장

○ 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

○ 처리용량 : 50톤/일

○ 위 탁 비 : 792,469천원

○ 수 탁 자 : 코오롱건설(주)

□ 스포츠센터

○ 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

○ 시설내역 : 수영장, 헬스, 에어로빅, 스쿼시, 선수용 숙소, 강당

○ 위 탁 비 : 740,054천원

○ 수 탁 자 : 코오롱스포렉스(주)

【 상수도과 소관 】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황                                 (단위 : 명)

계		5급		6급		7급		8～9급		연구직		기능직		상용직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
70	66	1	1	5	5	7	7	12	8	1	1	15	15	29	29

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
수도행정 담 당	▪ 상수도 특별회계 예산운영 ▪ 급수공사 대행업소 지정 및 인가 ▪ 토지․건물 등 재산 및 물품관리 ▪ 결산 및 경영분석
수도요금 담 당	▪ 상수도사용료 및 각종 세입의 부과징수 ▪ 수도계량기 검침 및 요금고지 ▪ 요금전산관리 및 각종요금 민원신고처리 ▪ 부정수도 관리
급수담당	▪ 누수방지 및 비상급수대책 ▪ 노후관 및 불량 수도관 교체 ▪ 간이상수도시설 설치 및 유지관리 ▪ 지하수 인․허가 및 관리
수도시설 담 당	▪ 상수도시설 증설 및 확장공사 ▪ 고도정수처리시설 사업 ▪ 농어촌 지방 상수도 사업 ▪ 상수원보호구역 지정 및 관리 ▪ 상수원보호구역 주민지원사업
정수장관리 담 당	▪ 원․정수 수질검사 분석 및 관리 ▪ 취․정수 시설운영관리(전기, 기계시설) ▪ 정수 약품관리 및 품질관리

Ⅱ. 2005 주요업무 추진실적

1. 맑은물 공급대책 사업

□ 상수도 2단계 확장사업

○ 위    치 : 파주시 일원

○ 사 업 량 : 배수관로 10.577㎞, 교하배수지(Q=98천㎥/일) 1개소

○ 사 업 비 : 27,098백만원(도비 2,599, 시비 24,499)

▪  기 투 자 :  4,783백만원(도비 956, 시비 3,827)

▪  향후투자 : 22,315백만원

○ 사업기간 : 2003. 3. ～ 2006. 8.

○ 추진현황

▪   ‘05.  4. : 배수관로 준공(공정율 60%)

▪   ‘05.  4. : 군부대협의 변경(표고 64.5→75m 증10.5)

□ 상수도 3단계 확장사업

○ 위    치 : 파주시 일원

○ 사 업 량 : 배수관로 16.4㎞, 월롱배수지 1개소(Q=60.9천㎥/일)

○ 사 업 비 : 24,640백만원(도비 4,928, 시비 19,712)

▪  확 보 액 : 3,695백만원(도비 553, 시비 3,142)

▪  향후투자 : 20,945백만원

○ 사업기간 : 2004. 7. ～ 2008. 12.

○ 추진현황

▪  ‘05.  4. :  설계용역 사업수행평가서 제출안내공고(PQ)

▪  ‘05.  5. :  설계용역 착수

□ 고도정수처리시설 설치사업

○ 위    치 : 문산읍 선유리 산100-2번지 일원

○ 사 업 량 : 시설용량 96천㎥/일

○ 사 업 비 : 18,281백만원(국비 8,690, 도비 4,345, 시비 5,246)

∙ 확 보 액 : 12,727백만원(국비 5,913, 도비 2,957 시비 3,857)

∙ 향후투자 :  5,554백만원

○ 사업기간 : 1996. 3. ～ 2007. 12.

○ 추진현황

∙ ‘05.  4. : 수도사업인가 보완신청(환경부)

□ 상수원 보호구역 주민지원사업

○ 위    치 : 파주시 장파리, 금파리, 자장리 일원

○ 사 업 량 : 9개사업(소득증대 4개, 복지증진 5개사업)

○ 사업기간 : 2005. 3. ～ 2005. 12.

○ 사 업 비 : 538백만원(국비 161, 시비 377)

○ 추진현황

∙ ‘05.  4.  4 : 상수원보호구역 주민지원사업 변경승인

(4개 → 9개사업)

∙ ‘05.  6.  9 : 상수원 보호구역 주민지원사업 재배정

□ 간이상수도 정비사업

○ 위    치 : 파주시 일원

○ 사 업 량 : 노후관개량 6.45㎞, 물탱크 7개소 및 관정개발 4개소

○ 사 업 비 : 950백만원(도비 135, 시비 815)

○ 사업기간 : 2005. 5. ～ 2005. 11.

○ 추진상황

∙ ‘05.  4.  4. : 용역설계 착수

∙ ‘05.  6. 10. : 공사착공

□ 노후관 교체사업

○ 위    치 : 파주시 일원(5개소)

○ 사 업 량 : L = 9㎞(배수관로)

○ 사 업 비 : 1,720백만원(도비 516, 시비 1,204)

○ 사업기간 : 2005. 4. ～ 2005. 10.

○ 추진현황

∙ ‘05.  4.  4 : 설계용역 완료

∙ ‘05.  5. 30 : 일상감사 완료 및 공사착공

【 하수도과 소관 】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
11	11	1	0	3	4	2	2	4	4	1	1

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
하수행정담당	▪ 하수도사용료 검침, 부과, 징수관리 ▪ 배수설비공사 대행업자 지정․관리
하수관리담당	▪ 하수관거 유지관리 ▪ 배수설비설치신고․준공 ▪ 마을하수도 유지관리 ▪ 하수처리장 유지관리 ▪ 하수관거 정비사업(설계, 감독) ▪ 마을하수도 및 하수관거 인허가 및 사업시행 승인 ▪ 중계펌프장 유지관리 ▪ 하수처리장, 마을하수도 민간위탁에 관한사항
하수시설담당	▪ 하수도정비 기본계획 수립 ▪ 하수처리장 건설 ▪ 마을하수도 건설 ▪ 하수처리장 인허가 및 사업시행 승인

Ⅱ. 2005 주요업무 추진실적

1. 하수관거정비 사업

□ 금촌 하수관거 정비사업

○ 위    치 : 금촌 하수처리구역(금촌동, 조리읍 봉일천리, 대원리) 일원

○ 사 업 량 : L=63㎞(신설 51㎞ 개보수 12㎞)

○ 사 업 비 : 59,000백만원(국비 35,400, 시비 23,600)

○ 사업기간 : 2004. ～ 2008.

○ 추진현황

▪ ‘04.  7.  5 : 기본계획 및 입찰안내서 작성용역 착수

▪ ‘04. 12. 27 : 기본계획용역 준공

▪ ‘05.  1. 26 : 위․수탁 협약체결(환경관리공단)

□ 문산권역 하수관거 정비사업

○ 위    치 : 문산읍, 파주읍, 법원읍, 광탄면 하수처리구역

○ 사 업 량 : L=208㎞(신설 189㎞ 교체 2㎞ 개보수 17㎞)

○ 사 업 비 : 124,248백만원

○ 사업기간 : 2005. ～ 2010.

○ 추진현황

▪ ‘03. 5. 29 : 타당성조사 용역완료

▪ ‘05. 6. 15 : 위․수탁 협약체결(환경관리공단)

2. 노후하수관 개량사업

○ 위    치 : 문산읍 선유리외 13개소

○ 사 업 량 : L=4,395m

○ 사업기간 : 2005. 1. ～ 2005. 12.

○ 사 업 비 : 3,000백만원(도비 1,500, 시비 1,500)

연번	사 업 명	사업량(m)	사업비 (백만원)	사업기간	공정율 (%)
계	14개소	4,395	3,000		58
1	선유1리 노후하수관	115	257	05. 6. 15 05. 8. 13	10
2	선유6리 노후하수관	336	116	05. 5. 30 05. 7. 28	10
3	가야1리 노후하수관	198	124	05. 5. 25 05. 7. 23	100
4	상지석4리 노후하수관	227	170	05. 5. 27 05. 7. 25	80
5	위전1리 노후하수관	248	211	05. 6. 10 05. 8. 08	10
6	어유지2리 노후하수관	134	123	05. 5. 09 05. 7. 08	100
7	검산동 노후하수관	165	611	05. 6. 14 05. 8. 12	10
8	금촌동(새말)노후하수관	1,132	951	05. 6. 15 05.12. 11	20
9	임진리외3 노후하수관	1,278	199	05. 6. 13 05. 9. 10	10
10	맥금동외 1개소 노후하수관	125	23	05. 6. 09 05. 7. 23	100
11	축현2리 노후하수관	88	50	05. 5. 24 05. 7. 22	80
12	동문2리 노후하수관	142	88	05. 5. 03 05. 7. 01	100
13	대능5리 노후하수관	72	37	05. 6. 06 05. 8. 04	100
14	문산1리 노후하수관	135	40	05. 6. 01 05. 7. 30	80

○ 추진현황

3. 하수처리장 건설

□ 통일동산 하수처리장

○ 위    치 : 탄현면 법흥리 1298번지 일원

○ 사 업 량 : 시설용량 16,000톤/일, 차집관로 5.02㎞

○ 사 업 비 : 31,690백만원(국비 4,106, 원인자부담금 27,584)

○ 사업기간 : 2003. 2. ～ 2006. 5.

○ 추진현황

▪ ‘03.  2.  7 : 공사착공

▪ ‘03. 10.  4 : 1차 공사중지(문화재현상변경허가 미이행)

▪ ‘04.  5. 17 : 공사 재착공(조건부허가)

▪ ‘04.  6.  7 : 2차 공사중지(허가조건 불이행)

▪ ‘04.  8. 30 : 문화재현상변경 조건부 허가사항 변경허가

▪ ‘04.  9.  3 : 공사 재착공

▪ ‘05.  4. 25 : 문화재현상변경 허가사항 변경허가

※ 현재공정 : 53%

□ 문산 하수처리장

○ 위    치 : 문산읍 당동리 129-1번지 일원 외 3개소

○ 사 업 량 : 시설용량 17,000톤/일, 차집관로 17.44㎞

- 문산(7,500톤), 파주(4,500톤), 법원(3,000톤), 광탄(2,000톤)

○ 사 업 비 : 43,528백만원(국비 24,061, 도비 9,734, 민간투자 9,733)

○ 사업기간 : 2004. 5. ～ 2007. 5.

○ 추진현황

▪ ‘03.  8. 21 : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정

▪ ‘04.  5. 15 : 실시계획 승인

▪ ‘04.  5. 25 : 법원, 광탄하수처리장 착공

▪ ‘04. 11. 13 : 파주하수처리장 착공

▪ ‘05.  3. 26 : 문산하수처리장 착공

※ 현재공정 : 53%