2004 행정사무감사

산업․건설위원회

2004 주요업무 추진상황

수 도 환 경 사 업 소

목        차

□ 운영과 소관 - 기 본 현 황 - 2004년 주요업무 추진실적 1. 환경기초시설 설치사업 2. 수질 환경보전 추진 3. 환경기초시설 위탁관리
□ 상수도과 소관 - 기 본 현 황 - 2004년 주요업무 추진실적 1. 맑은물 공급대책 사업
□ 하수도과 소관 - 기 본 현 황 - 2004년 주요업무 추진실적 1. 하수관거 정비사업 2. 하수종말처리시설 건설

운 영 과  소 관

기  본  현  황

1. 인력현황                                  (단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
14	12	1	1	1	1	3	3	4	4	4	2	1	1

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
환경시설담당	▪ 환경기초시설설치 및 기술업무지도 점검 ▪ 환경기초시설 운영 ▪ 사업소 일반회계 경리, 계약 ▪ 서무, 회계
오수관리담당	▪ 오수분뇨축산폐수처리관련 신고허가 민원 ▪ 분뇨관련 영업허가 민원
폐수처리담당	▪ 폐수종말처리시설 설치 및 운영 ▪ 수질오염조사 및 감시

2004년 주요업무 추진실적

1. 환경기초시설 설치사업

환경기초시설의 설치로 환경오염 예방과 주민편익 제공

□ 음식물 쓰레기처리시설 확충사업

○ 위    치 : 파주시 금촌동 714번지 일원(금촌하수종말처리장인근)

○ 사 업 량 : 음식물 쓰레기 80톤/일

○ 사업기간 : 2004. 4 ～ 2007. 6

○ 사 업 비 : 7,200백만원

○ 추진현황

․ ‘04.  4.  3 : 2005년도 국고보조사업 신청(환경부)

․ ‘04.  4. 14 : 타당성 조사용역 착수

․ ‘04.  8. 11 : 타당성 조사용역 완료예정

□ 축분혼합공공처리시설 설치공사

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1039-4번지 일원

○ 시설용량 : 80톤/일(축분60톤/일, 음식물20톤/일)

○ 처리방법 : 중온혐기성소화+호기성퇴비화

○ 부지면적 : 8,391㎡(건축면적 - 지하1층, 지상2층 : 1587.35㎡)

○ 사 업 비 : 10,437 백만원(양여금:7,200 도비:900 시비:2,337)

○ 사업기간 : 1998. 8 ～ 2004. 9. 9

○ 추진현황

․ ‘04. 1. 29 : 공사 재착공

․ ‘04. 6. 21 : 현재 폐수처리설비 보완공사중

․ ‘04. 9.  9 : 공사준공 예정

※ 현재공정 88%

□ 분뇨처리시설 증설사업

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-1 일원

○ 부지면적 : 1,800㎡

○ 처리용량 : 80㎘/일

○ 처리방식 : Biosuf 방식

○ 사 업 비 : 7,284백만원(양여금 5,827, 도비 728.5, 시비 728.5)

○ 사업기간 : 2002. 1 ～ 2005. 7

○ 추진현황

․ ‘03.  8. 12 : 공사착공

․ ‘04.  5.    : 연약지반 가시설 설치 및 기초 터파기완료

․ ‘04.  6.    : 분뇨처리동 버팀기초 타설완료 철근배근중

※ 현재공정 28%

□ 분뇨처리시설 개선보완사업

○ 사업대상 : 기존처리시설 140㎘/일(60㎘/일+80㎘/일)

○ 사업내용 : 탈수기동 8개종 수리 및 교체

○ 사 업 비 : 945백만원(양여금 756, 도비 94.5, 시비 94.5)

○ 사업기간 : 2004. 2 ～ 2004. 11

○ 추진현황

․ ‘04.  6.  : 설계용역완료

․ ‘04.  7.  : 공사착공

․ ‘04. 11.  : 공사준공 예정

□ 환경기초시설 악취제거사업

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-1 일원

○ 사 업 량

․ 축산폐수처리장 : 탈취탑 및 흡기구 설치(1식)

․ 음식물쓰레기처리장 : 악취흡입배관설치 및 탈취시설(1식)

○ 사 업 비 : 800백만원(시비)

○ 사업기간 : ‘04. 2 ～ ‘04. 10

○ 추진현황

․ ‘04.  6.  : 설계완료

․ ‘04.  7.  : 착공

․ ‘04. 10.  : 준공

2. 수질 환경보전 추진

□ 축산폐수 수집․운반 및 처리비 지원

○ 사업예산 : 576백만원(도비:288  시비:288)

○ 지원대상 : 신고대상 규모이하의 축산농가로 축산폐수공공처리시설에 유입처리 하는 농가

○ 지원기준

▪  신고대상 : 9원/ℓ(운반비:7원, 처리비:2원)

▪  신고미만 : 7원/ℓ(운반비:7원, 처리비:없음)

○ 지원방법

▪  수집․운반비 : 수거실적에 따라 축산폐수 수집․운반 허가 업체에

지급(6개업소)

▪  시설사용료(처리비) : 시설관리공단으로 지급(신고미만 제외)

○ 2004년도 지원실적

▪  수집․운반처리량 : 14,697㎘(2004. 1. 1～5.31기준)

▪ 지원금액 : 132,217천원(2004. 5월말 기준)

- 수집․운반비(6개업소) : 102,879천원

- 시설사용료(시설관리공단) : 29,338천원

3. 환경기초시설 위탁관리

□ 분뇨처리시설

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1040-1번지 일원

○ 처리용량 : 140㎘/일(60㎘/일+80㎘/일)

○ 사 업 비 : 1,353,163천원

○ 설치년도

․(60㎘/일) : 1991년도

․(80㎘/일) : 1997년도

○ 수 탁 자 : 파주시시설관리공단 (2001. 1. 1 ～ 현재)

□ 음식물쓰레기 혐기성퇴비화시설

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1039-4번지 일원

○ 처리용량 : 30톤/일(혐기성)

○ 사 업 비 : 365,052천원

○ 설치년도 : 1999년도

○ 수 탁 자 : 한라산업개발(주) (2000. 1. 1 ～ 현재)

□ 축산폐수공공처리시설

○ 위    치 : 파주읍 봉암리 1003-2

○ 처리용량 : 200㎘/일

○ 사 업 비 : 785,264천원

○ 설치년도 : 2000년도

○ 수 탁 자 : 파주시시설관리공단, 해동종합건설(주) (‘01.1.1～‘03.12.31)

파주시시설관리공단(‘04. 1. 1 ～ 현재)

□ 환경관리센터

○ 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

○ 처리용량 : 소각장 100톤/일×2기, 매립장1식(매립용량 378,320㎥)

○ 위탁운영비 : 3,736,423천원

○ 설치년도 : 2003년도 (2002. 6. 1호기 준공)

○ 수 탁 자 : 코오롱건설(주) (2002. 7. 1 ～ 현재)

□ 재활용선별장

○ 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

○ 처리용량 : 50톤/일

○ 위탁운영비 : 609,000천원

○ 설치년도 : 2002년도

○ 수 탁 자 : 코오롱건설(주)(2003. 3. 1 ～ 현재)

□ 스포츠센터

○ 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

○ 시설내역 : 수영장, 헬스, 에어로빅, 스쿼시, 선수용 숙소, 강당

○ 연간운영비 : 매출(수입액) 499,561천원,  비용(지출액) 1,143,366천원

○ 수 탁 자 : 코오롱스포렉스(주) (2003. 5. 12 ～ 현재)

상 수 도 과  소 관

기  본  현  황

1. 인력현황                                  (단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직		상용직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
70	69	-	-	1	1	5	5	10	7	9	12	15	15	30	29

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
업무담당	․상수도 특별회계 예산운영 ․급수공사 대행업소 지정 및 인가 ․토지․건물 등 재산 및 물품관리 ․결산 및 경영분석
요금담당	․상수도사용료 및 각종 세입의 부과징수 ․수도계량기 검침 및 요금고지 ․요금전산관리 및 각종요금 민원신고처리 ․부정수도 관리
급수담당	․누수방지 및 비상급수대책 ․노후관 및 불량 수도관 교체 ․간이상수도시설 설치 및 유지관리 ․농어촌 지방 상수도사업
시설담당	․상수도시설 증설 및 확장공사 ․고도정수처리시설 사업 ․상수원보호구역 주민지원사업 ․취․정수시설 운영관리
수질시험 담당	․원․정수 수질검사 분석 및 관리 ․정수 약품관리 및 품질관리 ․지하수 인․허가 및 관리 ․상수원보호구역 지정 및 관리

2004년 주요업무 추진실적

1. 맑은물 공급대책 사업

○ 상수도2단계 확장사업 추진으로 늘어나는 물수요에 적극 대처

○ 고도 정수처리시설 도입, 노후수도관 교체, 구역개량으로 맑고

깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 파주상수도2단계 확장사업

▪ 배수지 23천톤, 배수관로 13.2㎞, 사업비 27,098백만원

○ 고도정수처리시설사업

▪ 시설용량 96천톤/일, 사업비 18,281백만원

○ 노후수도관교체 및 구역개량공사

▪ 관로교체 19㎞, 누수탐사 650㎞, 사업비 3,900백만원

□ 그간의 추진실적

○ 파주상수도2단계 확장사업 : 공사착공(50%)

○ 고도정수처리시설사업 : 수도사업 인가신청

○ 노후수도관 교체 및 구역 개량공사 : 공사착공(39%)

□ 향후 추진계획

○ 파주상수도2단계확장사업 : 2004. 9월 완료예정(배수관로)

○ 고도정수처리시설사업 : 2005. 12월 완료예정

○ 노후수도관 교체 및 구역개량공사 등 유수제고사업으로 공기업

특별회계 운영 흑자분 및 향상된 수도행정서비스 제공

하 수 도 과  소 관

기  본  현  황

1. 인력현황                                  (단위 : 명)

계		5급		6급		7급		8급		9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
11	9	1	1	3	3	2	3	3	1	1	0	1	1

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
하수행정 담 당	▪하수도특별회계 운영관리 ▪하수도사용료 검침, 부과, 징수 관리 ▪배수설비공사 대행업자 지정․관리
하수관리 담 당	▪하수관거 유지관리, 하수도 준설원 관리 ▪배수설비설치 신고․준공 ▪마을하수도 유지․관리, 민간위탁에 관한 사항 ▪하수종말처리시설 유지․관리, 민간위탁에 관한 사항 ▪하수도관련 심의업무 ▪비관리청(마을하수도 및 하수관거) 하수도공사 인허가 및 사업시행 승인 ▪중계펌프장 유지․관리
하수시설 담 당	▪하수도정비 기본계획 수립 ▪하수종말처리장 시설건설 ▪마을하수도 시설건설 ▪하수관거 정비사업(설계, 감독) ▪비관리청(하수종말처리장) 하수도공사 인허가 및 사업시행 승인

2004년 주요업무 추진실적

1. 하수관거정비 사업

○ 기존시가지의 오․우수관 분류식화 하여 하수처리장 처리효율 증대

○ 노후하수관 정비에 따른 환경오염 방지 및 쾌적한 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 문산읍외 9개읍․면․동 일원(처리구역)

(단위: km, 백만원)

구분	사업량	사업비	사업기간	처리구역
계	385	253,664	‘03～’21	문산,파주,법원,조리, 월롱,탄현,파평,광탄,적성,금촌
1단계	138	91,788	‘03～’06	문산외7개소
2단계	86	55,438	‘07～’11	파주외5개소
3단계	94	52,416	‘12～’16	법원외6개소
4단계	67	54,022	‘17～’21	광탄외4개소

□ 그간의 추진실적

○ 2003. 05. 29 : 파주시 하수관거 타당성 조사 용역 완료 (‘01.12.03착수)

○ 2003. 08. 07 : 적성하수관거 공사착공

○ 2004. 06.    : 금촌하수관거 기본계획용역 착수

□ 향후 추진계획

○ 2004. 10 : 금촌하수관거 기본계획용역 완료

○ 2004. 12 : 적성하수관거공사 완료

○ 2005. 03 : 금촌하수관거 적격업체선정 및 공사착공

○ 2006. 12 : 1단계 사업완료

2. 하수종말처리시설 건설

금촌, 통일동산, 문산하수종말처리시설의 조기건설로 금촌, 통일동산,

교하택지개발지구조성에 따른 발생오수를 적기 처리하여 방류수질

개선 및 공공수역 수질보전

□ 하수처리장 사업 현황

처리장명	시설규모		처리방식	사업비 (백만원)	시공사	공정 (%)
	용량(톤/일)	차집관로(㎞)
금 촌	27,000	9.98	한화유로변경공법 (HDF)	33,570	한화,포스코, 성지	79.4
통일동산	16,000	5.02	간헐포기접촉산화공법 (DeNiPhoⓇ)	31,690	대림,호성	38
문 산	17,000	23.26	바이오세라믹필터 (BCF)	43,528	대림	5

□ 문제점 및 대책

○ 통일동산처리장

▪‘04. 5. 10 방류구 위치 및 저류지 설치에 대하여 문화재위원회의               검토를 받아 시행하는 조건으로 현상변경허가를 문화재청으로부터 득            하여 중지된 공사를 재개하였으나 허가조건 불이행 사유로 재차 공사중지              통보받음

▸‘04. 5. 19 방류구 위치 및 저류지 설치를 탄현면 만우리 장군연못           으로 하는 방안으로 문화재위원회에 검토시 환경운동연합과 협의           하여 제출토록 보류되어 환경운동연합과 협의진행 중이므로 문화재           청의 불합리한 공사중지 통보에 대하여 철회 요구하였고

▸환경단체에서 하수처리장 건설과 관련 대안으로 제시한 사항등을             협의하되 하수처리의 시급성을 감안 구조물 시공은 진행하면서 방류구 위치              및 저류지 설치 등에 대하여 협의 추진하고자 함

○ 문산처리장

▪문산하수도 민간투자사업은 문산, 파주, 법원, 광탄처리장을 동시에            건설 하는 사업으로서 토지보상 완료 지역인 법원, 광탄처리장부터 우선            시공중에 있으며 민원이 발생되고 있는 문산, 파주처리장은 당동1리 및            백석3리 주민들이 반대하고 있어

▸하수처리장 설치의 당위성 홍보 및 주민설득으로 추진 하고자 함.