도 시 건 설 국

보 고 순 서
□	추진목표와 방향	------	2 - 1
□	주요업무 추진계획
	【 도시계획과 소관 】 ○미래지향적인 도시계획추진 ○주민 숙원사업 추진	------ ------	2 - 2 2 - 3
	【 도로과 소관 】 ○국도․지방도 도로 사업 추진 ○군도 및 각급 도로망 확충	------ ------	2 - 7 2 - 8
	【 건축과 소관 】 ○투명하고 깨끗한 건축행정 구현 ○쾌적하고 살고싶은 공동주택 주거문화 정착 ○더불어 함께 사는 주거문화 정착	------ ------ ------	2 - 12 2 - 13 2 - 14
	【 교통정책과 소관 】 ○교통사고 저감사업 추진	------	2 - 15
	【 재난안전관리과 소관 】 ○자연형 하천 사업 추진 ○예방위주의 방재행정 추진	------ ------	2 - 16 2 - 17

	추진목표와 방향

ꏚ 도시계획과 소관

2 -

○ 미래지향적인 도시계획 추진

○ 주민편익 숙원사업 추진

ꏚ 도로과 소관

○ 지역간 연계강화를 위한 대로망 대폭 확충

ꏚ 건축과 소관

○ 투명하고 깨끗한 건축행정 구현

○ 쾌적하고 살고싶은 공동주택 주거문화 정착

○ 더불어 함께 사는 주거문화 정착

ꏚ 교통정책과 소관

○ 도시교통기본계획 수립을 통한 쾌적한 교통환경 조성

○ 대중교통 체계 확충 및 재정지원 확대

○ 교통사고 예방과 안전한 교통환경 조성

ꏚ 재난안전관리과 소관

○ 자연형 하천 사업 추진

○ 예방위주의 방재행정 추진

주요업무 추진계획

〔도시계획과 소관〕

1. 미래지향적인 도시계획추진

○ 도시기본계획에서 주어진 도시개발방침과 방향을 수용하여 목표

연도의 도시지표달성을 위한 부분별 도시개발계획을 구체화

○ 도시기본계획의 재검토 및 문제점을 분석․보완하여 미래지향적

도시기반 설정

ꊱ 파주도시관리계획 수립용역

○ 개요

- 과업범위 : 파주시 전 행정구역(A=672㎢)

- 목표연도 : 2015년(기준년으로부터 10년)

- 과업기간 : 2005. 4. 27 ～ 2006. 7. 31

- 주요내용 : 용도지역․지구․구역 및 도시기반시설계획 재조정 등

○ 추진계획

- 2006.  2 : 주민공람(2차)

※ 의회의견청취 및 도시계획위원회 자문

- 2006.  3 : 도시관리계획 입안

- 2006. 12 : 도시관리계획 결정

2. 주민 숙원사업 추진

○ 그간 지정학적 특성으로 각종 개발에서 소외되어 낙후된 접경지역의

생활환경 및 생산기반시설을 확충하여 정주환경개선 및 도․농간

지역균형발전 도모

○ 낙후된 민통선지역의 생산 및 생활 기반시설을 확충하여 민북거주민

및 출입영농인의 소득증대 도모

○ 파주시 일원 낙후․취약지역의 생활기반시설 및 복지시설 등의 확충

으로 주민편익과 주민숙원사항 해소

ꊱ 접경지역 지원사업

○ 사업개요

- 사업대상 : 3읍 8면(문산․파주․법원읍, 탄현․광탄․파평․

적성․군내․장단․진동․진서면)

- 사업내용 : 생활환경 개선․생산기반 시설정비

- 사업기간 : 2003 ~ 2012(10년간)

- 총사업비 : 85,400백만원 (국 59,780  도 25,620)

- 2006년 : 금곡리 농로개설 및 포장공사 외 11건 / 24.8 km (5,994백만원)

※ 낙후도와 사업효과를 고려 매년 사업대상지 선정

○ 추진계획

- 2006.  1.   : 공사 설계

- 2006.  3.   : 공사 착수

- 2006.  9.   : 공사 완료

ꊲ 민통선 북방지역 개발사업

○ 사업개요

-  사업대상 : 파주시 민통선지역(군내․진동․탄현면)

-  사업내용 : 생산 및 생활 기반시설

-  사업기간 : 2006. 1. ～ 9.

- 2006년 : 읍내리 농로포장공사 외 7건 / 10.5 km (2,100백만원)

※ 매년 사업대상지 선정

○ 추진계획

- 2006.  1.   : 사업대상지 확정

- 2006.  3.   : 공사 착수

- 2006.  9.   : 공사 완료

ꊳ 소규모 주민숙원사업

○ 사업개요

- 사업대상 : 파주시 일원

- 사업내용 : 기반시설, 생활시설, 복지시설 확충․개량

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 9.

- 2006년 : 영태리 교량재가설 및 용수로 복개공사 외 2건 / 700백만원

※ 매년 사업대상지 선정

○ 추진계획

- 2006.  1.   : 공사 설계

- 2006.  3.   : 공사 착수

- 2006.  9.   : 사업 완료

단위 사업별 세부 조서

일련 번호	사 업 명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	비 고
총 계		23개소	8,834
접경지역 지원사업		12개소	5,994
1	금곡1리 농로개설 및 포장공사	L=1,200m	306	2006.3～ 6.30
2	금곡2리마을안길포장및하수도정비공사	L-1,420m	311	2006.3～ 6.30
3	직천리마을안길포장및세천정비공사	L=1,180m	514	2006.3～ 6.30
4	법원4리 초리골 특화마을조성공사	1식 (4개사업)	1,350	2006.3～ 9.30
5	오금리농로포장및호안공사	L=5,100m	500	2006.3～ 5.30
6	율곡2리도로개설및배수로공사	L=520m	460	2006.3～ 6.30
7	율곡4리석축공사	L=2,000m	540	2006.3～ 6.30
8	자장리농로포장사업	L=3,600m	500	2006.3～ 4.30
9	자장리하수도정비공사	L=1,300m	413	2006.3～ 6.30
10	적암리배수로정비공사	L=800m	350	2006.3～ 4.30
11	적암리상수도확장공사	L=1,000m	150	2006.3～ 6.30
12	백연리마을안길포장및옹별설치공사	L=4,870m	600	2006.3～ 7.30
민북개발사업		8개소	2,080
1	읍내리농로포장공사	L=550m	80	2006.3～ 4.30
2	조산리농로포장공사(1,2)	L=1,750m	240	2006.3～ 4.30
3	조산리용수로설칙공사(1,2)	L=430m	210	2006.3～ 4.30
4	여룡리농로포장공사(1,2)	L=1,650m	220	2006.3～ 4.30
5	조산리농로포장공사(3,4)	L=1,700m	210	2006.3～ 4.30
6	어룡리농로포장공사(3,4)	L=1,700m	220	2006.3～ 4.30
7	방목리-초리간지방도확포장공사	L=2,320m	600	2006.3～ 7.30
8	대동-만우간 농수로정비공사	L=430m	300	2006.3～ 4.30
소규모 숙원사업		3개소	760
1	영태리교량재가설 및 용수로복개공사	교량L=17m, B=8m 복개L=50m, B=8m	400	2006.3～ 4.30
2	눌노리용수로정비공사	U형관 L=370m (1.0*1.0)	150	2006.3～ 4.30
3	법원리 도로포장 및 세천정비공사	포장L=150m, B=5m 옹벽L=150m, H=4m	210	2006.3～ 6.30

주요업무 추진계획

〔도로과 소관〕R

1. 국도 ․ 지방도 도로 사업 추진

통일대비 남북교류 전초기지로서의 간선도로망 확충으로 지역간

균형발전 도모

□ 현    황 : 12건 / 113.01km 14,947억원

○ 국  도 건설사업 : 3건/ 22.32km (4,615억원)

▪계속 : 3건  / 22.32(공사2 용역1)

○ 국지도 건설사업 : 5건 / 68.35km (7,011억원)

▪계속 : 5건 / 68.35km (공사3 용역2)

○ 지방도 건설사업 : 4건 / 21.90km (3,321억원)

▪계속 : 4건 / 21.9km (공사2 보상1 용역1)

□ 추진계획

○ 도로사업 추진에 따른 도로구역 결정과 사전 군부대 협의, 재해영향평가, 문화재 지표조사 등 유관기관 협의체제 구축운영

○ 보상독려반 운영과 기공승락서 징구 등 협의 매수를 병행 추진하고 행정절차 기간 도래 즉시 토지수용 절차 이행

2. 군도 및 각급 도로망 확충

○ 지역간 연결도로망 확충으로 원활한 교통소통 및 균형발전 도모

○ 농어촌지역 주민의 교통편익 증대와 농수산물 유통향상 등 농어

촌도로의 군도수준까지의 포장율 향상

○ 시민의 건강증진과 여가활용을 위한 장기미집행 도시계획도로 개설

에 따른 주민민원 해소

□ 현    황 : 38건 / 65.94km 4,311억원

○ 군        도 : 8건 / 22.25km (3,009억원)

▪계속 : 6건 / 21.95km (공사3 용역3)

▪신규 : 2건 /  0.3km (신규)

○ 농어촌 도 로 : 10건 / 23.75km (530억원)

▪계속 : 7건 / 19.05km (공사3 보상1)

▪신규 : 3건 / 3.9km (용역3)

○ 도시계획도로 : 10건 / 5.15km (460억원)

▪계속 : 7건 / 3.73km (공사4 보상2 용역1)

▪신규 : 3건 / 1.42km (신규)

○ 비법정도로 : 10건 / 14.79km (312억원)

▪계속 : 5건 / 10.26km (공사2 용역3)

▪신규 : 5건 / 4.53km (신규)

□ 추진계획

○ “자기지문문답표” 및 “사업별 세부추진 일정표”를 작성 자가

시스템 구축

○ 각종 인허가․협의․보상등을 동시 복합적으로 추진

○ 통합감리 시행으로 견실시공 유도 및 현장 품질관리 철저이행

2006년도 도로사업 추진계획

(단위 : km, 백만원)

일련 번호	구 분		사 업 명	위 치	사업량	사 업 기 간	사 업 비				공정(%)
							계	기투자	2006	향후	공사	보상
총계 50건					178.51		1,926,174	562,246	73,953	1,289,975
소계 3건					22.32		461,546	122,897	16,677	321,972
1	국도	계속	두포～천천간 (국도37호선)	파평두포 ～적성두지	L=10.64	‘99～’06	92,445	77,853	14,592	-	68	100
2			적성우회도로 (국도37호선)	적성두지 ～적성구읍	L=4.48	‘98～’06	42,501	40,416	2,085	-	95	99
3			적성～전곡간 (국도37호선)	적성구읍 ～적성적암	L=7.2	‘02～’09	326,600	4,628	-	321,972	용역100
소계 5건					69.05		701,182	216,330	14,000	470,852
4	국지도	계속	교하～조리간 (국지도56호)	교하문발 ～조리등원	L=10.29	‘99～’06	146,944	146,944	-	-	92	95
5
			장흥～광탄간 (국지도78호)	광탄신산 ～고양시계	L=9.7	‘04～’11	104,500	2,000	1,000	101,500	용역90
6			법원～상수간 (국지도56호)	법원갈곡 ～양주시계	L=10.06	‘05～’10	194,538	29,000	10,000	155,538		30
7			자유로확포장 (국지도23호)	고양이산포～탄현낙하	L=25.3	‘04～’06	34,200	34,200	-		80
8			조리～법원간 (국지도56호)	조리등원 ～법원법원	L=13.7	‘04～’12	221,000	4,186	3,000	213,814	용역100
소계 4건					21.64		332,170	44,371	16,902	270,897
9	지방도	계속	금촌～월롱간 (지방도360호)	파주야동 ～월롱위전	L=4.8	‘05～’08	75,675	31,364	9,410	34,901	5	25
10			식현～두지간 (지방도367호)	적성 식현 ～두지리	L=2.1	‘04～’06	9,192	7,400	1,792	-	40	97
11			설마～구읍간 (지방도371호)	적성 설마 ～구읍리	L=9.0	‘02～’08	155,353	4,607	5,700	145,046		90
12			월롱～광탄간 (지방도360호)	월롱 위전 ～광탄방축	L=5.74	‘04～’09	91,950	1,000	-	90,950	용역95
소계 8건					22.25		300,957	113,165	14,161	173,631
13	군도	계속	통일로～파주리 (군도7호선)	파주 봉암 ～파주파주	L=2.26	‘97～’06	16,284	11,522	4,711	51	50	100
14			출판단지～삽다리간 (군도1호선)	교하동패 ~출판단지	L=3.3	‘03～’11	57,500	1,620		55,880	용역95
15			문산～연풍간 (군도31호선)	파주 향양 ～연풍리	L=4.2	‘03～’08	72,100	8,000	8,000	56,100	용역95
16			문발공단~교하 (군도1호선)	교하 문발 ~교하리	L=4.9	'05~'11	66,650	4,050	1,000	61,600	용역90
17			금승~위전 (군도3호선)	탄현 금승 ~월롱 위전	L=5.95	‘03~’06	69,973	69,973	-	-	97	100

2006년도 도로사업 추진계획

(단위 : km, 백만원)

일련 번호	구 분		사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 기 간	사 업 비				공정(%)
							계	기투자	2006	향후	공사	보상
18	군도	계속	선유~문산여고	문산 선유 ~파주 봉서	L=1.34	‘04~’06	18,000	18,000	-	-	95	100
		신규	군도8호선 방호벽개선	파평 두포리	방호벽 1식	‘06.1～6	350	-	350	-	신규
19
			군도3호선 배수로	월롱 위전리	L=0.3	‘06.1～6	100	-	100	-	신규
20
소계10건					23.75		53,071	22,357	6,660	24,054
21	농어촌도로	계속	봉암～파주간 (농어촌202호)	파주봉암 ～파주파주	L=1.34	‘95～’06	9,140	9,140	-	-	30	100
			장릉진입로 (농어촌101호)	탄현갈현 ~법흥리	L=1.4	‘03～’06	4,646	4,646	-	-	65	100
22
			능안초교~상지석 (농어촌201호)	조리 능안리	L=0.4	‘05~’06	2,030	1,250	780	-	-	50
23
24			동패~산남간 (농어촌201호)	교하동패 ~산남리	L=3.5	'05~'09	6,800	1,100	1,200	4,500	용역40
25			덕천~답곡간 (농어촌301호)	파평덕천 ~적성답곡	L=3.5	'05~‘07	7,680	3,502	2,000	2,178	용역90
26			객현~구읍간 (농어촌302호)	적성객현 ~적성구읍	L=3.61	'05~'07	6,000	1,290	1,580	3,130	용역90
27			웅담~직천간 (농어촌205호)	법원웅담~ 직천리	L=5.3	'04~‘06	2,375	1,429	-	946	56
28		신규	금승~축현간 (농어촌203호)	탄현금승 ~축현리	L=1.2	'06~08	3,800	-	1,000	2,800	신규
29			운정역~능안리 (농어촌201호)	조리능안 ~상지석	L= 2	‘06~’09	7,800	-	50	7,750	신규
30			지방도359~오금 (농어촌202호)	탄현오금	L=1.5	‘06~’08	2,800	-	50	2,750	신규
소계 10건					5.15		46,056	38,656	1,873	5,527
31	도시계획도로	계속	당동~여우고개 (중1-1호)	문산 당동	L=1.34	‘03~’06	12,000	12,000	-	-	80	100
32			통일공원~중에교	파주봉서 ~향양	L=1.24	‘04~’06	19,100	19,100	-	-	90	100
33			마지리 도시계획도로	적성마지리	L=0.26	‘04~’06	2,106	2,106	-	-	30
34			신산리 도시계획도로	광탄신산리	L=0.2	‘04~’06	1,300	1,300	-	-	30
35			법원리 도시계획도로	법원법원리	L=0.19	‘04~’06	1,300	1,050	250	-		90
36			문산동초교 진입도로	문산선유리	L=0.24	'04~'06	1,300	1,150	150			30
37			신산시가지 우회도로	광탄신산리	L=0.26	‘04~’07	2,850	1,950	900	-	용역100
38		신규	금신초교~ 경신아파트	금촌동	L=0.53	'06~'08	2,800	-	40	2,760	신규

2006년도 도로사업 추진계획

(단위 : km, 백만원)

일련 번호	구 분		사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 기 간	사 업 비				공정(%)
							계	기투자	2006	향후	공사	보상
39	도시 계획 도로	신규	금촌동 도시계획도로	금촌동	L=0.39	‘06~’07	1,300	-	30	1,270	신규
40			낙원묘지 진입도로	금촌동~ 월롱덕은리	L=0.5	‘06～’08	2,000	-	503	1,497	신규
소 계 10건					14.79		31,192	4,470	3,680	23,042
41	비법정도로	계속	칼사격장 진입도로	문산이천리	L=2.0	‘05~’07	2,600	1,400	-	1,200	용역90
			자운서원 진입도로	법원동문리	L=1.5	'05~'06	920	920	-	-	용역100
42
			영어마을 진입도로	탄현법흥리	L=0.9	‘05~’06	850	850	-	-	30
43
			고산교~장곡리	조리봉일천 ~장곡리	L=3.66	'04~'06	2,500	1,300	1,200	-	60
44
			통일로정체구간	조리대원 ~등원리	L=2.2	'06~'08	19,572	-	200	19,372	용역계획
45
		신규	대원초교 ~설문동간	조리대원 ~고양설문	L=0.26	'06.1~ ‘06.12	2,500	-	30	2,470	신규
46
			방축1리마을안길	광탄방축리	L=1.1	'06.1~ '06.10	110	-	110	-	신규
47
			정감어린 가로환경		1식	'06	500	-	500	-	신규
48
			도심시가지보도		L=3	'06	900	-	900	-	신규
49
			검산초교진입로	검산동	L=0.17	‘06.1~ ‘06.10	740	-	740	-	신규
50

주요업무 추진계획

〔건축과 소관〕

1. 투명하고 깨끗한 건축행정 구현

○ 투명한 업무처리로 건축행정의 건실화 도모

○ 가설울타리 설치로 깨끗한 도시와 옥상조경을 통한 녹색 도시건설

○ 불법건축 행위의 사전 예방으로 법질서 확립

ꊱ 공정하고 투명한 업무처리로 건축행정 건실화 도모

○ 건축위원회심의 과정 공개를 통한 투명화 도모

- 설계자에게 설명기회 부여 및 실현 곤란한 조건부과 지양

○ 건축부조리 근절

- 건축공사현장 지도․점검시 실명제 이행(현장방문전 사전통보)

- 건축사대행 건축물에 대한 점검실시로 건축주와의 유착관계 근절(년2회)

ꊲ 깨끗하고 활기찬 도시건설

○ 가설울타리 설치로 깨끗한 공사현장 조성

○ 대형건축물 옥상조경(휴게공간)으로 녹색도시건설

- 연면적 5,000㎡이상으로써 5층이상 건축물

ꊳ 불법건축물 예방대책 추진

○ 유관기관과의 협조체계 구축을 통한 불법행위 근절

○ 기동성 있는 단속활동 전개 등으로 체계 확립

- 일일순찰 강화, 지역별 책임제 확행, 취약지역 특별관리

○ 대주민 홍보강화로 무질서심리 확산 방지 및 불법행위 사전예방

2. 쾌적하고 살고싶은 공동주택 주거문화 정착

○ 웰빙시대에 걸맞는 녹지공간 확보로 쾌적함이 어우러진

공동주택 주거문화 정착

○ 공동주택단지 내 노후시설물의 유지보수와 효율적인 관리를

통한 안전한 주거환경 조성

ꊱ 친환경적 공동주택 건립

○ 아파트 측벽에 벽화 등 그래픽 디자인을 통한 도시미관 향상

(지방도, 국․도변 등 대로변 위주로 추진)

○ 비탈면 부위에는 조경석 및 산벽처리(옹벽설치 지양)

○ 주차장은 최대한 지하화 하고 지상부분은 녹지공간과 공원 등으로 조성

ꊲ 공동주택 건설현장 점검을 통한 품질 및 안전관리 확보

○ 정기점검 : 년2회 이상(반기 1회이상)

○ 특별점검 : 해빙기, 장마철, 동절기 점검

ꊳ 공동주택단지 노후시설물 보수비 지원

○ 사업개요

- 사  업  비 : 200백만원(시 200)

- 대상단지수 : 62개 단지(5,522세대)

- 지원단지수 : 대상단지에서 3 ～ 5개 단지 선정 후 지원

- 지원시설물 : 놀이터, 공동화장실, 주차장, 단지 내 부대시설 등

- 지 원 금 액 : 사업에 따라 최대 1억원까지 지원

○ 추진계획

- 2006.  4.     : 지원 대상단지 선정

- 2006. 5 ～ 9. : 사업 추진 기간

- 2006. 10.   : 사업완료 및 정산

3. 더불어 함께 사는 주거문화 정착

○ 『사랑의 효친아파트』를 마련하여 홀로 사는 독거노인과

소년․소녀가장 등 소외 계층에게 지속적으로 제공

○ 농촌 지역의 노후․불량주택을 개량하여 쾌적한 농촌 환경조성

및 삶의 질 향상

ꊱ 공동주택 단지 내 효친아파트 건립 추진

○ 사업개요

- 설치대상 : 100세대이상 공동주택단지(1～2세대확보)

- 설치규모 : 1세대 당 8～12평 원룸형태

- 설치장소 : 아파트 부대복리시설(관리사무소)내 복합설치

○ 추진실적 : 43개단지 69세대

- 입주내역 : 10개단지 17세대(소년․소녀 3세대, 독거노인 14세대 총20명)

연도	계	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년
세대	17	5	4	7	1	0

- 입주(건립)예정내역 : 33개단지 52세대

○ 추진계획

- 아파트 사업계획승인 신청시 사업주체로 하여금 반영토록 권고

- 주민 만족도를 실시하여 개선사항 적극 수렴

ꊲ 농촌 주거환경 개선사업 지속추진

○ 사업개요

- 대상지역 : 문산읍 등 10개 읍․면

- 사 업 량 : 농촌주택개량 15개동

- 사 업 비 : 600백만원(주거전용면적100㎡기준 40백만원)

※ 재원배분 : 재특자금 20%, 농특세 10%, 주택기금 40%,

지방비(도비) 30%

○ 추진계획

- 2006. 2.  : 대상자 조사 및 사업량 신청

- 2006. 3.   : 대상자 확정 통보 / 2006. 3 ～ 10. : 사업완료 및 정산

주요업무 추진계획

〔교통정책과 소관〕

1. 교통사고 저감사업 추진

○ 어린이보호구역내의 교통안전시설물 설치 및 통학로를 확보함으      로써 교통안전사고 예방

○ 교통환경개선을 위해 교통안전시설물 확충으로 교통소통원활화

및 안전사고 예방

ꊱ 어린이보호구역 정비사업

○ 사업개요

- 위    치 : 웅담초등학교 등 16개교

- 사 업 량 : 보차도 분리,미끄럼방지시설, 가드휀스,교통안전표지판

- 사업기간 : 2006. 3. ～ 2006. 9.

- 사 업 비 : 4,200백만원(국비2,100  도비1,050, 시비1,050)

○ 추진계획

- 2006. 1. 30 : 설계용역 완료

- 2006. 3. 30 : 공사착공 /  2006. 9. 30 : 공사완료

교통안전시설물 정비 및 확충

○ 사업개요

- 위    치 : 파주시 전지역

- 사 업 량 : 도로교통 안전시설(차선도색,교통신호등,안전표지판등)

- 사업기간 : 2006. 2. ～ 2006. 9.

- 사 업 비 : 1,000백만원(전액시비)

○ 추진계획

- 2006. 2. 10 : 수요조사(각 읍면동 현장확인)

- 2006. 3. 30 : 공사착수  /  2006. 9. 30 : 사업완료

주요업무 추진계획

〔재난안전관리과 소관〕

1. 자연형 하천 사업 추진

○ 하천의 개수를 통해 근본적인 재해예방 및 하천이 가지는 수질      정화, 친수, 생태적공간 기능 등 하천 본래의 기능을 살려 자연과      사람이 어우러지는 자연형  하천 사업으로 추진

□ 현 황

○ 국가하천 (개수율 : 2005년 100%)

- 임진강 하도준설(사목지구) : 0.6㎞  2,715백만원

○ 지방하천 (개수율 : 2005년 87%)

- 2 건 : 1.34㎞ 4,833백만원

○ 소하천 (개수율 : 2005년 25%)

- 4 건 : 3.8㎞ 5,170백만원

- 용역 1건 : 12㎞ 150백만원

○ 임진강 골재 부존량 조사

- 용역 1건 : 120백만원

□ 추진계획

- 수해상습 침수지역의 소하천 개수사업 우선 추진

- 2006년도 소하천 개수율 목표 30% (2005년 대비 5%향상)

- 사업의 단계별로 하천의 환경기능을 최대한 반영 시공

2. 예방위주의 방재행정 추진

○ 재난안전시스템 확충 및 재난방재시설물의 일상정비점검

생활화로 상황발생시 신속한 대응태세 확립

ꊱ 재해위험지구 정비사업

○ 두지재해위험지구

- 사 업 량 : 배수펌프장 1식 ( 1,320톤/분 )

- 사업기간 : 2004. 3. ～ 2007. 12.

- 사 업 비 : 10,470백만원(국 6,282 도 1,256 시 2,932)

※‘06년 사업비 : 1,453백만원 (국872  도174  시407)

- ‘06년 추진계획 : 토지보상 협의완료

○ 율곡재해위험지구

- 사 업 량 : 배수펌프장 1식 ( 800톤/분 )

- 사업기간 : 2005. 3. ～ 2007. 12.

- 사 업 비 : 8,404백만원(국 5,042 도 1,008 시 2,354)

※‘06년 사업비 : 786백만원 (국472  도94 시220)

- ‘06년 추진계획 : 토지보상 협의완료

○ 기대효과

- 지역주민의 오랜 숙원사업 해소와 침수피해를 방지함으로서              인명과 재산피해를 최소화

ꊲ 재해예방사업 추진

○ 문산 배수펌프장 유수지 준설 사업

- 사 업 량 :  5,150톤 (준설토)

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 3.

- 사 업 비 : 300백만원 (시300 )

○ 재해예방시스템 확충

- 자동기상관측운용서버 : 1대  12백만원

- CCTV 영상감시장비 설치 및 교체 : 8 개소  115백만원

- 수위 및 강우 노후장비 교체 : 1식 15백만원

- 재해예방 및 응급복구장비 임차 : 100백만원

○ 기대효과

- 유수지의 저수용량 확보 및 방재시설물정비 확충으로 상황발생시          신속한 대응태세를 구축하여 주민의 생명과 재산보호

ꊳ 현장 중심의 재난안전예방사업 추진

○ 특정(중점)관리대상의 상시 정비점검

- 특정(중점)관리대상 : 156개소

교 량	공공시설	가스위험 시 설	다중이용 시 설	유선장	기 타
18	16	50	37	3	32

- 특정관리대상시설 관련분야 전문가(소방,전기,가스)와 합동점검실시

: 분기별 1회(합동점검) 및 수시점검, 안전점검의날(매월4일) 운영

○ 재난발생대비 훈련 강화

- 긴급구조구난훈련 : 06. 6.

- 국가재난대응종합훈련 : 06. 5.

- 지역․마을단위 재난재해 대비 민방위 훈련 : 06. 4. ～ 6.

○ 안전문화운동 추진

- 시민의 안전의식 제고를 위한 홍보 활동

▪ 시 홈페이지에 재난대비 행동요령 및 안전생활수칙 등 자료제공

▪ 포스터 및 글짓기대회 개최 등 시민 참여 유도

- 어린이 안전사고예방 교육 실시

▪ 교통안전, 생활안전 등 관내 초등학교 순회 교육실시

- 국민기초수급자, 장애인시설에 대한 재난예방점검 실시

○ 기대효과

- 특정관리대상의 상시 점검을 통한 재난불안요인 사전제거

- 시민의 안전생활 제고로 인명 및 재산피해 최소화

2006년 하천사업 추진현황

(단위 : 백만원)

번호	구 분		사 업 명	위 치	총 사업량 (km)	사업기간	사 업 비				2006년 공정
							계	기투자 (명시이월)	2006	향후	사 업 구 간(㎞)	보상 (%)	공사 (%)
총 계 8 건					45.98		119,240	12,533 (2,576)	10,292	96,415	5.66
소 계 1 건					17.69		68,880	2,798 (2,465)	250	65,832	0.6
1	국가하천	계속	임진강하도 준설사업	탄현 낙하리~진동 동파리	17.69	04년~08년	68,880	2.798 (2,465)	250	65,832	0.6	-	10%
소 계 2 건					6.68		27,332	5,866	4,833	16,633	1.3
2	지방 하천	계속	삽교천 개수공사	야동동~ 월롱 덕은리	4.79	03년~07년	14,614	5,666	3,333	5,615	1.0	완료	50%
3			분수천 개수공사	광탄 신산리	1.89	05년~08년	12,718	200	1,500	11,018	0.3	20%	10%
소 계 5 건					21.61		23,028	3,869 (111)	5,209	13,950	3.76
4	소하천	계속	팔봉천 개수공사	팔봉4교~ 팔학골입구	0.88	03년~06년	2,150	1,262	888	0	0.54	완료	100%
5			선고개천개수공사	객현국도37호 ~25사단사격장	2.02	03년~06년	1,929	1,427	502	0	0.22	완료	100%
6			밥제천 개수공사	파평 덕천리	3.45	04년~07년	3,410	300	1,000	2,110	1.0	완료	40%
7			새능천 개수공사	선유리동문천 ~ 새능	3.26	04년~07년	5,290	880 (111)	2,669	1,741	2.0	완료	50%
8		신규	수내천 개수공사	군내 정자리 ~방목리	12	06년~09년	10,249	0	150	10,099	-	용역100%