수도환경사업소

보 고 순 서
□	추진목표와 방향	------	4 - 1
□	주요업무 추진계획
	【 환경시설과 소관 】 ○환경기초시설의 기능 및 이미지개선 강화 ○축산폐수 수집․운반비 지원을 통한 하천수질개선 ○아름다운 공중화장실 조성 ○폐수종말처리시설 설치 및 운영사업	------ ------ ------ ------	4 - 2 4 - 4 4 - 5 4 - 6
	【 상수도과 소관 】 ○급수구역 확장 ○안전한 맑은물 공급 ○수질관리와 물 절약 실천운동 전개	------ ------ ------	4 - 9 4 - 10 4 - 12
	【 하수도과 소관 】 ○하수종말처리장 설치 ○하수처리 효율증대 및 수질개선	------ ------	4 - 13 4 - 14

	추진목표와 방향

ꏚ 환경시설과 소관

○ 환경기초시설을 확충, 개선 및 보완함으로써 오염원을 적정관리하여 무분별한. 폐자원 배출로 인한 환경오염을 사전에 예방하고

○ 소규모 축산농가에 대한 지원을 강화하여 축산폐수의    무단방류로 인한 하천오염을 방지하며

○ 파주LCD폐수종말처리시설을 설치하여 공공수역의 수질을 보전하고자 함.

ꏚ 상수도과 소관

○ 상수도시설 확충, 관로정비 및 노후관교체사업을 통하여 안전하고 깨끗한 물을 공급하며

○ 고도정수처리시설을 설치하여 시민이 안심하고 맛있게 마실수 있는 물공급체계를 구축하고

○ 특히 2006년은 간이급수시설 완전정비의 해로 정하여 안심하고 마실 수 있도록 물 공급 신뢰도 구축

ꏚ 하수도과 소관

4 -

○ 하수종말처리장 건설로 택지개발, 신도시조성 등 도시에서 발생하는 오수를 깨끗하게 처리하여 방류수질 개선하고

○ 오․우수관 분리 및 노후관 정비로 공공수역 수질보전과쾌적한 환경 개선

주요업무 추진계획

〔 환경시설과 소관 〕

1. 환경기초시설의 기능 및 이미지개선 강화

○ 환경기초시설의 확충․개선 및 보완하여 자원순환의 효율성을

높이고 오염원을 능동적으로 관리하는 한편,

○ 그동안 혐오시설로 인식된 환경기초시설을 친환경적인 이미지로

기능개선 및 홍보를 강화하고자 함.

ꊱ 음식물쓰레기 공공처리시설 설치사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-4번지 일원

- 사 업 량 : 80톤/일

- 사업기간 : 2004. 2. ～ 2007. 12.

- 사 업 비 : 7,200백만원(국비 2,160 도비 2,520 시비 2,520)

○ 추진계획

- 2006.  2. : 기본 및 실시설계용역 완료

- 2006.  3. : 대형공사 설계심의(경기도)

- 2006.  6. : 공사착공

- 2007. 12. : 종합시운전 및 공사준공

파주시 환경관리센터 이미지 개선사업

○ 사업개요

- 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

- 사 업 량 : 8,495㎡(외벽 그래픽 디자인) / 200백만원(시비 200)

※ 총물량 1,733㎡중 862㎡는 2004년 사업완료

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 4.

○ 추진계획

- 2006.  1. : 설계용역 착수

- 2006.  2. : 설계용역 완료

- 2006.  3. : 공사착공

- 2006.  4. : 공사준공

재활용선별장 소음․대기오염방지시설 설치

○ 사업개요

- 위    치 : 탄현면 낙하리 산 6번지 일원

- 사 업 량 : 소음 및 분진방지시설 설치 1식

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 7.

- 사 업 비 : 250백만원(시비 250)

○ 추진계획

- 2006.  1. : 실시설계용역 착수

- 2006.  2. : 실시설계용역 완료

- 2006.  3. : 공사착공

- 2006.  7. : 공사준공

축산폐수공공처리시설 설치 및 개선사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주읍 봉암리 1003-2번지 일원

- 사 업 량 : 1식(200톤/일 개선보완)

- 사업기간 : 2005. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 3,425백만원(국비 2,552.5 도비 342.5 시비 530)

○ 추진계획

- 2006.  1. : 공사착공 / 06. 10. : 공사준공

ꊵ 분뇨처리시설 개선보완 사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-1번지 일원

- 사 업 량 : 1식(140톤/일 개선보완)

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 1,315백만원(국비 1,052 도비 131 시비 132)

○ 추진계획

- 2006.  1. : 설계용역 착수

- 2006.  3. : 설계용역 완료

- 2006.  4. : 공사착공

- 2006. 10. : 공사준공

ꊶ 환경기초시설 주변지역 지원사업

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍, 파주읍, 월롱면, 탄현면, 적성면 일원

- 사 업 량 : 25개사업(도로포장, 하수도, 소교량, 가드레일, 기타)

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 2,045백만원(시비 2,045)

○ 추진계획

- 2006.  1. : 설계용역 착수

- 2006.  3. : 설계용역 완료

- 2006.  4. : 공사착공

- 2006. 10. : 공사준공

2. 축산폐수 수집․운반비 지원을 통한 하천 수질개선

○ 소규모 축산농가의 영세성으로 인한 축산폐수 자체처리의 어려움      으로 인하여 발생되는 문제점을 해결하고 가축분뇨를 효율적으로      수거함으로서 하천 수질오염을 예방하고자 함

ꊱ 축산폐수 수집․운반비 지원사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주시 전역

- 사 업 량 : 신고대상이하 축산농가 660개소

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 12.

- 사 업 비 : 492백만원(도비 246 시비 246)

▪ 지원금액 : 9원/ℓ(수거․운반비: 7원/ℓ, 처리비: 2원/ℓ)

○ 추진계획

- 2006.  1. : 지원대상 농가 확정

- 2006.  1. ∼ 12. : 매월 보조금 지급

▪ 수거실적에 따라 축산폐수 수거․운반업체 및 처리시설에 월별정산후 지급

3. 아름다운 공중화장실 조성

○ 여러 사람이 이용하는 공중화장실내에 편의시설 설치, 관리용품

지원 등을 통하여 누구나 다시 찾고 싶을 정도로 쾌적하고 깨끗한

공중화장실을 조성하고자 함.

ꊱ 모범화장실 유지관리 사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주시 군내면 점원리 산183번지 제3땅굴외 21개소

- 사 업 량 : 모범화장실 유지관리사업 22개소

- 사업기간 : 2006. 1. ∼ 2006. 12.

- 사 업 비 : 33,600천원 (도비 16,800 시비 16,800)

○ 추진계획

- 2006.  1. : 모범화장실 지정완료

- 2006.  1. ∼ 12. : 매월 모범화장실 관리용품 지원

ꊲ 국도변 개방화장실 지원사업

○ 사업개요

- 위    치 : 국도1호선 및 37호선

- 사 업 량 : 국도변 개방화장실 유지관리사업 20개소

- 사업기간 : 2006. 1. ∼ 2006. 12.

- 사 업 비 : 12,000천원(도비 6,000 시비 6,000)

○ 추진계획

- 2006.  1. : 국도변 개방화장실 지정완료

- 2006.  1. ∼ 12. : 매월 국도변 개방화장실 관리용품 지원

4. 폐수종말처리시설 설치 및 운영사업

○ 산업단지 조성은 국가경쟁력 강화 및 지역경제 활성화

○ 폐수종말처리시설의 국고지원으로 산업단지 분양가를 저렴하게 분양할 수 있어 입주예정업체의 경쟁력 강화

○ 운영관리에 대한 전문지식과 기술, 경영기법을 도입하여 비용절감

으로 행정업무능률 향상 및 관리감독기능과 전문성 도모

ꊱ 파주LCD지방산업단지 폐수종말처리시설 설치사업

○ 사업개요

- 위    치 : 월롱면 덕은리 일원

- 사 업 량 : 230천톤/일 (1단계 7만톤/일, 2단계 7만톤/일, 3단계 9만톤/일)

- 사업기간 : 2004. 1 ～ 2009. 6

- 사 업 비 : 174,093백만원(국비 100%)

▪ 1단계 : 53,313백만원, 2단계 : 42,041백만원, 3단계 : 78,739백만원

○ 추진계획

- 2006.  6. 30 : 1단계 준공

- 2007.  4.  1 : 2단계 1계열 시운전 개시

- 2007.  9. 30 : 2단계 설치사업 준공

- 2007.  7.  1 : 3단계 설치공사 착공

- 2009.  6. 30 : 3단계 설치공사 준공

ꊲ 문산첨단지방산업단지 폐수종말처리시설 설치사업

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 선유리 일원

- 사 업 량 : 15천톤/일 (1단계 10천톤/일, 2단계 5천톤/일)

- 사업기간 : 2005. ～ 2009. 6

- 사 업 비 : 37,616백만원(국비 100%)

▪ 1단계 : 29,312백만원, 2단계 : 8,304백만원

※ 기본계획 승인완료에 따른 총사업비 및 단계별 사업비 변경

○ 추진계획

- 2006.  1.  6 : 기본계획 승인완료

- 2006.  2. 13 : 공사입찰공고(긴급)

- 2006.  6.  1 : 우선시공분 공사착공 및 실시설계

- 2007.  8.  1 : 1단계 1계열(5천톤/일) 시운전 개시

- 2007. 11.  1 : 1단계 2계열(5천톤/일) 시운전 개시

- 2008.  3. 31 : 1단계(1만톤/일) 공사 준공

ꊳ 파주LCD지방산업단지 폐수종말처리시설 운영관리 위탁용역

○ 사업개요

- 위    치 : 월롱면 덕은리 일원

- 사 업 량 : 1단계 70,000톤/일(총230,000톤/일)

- 사업기간 : 2005. 12 ～ 2009. 5. 31

- 사 업 비 : 4,608백만원(1단계)

○ 기본방향

- 폐수종말처리시설 운영의 효율성과 전문성 최대 증진

- 일간/월간/년간 정기점검계획 수립 및 이행

- 시설물 이력카드 작성 및 유지보수 결과 전산화 추진

- 각종 계측장비의 주기적인 정도검사 실시

주요업무 추진계획

〔 상수도행정 분야 〕

1. 급수구역 확장

지하수를 이용하는 지역에 상수도 공급을 통한 주거환경 개선

ꊱ 상수도 공급체계 구축

○ 사업개요

- 사 업 량 : L=26.977㎞, 배수지 2개소, 가압장 1개소

▪ 2단계(교하) : L=10.577km, 배수지 1개소(98,000톤)

▪ 3단계(월롱) : L=16.4km, 배수지 1개소(60,900톤), 가압장 1개소

- 사업기간 : 2000. 3. ～ 2008. 12.

- 사 업 비 : 51,738백만원(도비 7,527 시비 44,211)

▪ 2단계(교하) : 27,098백만원, ▪ 3단계(월롱) : 24,640백만원

○ 추진계획

- 2006.  3. : 교하배수지 공사착공

- 2006.  3. : 3단계 수도사업인가

- 2007. 12. : 교하배수지 공사준공

- 2008. 12. : 3단계 공사완료

※ 광탄,법원은 수도정비기본계획에 반영하여 2006년도부터 사업추진

ꊲ 농어촌 지방상수도 확장공사

○ 사업개요

- 사 업 량 : D=150㎜, L=2.4㎞

- 사업대상 : 광탄면 영장리 ～ 특공연대

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 562백만원(국비 500 도비 62)

○ 추진계획

- 2006.  3. : 공사착공

- 2006. 10. : 공사준공

2. 안전한 맑은물 공급

임진강 상수원을 고도정수처리로 질을 높여 나가고 유수율 제고를   통한 수도행정의 질을 높여 나가겠음

ꊱ 고도정수처리시설 설치사업

○ 사업개요

- 사 업 량 : 96천㎥/일

- 사업기간 : 1996. 3. ～ 2007. 12.

- 사 업 비 : 27,158백만원(국비 13,579 도비 6,790 시비 6,789)

▪ 확  보  액 : 12,727백만원(국비 5,913 도비 2,957 시비 3,857)

▪ 향후투자액 : 14,431백만원(국비 7,666 도비 3,833 시비 2,932)

○ 추진계획

- 2006.  3. : 공사착공

- 2007. 12. : 공사준공

ꊲ 노후관 교체사업

○ 사업개요

- 사 업 량 : L=3.1km

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 9.

- 사 업 비 : 1,000백만원(도비 300 시비 700)

○ 추진계획

- 2006.  2. : 설계용역 완료

- 2006.  3. : 공사착공

- 2006.  9. : 공사준공

ꊳ 간이상수도 정비사업

○ 사업개요

- 사 업 량 : 취/정수 개선 15개소 및 노후관 개량 공사

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 9.

- 사 업 비 : 1,500백만원(도비 120 시비 1,380)

○ 추진계획

- 2006.  2. : 설계용역 완료

- 2006.  3. : 공사착공

- 2006.  9. : 공사준공

ꊴ 상수원보호구역 주민지원사업

○ 사업개요

- 사 업 량 : 금파2리 노인정보수외 8개사업

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 536백만원(국비 161 시비 375)

○ 추진계획

- 2006.  3. : 설계완료

- 2006.  4. : 공사착공

- 2006. 10. : 공사준공

3. 수질관리와 물 절약 실천운동 전개

○ 물의 소중함과 중요성을 널리 알려 물 수급의 불균형을 사전에

예방하고 효율적인 물관리 대책 추진

○ 시민이 안심하고 마실 수 있는 양질의 물 공급

ꊱ 수질관리 강화

○ 사업개요

- 사 업 량

▪ 문산정수장 탁도계 구입 (1대)

▪ 먹는물 수원에서의 병원성 미생물 분포실태 조사 (분기 1회 원생동물)

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 57백만원

○ 추진계획

- 2006. 1. : 원수 및 정수의 탁도연속측정장치 구입

- 2006. 3. : 병원성미생물의 기초자료 축적 및 관리강화를 위한 실태조사

ꊲ 물 학교 현장학습실시

○ 사업개요

- 교육대상 : 관내 초․중․고등학생

- 교육시간 : 2시간

- 교육장소 : 문산정수장 내

- 교육방법 : 시청각교육 및 현장학습 실시

○ 추진계획

- 2006. 1. : 물 학교 교재 제작(1,000부)

- 2006. 2. : 물 학교 기념품 제작

주요업무 추진계획

〔 하수도행정 분야 〕

1. 하수종말처리장 설치

○ 택지개발, 신도시 조성 등 도시개발에 따른 발생 오수를 깨끗하게      처리하여 공공수역의 수질개선

○ 방류수역 수질오염 방지를 통한 생태계 보호

ꊱ 문산하수처리장 설치사업

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 당동리 129-1외 3개소

- 사 업 량 : 시설용량 17,000톤/일, 차집관로 25.74㎞(문산외 3개소)

(문산 7,500 파주 4,500 법원 3,000 광탄 2,000)

- 사업기간 : 2004. 5. ～ 2007. 5.

- 사 업 비 : 43,528백만원(양여금 21,423 지방비 17,330 기타 4,775)

○ 추진계획

- 2006. 12.    : 하수처리장 시운전 가동

- 2007.  5.    : 공사 준공

ꊲ 통일동산 하수처리장 설치사업

○ 사업개요

- 위    치 : 탄현면 법흥리 1298번지 일원

- 사 업 량 : 시설용량 16,000톤/일, 차집관로 5.02㎞

- 사업기간 : 2003. 2. ～ 2006. 4.

- 사 업 비 : 39,585백만원(국비 4,106 원인자 35,479)

○ 추진계획

- 2006.  4.    : 공사 준공

ꊳ 운정지구 하수처리장 설치사업

○ 사업개요

- 위    치 : 교하읍 와동리 846일원(A=60,349㎡)

- 사 업 량 : 65,000㎥/일

- 사업기간 : 2006. 10. ～ 2009. 3.

- 시 행 청 : 대한주택공사

- 사 업 비 : 101,000백만원(처리장 91,000 슬러지 소각시설 10,000)

○ 추진계획

- 2006.  1. : 하수도정비기본계획 변경승인

- 2006.  6. : 하수처리장 설계완료 및 비관리청 사업시행허가 신청

- 2006.  9. : 환경부 설계자문 및 비관리청 사업시행 허가

- 2006. 10. : 공사착공

- 2008.  9. : 시운전 개시

- 2009.  3. : 공사 준공

2. 하수처리 효율증대 및 수질개선

○ 공공수역의 수질보전을 위한 오․우수관 분리 및 노후하수관 정비

○ 하수관거에서 발생하는 침입수(유입수) 및 누수량 저감

ꊱ 금촌하수관거 정비사업

○ 사업개요

- 위    치 : 금촌동, 조리읍 봉일천리 일원

- 사 업 량 : L=63km

- 사업기간 : 2004. ～ 2008.

- 사 업 비 : 59,000백만원(국비 37,416 시비21,584)

(단위:백만원)

년도별 투자계획
계	2004년	2005년	2006년	2007년이후
59,000	2,286	5,571	8,936	42,207

○ 추진계획

- 2006.  1. : 실시설계 적격심의

- 2006.  2. : 공공하수도 설치사업 인가 및 공사착공

- 2008. 12. : 공사 준공예정

ꊲ 문산하수관거 정비사업

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 문산리․선유리 일원

- 사 업 량 : L=84km

- 사업기간 : 2005. ～ 2009.

- 사 업 비 : 51,202백만원(국비 32,020 시비 19,182)

(단위:백만원)

년도별 투자계획
계	2004년	2005년	2006년	2007년이후
51,202	-	1,200	-	50,002

○ 추진계획

- 2006.  4. : 기본계획 용역 완료

- 2006.  5. : 턴키공사 적격자 선정 공고

- 2006. 10. : 턴키공사 적격자 선정

- 2006. 11. : 실시설계 착수

- 2007.  2. : 실시설계 완료 및 공사착공

- 2009. 12. : 공사 준공예정

ꊳ 하수관거정비 BTL사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주, 법원, 광탄, 금촌(새말 등) 일원

- 사 업 량 : L=162km (파주59㎞ 법원46㎞ 광탄25㎞ 금촌(새말 등)32㎞)

- 사업기간 : 2006. ～ 2009.

- 사 업 비 : 90,000백만원(국비 57,508 시비 32,492)

┍ 파주 : 30,067백만원

┞ 법원 : 25,764백만원

┞ 광탄 : 14,024백만원

┕ 금촌(새말 등) : 20,145백만원

○ 추진계획

- 2006.  1. : 위․수탁 협약체결 및 기초조사․기본계획 용역 착수(2006. 5. 준공)

- 2006.  6. : 민간투자 대상 사업지정 및 고시

- 2006. 11. : 제안서 접수․평가 (※ 협상 및 실시협약 체결)

- 2006. 12. : 공사 착공

- 2009. 12. : 공사 준공예정

ꊴ 노후하수관 정비사업

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 외 11개 읍면동

- 사 업 량 : L=8.18km

- 사업기간 : 2003. ～ 2007.

- 사 업 비 : 15,042백만원(도비 7,521 시비 7,521)

(단위:백만원)

년도별 투자계획
계	2004년 까지	2005년	2006년	2007년
15,042	4,100	3,000	2,018	5,924

○ 추진계획

- 2006.  1. : 실시설계용역 착수(‘06. 2. 완료)

- 2006.  2. : 일상감사 및 공사입찰

- 2006.  3. : 공사착공

- 2006.  9. : 공사완료 예정