수도환경사업소

보 고 순 서
□	추진목표와 방향	------	4 - 1
□	기본현황
	○인력현황 및 과별주요업무	------	4 - 2
□	주요업무 추진계획
	【 환경시설과 소관 】 ○환경기초시설 설치 및 시설개선․보완 추진 ○축산폐수 수집․운반비 지원을 통한 하천수질개선 ○아름다운 공중화장실 조성 ○폐수종말처리시설 설치사업	------ ------ ------ ------	4 - 3 4 - 7 4 - 8 4 -10
	【 상수도과 소관 】 ○상수도 급수체계 구축 ○안전한 맑은물 공급 ○수질관리와 물 절약 실천운동 전개	------ ------ ------	4 -12 4 - 14 4 - 16
	【 하수도과 소관 】 ○하수종말처리장 설치 및 운영 ○하수관거 정비사업	------ ------	4 - 17 4 - 19

	추진목표와 방향

ꏚ 환경시설과 소관

○ 친환경 폐기물처리시스템 구축을 위한 환경기초시설 확충

○ 효율적인 축산폐수처리를 위한 영세축산농가 지원확대

○ 안정적인 산업폐수처리를 위한 폐수종말처리시설 설치

ꏚ 상수도과 소관

○ 상수도 시설 확충 및 정비로 안정적인 물 공급체계 구축

○ 맛있고 깨끗한 물 공급을 위한 고도정수처리시설 추진

○ 시민들이 안심하고 마실 수 있는 물 관리시스템 강화

ꏚ 하수도과 소관

4 -

○ 생활하수의 환경친화적 처리를 위한 하수종말처리장 건설

○ 체계적인 하수관 정비로 효율적인 하수처리시스템 구축

기  본  현  황

1. 인력현황

계		4급		5급		6급		7급		8∼9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
67	67	1	1	3	3	13	13	16	16	17	17	17	17

2. 과별 주요업무

과 별	담 당 별	주 요 업 무	비 고
환경시설과	운영총괄담당	사업소 계약, 예산 및 운영총괄
	시 설 담 당	환경기초시설 설치 및 운영
	오수관리담당	오수,분뇨 및 축산폐수 관련 인허가
	산업폐수담당	산업폐수처리시설 설치 및 운영
상수도과	수도행정담당	상수도과 계약, 예산 및 운영총괄
	수도요금담당	상수도 요금 부과 및 징수
	급수담당	노후관교체 및 급수관리
	수도시설담당	상수도시설 확충 및 관로설치
	정수장담당	정수장 관리 및 수질검사
하수도과	하수행정담당	하수도사용료 부과징수
	하수관리담당	하수관거정비 및 노후하수관 개량사업
	하수시설담당	하수종말처리시설설치 및 운영

주요업무 추진계획

〔 환경시설과 소관 〕

1. 환경기초시설 설치 및 시설개선․보완 추진

○ 환경기초시설을 설치 및 개선․보완하여 친환경적인 폐기물처리

시스템을 구축하여 자원순환의 효율성을 도모하고 오염원을 적극

관리하는 한편, 그동안 혐오시설로 인식된 환경기초시설의 이미지를

개선하여 생활속의 친근감 있는 시설물로 자리매김해 나가고자 함.

ꊱ 음식물쓰레기 공공처리시설 설치사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주읍 봉암리 1043-1번지 일원

- 사 업 량 : 음식물처리시설 1식(처리용량 : 80톤/일)

- 사업기간 : 2005. 1. ～ 2007. 12.

- 사 업 비 : 14,000백만원(국비 4,200 도비 4,900 시비 4,900)

○ 그간추진상황

- 2006.  3. : 기본 및 실시설계용역 완료

- 2006.  6. : 지방재정투․융자 재심의 완료

【총사업비 변경 72억⇒140억】

○ 추진계획

- 2006.  9. : 공사착공

- 2007. 12. : 공사준공

ꊲ 축산폐수공공처리시설 개선보완 사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주읍 봉암리 1003-2번지 일원

- 사 업 량 : 시설개선보완 1식(200톤/일)

- 사업기간 : 2005. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 3,425백만원(국비 2,553 도비 342 시비 530)

○ 그간추진상황

- 2006.  4. : 공사착공(공정율 50%)

○ 추진계획

- 2006. 10. : 공사준공

ꊳ 분뇨처리시설 개선보완 사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-1번지 일원

- 사 업 량 : 시설개선보완 1식(140톤/일)

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 1,315백만원(국비 1,052 도비 131 시비 132)

○ 그간추진상황

- 2006.  4. : 공사착공(공정율 60%)

○ 추진계획

- 2006. 10. : 공사준공

ꊴ 비위생 매립지 정비사업

○ 사업개요

- 위    치 : 적성면 두지리 2-14번지 일원

- 사 업 량 : 비위생 매립지 정비 1식(16,000㎡)

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2007. 7.

- 사 업 비 : 2,980백만원(국비 1,490 도비 745 시비 745)

○ 그간추진상황

- 2006.  5. : 설계용역 완료

○ 추진계획

- 2006.  7. : 공사착공

- 2007.  7. : 공사준공

ꊵ 재활용선별장 소음․분진 방지시설 설치

○ 사업개요

- 위    치 : 탄현면 낙하리 산 6번지 일원

- 사 업 량 : 소음 및 분진방지시설 설치 1식

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 8.

- 사 업 비 : 250백만원(시비 250)

○ 그간추진상황

- 2006.  4. : 공사착공(공정율 60%)

○ 추진계획

- 2006.  8. : 공사준공

ꊶ 파주시 스포츠센터 수영장 증설사업

○ 사업개요

- 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

- 사 업 량 : 수영장 증설 25m×7레인

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 2,500백만원(시비 2,500)

○ 그간추진상황

- 2006.  5. : 공사착공(공정율 30%)

○ 추진계획

- 2006. 10. : 공사준공

ꊷ 파주시 환경관리센터 이미지 개선사업

○ 사업개요

- 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

- 사 업 량 : 외벽(4,558㎡) 그래픽 디자인

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 8.

- 사 업 비 : 200백만원(시비 200)

○ 그간추진상황

- 2006.  4. : 공사착공(공정율 90%)

○ 추진계획

- 2006.  8. : 공사준공

ꊹ 환경기초시설 주변지역 지원사업

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍, 파주읍, 월롱면, 탄현면, 적성면 일원

- 사 업 량 : 21개사업(도로포장, 하수도, 소교량, 가드레일, 기타)

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 1,705백만원(시비 1,705)

○ 그간추진상황

- 2006.  3. : 공사착공(공정율 80%)

○ 추진계획

- 2006. 10. : 공사준공

2. 축산폐수 수집․운반비 지원을 통한 하천 수질개선

○ 소규모 축산농가가 축산폐수 자체처리의 어려움으로 인하여           발생되는 문제점을 해결하고 가축분뇨를 효율적으로 수거, 처리함       으로써 하천 수질오염을 예방하고자 함

ꊱ 축산폐수 수집․운반비 지원사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주시 전역

- 사 업 량 : 716개소(신고대상이하 축산농가)

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 12.

- 사 업 비 : 492백만원(도비 246 시비 246)

▪ 지원금액 : 9원/ℓ(수거․운반비: 7원/ℓ, 처리비: 2원/ℓ)

○ 그간추진상황

- 2006.  1. : 지원대상 농가 확정

○ 추진계획

- 2006.  1. ∼ 12. : 매월 보조금 지급

▪ 수거실적에 따라 축산폐수 수거․운반업체 및 처리시설에 월별정산후 지급

3. 아름다운 공중화장실 조성

○ 다수이용 공중화장실내에 편의시설 설치 및 관리용품 비치 등으로      사용자에게 깨끗하고 쾌적한 공간을 조성하여 이용하기에 편한      화장실을 제공하고자 함.

ꊱ 모범화장실 유지관리 사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주시 군내면 점원리 산183번지 제3땅굴외 20개소

- 사 업 량 : 21개소

- 사업기간 : 2006. 1. ∼ 2006. 12.

- 사 업 비 : 33,600천원 (도비 16,800 시비 16,800)

○ 그간추진상황

- 2006.  1. : 모범화장실 지정

○ 추진계획

- 2006.  1. ∼ 12. : 매월 모범화장실 관리용품 지원

▪지원금액 : 200천원/월 지원(시․군설치 공중화장실)

100천원/월 지원(민간모범화장실)

ꊲ 국도변 개방화장실 지원사업

○ 사업개요

- 위    치 : 국도1호선 및 37호선

- 사 업 량 : 20개소

- 사업기간 : 2006. 1. ∼ 2006. 12.

- 사 업 비 : 12,000천원(도비 6,000 시비 6,000)

○ 그간추진상황

- 2006.  1. : 국도변 개방화장실 지정

○ 추진계획

- 2006.  1. ∼ 12. : 매월 국도변 개방화장실 관리용품 지원

▪ 지원금액 : 50천원/월 지원

ꊳ 공중화장실 개보수공사

○ 사업개요

- 위    치 : 군내면 점원리 일대

- 사 업 량 : 제3땅굴, 전망대

- 사업기간 : 2006. 5. ∼ 2006. 8.

- 사 업 비 : 50,000천원(도비 50,000)

○ 그간추진상황

- 2006.  6. : 실시설계용역 완료

○ 추진계획

- 2006.  7. : 공사착공

- 2006.  8. : 공사준공

4. 폐수종말처리시설 설치사업

○ 산업단지내에 폐수종말처리시설을 설치하여 발생폐수를 적정처리      함으로써 입주업체의 비용절감 도모로 경쟁력을 강화하는 한편,      방류수역의 수질개선을 통한 수질오염을 예방하고자 함.

ꊱ 파주LCD지방산업단지 폐수종말처리시설 설치사업

○ 사업개요

- 위    치 : 월롱면 덕은리 일원

- 사 업 량 : 230천톤/일(1단계 : 7만톤/일, 2단계 : 7만톤/일, 3단계 : 9만톤/일)

- 사업기간 : 2004. 1. ～ 2009. 6.

- 사 업 비 : 174,093백만원(국비 100%)

1단계 : 53,313백만원, 2단계 : 42,041백만원, 3단계 : 78,739백만원

○ 그간추진상황

가. 1단계

- 2004.  7. : 1단계 공사착공

- 2005.  6. : 1단계 1계열 시운전

- 2006.  1. : 1단계 2계열 시운전

나. 2단계

- 2005. 12. : 2단계 공사착공

○ 추진계획

- 2006. 11. : 1단계(7만톤/일) 준공

- 2007.  9. : 2단계(7만톤/일) 준공

- 2009.  6. : 3단계(9만톤/일) 준공

ꊲ 문산첨단지방산업단지 폐수종말처리시설 설치사업

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 선유리 일원

- 사 업 량 : 15천톤/일(1단계 : 10천톤/일, 2단계 : 5천톤/일)

- 사업기간 : 2005. 1. ～ 2008. 3.

- 사 업 비 : 37,654백만원(국비 100%)

1단계 : 29,312백만원, 2단계 : 8,342백만원

○ 그간추진상황

가. 1단계

- 2006.  6. : 공사착공

○ 추진계획

- 2007.  9. : 1단계 1계열(5천톤/일) 시운전

- 2007. 12. : 1단계 2계열(5천톤/일) 시운전

- 2008.  3. : 1단계(10천톤/일) 공사준공

- 2009년이후 : 2단계(5천톤/일) 공사준공

주요업무 추진계획

〔 상수도과 소관 〕

1. 상수도 급수체계 구축

○ 상수도 시설 확충 및 관로정비 사업을 추진하여 안전하고 깨끗한      물을 시민들에게 공급하고자 함.

ꊱ 파주상수도 2단계 확장사업

○ 사업개요

- 사 업 량 : 배수관로(L=10.577㎞)

.배수지 2개소(교하, 법원 106,500톤/일)

- 사업기간 : 2003. 7. ～ 2007. 12.

- 사 업 비 : 27,098백만원(도비 2,599 시비 24,499)

○ 그간추진상황

- 2004.  4. : 배수관로 공사착공

- 2004.  6. : 수도사업인가(환경부)

- 2005.  4. : 배수관로 공사준공

- 2005.  8. : 군협의완료(68천톤/일 → 98천톤/일)

- 2005. 12. : 수도사업변경인가

○ 추진계획

- 2006. 10. : 공사착공

- 2007. 12. : 공사준공

ꊲ 파주상수도 3단계 확장사업

○ 사업개요

- 사 업 량 : 배수관로(L=17.43㎞)

.배수지 2개소(월롱, 광탄 79,000톤/일)

- 사업기간 : 2004. 7. ～ 2008. 12.

- 사 업 비 : 24,640백만원(도비 4,742 시비 19,898)

○ 그간추진상황

- 2004.  7. : 지방재정투․융자심사(경기도)

- 2005.  7. : 실시설계 용역착수

- 2006.  3. : 실시설계 용역완료

○ 추진계획

- 2006.  7. : 수도사업인가 신청

- 2007.  3. : 공사착공

- 2008. 12. : 공사준공

ꊳ 상수도관로 확장공사

○ 사업개요

- 사 업 량 : 16개소 / L=45.125㎞

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 7,602백만원 (국비 500 도비 662 시비6,440)

○ 그간 추진상황

- 2006.  4. : 공사착공(공정율 70%)

○ 추진계획

- 2006. 10. : 공사준공

2. 안전한 맑은물 공급

○ 임진강 상수원수를 고도정수처리하여 질을 높여 나가고 유수율       .제고를 통하여 수도행정의 질을 높여 나가겠음

ꊱ 고도정수처리시설 설치사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주시 문산읍 선유리 산100-2번지 일원

- 사 업 량 : 96천톤/일

- 사업기간 : 1996.  3. ～ 2008. 12.

- 사 업 비 : 27,158백만원(국비 13,579 도비 6,790 시비 6,789)

○ 그간 추진상황

- 2004.  1. : 수도사업인가신청

- 2005.  4. : 수도사업인가 변경인가신청

- 2006.  6. : 건설기술심의 완료(경기도)

○ 향후계획

- 2006. 10. : 공사착공

- 2008. 12. : 공사준공

ꊲ 노후관 교체사업

○ 사업개요

- 사 업 량 : L=3.1km

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 9.

- 사 업 비 : 1,000백만원(도비 300 시비 700)

○ 그간추진상황

- 2006.  5. : 공사착공(공정율 90%)

○ 추진계획

- 2006.  9. : 공사준공

ꊳ 간이상수도 정비사업

○ 사업개요

- 사 업 량 : 취/정수 및 노후관개량 15개소

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 1,500백만원(도비 120 시비 1,380)

○ 그간추진상황

- 2006.  5. : 공사착공(공정율 70%)

○ 추진계획

- 2006. 10. : 공사준공

ꊴ 상수원보호구역 주민지원사업

○ 사업개요

- 사 업 량 : 금파2리 노인정보수외 6개사업

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 536백만원(국비 161 시비 375)

○ 그간추진상황

- 2006.  4. : 공사착공(공정율 50%)

○ 추진계획

- 2006. 10. : 공사준공

3. 수질관리와 물 절약 실천운동 전개

○ 체계적인 수질관리를 위한 장비구입으로 시민이 안심하고 마실 수      있는 양질의 물을 공급하는 한편 물 학교를 연중내내 운영함으로써      자라나는 세대에게 물의 소중함과 중요성을 널리 알리고자 함.

ꊱ 수질관리 강화

○ 사업개요

- 사 업 량

․ 먹는물 수질검사기관 지정 추진

․ 문산정수장 탁도계 구입 (1대)

․ 먹는물 수원에서의 병원성 미생물 분포실태 조사 (분기 1회 원생동물)

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 비 : 57백만원(시비 57)

○ 추진계획

- 2006.  1. : 원수 및 정수의 탁도연속측정장치 구입

- 2006.  3. : 병원성미생물 기초자료 수집 및 관리를 위한 실태조사

ꊲ 물 학교 현장학습실시

○ 사업개요

- 교육대상 : 관내 초․중․고등학생

- 교육시간 : 2시간

- 교육장소 : 문산정수장 내

- 교육방법 : 시청각교육 및 현장학습 실시

○ 추진계획

- 2006.  1. : 물 학교 교재 제작(1,000부) 및 교육대상자 선정

- 2006.  2. ～ 12. : 연중 물학교 운영

○ 그간추진상황

- 2006.  6. : 광탄종고외 3개교 총 109명 참가

주요업무 추진계획

〔 하수도과 소관 〕

1. 하수종말처리장 설치 및 운영

○ 하수처리장 건설로 하수로 인한 수질오염을 예방하는 한편,

도시하수의 재순환시스템을 구축함으로써 우리가 쓰고 버린

생활하수를 정화하여 환경오염을 예방하고자 함.

ꊱ 문산하수처리장 설치사업

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 당동리 129-1외 3개소

- 사 업 량 : 17,000톤/일, 차집관로 25.74㎞(문산외 3개소)

(문산 7,500 파주 4,500 법원 3,000 광탄 2,000)

- 사업기간 : 2004. 5. ～ 2007. 5.

- 사 업 비 : 43,528백만원(국비 21,423 지방비 17,330 기타 4,775)

○ 그간추진상황

- 2005.  3. : 공사착공(공정율 79%)

○ 추진계획

- 2006. 12. : 시운전

- 2007.  5. : 공사준공

ꊲ 금촌하수처리장 운영

○ 사업개요

- 위    치 : 파주시 금촌동 714번지 일원

- 시설용량 : 27,000㎥/일

- 처리공법 : HDF(한화유로변경형 질소․인 고도처리기술)

- 처리구역 : 금촌동, 아동동, 봉일천리

- 운영업체 : (주)파주엔바이로

○ 그간추진상황

- 2003.  3. : 공사착공

- 2005.  3. : 공사준공

ꊳ 통일동산하수처리장 운영

○ 사업개요

- 위    치 : 탄현면 법흥리 1,298번지 일원

- 시설용량 : 16,000㎥/일

- 처리공법 : Denipho(간헐포기접촉산화방식)

- 처리구역 : 통일동산, 출판문화산업단지, 교하택지개발지구

- 운영업체 : (주)환경시설관리공사

○ 그간추진상황

- 2003.  2. : 공사착공

- 2005. 12. : 시운전

- 2006.  5. : 하수처리장 민간위탁 통합운영 개시

ꊴ 적성하수처리장 운영

○ 사업개요

- 위    치 : 적성면 가월리 193번지 일원

- 시설용량 : 2,000㎥/일

- 처리공법 : 선회와류식 - SBR

- 처리구역 : 마지리, 구읍리, 두지리

- 운영업체 : (주)환경시설관리공사

○ 그간추진상황

- 2001.  5. : 공사착공

- 2003.  9. : 공사준공

2. 하수관거 정비사업

○ 주거지역내 하수의 원활한 배수와 우기시 침수를 방지하기 위해

오․우수관을 분리하고 낡은 하수관을 교체하는 등 체계적인 하수관거      정비로 보다 효율적인 하수처리시스템을 구축하고자 함.

ꊱ 금촌하수관거 정비사업

○ 사업개요

- 위    치 : 금촌동, 조리읍 봉일천리 일원

- 사 업 량 : L=63km

- 사업기간 : 2004. ～ 2008.

- 사 업 비 : 59,000백만원(국비 39,856 시비 19,144)

○ 그간추진상황

- 2006.  3. : 공사착공(공정율 11%)

○ 추진계획

- 2008. 12. : 공사준공

ꊲ 문산하수관거 정비사업

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 문산리․선유리 일원

- 사 업 량 : L=42km

- 사업기간 : 2005. ～ 2010.

- 사 업 비 : 51,202백만원(국비 32,020 시비 19,182)

○ 그간추진상황

- 2005. 12. : 기본계획용역 착수

○ 추진계획

- 2006.  8. : 기본계획 용역 완료

- 2007.  2. : 공사착공

- 2010. 12. : 공사준공

ꊳ 하수관거정비 BTL사업

○ 사업개요

- 위    치 : 파주, 법원, 광탄, 금촌(새말 등) 일원

- 사 업 량 : L=162km (파주59㎞ 법원46㎞ 광탄25㎞ 금촌(새말 등)32㎞)

- 사업기간 : 2006. ～ 2010.

- 사 업 비 : 90,000백만원(국비 57,508 시비 32,492)

┌ 파주 : 30,067백만원

├ 법원 : 25,764백만원

├ 광탄 : 14,024백만원

┕ 금촌(새말 등) : 20,145백만원

○ 그간추진상황

- 2006.  6. : 기본계획용역 착수

○ 추진계획

- 2007.  1. : 사업계획서 평가 및 우선협상 대상자 지정

- 2008.  1. : 실시계획 승인 협의(경기도)

- 2008.  2. : 공사착공

- 2010. 12. : 공사준공

ꊴ 노후하수관 정비사업

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 당동리 외 12개 읍면동

- 사 업 량 : L=3.46km

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 7.

- 사 업 비 : 1,903백만원(도비 951 시비 952)

○ 그간추진상황

- 문산 당동2리(190m, 140백만원) [3.17 : 착공 / 5.15 : 준공]

- 파주 향양리(410m, 180백만원) [4. 5 : 착공 / 5.14 : 준공]

- 파주 파주4리(300m, 120백만원) [3.27 : 착공 / 5.25 : 준공]

- 법원 금곡2리(260m, 150백만원) [3.27 : 착공 / 5.25 : 준공]

- 교하 산남리(330m, 160백만원) [4. 6 : 착공 / 7. 4 : 준공]

- 교하 상지석2리(210m, 150백만원) [4. 5 : 착공 / 6. 3 : 준공]

- 조리 등원1리(250m, 150백만원) [3.20 : 착공 / 5.18 : 준공]

- 월롱 영태6리(300m, 160백만원) [4. 5 : 착공 / 6. 3 : 준공]

- 탄현 법흥리(93m, 43백만원) [3.22 : 착공 / 5.20 : 준공]

- 파평 눌노리(200m, 120백만원) [3.24 : 착공 / 4.22 : 준공]

- 광탄 신산2리(200m, 130백만원) [3.23 : 착공 / 5.21 : 준공]

- 적성 어유지2리(200m, 100백만원) [3.27 : 착공 / 5.25 : 준공]

- 검산동(520m, 300백만원) [4.10 : 착공 / 7. 8 : 준공]