도시개발사업소

보 고 순 서
□	추진목표와 방향	------	5 - 1
□	기본현황
	○인력현황 및 과별주요업무	------	5 - 2
□	주요업무 추진계획
	【 공영개발과 소관 】 ○ 첨단정보화 미래도시 건설 ○ 교하지구/금촌지구 택지개발 사업 ○ LCD 클러스터 구축	------ ------ ------	5 - 3 5 - 5 5 - 7
	【 균형개발과 소관 】 ○ 미군반환공여지 개발 추진 ○ 주민 숙원사업 추진 ○ 녹지 및 공원 확충 ○ 가로경관 및 녹지대 관리	------ ------ ------ ------	5 - 10 5 - 11 5 - 13 5 - 14
	【 도시관리과 소관 】 ○ 도시미관 조성 사업 추진 ○ 주․정차질서 확립 및 주차공간 확충 ○ 가로환경 조성 및 현장처리기동대 운영	------ ------ ------	5 - 15 5 - 17 5 - 19

	추진목표와 방향
\

5 -

ꏚ 미래지향적인 도시개발 및 DISPLAY산업 클러스터 구축

○ 자족도시 기반 구축으로 친수환경 생태도시와 어우러진

미래 첨단정보화 신도시 건설

○ 안정적인 주택공급과 복지사회 건설을 위한 택지개발사업 추진

○ 세계 최고의 DISPLAY산업 CRUSTER 구축을 위한 LCD지방

산업단지, 문산첨단산업단지, 파주월롱 첨단산업단지 조성 추진

ꏚ 균형개발행정 분야

○ 주한미군반환지 개발로 지역간 균형발전과 주민의 복리증진 도모

○ 낙후지역의 체계적인 집중투자로 주민의 정주생활환경 개선

및 생산기반시설 정비

○ 공원녹지 조성 및 도시녹화사업으로 쾌적한 도시환경을 창출

하여 시민의 휴식공간 제공

ꏚ 도시관리행정 분야

○ 대표도시 이미지에 걸맞는 광고물 정비

○ 주정차 단속 및 주차공간 확충으로 깨끗한 거리조성

○ 쾌적한 가로환경 조성을 통한 시민 보행권 확보

○ 불편사항 현장해결로 시민주의 봉사행정 구현

기  본  현  황

1. 인력현황

계		4급		5급		6급		7급		8∼9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
49	49	1	1	3	3	12	15	13	8	11	11	9	11

2. 과별 주요업무

과 별	담 당 별	주 요 업 무	비 고
공영개발과	이주총괄담당	계약, 택지지구 및 산업단지내 이주, 보상, 불법행위 지도단속
	택지개발담당	파주운정신도시 조성, 금촌(2)지구 택지개발사업, 교하지구 택지개발사업
	산업입지담당	파주LCD지방산업단지, 문산첨단산업단지, 파주월롱 첨단산업단지, 지방․국가지방산업단지
균형개발과	균형개발담당	미군반환공여지 개발추진 및 국가균형발전 업무
	숙원사업담당	소규모 주민숙원사업, 민북개발사업, 접경지역지원사업
	녹지공원담당	녹지공원조성 및 녹지대 관리
도시관리과	광고물1담당	광고물 시책사업 추진, 옥외광고물 인․허가, 옥외광고물 지도단속
	광고물2담당	현수막걸이대 등 광고시설물 관리, 옥외광고물 지도단속
	주차관리1담당	공영주차장 확충, 부설주차장 관리, 불법주정차 지도단속, 주정차과태료 체납관리
	주차관리2담당	주정차과태료 부과, CCTV 확충 및 관리, 불법주정차 지도단속
	가로물관리담당	가로․보안등 설치 및 유지보수, 현장처리민원기동대 운영, 노점상 및 노상적치물 지도단속

주 요 업 무 보 고

〔 공영개발과 〕

1. 첨단정보화 미래도시 건설

○ 친수 환경 생태도시, 복합문화 체험도시, 수도권 서북부 거점도시,

자족도시 기반 및 U-City 구축

ꊱ 파주운정신도시 조성

○ 사업개요

- 위    치 : 교하읍 와동․야당․동패․목동․다율․상지석․당하리 일원

- 사 업 량 : 2,850천평(9,423천㎡)

- 수용인구 : 46,054세대(124천명)

- 사업기간 : 2003. 5. ～ 2009. 12.

- 시 행 자 : 파주시, 대한주택공사(대한주택공사 자체자금)

○ 추진상황

- 2003.  5. 20 : 운정신도시 1단계지구 택지개발계획 승인 고시

- 2003. 12. 13 : 운정신도시 2단계지구 지정 고시

- 2004.  5. 18 : 운정신도시 1단계지구 보상협의 통보

- 2004. 12. 30 : 운정신도시 지구지정 변경, 통합개발계획 및 1단계

지구 실시계획 승인

- 2005.  6. 30 : 운정신도시 1단계지구 1공구 착공

- 2005. 12. 15 : 운정신도시 2단계지구 보상협의 통보

- 2006.  2. 10 : 1단계지구 2, 3공구 착공

○ 향후계획

- 2006. 11.  : 통합실시계획 승인

- 2006. 12.  : 2단계지구 착공

- 2008. 12.  : 최초 입주

- 2009. 12.  : 택지개발사업 준공

ꊲ 제2자유로 및 김포-관산간 도로 건설

○ 사업개요

구 분	제2자유로	김포-관산간 도로
사업구간	운정지구～대화I.C～강매I.C ～상암동	장월I.C～운정I.C
사업규모	연장 24.9km / 6차로	연장 7.6 km / 6～8 차로
사업기간	2003 ～ 2009
시행주체	파주운정시행자(파주시, 주택공사)
사업비	14,792억원 ※ 운정시행자(11,075)/교하 시행자(2,059)/국제전시장(1,658)	4,052억원

○ 추진상황

- 2006.  4. 20 : 광역교통개선대책 심의 요청(도⇒건교부)

- 2006.  5. 17 : 광역교통 검토작업반 회의(건교부)

- 2006.  5. 18～22 : 광역교통 실무협의회(건교부, 서면자문)

- 2006.  7.  5 : 대도시권 광역교통위원회 심의 결정

○ 향후계획

- 2006.  9.  : 사전환경성검토서 작성 및 관련기관 협의

- 2006. 12.  : 교통 및 환경영향평가

- 2007.  3.  : 도로구역결정

- 2007.  5.  : 토지보상 착수

- 2007.  9.  : 공사착수(착공후 27개월)

- 2009. 12.  : 도로준공

2. 교하지구/금촌지구 택지개발 사업

○ 효율적인 택지개발사업으로 주택난 해소 및 주거생활의 안정화와

도시의 건전한 발전 도모

ꊱ 교하지구 택지개발 사업

○ 사업개요

- 위    치 : 교하읍 문발․다율․동패리 일원

- 사 업 량 : 618천평(2,043천㎡)

- 수용인구 : 10,406세대(32천명)

- 사업기간 : 2000. 11. ～ 2006. 12.

- 시 행 자 : 한국토지공사

○ 추진상황

- 1997.  7. 22 : 택지개발예정지구 지정(건교부고시 제1997-240호)

- 2000. 11. 10 : 택지개발예정지구 변경지정 및 개발계획 승인

- 2001.  8. 24 : 택지개발예정지구 변경지정 및 개발계획 변경 승인

- 2003.  4. 15 : 개발계획 변경 및 실시계획, 지구단위계획 승인,

대지조성공사 착공

- 2005. 12. 20 : 공동주택 주민 최초 입주

○ 향후계획

- 2006.  7.  : 대지조성공사 완료

- 2006. 10.  : 교하～덕이간 도로 준공

- 2006. 12.  : 공공시설(중앙공원, 도로 등) 인수인계 및 사업준공

ꊲ 금촌지구 택지개발 사업

○ 사업개요

- 위    치 : 금촌․금릉동 일원

- 사 업 량 : 309천평(1,019천㎡)

∙ 금촌1지구 : 48천평 / 금촌2지구 : 261천평

- 수용인구 : 9,744세대(31천명)

∙ 금촌1지구 : 1,842세대(6천명) / 금촌2지구 : 7,902세대(25천명)

- 사업기간

∙ 금촌1지구 : 1996. 11. 29 ～ 2005.  1. 24(사업준공)

∙ 금촌2지구 : 1999.  4. 30 ～ 2006.  9. 30

- 시 행 자 : 파주시, 대한주택공사 공동시행(1지구 : 주공 단독시행)

○ 추진상황

- 1997. 10. 27 : 택지개발예정지구 지정(건교부고시 제1997-346호)

- 1999.  4. 30 : 택지개발계획 승인

- 1999. 10. 19 : 택지개발계획 및 실시계획 변경 승인

- 2003. 12. 15 : 택지개발예정지구 변경지정, 개발계획 및 실시계획

변경 승인

- 2004. 12. 28 : 택지개발계획 및 실시계획 변경 승인

- 2005.  7.  1 : 1공구 사업준공(건교부고시 제2005-209호)

- 2005. 12. 26 : 택지개발계획 및 실시계획 변경 승인

- 2006.  6. 27 : 택지개발계획 및 실시계획 변경 승인(사업기간 연장)

○ 향후계획

- 2006.  9. 30 : 택지개발사업 준공

3. LCD 클러스터 구축

○ 낙후된 접경지역에 대규모 LCD관련 투자유입과 중소기업 유치로      지역경제 활성화와 지역균형 개발

ꊱ 파주LCD지방산업단지

○ 사업개요

- 위    치 : 파주시 월롱면 덕은리, 탄현면 금승리 일원

- 사 업 량 : 513천평/1,696천㎡

- 사 업 비 : 334,910백만원

(도비 11,000  시비 11,000  기타 312,910)

- 사업기간 : 2003 ～ 2007

- 시 행 자 : 파주시, 경기지방공사 공동시행

- 입주업체 : LG.philips LCD사, 대성가스(주), 한국SMT(주), 희성전자

○ 추진상황

- 2004.  2. 11 : 실시계획 승인

- 2006.  1.  2 : 7세대 공장 가동 및 TFT-LCD 양산

- 2006.  1. 16 : 8세대 공장 착공

- 2006.  4. 27 : 7세대 라인 공장 건축 준공식

- 2006.  6. 30 : 부지조성공사 98%

○ 향후계획

- 2006. 11. : 지구지정 및 실시계획(변경) 승인

- 2006. 12. : 부지조성(토목)공사 완료

- 2007.  6. : 부지조성(조경)공사 완료

- 2007. 12. : 산업단지 준공 및 시설물 인계인수

ꊲ 문산첨단산업단지 조성

○ 사업개요

- 위    치 : 파주시 문산읍 당동리, 선유리 일원

- 사 업 량 : 591천평(1,953천㎡)

∙ 외투기업 전용단지(당동) - 194천평 ( 640천㎡)

∙ 국내기업 협력단지(선유) - 397천평 (1,313천㎡)

- 사 업 비 : 511,452백만원

(도비 14,032  시비 14,032  기타 483,388)

- 사업기간 : 2004 ～ 2008(2개지구 동시개발)

- 시 행 자 : 파주시, 경기지방공사 공동시행

- 입주업체 : LCD관련 약 60여개업체

○ 추진상황

- 2004. 11. 15 : 지구지정 승인

- 2005.  6. 24 : 실시계획 승인

- 2005.  7. 22 : 부지조성공사 착공

- 2006.  6. 23 : (주)파주전기초자(1단계) 공장건축 준공

○ 향후계획

- 2006. 11. : 지구지정 및 실시계획(변경) 승인

- 2007. 12. : 부지조성공사 완료

- 2008.  6. : 산업단지 준공 및 시설물 인계인수

ꊳ 파주월롱 첨단산업단지 조성

○ 사업개요

- 위    치 : 파주시 월롱면 능산리, 문산읍 내포리 일원

- 사 업 량 : 253천평(835천㎡)

- 사 업 비 : 300,000백만원

- 사업기간 : 2006 ～ 2009

- 시 행 자 : 파주시, 경기지방공사 공동시행

- 입주업체 : LG전자, LG화확, LG이노텍, LG마이크론

○ 추진상황

- 2006.  1. 26 : 산업단지 입지후보지 결정

- 2006.  1. 27 : 개발행위허가 제한고시

- 2006.  3.  2 : 정부지원반 1차회의 개최

- 2006.  5. 19 : 개발행위허가 제한(변경고시)

- 2006.  6.  2 : 군부대 협의 완료(3차)

- 2006.  6. 23 : 사전환경성 검토서 협의 완료

- 2006.  7.  4 : 사전재해영향평가 협의 완료

○ 향후계획

- 2006. 10. : 지구지정 승인

- 2007.  6. : 제영향평가(환경, 인구, 교통, 재해) 협의완료

- 2007.  9. : 실시계획 승인 및 공사착공

- 2009.  8. : 산업단지 준공

주 요 업 무 보 고

〔 균형개발과 〕

1. 미군반환공여지 개발 추진

○ 미군반환공여구역 및 그 주변지역을 효율적으로 개발하여

지역간의 균형 있는 발전과 주민의 복리 증진 도모

○ 공여지 현황

기지명	위 치	공여면적 (평)	반환시기	비 고
계	6개소	56만평
캠프하우즈	조리읍 봉일천리	19만평	2007년 이후
캠프에드워드	월롱면 영태리	8만평	2007년 이후
캠프자이언트	문산읍 선유리	5만평	2007년 이후
캠프게리오웬	문산읍 선유리	9만평	2007년 이후
캠프그리브스	군내면 백연리	7만평	2007년 이후
캠프스텐톤	광탄면 신산리	8만평	2007년 이후
불스아이원외 6개소	파평면 율곡리 등	2,612만평	2008년 이후

※ 본 자료는 국방부에서 제공한 자료임.

○ 추진상황

- 미군반환공여지 전담 T/F팀 구성

- 미군반환공여구역주변지역등지원특별법 제정(2006. 3. 3)

- 시행령(안) 검토의견 제출

○ 향후계획

- 2006년 9월 3일까지 시행령 및 시행규칙 제정

- 향후 지침 및 규정에 의거 종합개발계획 수립

2. 주민숙원사업추진

○ 낙후된 접경지역 및 민북지역 개발로 주민의 정주여건 조성과

소득기반 조성

○ 마을회관 증·개축으로 주민의 정보공유 및 휴식공간 제공

ꊱ 접경지역 지원사업

○ 사업개요

- 사업내용 : 생활환경 개선․생산기반 시설정비

- 사 업 량 : 금곡리 농로개설 및 포장공사외 11건 / 24.8 km

- 사 업 비 : 5,994백만원(국비 4,196  도비 1,798)

○ 추진상황 : 12건(완료10, 공사중2)/진도 92%

○ 향후계획

- 금곡2리 마을안길포장 및 하수도공사(2006. 7. 30 준공예정)

- 법원4리 초리골 특화마을조성공사(2006. 9. 30 준공예정)

ꊲ 민통선 북방지역 개발사업

○ 사업개요

- 사업대상 : 파주시 민통선지역(탄현면․군내․진동)

- 사업내용 : 생산 및 생활 기반시설

- 사 업 량 : 읍내리 농로포장공사 외 7건 / 10.5 km

- 사 업 비 : 2,100백만원(도비 1,050  시비 1,050)

○ 추진상황 : 8건(완료7, 공사중1)/진도 93%

○ 향후계획

- 방목리～초리간지방도 확장공사(2006. 8. 30 준공예정)

ꊳ 소규모 주민숙원사업

○ 사업개요

- 사업내용 : 기반시설, 생활시설, 복지시설 확충․개량

- 사 업 량 : 영태리 교량재가설 및 용수로 복개공사 외 2건

- 사 업 비 : 700백만원(시비)

○ 추진상황 : 사업완료/진도 100%

마을회관 신․증축

○ 사업개요

- 사 업 량 : 9개소(문산2, 파주1, 법원1, 조리3, 적성1, 금촌1동1)

- 사 업 비 : 1,240백만원(시비)

○ 추진상황 : 9개소(완료6, 공사중3)/진도 90%

※ 문산읍 2, 법원읍 1, 조리3 준공

○ 향후계획

- 파주2리 마을회관외 2개소(2006. 8. 30 준공예정)

3. 녹지 및 공원 확충

○ 공원을 계획적․체계적으로 조성하는 기틀을 마련하고 소규모

토지는 매입하여 공원을 조성하는 한편,

○ 생활권 등산로를 정비․조성하여 시민의 건강 휴양과 정서함양에 기여

ꊱ 녹지 및 공원의 조성

○ 사 업 장 : 학교숲 조성외 3개사업

○ 사 업 비 : 970백만원

(국비 40 도비 320 시비 610)

○ 사 업 량

- 학교·도시숲 조성(5개소)/영어마을 녹화사업/1억그루나무심기(4개소)

○ 추진상황 : 10개소(완료9, 공사중1)/진도 93%

- 학교숲 조성 1개소(임진초교)에 대하여는 10월 완료예정

ꊲ 2006년도 마을꽃 축제 개최

○ 사업개요

- 사업위치 : 파주시 교하읍 서패리

- 사 업 비 : 450백만원(시비)

- 사 업 량 : 28천평(42가구)

- 사업기간 : 2006. 3. ～ 2007. 5.

○ 추진상황

- 종합개발계획용역 추진중(2006. 1. ～ 현재)

○ 향후계획

- 2006.  8. : 용역 완료 및 사업착수

- 2006. 10. : 마을꽃 축제 기반조성 완료

4. 가로경관 및 녹지대 관리

○ 급진전 하는 도시화로 녹지공간이 현저히 부족한 실정으로 아름      다운 가로경관 조성과 지속적인 녹지대 관리로 쾌적한 휴식공간      확보 및 시민들의 삶의 질 향상에 기여

ꊱ 가로수 및 꽃길 조성

○ 사업대상 : 통일로 꽃길조성외 6개사업

○ 사 업 비 : 600백만원(시비)

○ 사 업 량

- 무궁화 가로수 식재 : 1개소

- 통일로·자유로 및 주요도로변 꽃길조성 : 77㎞

- 가로수 이식·가지치기 : 3식

- 나무은행 운영 : 1식

○ 추진상황 : 7건(완료2, 공사중5)/진도 87%

○ 향후계획

- 통일로 및 자유로 꽃길조성외 4개사업(2006. 10. 30 준공예정)

ꊲ 녹지대 관리

○ 사업대상 : 통일동산외 5개구역

○ 사 업 비 : 920백만원(시비)

○ 사 업 량

- 통일로·교하출판단지내 및 통일동산지구내 녹지대 관리

- 주요도로변 및 소공원 녹지대 관리

- 금촌택지개발지구내 공원 및 녹지 유지관리

○ 추진상황 : 민간위탁 추진중/진도 70%

※ 파주시산림조합, 동서조경산업, 호림조경(주)

주 요 업 무 보 고

〔 도시관리과 〕

1. 도시미관 조성 사업 추진

○『간판이 아름다운 거리』시범사업 확대 추진

○ 광고물 정비 및 표준통합안내표지판 설치로 깨끗한 도시환경 조성

ꊱ『간판이 아름다운 거리』사업 추진

○ 사업개요

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 정비구간 : 금촌 농업기반공사 ⇔ 금촌의료원

- 사 업 량 : 19동 89업소 155간판

- 사 업 비 : 490백만원

- 사업내용 : 옥외광고물 표준모델(안)에 의거 광고물 교체 정비

○ 추진상황

- 2006.  5. 15 : 옥외광고물표준모델(안) 확정

- 2006.  5. 19 : 실시설계 착공(2006. 7. 17 완료예정)

○ 향후계획

- 2006.  8. 10 : 업체 선정 및 사업 착공(2006. 10월까지 정비완료)

ꊲ 불법광고물 지속정비

○ 사업개요

- 불법광고물 단속반의 365일 운영체제 구축

- 지주이용광고물을 카드화하여 체계적인 관리지도

- 포순이 어머니 봉사대, 실버경찰대 등 민간단체 참여 유도

○ 정비실적(상반기)

- 불법광고물 정비 : 162,212건(유동 161,614건/ 고정 598건)

- 어머니포순이 봉사대 정비활동 : 5회 4,340건 수거

○ 향후계획

- 취약시기(휴일․야간) 불법광고물 지도단속 강화

- 불법광고물 수거 어머니봉사대 야간단속 : 월2회 이상

ꊳ 표준 통합안내표지판 확대 설치

○ 사업개요

- 설치기간 : 2006. 3. ～ 2006. 8.

- 설치지역 : 12개 읍․면․동

- 사 업 량 : 60개소(대형 30개소, 소형 30개소)

- 사 업 비 : 141백만원

○ 추진상황

- 2006.  3. 16 : 읍․면․동 예산재배정

- 2006.  5. 30 : 설치 완료

○ 향후계획

- 2006년도 하반기 추가수량 조사 및 설치 확대

2. 주․정차질서 확립 및 주차공간 확충

○ 단속위주에서 자율적인 주민참여 행정으로 전환하여 주․정차

질서문화 정착

○ 도심지 주차공간 확충을 통해 주차난 해소 및 주민편익 증진

ꊱ 주정차 질서확립

가. 주정차 단속

○ 단속반 편성 : 10개반 19명, 차량 14대(견인차 3대)

○ 대상지역 : 7개 읍․면․동 주정차 금지지역

- 금촌1․2동, 문산읍, 교하읍, 조리읍, 광탄면, 월롱면

○ 활동계획

- 평일(주간) : 10개조 14대,  야간 및 휴일 : 4개조 5대

나. 주민자율단속 확대

○ 대상지역 : 광탄면

- 야간 및 휴일 자율주차 관리 ⇒ 평일 주간까지 확대 실시

○ 실버경찰대, 번영회 등 사회단체 적극 활용

- 봉사자 실비보상(급식비 및 피복비 등)

다. 금촌동 무인단속카메라(CCTV) 설치 확대

○ 사 업 량 : 14대

- 금촌북부농협～ 순달교 사거리～금촌 로타리(12), 금촌2동사무소앞, 시청앞

○ 사 업 비 : 700백만원

○ 추진상황

- 2006.  6. 15 : 착공(2006. 8. 29 완료예정)

ꊲ 공영주차장 확충사업 추진

가. 공영주차장 조성사업

○ 사업개요

- 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 10.

- 사 업 량 : 4개소 240면(금촌택지 지구내)

- 사 업 비 : 450백만원

○ 추진상황

- 금촌택지지구 4개소 공사중(2006. 7월말 완료예정)

나. 임시공영주차장 조성사업

○ 사업개요

- 사업기간 : 2006. 2. ～ 2006. 10.

- 사 업 량 : 22개소 1,500면

- 사 업 비 : 850백만원

○ 추진상황

- 2006. 1. 1. ～ 6. 30 : 8개소 705면(금촌 7, 문산 1) 조성완료

※ 6개소 425면 공사중(2006. 8월말 완료예정)

3. 가로환경 조성 및 현장처리기동대 운영

○ 주요 도로변 가로등 설치로 야간통행 편의제공과 밝은 거리 조성

○ 절전형 보안등 설치로 에너지 절약, 예산절감 및 노후시설 개선

○ 생활불편 사항을 찾아가 해결해 주는 시민주의 행정구현

ꊱ 가로등 정비사업 추진

○ 정비기간 : 2006. 1. ～ 2006. 12.

○ 사 업 량 : 가로등 신설, 가로등 유지보수(3개권역)

○ 사 업 비 : 830백만원

○ 추진상황

- 2006.  1. 26 : 가로등 유지보수 연간단가계약 체결(최종)

- 2006.  6. 19 : 시경계 가로등(81등) 착공

- 2006.  6. 20 : 지방도 가로등(447등) 설치 완료

○ 향후계획

- 2006.  7. 30 : 파주시 경계 가로등 설치 완료예정

- 2006. 12월까지 가로등 유지보수 지속실시(3개권역)

ꊲ 절전형 보안등 교체사업

○ 사업기간 : 2006. 4. ～ 2006. 10.

○ 사 업 량 : 보안등 8,641등(교체 8,161등, 신설 480등)

○ 사 업 비 : 3,649백만원(ESCO사업자 선투자, 에너지 절감액으로 상환)

○ 사업내용

- 램 프  교 체 : 나트륨(288W) → 삼파장(85W)

- 점멸방식개선 : 수동식 → 자동식

- 보안등 관리 프로그램 및 D/B 구축

○ 추진상황

- 2006.  4. 21 : 사업계약 및 착공, 자재승인 및 제작

- 2006.  6.  2 : 보안등 교체 착수(현공정 45%)

○ 향후계획

- 2006. 10. 17 : 사업완료 예정

ꊳ 노점상 및 노상적치물 단속

○ 단속기간 : 2006. 1. ～ 2006. 12.

○ 단속지역 : 금촌동 및 통일동산, 교하택지

○ 단속인원 : 12명(직원 6명, 용역업체 6명)

○ 기대효과

- 깨끗한 거리환경 조성 및 시민 보행권 확보

ꊴ 현장처리기동대 지원활동 확대

○ 사업개요

- 운영기간 : 2006. 1. 1 ～ 12. 31

- 운영인원 : 2개반 10명(반장 2, 운전 2, 전기 2, 일용 4)

- 운영장비 : 2대(크레인 탑재 1톤트럭)

○ 향후계획

가. 시민불편사항 처리기간 단축

▪ 당일 민원접수 ⇒ 당일 현장출동 처리

▪ 365일 휴일없이 운영(매일 22:00까지 근무)

나. 시민불편사항 조기 해결

▪ 가로․보안등 보수, 도로파손 복구

▪ 도로상 차량 및 보행장애 시설물 제거, 가로수 제거 및 정리

▪ 가로변 표지판 바로세우기, 불법광고물 및 방치쓰레기 제거

▪ 기타 상․하수도, 교통시설 등 불편사항 정비

다. 저소득 및 소외계층 옥내 노후 전기시설 등 정비

▪ 대  상 : 7개 읍․면 39가구

▪ 기  간 : 2006. 7. 4 ～ 11. 21(주 2회 실시)