2006 행정사무감사

도시산업위원회

2006 행정사무감사자료

도시개발사업소

목 차
	【공영개발과】
11-1.	운정신도시 조성 추진현황
11-2.	제2자유로 및 김포～관산간 도로건설 추진현황
11-3.	월롱첨단산업단지 조성 추진현황
11-4.	문산첨단산업단지 조성 추진현황
11-5.	출판문화정보국가산업단지 조성 추진현황
	【균형개발과】
12-1.	미군반환공여지 개발 추진현황
12-2.	민통선 북방지역 개발사업 추진현황
12-3.	접경지역 지원사업 추진현황
12-4.	학교숲 조성 등 녹지 및 공원조성사업 현황
12-5.	꽃마을 축제 추진사항
12-6.	통일동산 등 녹지대 관리현황
12-7.	취약지 정비사업 추진현황
12-8.	소규모 주민편익사업 추진현황
12-9.	파주시 산림조합 위탁 사업현황

목 차
	【도시관리과】
13-1.	「간판이 아름다운 거리」사업 추진현황
13-2.	불법광고물 정비 실적 현황
13-3.	공영주차장 확충사업 추진현황
13-4.	현장처리기동대 운영 현황
13-5.	절전형 보안등 교체사업
13-6.	읍면별 지주간판 설치현황

11-1. 운정신도시 조성 추진현황

확 인 자 : 공영개발과장  우 범 찬 (인)

작 성 자 : 택지개발담당  나 호 준 (인)

□ 사업개요

○ 위    치 : 교하읍 와동․야당․동패․목동․다율․상지석․당하리 일원

○ 사 업 량 : 2,850천평(9,423천㎡)

○ 수용인구 : 46,054세대(124천명)

○ 사업기간 : 2003. 5. ～ 2009. 12.

○ 시 행 자 : 파주시, 대한주택공사 공동시행

□ 추진상황

○ 2003.  5. 20 : 1단계지구 택지개발계획 승인 고시

○ 2003. 12. 13 : 2단계지구 지정 고시

○ 2004.  5. 18 : 1단계지구 보상협의 통보

○ 2004. 12. 30 : 지구지정 변경, 통합개발계획 및 1단계지구 실시계획 승인

○ 2005.  6. 30 : 1단계지구 착공

○ 2005. 12. 15 : 2단계지구 보상협의 통보

○ 2006.  8.  4 : 제영향평가 심의 신청(건교부)

□ 향후계획

○ 2006. 11.    : 통합실시계획 승인

○ 2006. 12.    : 2단계지구 착공

○ 2008. 12.    : 최초 입주

○ 2009. 12.    : 택지개발사업 준공

11-2. 제2자유로 및 김포～관산간 도로건설 추진현황

확 인 자 : 공영개발과장  우 범 찬 (인)

작 성 자 : 택지개발담당  나 호 준 (인)

□ 사업개요

구 분	제2자유로	김포~관산간 도로
사업구간	운정지구～대화I.C～강매I.C ～상암동	장월I.C～운정I.C
사업규모	연장 24.9km / 6차로	연장 7.6 km / 6～8 차로
사업기간	2003 ～ 2009
시행주체	파주운정시행자(파주시, 주택공사)
사업비	14,792억원 ※ 운정시행자 - 11,075 교하시행자 - 2,059 국제전시장 - 1,658	4,052억원

□ 추진상황

○ 2006.  4. 20 : 광역교통개선대책 심의 요청(도⇒건교부)

○ 2006.  7.  5 : 대도시권 광역교통위원회 심의 결정(건교부)

○ 2006.  8. 17 : 지방도 노선인정 승인 신청(⇒도)

□ 향후계획

○ 2006.  9.    : 사전환경성검토서 작성 및 관련기관 협의

○ 2006. 10.    : 노선인정 승인

○ 2007.  1.    : 교통 및 환경영향평가

○ 2007.  5.    : 도로구역결정

○ 2007.  6.    : 토지보상 착수

○ 2008.  1.    : 공사착수

○ 2009. 12.    : 도로준공

11-3. 월롱첨단산업단지 조성 추진현황

확 인 자 : 공영개발과장  우 범 찬 (인)

작 성 자 : 산업입지담당  이 은 갑 (인)

□ 사업개요

○ 위    치 : 월롱면 능산리, 문산읍 내포리 일원

○ 사 업 량 : 253천평(835천㎡)

○ 사 업 비 : 2,516억원(도비 45   시비 45   기타 2,426)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2009

○ 시 행 자 : 파주시, 경기지방공사 공동시행

○ 입주업체 : LG전자, LG화학, LG이노텍, LG마이크론

□ 추진상황

○ 2006.  1. 26 : 산업단지 입지후보지 결정

○ 2006.  1. 27 : 개발행위허가 제한고시

○ 2006.  3.  2 : 정부지원반 1차회의 개최(산업자원부)

○ 2006.  6.  2 : 군부대 협의 완료(3차)

○ 2006.  7.  4 : 사전환경성 검토 및 사전재해영향성 검토 협의 완료

○ 2006.  7. 25 : 지구지정 승인 신청(시 → 경기도)

○ 2006.  8. 18 : 공업용지(산업단지) 공급물량 승인(건설교통부)

□ 향후계획

○ 2006. 10.    : 지구지정 승인

○ 2007.  6.    : 제영향평가(환경, 인구, 교통, 재해) 협의 완료

○ 2007.  9.    : 실시계획 승인 및 공사착공

○ 2009.  8.    : 산업단지 준공

11-4. 문산첨단산업단지 조성 추진현황

확 인 자 : 공영개발과장  우 범 찬 (인)

작 성 자 : 산업입지담당  이 은 갑 (인)

□ 사업개요

○ 위    치 : 문산읍 당동․선유리, 파주읍 향양리 일원

○ 사 업 량 : 591천평(1,953천㎡)

∙ 외투기업(당동) : 194천평(640천㎡)

∙ 국내기업(선유) : 397천평(1,313천㎡)

○ 사 업 비 : 5,114억원(도비 140   시비 140   기타 4,834)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2008(2개지구 동시개발)

○ 시 행 자 : 파주시, 경기지방공사 공동시행

○ 입주업체 : LCD관련 약 90여개업체(당동 : 15개업체, 선유 : 75개업체)

○ 추진공정 : 당동 - 40%, 선유 - 75%

□ 추진상황

○ 2004. 11. 15 : 지구지정 승인

○ 2005.  6. 24 : 실시계획 승인

○ 2005.  7. 22 : 부지조성공사 착공

□ 보상협의 실적

○ 당동지구

(단위:백만원)

구 분	보상대상		취 득		재결신청		필 지 대 비 비 율 (%)
	필지(건)	금액	필지(건)	금액	필지(건)	금액
합 계	498	156,012	496	155,925	-		99
토 지	355	145,616	353	145,529	-	-	99
지장물	143	10,396	143	10,396	-	-	100

※ 미취득 토지내역

수자원공사 환매권토지 : 1필지 133㎡

무주부동산            : 1필지 219㎡

○ 선유지구

(단위:백만원)

구 분	보상대상		취 득		재결신청		필 지 대 비 비 율 (%)
	필지(건)	금액	필지(건)	금액	필지(건)	금액
합 계	807	137,294	807	137,294	-	-	100
토 지	685	131,202	685	131,202	-	-	100
지장물	122	6,092	122	6,092	-	-	100

□ 이주 및 생활대책 수립

○ 이주대책

∙ 공익사업을위한토지등의취득및손실보상에관한법률 제78조 및 동법

시행령 제40조에 근거하여 사업지구내 주거용 건축물이 수용되어

생활근거를 상실한 자를 위해 이주단지를 조성하여 50～70평의 이주자 택지를

공급(당동지구 : 51명, 선유지구 : 65명)

○ 생활대책

∙ 사업시행으로 생활수단을 상실한 영농 및 축산, 영업 보상자에게

경기지방공사 용지규정에 근거하여 8평 규모의 사업지구내 근린상가

용지를 조합형식으로 공급(당동지구 : 96명, 선유지구 : 123명)

□ 향후계획

○ 2006. 11.    : 지구지정 및 실시계획(변경) 승인

○ 2007. 12.    : 부지조성공사 완료 및 시설물 인계인수

○ 2008.  6.    : 산업단지 준공

11-5. 출판문화정보국가산업단지 조성 추진현황

【 한국토지공사 소관 】

□ 사업개요

○ 위    치 : 교하읍 산남․문발․서패리 일원

○ 사 업 량 : 472천평(1,560천㎡)

∙ 1단계 : 265천평(874천㎡),  2단계 : 207천평(686천㎡)

○ 사업기간 : 1997. 4. ～ 2008. 12.(2004. 1 - 1단계 준공 인가)

○ 유치업종

∙ 1단계 : 출판업, 상업인쇄 및 인쇄관련 서비스업, 출판유통업

∙ 2단계 : 출판업, 상업인쇄 및 인쇄관련 서비스업, 영상산업, 소프트웨어산업

□ 추진상황

○ 1997.  3. 26 : 국가산업단지 지정 및 개발계획 승인

○ 1997. 12. 31 : 실시계획 승인(서울지방국토관리청고시 제1997-283호)

○ 1998. 10. 24 : 부지조성공사 착공

○ 2000.  6. 26 : 1단계 실시계획 변경 승인

○ 2004.  1.  9 : 1단계 개발사업, 준공인가

○ 2005.  3. 24 : 2단계 개발사업, 지구지정 변경 승인

○ 2006.  5. 10 : 재해영향평가 완료

□ 향후계획

○ 2006. 12.    : 교통영향평가 협의

○ 2007.  8.    : 실시계획 승인

○ 2007. 12.    : 공사 착공

○ 2008.  6.    : 분양 실시

○ 2008. 12.    : 공사 완료

12-1. 미군반환공여지 개발 추진현황

확 인 자 : 균형개발과장  최 귀 남 (인)

작 성 자 : 균형개발담당  이 종 칠 (인)

구 분	기 지 명	위 치	면 적		비 고
			㎡	평
계			1,851,863	560,187
1	캠프 하우즈	조리읍 일원	636,009	192,392
2	캠프 에드워드	월롱면 일원	251,531	76,088
3	캠프 자이언트	문산읍 일원	171,171	51,779
4	캠프 게리오웬	문산읍 일원	285,138	86,254
5	캠프 스텐톤	광탄면 일원	271,273	82,060
6	캠프 그리브스	군내면 일원	236,741	71,614

○ 현    황

○ 추진사항

∙2005.12   : 도시기본계획에 시가화 예정용지 반영 요청(건교부 심의중)

∙2006. 3. 3 : 미군반환공여구역주변지역등 지원 특별법 제정

∙2006. 8.29 : 특별법 시행령 국무회의 통과

∙2006. 9. 1 : 미군반환공여지 개발용역 발주

○ 향후추진일정

∙2007. 03. : 개발구상 용역 수립(파주시)

∙2007. 09. : 발전종합계획 수립(경기도▸행자부 승인)

∙2008. 03. : 연도별 사업계획 수립(경기도▸행자부 승인)

∙2008. 09. : 사업시행자 지정(파주시)

12-2. 민통선 북방지역 개발사업 추진현황

확 인 자 : 균형개발과장  최 귀 남 (인)

작 성 자 : 숙원사업담당  김 순 태 (인)

□ 총    괄

(금액단위:백만원)

총 계		2006년도		2005년도
사업건수	사업비	사업건수	사업비	사업건수	사업비
15	3,600	8	2,100	7	1,500

□ 연도별 사업내역

(금액단위:백만원)

번호	사 업 명	사업량	사업비	진도율	비고
계	15		3,600
1	읍내리농로포장공사	L= 550m	80	완료	2006
2	조산리농로포장공사(1.2지구)	L=1,750m	240	완료
3	조산리용수로설치공사(1.2지구)	L= 430m	210	완료
4	어룡리농로포장공사(1,2지구)	L=1,650m	220	완료
5	조산리농로포장공사(3.4지구)	L=1,700m	210	완료
6	어룡리농로포장공사(3,4지구)	L=1,700m	220	완료
7	방목-초리간지방도확,포장장공사	L=2,230m	620	85%
8	대동-만우간 농수로정비공사	L= 430m	300	완료
9	조산리 농로포장공사	B=3m,L=2,200m	300	완료	2005
10	방목리 농로포장공사	B=3m,L=1,200m	300	완료
11	정자리 농로포장공사	B=4m,L=2,000m	180	완료
12	조산리 마을간이상수도개선사업	관정 1개소	100	완료
13	하포리 농로포장공사	B=3m,L=600m	120	완료
14	용산리 농로포장공사	B=3m,L=1,000m	200	완료
15	대동-만우간 농로포장공사	B=3m,L=2,000m	300	완료

12-3. 접경지역 지원사업 추진현황

확 인 자 : 균형개발과장  최 귀 남 (인)

작 성 자 : 숙원사업담당  김 순 태 (인)

□ 총    괄

(금액단위:백만원)

총 계		2006년도		2005년도
사업건수	사업비	사업건수	사업비	사업건수	사업비
29	11,149	12	5,994	17	5,155

□ 연도별 사업내역

○ 2006년도분

(금액단위:백만원)

번호	사 업 명	사업량	사업비	진도율	비고
계	12건		5,994
1	금곡1리농로개설및포장공사	L= 1,200m	306	완료
2	금곡2리마을안길포장및하수도정비공사	L=1,420m	311	완료
3	직천리마을안길포장및세천정비공사	L=1,180m	514	완료
4	법원4리초리골특화마을조성공사	1식 4개사업	1,350	75%
5	오금리농로포장및호안공사	L=5,100m	500	완료
6	금곡2리도로개설및배수로공사	L=520m	460	완료
7	율곡4리석축공사	L=2,000m	540	완료
8	자장리농로포장공사	L=3,600m	500	완료
9	자장리하수도정비공사	L=1,300m	413	완료
10	적암리배수로정비공사	L=800m	350	완료
11	적암리상수도확장공사	L=1,000m	150	완료
12	백연리마을안길포장및옹벽설치공사	L=4,870m	600	완료

○ 2005년도분

(금액단위:백만원)

번호	사 업 명	사업량	사업비	진도율	비고
계	17건		5,155
1	장산리 농로포장등	L=2,000m	322	완료
2	장산리 세천정비	L=400m	204	완료
3	직천리 농로포장	L=2,830m	315	완료
4	직천리 세천정비	L=383m	171	완료
5	금곡리 세천정비등	L=400m,L=600m	383	완료
6	오금리 농로포장	L=4,000m	500	완료
7	발랑1리 다목적회관신축	(2층 60평)	124	완료
8	발랑2리 마을진입로 확포장	L=250m	276	완료
9	발랑3리 세천정비	L=400m	100	완료
10	장파리 농로포장등	L=3km,L=600m	400	완료
11	장파리 하천정비	L=200m	190	완료
12	눌노리 교량 설치	B=6m,L=20m	200	완료
13	눌노리하수도 및 용수로 정비	L=420m	170	완료
14	율포리 농수로 설치	L=1,500m	600	완료
15	적암리 세천정비	L=500m	500	완료
16	백연리 다목적회관	2층 80평	400	완료
17	법원4리 특화마을	1식	300	완료

12-4. 학교숲 조성 등 녹지 및 공원조성사업 현황

확인자 균형개발과장 최 귀 남(인)

작성자 녹지공원담당 박 호 석(인)

【학교숲 조성사업】

□ 총    괄

(금액단위:백만원)

총 계		2006년도		2005년도
사업건수	사업비	사업건수	사업비	사업건수	사업비
6	550	3	250	3	300

□ 연도별 사업내역

(금액단위:백만원)

번호	사 업 명	사업량	사업비	진도율	비고
계	6		550
1	학교숲 조성사업(연풍초교)	1,300㎡	250	완료	2006
2	학교숲 조성사업(문산중)	1,500㎡		완료
3	학교숲 조성사업(임진초등)	200㎡		조성중
4	학교숲 조성사업(문산북중)	1,000㎡	300	완료	2005
5	학교숲 조성사업(파주초등)	600㎡		완료
6	학교숲 조성사업(지산초등)	800㎡		완료

【녹지 및 공원 조성사업】

□ 총    괄

(금액단위:백만원)

총 계		2006년도		2005년도
사업건수	사업비	사업건수	사업비	사업건수	사업비
12	1,413	6	913	6	500

□ 연도별 사업내역

(금액단위:백만원)

번호	사 업 명	사업량	사업비	진도율	비고
계	12		1,413
1	소공원 및 가로변 녹화사업	3,150㎡	435		2006
2	파주읍 우회도로 가로수 식재	300m	22
3	영어마을 가로수 식재	2.2km	186
4	광탄면기산리진입도로 가로수 식재	800m	132
5	도시숲조성사업(가로수 식재)	3.3km	127
6	통일공원 공원등 설치공사	5개소	11
7	시청앞 소공원 조성	662㎡	101		2005
8	월롱면 위전리(점말) 소공원 조성	530㎡	20
9	선유광장 소공원 조성	2,059㎡	50
10	두보아파트 자투리 소공원 조성	670㎡	28
11	광탄면 기산리 가로환경개선	587㎡	62
12	국지도56호선 가로수 식재	4.2km	239

12-5. 꽃마을 축제 추진사항

확인자 균형개발과장 최 귀 남(인)

작성자 녹지공원담당 박 호 석(인)

농촌의 자연미를 살린 꽃마을을 조성 도시민과 함께 할 수 있는 지역

축제를 개최하여 도농간의 유기적이고 균형있는 발전도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 파주시 교하읍 서패리 일원

○ 사 업 비 : 450백만원(시비)

○ 사업규모 : 28천평(42가구)

□ 추진사항

○ 2006. 3. 16 : 꽃 마을 대상지 선정

○ 2006. 3. 30 : 꽃 마을 용역 착수

○ 2006. 4.   : 국내 꽃 축제 벤치마킹

∙광양 매화축제, 구례 산수유축제, 서천 동백꽃 쭈꾸미축제, 고양 꽃축제

○ 2006.4. 19 : 꽃 마을축제 주민설명회

□ 향후 계획

○ 2006.  9 : 용역 완료 및 사업착수

○ 2006. 10 : 기반조성완료

○ 2007.    : 꽃식재 및 축제 개최(추후 일정 확정)

12-6. 통일동산 등 녹지대 관리현황

확인자 균형개발과장 최 귀 남(인)

작성자 녹지공원담당 박 호 석(인)

□ 총    괄

(금액단위:백만원)

총 계		2006년도		2005년도
건 수	사업비	건 수	사업비	건 수	사업비
10	1,840	6	1,050	4	790

□ 년도별 위탁현황

(금액단위:백만원)

위탁업체	사 업 명	사업량	사업비	진도율	비고
계			1,840
파주시 산림조합	통일로 및 주변 녹지위탁	25km/138,228㎡	300	80	2006
	통일동산주변 녹지위탁	32개소/986,049㎡	200	“
	자유로주변 녹지위탁	28㎞/93,847㎡	200	“
동서조경	파주출판단지외 2개소	60,296㎡	100	“
	도시공원 및 녹지대 위탁	171,473㎡	150	“
호림조경	주요도로변 녹지위탁	93,847㎡	100	“
파주시 산림조합	통일로,자유로,통일동산 주요도로변 녹지위탁	1,319,971㎡	790	완료	2005

12-7. 취약지 정비사업 추진현황

확 인 자 : 균형개발과장  최 귀 남 (인)

작 성 자 : 숙원사업담당  김 순 태 (인)

□ 총    괄

(금액단위:백만원)

총 계		2006년도		2005년도
건 수	사업비	건 수	사업비	건 수	사업비
6	1,140	3	760	3	380

□ 연도별 사업내역

(금액단위:백만원)

번호	사 업 명	사업량	사업비	진도율	비고
계	6건		1,140
1	영태리교량재가설및용수로복개공사	교량L=17m	400	완료	2006
2	눌노리용수로설치공사	L=370m	150	완료
3	법원리 도로포장및세천정비공사	L=150m	210	완료
4	동문1리 소교량재가설	L=16m	150	완료	2005
5	축현1리 소교량재가설	L=18m	180	완료
6	객현1리 소교량재가설	L=4m	50	완료

12-8. 소규모 주민편익사업 추진현황

확 인 자 : 균형개발과장  최 귀 남 (인)

작 성 자 : 숙원사업담당  김 순 태 (인)

□ 총    괄

(금액단위:백만원)

총 계		2006년도		2005년도
건 수	사업비	건 수	사업비	건 수	사업비
26	1,740	9	695	17	1,045

□ 연도별 사업내역

○ 2006년도

(금액단위:백만원)

번호	사 업 명	사업량	사업비	진도율	비고
계	9건		695
1	아동1통농로포장공사	L=350m	42	완료
2	맥금12통 흄관매설및도로확장공사	L=350m	40	완료
3	아동4통 배수로정비공사	L=40m	7	완료
4	검산11통 농로포장공사	L=300m	36	완료
5	야동7통 소하천정비공사	L=300m	84	완료
6	검산11통 세천정비공사(1지구)	L=150m	30	완료
7	검산11통 세천정비공사(2지구)	L=300m	336	완료
8	금능동농로포장공사(1지구)	L=775m	93	완료
9	금능동농로포장공사(2지구)	L=300m	27	완료

○ 2005년도

(금액단위:백만원)

번호	사 업 명	사업량	사업비	진도율	비고
계	17건		1,045
1	아동4통 개거복개공사	L=40m	4	완료
2	야동7,8통 농로포장공사	L=1,000m	97	완료
3	야동8통 옹벽설치공사	L=15m	11	완료
4	검산10통 하수도설치	L=60m	21	완료
5	검산12통 농로포장공사	L=1,834m	177	완료
6	맥금12통 농로포장공사	L=360m	50	완료
7	맥금13통 농로포장공사	L=700m	30	완료
8	맥금13통 개거연결공사	L=100m	6	완료
9	맥금14통 농로포장공사	L=125m	12	완료
10	맥금14통 하수관설치공사	L=140m	10	완료
11	금촌16통 옹벽설치공사	L=28m	12	완료
12	덕은4리 박스설치공사	L=300m	280	완료
13	덕은5리 세천복개공사	L=120m	160	완료
14	야동7통 소하천정비공사	L=400m	100	완료
15	야동8통 소하천정비공사	L=150m	32	완료
16	맥금12통 마을안길확장공사	L=100m	33	완료
17	검산9통 마을안길포장공사	L=80m	10	완료

12-9. 파주시 산림조합 위탁 사업현황

확인자 균형개발과장 최 귀 남(인)

작성자 녹지공원담당 박 호 석(인)

□ 총    괄

(금액단위:백만원)

총 계		2006년도		2005년도
건 수	사업비	건 수	사업비	건 수	사업비
7	1,490	3	700	4	790

□ 연도별 위탁현황

(금액단위:백만원)

구 분	사 업 명	기 간	내 용	사업비
소계	3개소			700
2006년	통일로및주변녹지대 조경 위탁관리	06. 5. 15 - 12. 20	녹지대 잡초제거 및 예초 수목 및 수벽 전지ㆍ전정등 조경관리	300
	자유로 녹지대 조경 위탁관리	06. 5. 15 - 12. 20		200
	통일동산 녹지대 조경위탁관리	06. 5. 15 - 12. 20		200
소계	4개소			790
2005년	통일로 및 주변녹지대 조경 위탁관리	05. 5. 20 - 12.22	녹지대 잡초제거 및 예초 수목 및 수벽 전지ㆍ전정등 조경관리	300
	자유로 녹지대 조경 위탁관리	05. 5. 20 - 12. 21		200
	통일동산 녹지대 조경 위탁관리	05. 5. 20 - 12. 22		200
	주요도로변 녹지대 조경위탁관리	05. 5. 20 - 11. 20		90

※붙임 : 위탁사업 명세 및 정산서 사본(별도제출)

13-1.「간판이 아름다운 거리」사업 추진현황

확인자 : 도시관리과장  윤 병 관 (인)

작성자 : 광고물1담당   장 윤 순 (인)

【 2005년도 】

□ 추진실적

○ 사업기간 : 2005. 1월 ～ 2005.12월

○ 위    치 : 금촌동 중앙로(시청앞⇔한국농촌공사)

○ 사 업 량 : 13동 85개업소 139개 간판

○ 사 업 비 : 474백만원(도비 50 / 시비 50)

【 2006년도 】

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2006. 1월 ～ 2006.10월

○ 위    치 : 금촌동 중앙로(한국농촌공사⇔금촌의료원)

○ 사 업 량 : 19동 89개업소 135개 간판

○ 사 업 비 : 490백만원(시비 100%)

□ 그간 추진사항

○ ‘06.05.15 : 옥외광고물 표준모델안 확정

○ ‘06.05.30 : 건축주, 점포주 동의서 징구완료

○ ‘06.07.14 : 실시설계 용역완료

○ ‘06.08.08 : 사업착공

□ 향후 추진계획

○ ‘06.10.08 : 사업완료 예정

□ 기대효과

○ 건물과 조화를 이루는 간판으로 교체하여 쾌적한 가로환경 조성과 옥외

광고물에 대한 시민의식 제고

13-2. 불법광고물 정비 실적현황

확인자 : 도시관리과장  윤 병 관 (인)

작성자 : 광고물1담당   장 윤 순 (인)

광고물2담당   이 동 림 (인)

□ 2005년도

○ 불법유동광고물 정비실적

(단위 : 건)

합 계	현수막	입간판	차량이용 광 고	에어라이트	벽보․전단	기타
249,702	20,269	4,658	7	199	208,651	15,918

○ 불법고정광고물 정비실적

(단위 : 건)

합 계	가로간판	돌출간판	지주간판	세로간판	옥상간판	기 타
2,753	113	138	2,461	4	10	27

□ 2006년도

○ 불법유동광고물 정비실적

(단위 : 건)

합 계	현수막	입간판	차량이용 광 고	에어라이트	벽보․전단	기타
276,884	10,091	975	37	167	255,604	10,010

○ 불법고정광고물 정비실적

(단위 : 건)

합 계	가로간판	돌출간판	지주간판	옥상간판	기타
1,081	157	104	764	33	23

13-4. 현장처리기동대 운영 현황

확인자 : 도시관리과장  윤 병 관 (인)

작성자 : 가로물관리담당  전 재 식 (인)

□ 운영배경

○ 현장처리기동대는 1996년 4월1일 발족, 올해로 창설 10주년을 맞아 그 동안       시민의 불편을 최소화하고 시민이 만족할 수 있는 행정을 위해 “찾아가          해결한다”는 목표 아래,

○ 시민생활과 밀접하게 관련되어 있는 다양한 분야로 업무영역을 확대하여       생활불편사항을 체계적이고 신속하게 처리함으로서 시민 삶의질 향상 도모

□ 운영개요

○ 운영현황

- 인  원 : 12명 (반장 2, 전기 2, 운전 2, 반원 6)

- 장  비 : 2대 (크레인 탑재 1톤트럭)

○ 운영내용

- 시민불편사항 처리기간 단축

•당일 민원접수 ⇒ 당일 현장출동 처리

- 시민불편사항 사전점검 및 조치

•365일 휴일없이 운영 (평일22시, 휴일18시)

- 다양한 시민불편사항 처리 확대

•가로·보안등 보수 및 소규모 도로파손 복구

•도로상 차량 운행장애 시설물 제거, 가로수 제거 및 정리

•도로변의 각종 표지판 바로 세우기, 불법광고물 및 방치쓰레기 제거

•기타 상수도, 하수도, 교통시설등의 불편사항 정비

□ 운영실적

▷ 2005년도

(단위 : 건)

구 분	계	가로․보안등 보 수	광고물 정비	교통시설물 정비	소규모 도로보수	처리실적 (%)	비 고
처리건수	11,013	3,722	2,836	4,371	84	100

▷ 2006년도(8.31 현재)

(단위 : 건)

구 분	계	가로․보안등 보 수	광고물등 정비	교통시설물 정비	소규모 도로보수	처리실적 (%)	비 고
처리건수	4,453	3,272	417	732	32	100

13-5. 절전형 보안등 교체사업

확인자 : 도시관리과장  윤 병 관 (인)

작성자 : 가로물관리담당  전 재 식 (인)

□ 추진배경

○ 고유가시대 에너지절약 정책과 연계하여 전기요금과 관리비가 과다하게          발생하는 기존 노후 보안등을 에너지 절약형인 “절전형 보안등”으로 교체하여        노후시설 개선과 전기 감전사고 방지, 에너지절약을 위한 사업으로서

○ 기존 보안등은 설치된지 오래되어 효율이 낮고 전기요금의 과다발생과 노후로       인한 고장 수시발생으로 유지관리비가 증가하고 있으며, 시설노후에 따른        안전사고 예상 및 보안등관련 민원이 증가하고 있음

○ 따라서 기존 노후된 보안등을 초기 파주시 예산투자 없이 에너지절약전문        기업에서 전액 에스코자금을 선투자하여 설치하고, 투자된 비용은 시설개선       으로 절감되는 전기요금과 유지관리비로 상환하는 사업임.

□ 사업개요

○ 지    역 : 파주시 전체

○ 사 업 량 : 9,300등

○ 사업내용

- 전구교체 나트륨 전구(288W) → 삼파장 전구(85W)

- 점등방식 개선 : 수동점멸방식 → 전자식 점멸 방식

- 관리체계 개선 : 보안등관리 프로그램 개발 및 D/B구축

○ 사 업 비 : 4,090백만원(원금 3,760백만원, 이자 330백만원)

○ 사업기간 : 2006. 4. 21 ～ 10. 17〔도급자 : (주)테크윈  정 붕 익〕

○ 진    도 : 91% (06. 8.31 현재)

□ 추진실적 및 계획

○ 2006. 4. 21 : 사업 착공

○ 2006. 8. 31 : 절전형 보안등 설치 8,508등 (설치율 91%)

○ 2006. 9. 10 : 절전형 보안등 교체 완료

○ 2006. 9. 25 : 사용 전력 변경 계약(한전)

○ 2006.10. 15 : 시설물 최종 점검 (야간 빛 분포도 및 위치․방향등 조정)        ○ 2006.10. 17 : 절전형 보안등 교체사업 준공

□ 관리계획

○ 사업준공후 향후 5년간(2007～2011년) 에스코업체에서 사후관리

○ 사업준공 익년부터 절감액으로 투자비 상환 (5년간)

□ 기대효과

○ 초기 투자비용 없이 노후 시설개선으로 기존 보안등 대비 연간 8억원 절감

○ 보안등 관리 프로그램 개발과 D/B 구축 등 체계적 사후관리

○ 소비전력 및 관리비 절감등 에너지절약정책 적극 추진.

○ 보안등 점등방식(수동조작→전자동) 개선에 따른 주민불편해소 및 효율적

관리로 전기안전(감전)사고 방지 효과

○ 과도한 불빛으로 인한 농작물 피해와 주택가 수면장애 민원 해소

13-6. 읍면별 지주간판 설치현황

확인자 : 도시관리과장  윤 병 관 (인)

작성자 : 광고물1담당   장 윤 순 (인)

광고물2담당   이 동 림 (인)

(단위 : 개)

구 분	행 정 용 지주간판	표준통합 안내표지판	사설지주간판		비 고
			허가지주간판	불법지주간판
합 계	82	157	1,449	148
문 산 읍	4	7	31	2
파 주 읍	3	23	126	11
법 원 읍	6	10	159	10
교 하 읍	24	28	145	35
조 리 읍	9	21	209	6
월 롱 면	2	12	31	6
탄 현 면	8	13	131	10
광 탄 면	18	14	181	28
파 평 면	0	11	45	12
적 성 면	2	10	57	28
금 촌 동	6	8	334	0