2006 행정사무감사

도시산업위원회

2006 주요업무 추진상황

수도환경사업소

목 차 【환경시설과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황			1
2.	분장사무			1
Ⅱ.	2006 주요업무 추진실적
1.	친환경적인 폐기물처리시스템 구축			2
2.	축산폐수 수집․운반비 지원을 통한 하천수질개선			5
3.	아름다운 공중화장실 조성			5
4.	폐수종말처리시설 설치사업			6
【상수도과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황			9
2.	분장사무			9
Ⅱ.	2006 주요업무 추진실적
1.	물 공급체계 구축사업			10
2.	물 관리시스템 강화			11
3.	물 학교 운영			13

【하수도과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		15
2.	분장사무		15
Ⅱ.	2006 주요업무 추진실적
1.	하수종말처리장 설치 및 운영		16
2.	하수관거 정비사업		17
【시 세 과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무

환경시설과  소관

2006 주요업무 추진상황

【환경시설과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
19	19	1	1	1	1	5	5	4	4	6	6	2	2

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
운영총괄담당	∙사업소 운영에 관한 종합계획 및 조정 ∙사업소 소관 계약(공사, 물품, 용역) ∙예산편성 및 지출
시 설 담 당	∙환경기초시설 설치 및 개선․보완사업 ∙환경기초시설 민간위탁운영 ∙환경기초시설 주변지역지원사업
오수관리담당	∙오수,분뇨 및 축산폐수관련 인․허가 ∙오수,분뇨 및 축산폐수관련 지도단속 ∙오수,분뇨 및 축산폐수관련 진정민원 ∙공중화장실 설치 및 관리
산업폐수담당	∙산업단지 폐수종말처리시설 설치 ∙산업단지 폐수종말처리시설 위탁운영 ∙산업단지 폐수종말처리시설 개선 및 .보완

Ⅱ. 2006 주요업무 추진실적

1. 친환경적인 폐기물처리시스템 구축

□ 음식물쓰레기 공공처리시설 설치사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주읍 봉암리 1043-1번지 일원

∙ 사 업 량 : 음식물처리시설 1식(처리용량 : 80톤/일)

∙ 사업기간 : 2005. 1. ～ 2007. 12.

∙ 사 업 비 : 14,000백만원(국비 4,200 도비 4,900 시비 4,900)

○ 추진실적

∙ ‘06. 3. : 기본 및 실시설계용역 완료

∙ ‘06. 6. : 지방재정 투․융자(공정율 30%)

○ 향후계획

∙ ‘06.10. : 공사착공

∙ ‘07.12. : 공사준공

□ 축산폐수공공처리시설 개선보완 사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-4번지 일원

∙ 사 업 량 : 시설개선보완 1식(200톤/일)

∙ 사업기간 : 2005. 1. ～ 2006.10.

∙ 사 업 비 : 3,425백만원(국비 2,553 도비 342 시비 530)

○ 추진실적

∙ ‘06. 4. : 공사착공(공정율 90%)

○ 향후계획

∙ ‘06.10. : 공사준공

□ 분뇨처리시설 개선보완 사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주읍 봉암리 1002-1번지 일원

∙ 사 업 량 : 시설개선보완 1식(60톤/일+80톤/일)

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006.10.

∙ 사 업 비 : 1,315백만원(국비 1,052 도비 131 시비 132)

○ 추진실적

∙ ‘06. 4. : 공사착공(공정율 90%)

○ 향후계획

∙ ‘06.10. : 공사준공

□ 비위생매립지 정비사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 적성면 두지리 2-14번지 일원

∙ 사 업 량 : 비위생매립지 정비 1식(16,000㎡)

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2007. 7.

∙ 사 업 비 : 2,980백만원(국비 1,490 도비 745 시비 745)

○ 추진실적

∙ ‘06. 7. : 공사착공(공정율 10%)

○ 향후계획

∙ ‘07. 7. : 공사준공

□ 재활용선별장 소음․분진 방지시설 설치

○ 사업개요

∙ 위    치 : 탄현면 낙하리 산 6번지 일원

∙ 사 업 량 : 소음 및 분진방지시설 설치 1식

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 8.

∙ 사 업 비 : 250백만원(시비 250)

○ 추진실적

∙ ‘06. 5. : 공사착공

∙ ‘06. 8. : 공사준공

□ 파주시 스포츠센터 수영장 증설사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

∙ 사 업 량 : 수영장 증설 7레인 (25m × 2.5m)

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006.10.

∙ 사 업 비 : 2,500백만원(시비 2,500)

○ 추진실적

∙ ‘06. 5. : 공사착공(공정율 70%)

○ 향후계획

∙ ‘06.10. : 공사준공

□ 파주시 환경관리센터 이미지 개선사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

∙ 사 업 량 : 외벽(4,558㎡) 그래픽 디자인

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 8.

∙ 사 업 비 : 200백만원(시비 200)

○ 추진실적

∙ ‘06. 5. : 공사착공

∙ ‘06. 8. : 공사준공

□ 환경기초시설 주변지역 지원사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 소각장(탄현면․문산읍), 위생처리장(파주읍․월롱면), 매립지(적성면)

∙ 사 업 량 : 21개사업(도로포장,하수도,소교량,가드레일,기타)

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006.10.

∙ 사 업 비 : 1,705백만원(시비 1,705)

○ 추진실적

∙ ‘06. 3. : 공사착공(공정율 90%)

○ 향후계획

∙ ‘06.10. : 공사준공

2. 축산폐수 수집 ․ 운반비 지원을 통한 하천 수질개선

□ 축산폐수 수집․운반비 지원사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주시 전역

∙ 사 업 량 : 716개소(신고대상이하 축산농가)

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006.12.

∙ 사 업 비 : 492백만원(도비 246 시비 246)

○ 추진실적

∙ ‘06. 1. : 지원대상 농가 지정(신규 또는 폐쇄 축산농가에 따라 변동)

∙ ‘06. 1. ～ 12. : 수집․운반비 지급

(수거실적에 따라 축산폐수수집운반업체 및 처리시설에 월별정산 후 지급)

3. 아름다운 공중화장실 조성사업

□ 모범화장실 유지관리 사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 군내면 점원리 산 183번지 제3땅굴외 20개소

∙ 사 업 량 : 21개소

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006.12.

∙ 사 업 비 : 33,600천원(도비 16,800 시비 16,800)

○ 추진실적

∙ ‘06. 1. : 모범화장실 지정

∙ ‘06. 1. ～ 12. : 매월 모범화장실 관리용품 지급

□ 국도변 개방화장실(주유소) 지원사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 국도1호선 및 37호선

∙ 사 업 량 : 20개소

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006.12.

∙ 사 업 비 : 12,000천원(도비 6,000 시비 6,000)

○ 추진실적

∙ ‘06. 1. : 국도변 개방화장실 지정

∙ ‘06. 1. ～ 12. : 매월 국도변 개방화장실 관리용품 지원

□ 공중화장실 개보수공사

○ 사업개요

∙ 위    치 : 제3땅굴 및 전망대

∙ 사 업 량 : 2개소

∙ 사업기간 : 2006. 5. ～ 2006. 8.

∙ 사 업 비 : 50,000천원(도비 50,000)

○ 추진실적

∙ ‘06. 7. : 공사착공

∙ ‘06. 8. : 공사준공

4. 폐수종말처리시설 설치사업

□ 파주LCD지방산업단지 폐수종말처리시설 설치 및 운영관리

〈파주LCD지방산업단지 폐수종말처리시설 설치사업〉

○ 사업개요

∙ 위    치 : 월롱면 덕은리 산113-1번지 일원

∙ 사 업 량 : 23만톤/일(1단계 : 7만톤, 2단계 : 7만톤, 3단계 : 9만톤)

∙ 사업기간 : 2004. 1. ～ 2009. 6.

∙ 사 업 비 : 174,093백만원(국비 174,093)

○ 추진실적

가. 1단계

∙ ‘04. 7. : 1단계 공사착공

∙ ‘05. 6. : 1단계 1계열 시운전

∙ ‘06. 1. : 1단계 2계열 시운전(공정율 99%)

나. 2단계

∙ ‘05.12. : 2단계 공사착공(공정율 43%)

○ 향후계획

∙ ‘06.11. : 1단계(7만톤) 공사준공

∙ ‘07. 9. : 2단계(7만톤) 공사준공

∙ ‘09. 6. : 3단계(9만톤) 공사준공

〈파주LCD지방산업단지 폐수종말처리시설 민간위탁 운영관리〉

○ 사업개요

∙ 위    치 : 월롱면 덕은리 산113-1 일원

∙ 사 업 량 : 1단계 7만톤/일

∙ 처리공법 : Bio-SAC BNR 공법

∙ 용역기간 : 2006. 6. ～ 2009. 5.(3년간)

∙ 운영업체 : (주)환경시설관리공사

∙ 운 영 비 : 4,534백만원/년 (원인자부담)

○ 추진실적

∙ ‘05.11.14. : 민간위탁 운영관리 계약체결

∙ ‘05.12. 1. : 사전운영관리수행(6개월)

∙ ‘06. 6. 1. : 정상가동 개시

□ 문산첨단지방산업단지 폐수종말처리시설 설치사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 문산읍 선유리 일원

∙ 사 업 량 : 1만5천톤/일(1단계 : 1만톤, 2단계 : 5천톤)

∙ 사업기간 : 2005. ～ 2010.

∙ 사 업 비 : 37,654백만원(국비 37,654)

○ 추진실적

가. 1단계

∙ ‘06. 6. : 1단계 공사착공(공정율 10%)

○ 향후계획

∙ ‘07. 6. : 1단계 1계열(5천톤) 시운전

∙ ‘07.12. : 1단계 2계열(5천톤) 시운전

∙ ‘08. 3. : 1단계(1만톤) 공사준공

∙ ‘10.  . : 2단계(5천톤) 공사준공

(입주업체 공장가동 및 폐수발생량을 감안하여 단계별 설치)

상수도과  소관

2006 주요업무 추진상황

【상수도과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능․상용
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
66	66	-	-	1	1	5	5	9	9	9	9	42	42

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
수도행정담당	∙상수도 특별회계 일반운영 ∙급수공사 대행지정 및 인가 ∙토지․건물 등 재산 및 물품관리 ∙결산 및 경영분석
수도요금담당	∙상수도사용료 및 각종 세입의 부과징수 ∙수도계량기 검침 및 요금고지 ∙요금전산관리 및 각종요금 민원신고처리 ∙부정수도 관리
급 수 담 당	∙누수방지 및 비상급수대책 ∙노후관 및 불량수도관 교체 ∙간이상수도시설 설치 및 유지관리
수도시설담당	∙상수도 시설 증설 및 확장공사 ∙고도정수처리시설 사업 ∙농어촌 지방상수도 사업 ∙상수원보후구역 지정 및 관리
정수장관리담당	∙원수․정수 수질검사 분석 및 관리 ∙취수․정수시설 운영관리 ∙정수 약품관리 및 품질관리 ∙지하수 인허가 및 관리

Ⅱ. 2006 주요업무 추진실적

1. 물 공급체계 구축사업

□ 파주상수도 2단계 확장사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주시 일원

∙ 사 업 량 : 배수관로(L=10.577㎞), 배수지 2개소(106,500톤/일)

- 교하배수지(98,000톤/일). : 교하읍 동패리 산 228번지 일원

- 법원배수지(8500톤/일) : 법원읍 동문리 산 53번지 일원

∙ 사업기간 : 2003. 7. ～ 2007.12.

∙ 사 업 비 : 27,098백만원(도비 2,599 시비 24,499)

○ 추진실적

∙ ‘04. 4. : 배수관로 공사착공

∙ ‘04. 6. : 수도사업인가(환경부)

∙ ‘05. 4. : 배수관로 공사준공(공정율 30%)

○ 향후계획

∙ ‘06.11. : 배수지 공사착공

∙ ‘07.12. : 배수지 공사준공

□ 파주상수도 3단계 확장사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주시 일원

∙ 사 업 량 : 배수관로(L=17.43㎞), 배수지 2개소(79,000톤/일)

- 월롱배수지(68,000톤/일) : 월롱면 덕은리 산 134번지 일원

- 광탄배수지(11,000톤/일) : 광탄면 신산리 산 14-3번지 일원

∙ 사업기간 : 2004. 7. ～ 2008.12.

∙ 사 업 비 : 24,640백만원(도비 4,742 시비 19,898)

○ 추진실적

∙ ‘06. 3. : 실시설계 용역완료

∙ ‘06. 7. : 수도사업인가 신청

○ 향후계획

∙ ‘07. 3. : 공사착공

∙ ‘08.12. : 공사준공

□ 상수도관로 확장공사

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주시 일원

∙ 사 업 량 : 16개소(L=45.125㎞)

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006.10.

∙ 사 업 비 : 7,602백만원(국비 500 도비 662 시비 6,440)

○ 추진실적

∙ ‘06. 4. : 공사착공(공정율 90%)

○ 향후계획

∙ ‘06.10. : 공사준공

2. 물 관리시스템 강화

□ 고도정수처리시설 설치사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 문산읍 선유리 산100-2번지 일원

∙ 사 업 량 : 96천톤/일

∙ 사업기간 : 1996. 3. ～ 2008.12.

∙ 사 업 비 : 25,382백만원(국비 12,241 도비 6,120 시비 7,021)

○ 추진실적

∙ ‘04. 1. : 수도사업인가 신청

∙ ‘05. 9. : 수도사업인가 인가

∙ ‘06. 6. : 건설기술심의 완료(경기도)

○ 향후계획

∙ ‘06.11. : 공사착공

∙ ‘08.12. : 공사준공

□ 노후관 교체사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주시 일원

∙ 사 업 량 : 법원읍 가야리 외3개소(L=2.5㎞)

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 9.

∙ 사 업 비 : 640백만원(도비 150 시비 490)

○ 추진실적

∙ ‘06. 5. : 공사착공(공정율 95%)

○ 향후계획

∙ ‘06. 9. : 공사준공

□ 간이상수도 정비사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주시 일원

∙ 사 업 량 : 취정수시설 및 노후관개량 15개소

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006.10.

∙ 사 업 비 : 1,500백만원(도비 120 시비 1,380)

○ 추진실적

∙ ‘06. 5. : 공사착공(공정율 90%)

○ 향후계획

∙ ‘06.10. : 공사준공

□ 상수원 보호구역 주민지원사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파평면 장파리․금파리, 적성면 자장리 일원

∙ 사 업 량 : 금파2리 노인정보수 외6개사업

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006.10.

∙ 사 업 비 : 536백만원(국비 161 시비 375)

○ 추진실적

∙ ‘06. 4. : 공사착공(공정율 90%)

○ 향후계획

∙ ‘06.10. : 공사준공

3. 물 학교 운영

□ 물학교 현장학습 실시

○ 사업개요

∙ 교육대상 : 관내 초․중․고생

∙ 교육시간 : 2시간

∙ 교육장소 : 문산정수장 내

∙ 교육방법 : 시청각교육 및 현장학습 병행

○ 추진실적

∙ ‘06. 1. : 물학교 교재제작(1,000부) 및 교육대상자 선정

∙ ‘06. 2. ～ 12. : 연중 물학교 운영(총 6개교 223명 실시)

하수도과  소관

2006 주요업무 추진상황

【하수도과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
12	12	-	-	1	1	3	3	3	4	3	4	2	-

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
하수행정담당	∙하수도 사용료 검침, 부과, 징수관리 ∙예산 및 서무관리
하수관리담당	∙하수관거 유지관리 ∙배수설비 설치신고․준공 ∙하수관거 정비사업 ∙비관리청 하수관거 인허가 및 사업시행 .승인
하수시설담당	∙하수도정비계획 수립 ∙하수종말처리장 건설 ∙하수종말처리시설 및 마을하수도 유지 .관리 ∙하수처리장 인허가 및 사업시행 승인 ∙중계펌프장 유지관리 ∙하수처리장,마을하수도 민간위탁에 .관한 사항

Ⅱ. 2006 주요업무 추진실적

1. 하수종말처리장 설치 및 운영

□ 문산하수처리장 설치사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 문산읍 당동리 129-1일원외 3개소

∙ 사 업 량 : 17,000톤/일(차집관로 L=17.44㎞)

[문산 7,500 파주 4,500 법원 3,000 광탄 2,000]

∙ 사업기간 : 2004. 5. ～ 2007. 5.

∙ 사 업 비 : 43,528백만원(국비 24,061 도비 9,734 시비 178 민자 9,555)

○ 추진실적

∙ ‘04. 5. : 법원․광탄 하수처리장 공사착공(공정율 95%)

∙ ‘04.11. : 파주하수처리장 공사착공(공정율 97%)

∙ ‘05. 3. : 문산하수처리장 공사착공(공정율 81%)

○ 향후계획

∙ ‘06.12. : 시운전

∙ ‘07. 5. : 공사준공

□ 금촌하수처리장 운영

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주시 금촌동 714번지 일원

∙ 사 업 량 : 27,000톤/일

∙ 처리공법 : HDF(한화유로변경형 질소․인 고도처리기술)

∙ 처리구역 : 금촌동, 아동동 및 봉일천리

∙ 운영업체 : 파주엔바이로(주)

○ 추진실적

∙ ‘03. 3. : 공사착공

∙ ‘05. 3. : 공사준공

□ 통일동산하수처리장 운영

○ 사업개요

∙ 위    치 : 탄현면 법흥리 1298번지 일원

∙ 사 업 량 : 16,000톤/일

∙ 처리공법 : Denipho(간헐포기접촉산화방식)

∙ 처리구역 : 통일동산, 출판문화산업단지 및 교하택지개발지구

∙ 운영업체 : (주)환경시설관리공사

○ 추진실적

∙ ‘03. 2. : 공사착공

∙ ‘06. 4. : 부분준공

○ 향후계획

∙ ‘06. 9. : 공사준공

□ 적성하수처리장 운영

○ 사업개요

∙ 위    치 : 적성면 가월리 193번지 일원

∙ 사 업 량 : 2,000톤/일

∙ 처리공법 : SBR(선회와류식)

∙ 처리구역 : 마지리, 구읍리 및 두지리

∙ 운영업체 : (주)환경시설관리공사

○ 추진실적

∙ ‘01. 5. : 공사착공

∙ ‘03. 9. : 공사준공

2. 하수관거 정비사업

□ 금촌하수관거 정비사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주시 금촌동, 조리읍 봉일천리 일원

∙ 사 업 량 : L=63㎞

∙ 사업기간 : 2004. ～ 2008.

∙ 사 업 비 : 59,000백만원(국비 39,856 시비 19,144)

○ 2006년도 추진실적

∙ ‘06. 3. : 공사착공

∙ ‘06. 8. : 조리읍 봉일천리․대원리 구간 : 총 9.9㎞중 5.3㎞완료(공정율 54%)

금촌동․금능동 구간 : 총 12.9㎞중 4.9㎞완료(공정율 38%)

* 경의선구간 하수관거 압입공사 2개소 완료

○ 향후계획

∙ ‘08.12. : 공사준공

□ 문산하수관거 정비사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 문산읍 문산리․선유리 일원

∙ 사 업 량 : L=42㎞

∙ 사업기간 : 2005. ～ 2010.

∙ 사 업 비 : 42,167백만원(국비 29,517 시비 12,650)

○ 추진실적

∙ ‘05.12. : 기본계획용역 착수

○ 향후계획

∙ ‘06.10. : 기본계획용역 완료

∙ ‘07. 4. : 공사착공

∙ ‘10.12. : 공사준공

□ 하수관거정비 BTL사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주읍, 법원읍, 광탄면, 금촌동(새말 등) 일원

∙ 사 업 량 : L=163㎞(파주 59㎞, 법원46㎞, 광탄25㎞, 금촌(새말 등)33㎞)

∙ 사업기간 : 2006. ～ 2010.

∙ 사 업 비 : 90,000백만원(국비 57,508 시비 32,492)

○ 추진실적

∙ ‘06. 6. : 기본계획용역 착수

○ 향후계획

∙ ‘06.10. : 기본계획용역 완료

∙ ‘08. 2. : 공사착공

∙ ‘10.12. : 공사준공

□ 노후하수관 정비사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 문산읍 당동리외 12개소

∙ 사 업 량 : L=3.463㎞

∙ 사업기간 : 2006. 1. ～ 2006. 8.

∙ 사 업 비 : 1,903백만원(도비 951 시비 952)

○ 추진실적

위 치	사업량	사업비	공사착공	공사준공	비 고
계	3.463㎞	1,903백만원
당동2리	190m	140백만원	3.17	5.15
향양리	410m	180백만원	4. 5	5.14
파주4리	300m	120백만원	3.27	5.25
금곡2리	260m	150백만원	3.27	5.25
산남리	330m	160백만원	4. 6	7. 4
상지석2리	210m	150백만원	4. 5	6. 3
등원1리	250m	150백만원	3.20	5.18
영태6리	300m	160백만원	4. 5	6. 3
법흥리	93m	43백만원	3.22	5.20
눌노리	200m	120백만원	3.24	4.22
신산2리	200m	130백만원	3.23	5.21
어유지2리	200m	100백만원	3.27	5.25
검산동	520m	300백만원	4.10	7. 8