2006 행정사무감사

도시산업위원회

2006 주요업무 추진상황

도시건설국

목 차 【도시계획과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		1
2.	분장사무		1
Ⅱ.	2006 주요업무 추진실적
1.	도시기본계획 수립		2
2.	도시관리계획 수립		3
【도 로 과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		5
2.	분장사무		5
Ⅱ.	2006 주요업무 추진실적
1.	지역간 사통팔달 도로망 구축		6
【건 축 과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		9
2.	분장사무		9
Ⅱ.	2006 주요업무 추진실적
1.	공동주택 시설보수비 지원사업 추진		10
2.	농촌 주거환경개선사업 추진		11

목 차 【교통정책과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		13
2.	분장사무		13
Ⅱ.	2006 주요업무 추진실적
1.	대중교통체계 개선 및 재정지원		14
2.	교통사고 저감사업		15
【재난안전관리과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		18
2.	분장사무		18
Ⅱ.	2006 주요업무 추진실적
1.	상시 대비하는 재난예방		19
2.	현장중심의 재난안전관리 추진		20
3.	하천정비 사업추진		21

도시계획과 소관

2006 주요업무 추진상황

【도시계획과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
21	21	1	1	1	1	4	4	6	4	9	11

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
도시계획담당	▪도시기본․도시관리계획수립 ▪도시계획위원회 운영 ▪토지적성평가 수립 및 운용 / 수치지형도 제작 및 운용 ▪도시계획통계 / 온천개발 / 군사시설보호구역관리 ▪서무일반, 예산, 회계 ▪기반시설부담금 부과, 징수 및 집행
시설지구담당	▪제1,2종 지구단위계획 및 구역의 변경․결정 ▪도시개발사업 구역지정 제안협의 ▪도시및주거환경 정비구역 지정 ▪장기미집행시설 집행계획 / 통일동산 토지이용관리 ▪도시계획시설결정 및 실시계획인가 ▪토지구획정리사업 관리
개발민원1담당	▪개발행위허가, 준공 (문산,파주,법원,조리,월롱,광탄,파평,적성,군내) ▪불법개발행위단속
개발민원2담당	▪개발행위허가, 준공(교하,탄현,금촌1동,금촌2동) ▪불법개발행위단속

Ⅱ. 2006 주요업무 추진실적

1. 도시기본계획 수립

□ 사업개요

○ 사업범위 : 파주시 행정구역(672.56㎢)

○ 목표년도 : 2016년 →2025년

○ 계획인구 : 874천명

○ 도시공간구조 : 3핵 도심기능 분산형 구조

▪ 문산(26.9만명) : 남북교류 중심

▪ 금촌(28.6만명) : 경제행정 중심

▪ 교하(31.9만명) : 문화사업 중심

□ 그간의 추진실적

○ ‘05.  3. 28 : 도시기본계획 공청회 개최

○ ‘05.  4. 26 : 파주시의회 의견청취

○ ‘05.  5.  9 : 시 도시계획 위원회 자문

○ ‘05.  5. 24 : 도시기본계획(안) 승인 요청

○ ‘05. 11. 18 : 경기도 도시계획위원회 자문

○ ‘05. 12.  2 : 경기도 도시계획 수권 소위원회 자문

○ ‘05. 12. 19 : 도시기본계획 승인 요청(경기도→건교부)

○ ‘06. 1. ～ 6 : 중앙부처 협의

○ ‘06.  7.  6 : 중앙도시계획위원회 개최

□ 향후 추진계획

○ ‘06.  9 ～ 10 : 중앙도시계획(분과)위원회 개최

○ ‘06.  12      : 2025 파주도시기본계획 건교부 승인

2. 도시관리계획 수립

□ 사업개요

○ 사업범위 : 파주시 전 행정구역(672.56㎢)

○ 목표년도 : 2015년(기준년으로부터 10년)

○ 수립방향

▪용도지역․지구․구역 및 도시기반시설계획 재조정

▪관리지역 용도세분(계획․생산․보전관리지역)

▪불합리한 용도지역(자연환경 보전지역 등) 재조정

▪개발용지(산업단지 등)수요예측 반영

▪기타 행정기관 관련법에 의한 협의 등

○ 사 업 비 : 1,463백만원

○ 용역기간 : ‘05. 4. 27 ～ ’07. 12.

□ 그간의 추진실적

○ ‘05.  4. 27. : 과업착수

○ ‘05. 11. ～ ’06. 7. : 주민의견청취(총 3회)

○ ‘05. 12. ～ ’06. 7. : 시 도시계획수권 소위원회 개최(7회)

○ ‘05. 12. ～ ’06. 3. : 파주시의회 의견청취

○ ‘06. 07. 25 : 시 도시계획위원회 개최

○ ‘06. 8. 2. : 관리지역 용도세분 결정신청 (파주시→경기도)

○ ‘06. 9. 현재 : 도시계획 재정비 기초자료 및 환경성․교통성계획 수립 중

□ 향후추진계획

○ ‘07. 03.  : 도시계획 재정비 결정신청

○ ‘07. 12.  : 도시관리계획 (도시계획재정비)완료

도로과  소관

2006 주요업무 추진상황

【도로과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
19	20			1	1	4	4	6	3	5	9	3	3

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
도로행정담당	∙국가소송업무 ∙국유재산관리 ∙지방도 위탁보상 ∙전문건설업관리 ∙서무. 회계
도로건설1담당	∙군도 및 농어촌도로 공사추진 ∙군도,농어촌도로 보상 ∙국도․지방도 추진협의
도로건설2담당	∙도시계획도로 및 비법정도로 공사추진 ∙도시계획도로 및 비법정도로보상
도로보수담당	∙도로유지보수 및 보도신설 관리 ∙접도구역관리 ∙도로점용(굴착)허가 ∙공유재산관리 ∙미불용지보상 ∙부당이득금 관련소송

Ⅱ. 2006 주요업무 추진실적

1. 지역간 사통팔달 도로망 구축

□ 사업개요

○ 총       계 : 41건  71.05km 452,277백만원

▪ 지   방  도  :  1건 L= 2.1km, 10,997백만원(위탁사업)

▪ 군        도 :  8건 L=22.25km, 300,957백만원

▪ 농어촌  도로 : 11건 L=28.16km, 55,671백만원

▪ 도시계획도로 : 10건 L= 5.33km, 50,060백만원

▪ 기        타 : 11건 L=13.21km, 34,592백만원

□ 추진상황

○ 지방도 1건

▪ 공사중 : 식현~두지(2.1km)

○ 군도 8건

▪ 설계용역 : 3건

- 문산~연풍(4.2km), 문발~교하(4.9km), 출판단지~삽다리(3.3km)

▪ 공사완료 : 3건

▪ 금승~위전(5.95km), 선유~문산여고(1.34km),군도3호선 배수로(0.3km)

▪ 공사중 : 1건

- 통일로~파주리(2.26km)

▪ 향후 : 1건

- 군방호벽(지하화 변경으로 인한 재설계 및 사업비 부족으로 07년이후추진)

○ 농어촌도로 11건

▪ 설계용역 : 4건

- 동패~산남(3.5km), 운정역~능안리(2km),객현~구읍(3.61km)

지방도359~오금리(1.5km)

▪ 보상중 : 3건

- 금승~축현(1.2km), 덕천~답곡(3.5km), 칼사격장(2km)

▪ 공사중 : 3건

- 봉암~파주(3.75km), 능안초교~상지석리(0.4km),웅담~직천(5.3km)

▪ 일몰사업 : 1건

- 장릉진입도로(1.4km)

○ 도시계획도로 10개 노선

▪ 설계용역 : 1건

- 금신초교~경신아파트(0.53km)

▪ 보상중 : 2건

- 금촌동 도시계획도로(0.39km), 낙원묘지진입로(0.5km)

▪ 공사중 : 3건

- 마지리도시계획(0.26km), 신산우회도로(0.44km), 신산리도시계획 (0.2km)

▪ 공사완료 : 4건

- 당동~여우고개(1.34km), 통일공원~중에교(1.24km)

법원리도시계획(0.19km), 문산동초교진입도로(0.24km)

○ 기  타 : 11개 사업

▪ 설계용역 : 2건

- 통일로정체구간개선(2.2km), 검산초교진입로(0.17km)

▪ 보상중 : 1건

- 시청로 및 학령산생태터널(0.42km)

▪ 공사중 : 2건

- 자운서원진입로보도(1.5km), 대원초교~설문동간(0.26km)

▪ 공사완료 : 6건

- 고산교~장곡리간자전거도로(3.66km), 영어마을진입로(0.9km),

방축1리마을안길(1.1km), 도심지보도(3km), 마을안길정비(1식),

정감어린가로환경(1식)

건  축  과  소관

2006 주요업무 추진 상황

【건  축  과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
19	19			1	1	5	5	8	5	4	7	1	1

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
건 축 담 당	∙실무종합심의, 건축행정건실화 추진 ∙건축허가 및 사용승인 ∙공장총량제 관리 및 도로대장 관리 ∙건축통계, 건축헌장서비스 이행 ∙건축조례 제․개정 ∙지방건축위원회, 수해주택관리
공 동 주 택 개 발 담 당	∙주택건설사업계획승인 ∙공동주택 공사현장 지도점검 ∙공동주택 건설현장 감리자 지정
공 동 주 택 관 리 담 당	∙공동주택관리 및 종합계획수립 ∙국민주택 융자금 및 택지매입 융자금 관리 ∙임대주택 매각 및 분양전환
건 축 지 도 담 당	∙불법건축물 정비계획수립 및 지도단속 ∙농어촌 마을환경 개선사업 ∙가설건축물 허가 ∙수임건축물 지도점검

Ⅱ. 2006 주요업무 추진실적

1. 공동주택 시설보수비 지원사업 추진

□ 사업개요

○ 사업대상 : 금촌동 동산연립주택 등 11개 단지

(금촌2, 문산3, 법원2, 조리3, 광탄1)

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 보조금 지원범위

▪지원대상 : 준공 후 10년 이상 경과된 주택건설사업승인 대상 공동주택

▪지원시설 : 도로 및 부속시설, 상․하수도시설(건축물 내 시설제외),

어린이놀이터, 체육시설, 주차장 등

○ 보조금 지원한도

▪3천만원 미만 사업(보조금 80%, 자부담 20%)

▪3천만원 이상 사업(보조금 60%, 자부담 40% - 최대 1억원까지)

※보조금을 지원받은 공동주택은 5년 이내에 다시 보조금을 신청할 수 없음

□ 추진실적

○ 2006. 1. 30  보조금 신청서 접수완료

○ 2006. 3. 20  보조금 결정통보

○ 2006. 4. 20  보조금 자금교부

○ 2006. 5. 30  공동주택 시설보수비 사업완료

※ 금촌동 동산연립 등 11개 단지에 총 193,880천원 보조금 지원

□ 기대효과

○ 공동주택단지 내 노후시설물의 재정지원을 통한 쾌적하고 안전한 주거환경 도모

2. 농촌 주거환경개선사업 추진

□ 사업개요

○ 사업대상 : 문산읍 등 7개 읍․면 15동

(문산2, 파주3, 법원1, 탄현1, 광탄1, 파평3, 적성4)

○ 사업내용 : 농어촌지역의 노후불량주택 개량 및 개선

○ 사 업 비 : 600백만원(동당 40백만원) - 도비 30%, 주택기금 70%

※ 전용면적 100㎡이하 개․증․신축 시 40백만원, 부분적인 개․증축 시 20백만원

□ 추진실적

○ 2006. 3. 08  대상자 확정 통보

○ 2006. 8. 31  공사완료 12동, 공사중 3동

□ 기대효과

○ 농촌지역의 낡고 불량한 주택을 개량하여 낙후된 주거환경의 향상을 도모 삶의 질 향상

교통정책과  소관

2006 주요업무 추진 상황

【교통정책과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
24	24			1	1	4	4	8	8	10	10	1	1

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
교통정책담당	∙광역교통개선대책 및 지방 대중교통계획 수립 ∙교통영향평가 ∙여객운송사업 및 대여사업 인․허가 및 등록 ∙운송사업자 재정 및 유가보조금 지원
교통시설담당	∙어린이보호구역 정비 ∙교통안전시설 설치 및 관리 ∙교통체계개선사업 등 안전사고 저감 대책 추진
운수지도담당	∙화물자동차운송사업 인․허가 및 등록 ∙여객 및 화물 운수사업자 지도단속 ∙자동차관리사업 등록 및 법규위반 행정처분
차량등록담당	∙자동차 등록(신규․이전․변경․말소) ∙자동차 검사 ∙자동차 책임보험 ∙건설기계 등록 및 관리

Ⅱ. 2006 주요업무 추진실적

1. 대중교통체계 개선 및 재정지원

□ 대중교통노선 확충

대단위 아파트 단지, 헤이리 아트벨리, 영어마을등 상주인구 증가지역의 대중교통 불편 완화와 도서벽지의 대중교통 확충을 위한 노선신설 및 교통 체계 개선

○ 노선신설 :  9개 노선, 21대(시내 4개, 마을버스 5개 노선)

․ 2000번(교하～서울역, 20대) ← 9704번 양도양수

․ 1500번(교하～김포공항, 3대)

․ 2200번(맥금동～합정역, 4대)

․ 100-87번(출판단지～운정역, 2대)

․ 100-52번(적성TR～한탄강, 1대)

․ 3번(봉일천시장～명성터미널, 1대)

․ 1-1번(금촌～문산, 4대)

․ 1-2번(금촌～금촌, 3대)

․ 1-3번(금촌～금촌, 3대)

○ 노선연장 및 변경 : 12개 노선, 64대(시내 4개, 마을버스 8개 노선)

․ 100-7번(송촌리～금촌) → 교하택지지구 경유

․ 1-7번(연다산리～금촌) → 교하택지지구 경유

․ 100-3번(금촌～출판단지) → 교하택지지구 경유

․ 909번(문산～불광동) → 서울역 연장

․ 200번(맥금동～합정역) → 영어마을 경유

․ 900번(맥금동～일산신도시) → 영어마을 경유

․ 1-2번(금촌～금촌) → 영어마을 경유

․ 1-3번(금촌～금촌) → 영어마을 경유

․ 100-71(용미리～분수리, 1대) → 도마초교～광탄 연장

․ 100-89번(금촌～현대아이파크) → 교하신도시～운정역

․ 16-1번(도내리～금촌) → 백석리 연장

․ 공영버스 9번(교하～운정역) → 교하, 운정, 약천사 경유

○ 노선통합 및 개선

․ 신일여객 13번과 131번을 13번(법원읍～금촌)으로 통합(7대)

․ 신성교통 200번(맥금동～합정역)과 2200번을 200번으로 통합(10대)

․ 금화초등학교앞 대중교통 노선 개선(총 13개 노선 112대)

․ 삼광고등학교 학생통학 노선 신설

○ 기타 대중교통 업무

․ 버스승강장 설치(승강장 53개소, 버스표지판 153개소)

․ 공영차고지 타당성 용역 완료

․ 2006년 상반기 공영버스.벽지노선 교통량 조사 실시

□ 마을버스 재정지원

○ 사업개요

․ 대    상 : 10개사/29개노선/69대

․ 지 원 액 : 650백만원(시비)

․ 지원내용 : 버스구입비, 재정지원(적자노선 보조, 보험료, 피복비 등)

○ 추진현황

․ ‘06. 6. 05 : 버스구입비 240백만원 지원(4개업체 6대)

상반기 특별재정지원 198백만원

․ ‘06. 9월  : 하반기 특별재정지원 212백만원(예정)

2. 교통사고 저감사업

□ 어린이보호구역 정비사업

○ 사업개요

․ 위    치 : 웅담초등학교 등 16개교

․ 사 업 량 : 보차도 분리, 미끄럼방지시설, 가드휀스, 교통안전표지판

․ 사업기간 : 2006. 3. ～ 2006. 10.

․ 사 업 비 : 4,200백만원(국비2,100  도비1,050, 시비1,050)

○ 그간추진실적

․ ‘06. 2. 06 : 설계용역 착수

․ ‘06. 3. 27 ～ 3. 31 : 사업설명회 (각학교 회의실)

․ ‘06. 4. 13 : 설계용역 완료

․ ‘06. 6. 22 : 공사착공

○ 추진계획

․ ‘06. 10. 23 : 공사완료(예정)

□ 교통안전시설물 정비 및 확충

○ 사업개요

․ 위    치 : 파주시 전지역

․ 사 업 량 : 도로교통 안전시설(신호등, 교통안전표지판 등)

․ 사업기간 : 2006. 2. ～ 2006. 10.

․ 사 업 비 : 500백만원(시비)

○ 그간추진실적

․ ‘06. 1. 10 : 계약의뢰

․ ‘06. 2. 20 : 공사착공

※ 8월말현재 공정율 : 80%(교통표지판 신설 367개, 정비 1,020개)

○ 추진계획

․ ‘06. 10. 30 : 사업완료(예정)

□ 교통체계개선사업

○ 사업개요

․ 위    치 : 파주읍삼거리, 법원읍 우회도로 교차로

․ 사업내용 : 기하구조 개선, 신호체계 개선

․ 사업기간 : ‘06. 1월～10월

․ 사 업 비 : 300백만원(시비)

○ 그간추진실적

․ ‘06. 3. 15 : 설계용역 착수

․ ‘06. 5. 13 : 설계용역 완료

․ ‘06. 8. 04 : 공사착공(현공정 30%)

○ 추진계획

․ ‘06. 10. 30 : 공사완료(예정)

재난안전관리과  소관

2006 주요업무 추진상황

【재난안전관리과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
21	21			1	1	4	4	6	6	2	4	8	6

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
재난관리담당	∙재난안전관리계획 수립 ∙재난시설물 안전점검 및 유지관리 ∙안전문화운동 추진 ∙재난관리기금 운영
복구지원담당	∙재해위험지구 정비사업 추진 ∙자연재난 상황관리, 피해확인 및 복구 ∙방재시설물의 상시 활용상태 유지 ∙사전재해영향성 검토 협의
민방위담당	∙민방위편성 및 교육훈련 ∙공익근무요원 운영관리 ∙민방위교육장 관리
하천관리담당	∙지방2급 하천, 소하천 개수공사 ∙하천점용허가 및 하천제방유지보수 ∙공유재산관리 및 도유폐천부지 대부 ∙하천 불법행위감시

Ⅱ. 2006 주요업무 추진실적

1. 상시 대비하는 재난예방

□ 방재시설물 정비 관리

○ 배수펌프장 정비 관리(29개소)

▪ 주간점검 및 시험운영

▪ 전기안전관리자 배치 및 비상근무체제 구축 : 대형 5개소

▪ 재난대책기간 중 펌프장 담당자 고정 배치 : 18명

▪ 배수펌프장 유수지 준설 : 문산배수펌프장 (7,874톤)

○ 응급복구 장비 자재 확보

▪ 수방자재 구입 비축 : PP마대등 7종 702,660종

▪ 민간임차장비 사용 협약 : 굴삭기 등 3종 647대

▪ 구호, 방역, 이재민 수용시설 확보

▪ 인접시군(5), 유관기관(10), 군부대 인력 및 장비 상호지원협약

○ 예․경보시스템 구축 관리

▪ 예․경보시스템 : 수위관측기(21), 강우관측기(5), CCTV(31),

자동기상관측장비(12), 문자전광판(3)

□ 재해취약지구 관리

○ 재해위험지구 정비사업 추진

▪ 지 구 명

- 두지지구 (적성면 두지리 62-1일원)

- 율곡지구 (파평면 율곡리 509일원)

▪ 지 정 일 : 2003. 10. 30

▪ 사업기간 : 2004년 ～ 2007년

▪ 사 업 량 : 배수펌프장 설치 각 1식

▪ 사 업 비

- 두지지구 : 10,470백만원 (국6,282 도1,256 시2,932)

- 율곡지구 :  8,404백만원 (국5,043 도1,008 시2,353)

○ 위험구역 관리(감악산,장곡리) : 문자전광판 및 자동음성통보

시스템 설치 위험 예보

○ 대규모공사장 현장 상시 관리(사업비 50억이상)

▪ 기상 속보 실시간 전달 : 12개 현장(소․단장24명)

□ 사전재해영향성검토협의제도 운영

○ 목적 : 풍수해의 근본적인 발생원인 중 개발사업에 의한 위험요인을 사전재해영향성검토협의를 통하여 사전제거 및 예방 시설설치 후 개발행위 허가 추진

○ 대상 : 행정계획 48종, 개발사업 47종

○ 사전재해영향성검토위원회 구성

▪ 구성시기 : ‘06. 10월중

▪ 계획인원 : 28명 (위원장:도시건설국장, 지명:6, 추천:21)

▪ 협의내용 : 행정계획 5, 개발사업 12

2. 현장중심의 재난안전관리 추진

□ 재난시설물 안전대책

○ 대상 : 367개소 (중점관리대상156, 시특법대상211)

▪ 관련분야 전문가(소방, 전기, 가스)와 합동점검

▪ 해빙기․장마철․동절기 시설물안전점검 : 특별기동점검반운영

▪ 유선종사자 및 시설물관리자 안전관리교육

□ 재난발생대비 훈련

○ 국가재난대응종합훈련 : ‘06. 3. 29 ～ 3. 31

○ 지역․마을단위 재난재해 대비 민방위 훈련 : ‘06. 4. 14

○ 유관기관 합동 긴급구조 종합훈련 : ‘06. 9. 15

□ 안전문화운동 추진

○ 소외계층에 대한 재난안전 복지 서비스

▪ 독거노인 세대 전기안전점검 및 시설개선 : 277가구

○ 시민의 안전의식 제고 활동

▪ 공연․행사시 안전관리 및 재난예방 홍보

▪ 재난유형별 국민행동요령 홈페이지 게재 및 홍보책자 배부

○ 어린이 생활안전 교육 : ‘06. 7. 10 ~  7. 24

▪ 관내 초등학교 순회 교육 실시 : 8개교 1,719명

○ 매월 4일 『안전점검의 날』운영 : 9회

3. 하천정비 사업 추진

□ 정비계획

○ 지방하천 (개수율 : 2006년 87%)

▪ 2 건 : 1.1㎞ 12,833백만원

○ 소하천 (개수율 : 2006년 28%)

▪ 4 건 : 4.42㎞ 6,443백만원

▪ 용역 1건 : 12㎞ 150백만원

□ 정비실적

○ 지방하천

▪ 삽교천 개수공사(2차) : 0.8㎞ 완료

▪ 분수천 개수공사(1차) : 0.3㎞, 교량1개소 공정 20%

※ 제2회 추경예산 도비 80억원 확보

○ 소하천

▪ 팔봉천 개수공사(2차) : 0.54㎞ 공정 95%(‘06. 9 전체분완료)

▪ 선고개천 개수공사(3차) : 0.22㎞ 완료(‘06. 9 전체분완료)

▪ 밥제천 개수공사(1차) : 0.68㎞ 완료

▪ 새능천 개수공사(2차) : 2.98㎞ 공정 90%(‘06. 10 전체분완료)

▪ 수내천 개수공사(용역) : 공정 20%

2006년 하천사업 추진현황

(단위 : km, 백만원)

번호	구 분		사 업 명	위 치	총 사업량 (km)	사업기간	사 업 비				2006년 공정
							계	기투자	2006 (명시이월)	향후	사 업 구 간(㎞)	보상 (%)	공사 (%)
총 계 7 건					27.72		54,477	9,735	19,332 (94)	25,410	5.52
소 계 2 건					6.79		31,900	5,866	12,833	13,201	1.1
1	지방 하천	계속	삽교천 개수공사	야동동~ 월롱 덕은리	4.79	03년~07년	14,614	5,666	3,333	5,615	0.8	완료	100%
2			분수천 개수공사	광탄 신산리	2.0	05년~08년	17,286	200	9,500	7,586	0.3	20%	20%
소 계 5 건					20.93		22,577	3,869	6,499 (94)	12,209	4.42
3	소하천	계속	팔봉천 개수공사	팔봉4교~ 팔학골입구	0.88	03년~06년	2,150	1,262	888	0	0.54	완료	95%
4			선고개천개수공사	객현국도37호 ~25사단사격장	2.02	03년~06년	2,229	1,427	802	0	0.22	완료	100%
5			밥제천 개수공사	파평 덕천리	2.77	04년~07년	3,410	300	1,000	2,110	0.68	완료	100%
6			새능천 개수공사	선유리동문천 ~ 새능	3.26	04년~06년	4,539	880	3,659 (94)	0	2.98	완료	90%
7		신규	수내천 개수공사	군내 정자리 ~방목리	12	06년~10년	10,249	0	150	10,099	-	용역20%