도시산업위원회

2007. 2. 5. ～ 2.  9.

2007년도 시정업무보고

파  주  시

시 정 철 학

비전과 목표

“최첨단”“친환경”“고품격”도시건설

비 전

대한민국 대표도시 "G&G PAJU"

목 표

업그레이드 (Upgrade) 파주

방 침

도시환경

깨끗한 도시환경

사업추진

클로징 10

민원행정

민원행정특별도시

2007년도 역점정책

◦최첨단 기업도시

◦미래를 내다보는 도시개발

◦최첨단 선진농촌

◦녹지공간 확대

◦깨끗한 물의 안정적 공급

◦수질개선

◦교육과 문화관광 인프라 확충

14대 중점과제

◦청결․질서․안전한 도시 건설

◦더불어 사는 도시

◦체육공간 확충 및 청소년 문화공간 조성

◦내부통제시스템 운영

◦일하는 방식 개선

◦선택과 집중 투자

◦아웃소싱 발굴 확대

도시개발사업단

보 고 순 서
□	추진목표와 방향	------	18 - 1
□	주요업무 추진계획
	【 공영개발과 소관 】 ○미래지향적인 도시개발 ○파주 LCD클러스터 구축	------ ------	18 - 2 18 - 3
	【 균형개발과 소관 】 ○미군반환공여지 개발 추진 ○주민숙원사업 추진 ○대학설립 추진	------ ------ ------	19 - 1 19 - 1 19 - 3
	【 교통개발과 소관 】 ○맞춤형 교통체계 구축 ○교통정체구간 해소 및 안전사고 예방	------ ------	20 - 1 20 - 2
	【 차량사업소 소관 】 ○자동차과태료 체납액 정리추진	------	21 - 1

	추진목표와 방향

ꏚ 공영개발과

○ 친수 생태가 어우러지는 친환경적인 생활환경 중심으로

최첨단 IT기술에 기반한 편리하고 안전한 도시 건설

○ 세계 최대 규모의 LCD관련 디스플레이 클러스터를 구축하여

개발촉진과 지역경제 활성화 도모

ꏚ 균형개발과

○ 대학유치, 테마공원조성 등 반환공여지 및 그 주변지역 개발을

18 -

차질없이 추진

○ 체계적인 집중투자로 특색있고 개성있는 살기좋은 마을 조성과

경쟁력있는 고품격 도시 육성

○ 2008년 50만을 육박하는 중대형 자족도시 형성에 따라 쾌적한

교육환경의 조성으로 자치교육 실현 및 교육도시 기틀마련

ꏚ 교통개발과

○ 노선신설, 변경으로 서울 도심 접근 시간을 단축하여 주민

에게 편의를 제공하고, 오․벽지 노선 신설 및 증회운행

으로 도서벽지 주민편리성 도모

○ 신호연동화로 교통정체구간 해소와 시설물 정비로 사고예방

ꏚ 차량사업소

○ 자동차과태료 체납액 납세안내 및 징수독려 강화를 통한

체납액 조기 징수와 과감한 결손처분으로 행정낭비 요인

제거

주요업무 추진계획

〔 공영개발과 소관 〕

1. 미래지향적인 도시개발

• 지속가능한 친환경 도시, 생활환경 중심 도시, 변화있는 경관과 주거

유형이 공존하는 최첨단 IT기술 도시 건설

□ 운정신도시 조성

○ 사업개요

- 위    치 : 교하읍 와동․야당리 일원  / 501만평

∙ 1,2단계 289만평, 3단계 212만평

- 수용인구 : 8만 세대 / 21.8만명

∙ 1,2단계 : 4.6만 세대  / 12.4만명

∙ 3단계 : 3.4만 세대 / 9.4만명

- 사업기간 : 2003 ～ 2013

- 추진공정 : 10% (1단계지구)

* 교하택지, 제척지 포함 : 579만평 9.9세대 27만명

○ 추진상황

- 2005.  6. 30 : 1단계지구 착공

- 2006.  9. 21 : 공동주택 최초 분양 (한라건설 937세대)

- 2006. 10. 27 : 운정신도시 확대건설계획 발표 (건교부)

- 2006. 12. 28 : 통합실시계획(1, 2단계) 승인

○ 추진계획

- 2007.  3. 10 : 2단계지구 착공

- 2007.  4. 30 : 홍보관 개관

- 2007. 12. 30 : 공동주택 분양 (7,013세대)

- 2009.  9. 30 : 최초입주 (2,060세대)

- 2009.  6. 30 : 공동주택 분양 (3단계)

2. 파주 LCD클러스터 구축

• 세계 최대 규모의 디스플레이 클러스터 구축으로 지역 개발촉진과 경제 활성화 도모

□ 파주LCD지방산업단지(본단지) 조성

○ 사업개요

- 위    치 : 월롱면 덕은리, 탄현면 금승리 일원 / 51.8만평

- 사 업 비 : 3,349억원(도비 110 시비 110 기타 3,129)

- 사업기간 : 2003 ～ 2007

- 입주업체 : LG.philips LCD사, 대성가스(주), 한국SMT(주), 희성전자

- 추진공정 : 98%

○ 추진상황

- 2004.  7. 30 : 부지조성공사 착공

- 2006.  1.  2 : 7세대 TFT-LCD양산(45천장/월, ‘07년 6월부터 90천장/월)

- 2006. 10. 30 : 이주택지(57세대), 근생부지(5필지/80명) 분양

- 2006. 12. 30 : 부지조성(토목)공사 완료

○ 추진계획

- 2007.  5. 30 : 이주택지 및 근생부지 입주 완료

- 2007.  6. 30 : 조경공사 완료 및 공공시설물 인계인수

- 2007. 12. 30 : 산업단지 준공

□ 문산첨단산업단지(LCD 협력단지) 조성

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 당동․선유리, 파주읍 향양리 일원

- 면    적 : 59.1만평 / 당동(외투) 19.4만평, 선유(국내) 39.7만평

- 사 업 비 : 5,114억원 (도비 140, 시비 140, 기타 4,834)

- 사업기간 : 2004 ～ 2008

- 입주업체 : LCD관련 약 90여개사 (당동 : 15, 선유 : 75)

* 입주계약 : 당동 4개사(준공 2), 선유 53개사(준공 5, 건축중 4)

- 추진공정 : 당동 45%, 선유 85%

○ 추진상황

- 2005.  6. 20 : 실시계획 승인

- 2005.  7. 22 : 부지조성공사 착공

- 2006. 12. 20 : 이주택지, 근생부지 분양

○ 추진계획

- 2007.  4.  1 : 이주택지(131세대), 근생부지(10필지/223명) 입주개시

- 2007. 11. 30 : 협력업체 분양 및 입주계약 완료(경기지방공사)

- 2007. 12. 30 : 부지조성공사 완료 및 공공시설물 인계인수

- 2008.  6. 30 : 산업단지 준공

※ 화학대 이전(양여 17천평/130억원, 기부 39천평/230억원)

- 2006.  2.  1 : 군협의 합의각서 체결

- 2006.  12. 6 : 국유재산관리계획 반영(재경부)

- 2007.  3. 30 : 국방부 실시계획 승인, 미보상 토지 수용(6/34필지)

- 2007.  4. 10 : 공사 착공

- 2007. 12. 30 : 준공 및 시설물 기부

□ 파주월롱첨단산업단지(LG계열사) 조성

○ 사업개요

- 위    치 : 월롱면 능산리, 문산읍 내포리 일원 / 25.5만평

- 사 업 비 : 2,557억원(도비 45 시비 45 사업시행자 2,467)

* 실시설계 완료후 사업비 확정

- 입주업체 : LG전자, LG화학, LG이노텍, LG마이크론

○ 추진상황

- 2006.  1. 26 : 산업단지 입지후보지 결정

- 2006. 12. 20 : 지구지정 및 개발계획 승인(경기도)

- 2007.  1. 25 : 문화재 지표조사 협의 완료(문화재청)

- 2007.  1. 29 : 제영향평가(환경,교통,재해,인구) 관련부서 협의

○ 추진계획

- 2007. 2.  5 : 제영향평가 주민설명회 개최

* 30인이상 요구시 주민공청회 개최

- 2007.  6. 30 : 제영향평가 협의완료

- 2007.  9.  1 : 실시계획승인(경기도) 및 부지조성공사 착공

- 2009.  8. 30 : 산업단지 준공 및 공장건축 준공

주요업무 추진계획

〔 균형개발과 소관 〕

1. 미군반환공여지 개발 추진

대학 및 테마공원조성 등 본격적인 미군반환공여구역 및 그 주변

지역 개발을 차질없이 추진

□ 미군반환공여지 개발

○ 개    요

기 지 명	위 치	공여면적	반환시기	비 고
캠프하우즈외5개소	조리읍 봉일천외	56만평	2007년 예정	미군주둔기지

○ 추진계획

- 2007. 1. : 1단계 발전종합계획 승인신청(경기도 → 행정자치부)

- 2007. 4. : 미군반환공여지 1단계 발전종합계획 승인(행정자치부)

- 2007. 9. : 연도별 사업계획서 수립 및 승인

※ 공여지 반환 추진은 미군측과 반환협상이 완료즉시 차질없이 추진

2. 주민숙원사업 추진

• 개성과 특색있는 마을 조성으로 경쟁력 있는 지역 육성

• 낙후된 접경지역 및 민북지역 개발로 정주여건 및 소득기반 조성

□ 살기좋은 시범마을 육성 사업

○ 사업개요

- 사업대상 : 읍면동 추천마을중 심사위원회를 거쳐 선정

- 사업내용 : 시범마을 입지여건을 고려한 개성과 특색있는 마을 조성

19 -

- 선정기준 : 주요도로변 등 외지인 방문이 쉽고 재정부담이 적으며               사업파급 효과가 큰 마을 선정

※ 벤치마킹 실시후 읍면동 실행계획 재수립 및 심의위원회에서 결정

- 사업기간 : 2007. 2. 1 ～ 9. 30

○ 추진계획

- 2007.  1. 26 : 사업계획 재수립 및 보고 (읍면동→시)

- 2007.  1. 31 : 대상마을 심사 및 결정 (제2차 심사위원회 개최)

- 2007.  2.  9 : 설계 완료

- 2007.  2. 12 ～ 9. 30 : 사업실행

- 2007. 10. 30 : 종합평가

□ 접경지역 및 민통선 북방지역 개발사업

○ 사업개요

- 사업대상 : 3읍 8면(문산읍, 파주읍, 법원읍, 탄현면, 광탄면, 파평면

적성면, 군내면, 장단면, 진동면, 진서면)

- 사업내용 : 생활환경 개선․생산기반 시설정비

- 사업기간 : 2003 ~ 2012(10년간)

- 총사업비 : 92,250백만원 (국 59,780  도 29,045  시3,425)

- 2006까지 투자액 : 24,056백만원(접경지역 17,456  민통선북방 66,000)

- 2007년 투자예정액 : 7,996백만원(접경지역 6,596  민통선지역 1,400)

※ 살기좋은 마을만들기 등 집중과 선택의 여건이 우수한 마을 우선 선정

○ 추진계획

- 2007.  2. 28 : 사업대상지 선정 및 설계

- 2007.  3. 20 : 공사 착공

- 2007.  9. 30 : 공사 완료

□ 소규모 주민숙원사업

○ 사업개요

- 사업대상 : 마을회관 4동, 금촌1동 주민숙원사업

- 사업기간 : 2007. 1. 30 ～ 9. 30

- 사 업 비 : 815백만원(시비)

○ 추진계획

- 2007.  1. 30 : 설계 완료

- 2007.  3. 20 : 공사 착공

- 2007.  9. 30 : 공사 완료

3. 대학설립 추진

• 2008년 50만을 육박하는 중대형 자족도시 형성에 따라 쾌적한

교육환경의 조성으로 자치교육 실현 및 교육도시 기틀마련

□ 두원공과대학 (2008. 3월 개교예정)

○ 개   요

- 위    치 : 파주읍 봉암리 산 115외 5

- 부    지 : 26,641평 / 건축 1,093평(연면적 4,915평)

- 규    모 : 전문대 3개학과

(디스플레이, 디스플레이생산자동학과, 디지털콘텐츠) 정원 960명

- 건축착공 : ‘06. 10. 31

○ 추진계획

- 2006. 10. 31 : 공사 착공

- 2008.  2. 28 : 공사 완료

- 2008. 3월 ～ 5월 : 준공 예정

□ 이화여대(2010. 3월 개교예정)

○ 개    요

- 위    치 : 월롱면 영태리 캠프에드워드 및 주변지역

- 규    모 : 미군공여지 포함 240,000평

- 유치시설 : 대학캠퍼스, 부속병원, 연구단지 등

- 진행사항 : 기본설계용역 추진중

○ 추진계획(연구시설 결정)

- 2006.12 ～ 07.3.30 : 도시계획안(연구단지)승인신청

공고공람, 도시계획 심의, 결정고시

- 2007. 4.1 ～ 5.30 : 실시계획인가, 관련법 검토(농지․산지전용 검토)

- 2007. 6.1 ～12.30 : 보상계획 통보 및 공고, 손실보상협의, 재결신청

- 2008. 1 : 도시계획시설 변경결정 (연구→학교)

□ 신흥대학(2009. 3월 개교예정)

○ 개    요

- 위    치 : 법원읍 삼방리 산 93-13외 6필지

- 부    지 : 112,484평 / 건물 2,296평

- 규    모 : 4개학과

(전자통신과, 영어통역과, 웹프로그램, 소프트웨어)정원 592명

○ 추진계획

- 2006. 12월 : 교육부 위치변경 승인 검토중 (1월말 결정예정)

- 2007. 1월 말 : 교육부 승인 결정

- 2007. 2월 이후 : 군협의, 도시관리계획 입안, 실시계획 승인절차 이행

□ 한서울 관광대학(2009. 3월 개교예정)

○ 개    요

- 위    치 : 탄현면 금산리 산 41-1번지 외 15필지

- 부    지 : 57,955평 / 건축물 5,720평

- 규    모 : 2년제 전문대학, 4개학과

(호텔경영, 외식서비스, 관광외식, 제빵과) / 480명

○ 추진계획

- 2007. 1. 5 : 군작전성 검토결과 부동의 회신

- 2007. 2월 이후 : 군작전성 검토 재협의 준비

주요업무 추진계획

〔 교통개발과 소관 〕

1. 맞춤형 교통체계 구축

• 노선신설, 변경으로 서울도심 접근 시간 단축 및 편의 제공

• 오 ․ 벽지노선 신설 및 증회운행으로 도서벽지 주민편리성 도모

□ 대중교통 노선 신설

20-

○ 영등포행 직행노선 신설

- 일산신도시를 연계한 직행버스 노선신설

-  운행예정노선 : 금촌․교하택지~일산신도시~영등포(수혜주민 : 10만)

※ ‘06년도 2000번 신설 및 909번 서울역 연장운행 개시

○ 노선 분리 운행

- 출근시간 단축을 위한 노선 분리(삽다리~대화역 무정차 운행)

□ 오․벽지노선 신설 및 확충

○ 오․벽지 노선 신설로 대중교통 편의성 제공

- 신설대상노선 : 두지리~적성터미널

- 소요예산액 : 40백만원(차량구입지원)

○ 벽지노선 운행증회로 대중교통 지역적 편차 해소

- 대상지역 : 3개지역(식현리~자장리, 법원리~직천리, 법원리~어둔리)

- 운행횟수 : 6회 → 8회로 운행(30% 증회 운행)

2. 교통정체구간 해소 및 안전사고 예방

• 신호연동화로 교통정체구간 해소 및 시설물 정비로 사고 예방

○ 사업개요

- 신호연동화 사업 지속적 추진

- 불합리한 교통섬 정비

- 교통사고 다발지역 교통시설물 보강

○ 추진계획

- 신호 연동화 사업 추진(소요예산액 : 30백만원)

∙ 금촌택지지구외 2개구간(금촌역 앞, 파주읍 우회도로)

※ ‘06년 국도1호선, 지방도 359, 368호, 교하지구 구간 사업 완료

- 불합리한 교통섬 및 안전지대 시설물 정비

∙ 파주읍 삼거리 외 10개소

- 교통사고 다발지역 교통시설물 보강(소요예산액 : 150백만원)

∙ 갈현삼거리 외 28개소

주요업무 추진계획

〔 차량사업소 소관 〕

1. 자동차과태료 체납액 정리추진

• 자동차과태료 체납액 납세안내 및 징수독려 강화를 통한 체납액

조기 징수

• 납부의무가 소멸된 체납을 결손 처분함으로써 체납관리 행정력

낭비 요인 제거

□ 체납액 현황                                (단위 : 백만원)

구 분	총 계	보험과태료	등록․검사과태료	건설기계과태료
총체납액	8,413	4,828	3,523	62

□ 추진계획

○‘07년도 징수목표액 : 1,214백만원

- ‘06년 징수실적액  1,104백만원 대비 110백만원 증가(10%증)

○ 징수독려반 편성운영

- 시 기 : 2007. 1월부터 연중

- 방 법 : 개인별 목표량할당(1인당 1,000건)

징수실적 일일보고 및 월별평가 실시

□ 중점 추진사항

21 -

○ 체납자에 대하여 개별 전화 납부독려

○ 50만원이상 체납자 부동산 압류 실시

○ 말소차량(차령초과) 대체압류등록

○ 무재산자,소멸시효 완성자 결손처분 실시