부   의   안   건

파주시 도시관리계획(하수종말처리시설) 결정에

따른 의견청취의 건

파   주   시

파주시 도시관리계획(하수종말처리시설)결정에 따른 의견청취의 건

< 파주 통일동산 하수종말처리장>

의 안 번 호			제출연월일 : 2009. 9. . 제 출 자 : 파 주 시 장

1. 제안사유

○ 택지와 산업단지개발, 통일동산 콘도미니엄 유치 등으로 지역내 인구가 급격히 증가하고 도시화 됨에 따라 증가하는 하수량을 적정처리하고 방류수역인 공릉천, 한강 수계의 수질개선과 지역주민의 주거환경과 공중보건을 향상시키기 위하여 기존 통일동산 공공하수처리시설의 용량을 증설하고자 하며, 이에 부지면적의 증가에 따른 도시관리계획결정(변경)하고자 함.

2. 제안내용

○  도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 환경기초시설(하수도) 결정(변경) 조서

구분	도면의 표 시	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후
변경	①	하수도	하수종말 처리시설	탄현면 법흥리 1298번지 일대	22,466	(증)2,796	25,262	2000.9.7	처리시설 증설

나. 환경기초시설(하수도) 변경사유서

도면의 표시	시설명	변경내용	변경사유
①	하수도 (하수종말 처리시설)	•면적 : 22,466㎡→25,262㎡ (증 2,796㎡)	•교하택지와 출판단지 2단계 등 산업단지개발, 통일동산 콘도미니엄 유치 등으로 지역내 인구가 급격히 증가하고 도시화 됨에 따라 하수처리용량 부족이 예상되는 기존 통일동산공공하수처리시설의 용량을 증설하는 사업임. •인접부지에 증설 공공하수처리시설을 건설함으로서 증가된 하수량을 적정 처리할 수 있으며 방류수역(공릉천, 한강)의 수질개선과 수인성 전염병 예방 등 공중보건위생의 향상을 도모하고자 함.

○ 도시관리계획결정(안) 도면

4. 주민의견 청취

○ 기    간 : ‘09. 09. 04 ～ ’09. 09. 18

○ 방    법 : 일간신문(경기신문, 경기매일), 파주시 인터넷 홈페이지, 읍․면․동 게시판 게시

○ 제출의견 : 의견없음

5. 기타사항 (별첨)

○ 사업계획서

1. 사업계획서

가. 위 치 도

통일동산공공하수처리시설

나. 기존현황

기존현황	◦위 치 : 경기도 파주시 탄현면 법흥리 1298 일원 ◦면 적 : 22,466 ㎡ (국․공유지 22,466 ㎡) ◦도시관리계획 : 계획관리지역

다. 현황전경사진

조망점 ①

증설부지

기존부지

조망점 ②

기존부지

증설부지

라. 사업계획서

1) 사 업 명  :  파주시 통일동산공공하수처리시설 증설사업

2) 사업목적

- 택지와 산업단지개발, 통일동산 콘도미니엄 유치 등으로 지역내 인구가 급격히 증가하고 도시화 됨에 따라 증가하는 하수량을 적정처리하고 방류수역인 곡릉천, 한강 수계의 수질개선과 지역주민의 주거환경과 공중보건을 향상시키기 위하여 기존 통일동산 공공하수처리시설의 용량을 증설하고자 하며, 이에 부지면적의 증가에 따른 도시 관리계획 결정(변경)하고자 함.

3) 사업의 범위 및 내용

가) 사업의 범위

(1) 공간적 범위

○ 과업명 : 파주시 통일동산공공하수처리시설 증설사업

○ 처리구역 : 통일동산처리구역

○ 시설용량 : 22,000㎥/일 (기존 : 16,000㎥/일,  증설 : 6,000㎥/일)

○ 방류수역 : 문발유수지 유입 후 한강 방류

(2) 시간적 범위

○ 사업기간 : 2009. 6. 25 ~ 2011.  4. 16

○ 목표년도 : 2010년

○ 하수배제방식 : 완전분류식화

일 자	추 진 내 용	비고
2007. 8.	기본게획․입찰안내서 작성 용역 착수
2008. 4.	기본계획 자문․입찰안내서 심의 (환경관리공단)
2008. 6.	환경성검토 협의회 개최
2008. 6.	도시관리계획(하수도)결정(변경)신청
2008. 8.	기본게획․입찰안내서 작성 용역 준공 / 공사발주
2008. 9.	시의회 의견청취
2009. 1.	기본설계 적격심의 (실시설계적격자 선정, 우선시공분실시설계적격심의 병행)
2009. 1.	우선시공분 착공
2009. 5.	실시설계 심의 (낙찰작 선정)
2009. 5 ~ 6.	재원협의(한강청) / 설치인가(경기도)
2011. 1.	공사준공 (우선시공분 착공일로부터 24개월)