2010 행정사무감사

기획행정위원회

2010년 주요업무 추진상황

전산통신관실

목 차 【전산통신관실】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		3
2.	분장사무		3
Ⅱ.	2010 주요업무 추진실적
1.	시민 정보화 역량 강화		5
2.	SPEED 행정 처리 지원		6
3.	정보통신 보안업무 추진 강화		6
4.	첨단 정보도시 실현기반 구축		7
5.	공간정보의 효율적인 활용과 안정적인 서비스		9
6.	U-City 구축사업		10

【전산통신관실 소관 】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
23	23	0	0	1	1	4	4	4	4	10	10	4	4	2

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현 부서 임용일	비고
전산팀	전산통신관	행정5급	이기영	전산통신관실 업무 총괄	2010.2.12 (5개월)
	전산팀장	전산6급	전현정	전산팀 업무 총괄 정보화사전협의조정시스템 운영	2010.2.12 (5개월)
		전산7급	유경숙	정보화마을, 정보화교육	2010.2.12 (5개월)
		전산7급	김은옥	지식경영시스템, 보안계획수립	2010.2.12 (5개월)
		행정8급	이진희	서무, 회계, 행정전자서명	2010.2.12 (5개월)
		전산8급	안혁기	전산실운영, S/W관리, 전산장비관리	2010.2.12 (5개월)
		전산9급	임소희	새올행정, 전자문서	2010.2.12 (5개월)
		기능9급	송영인	시군구행정종합시스템운영	2010.2.12 (5개월)

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현 부서 임용일	비고
통신팀	통신팀장	방송통신6급	김을련	통신팀 업무총괄	2010.2.12 (5개월)
		방송통신8급	김환태	정보통신공사 설계 및 감독	2010.2.12 (5개월)
		방송통신8급	이병수	정보통신 보안시스템 운영	2010.2.12 (5개월)
		방송통신8급	박성환	정보통신망 및 민통선출입통제시스템	2010.2.12 (5개월)
		방송통신9급	김우현	정보통신공사 사용전검사	2010.2.12 (5개월)
		방송통신9급	최현주	정보통신 보안시스템 운영	2010.2.12 (5개월)
		기능8급	이정현	교환(안내)업무, 청내방송	2010.2.12 (5개월)
		기능9급	김수환	정보통신공사 사용전검사	2010.2.12 (5개월)
		기능9급	박기배	신청사 정보통신 공사 및 감독	2010.2.12 (5개월)
GIS팀	GIS팀장	전산6급	장호성	GIS 업무 총괄	2010.2.12 (5개월)
		전산7급	남효정	GIS시스템 관련 성과물 감독	2010.2.12 (5개월)
		시설9급	김 충	GIS DB 구축 및 성과물수집 관리	2010.2.12 (5개월)
U-City팀	U-City팀장	행정6급	천유경	U-City업무지원, 유비파크운영	2010.2.12 (5개월)
		전산7급	정명원	유비쿼터스도시계획 수립	2010.2.12 (5개월)
		방송통신9급	김선흠	U-City도시정보센터	2010.2.12 (5개월)

Ⅱ. 2010 주요업무 추진실적

1. 시민 정보화 역량 강화

□ 다양한 지역정보화 사업추진

○ 사업개요 : 시민의 정보격차 해소를 위한 정보화교육 추진

○ 예 산 액 : 135,000천원

○ 추진실적

∙ 시민정보화교육 : 계획인원 1,600명중 809명 수료(총10기중 5기 운영)

∙ 실버정보대학운영 : 18기 30명중 26명 수료(19기 30명 8.30일 개강)

∙ 은빛모아IT경진대회 개최 : 2010. 5. 13 개최(경기도대회 4명 수상)

□ 도시와 농촌이 하나 되는 정보화마을 추진

○ 사업개요 : 정보화마을 홍보 강화 및 마인드향상 교육

○ 예 산 액 : 81,772천원

○ 사업대상 : 통일정보화마을(군내면), 산머루정보화마을(적성면 객현1리)

○ 추진실적

∙ 산머루정보화마을 입구 도로표지판 설치(37번 국도)

∙ 정보화마을 체험상품 운영

- 감자캐기(통일마을) : 63명참가 1,395천원

- 옥수수따기(통일마을), 곤충만들기(산머루마을) : 체험 모집중

∙ 우수 정보화마을 벤치마킹 실시

- 마을상호교류 : 통일마을 25명 산머루마을 견학(머루잼, 비누만들기 체험 참여)

- 우수 마을 견학 : 충북 괴산군 둔율올갱이마을(2010. 8. 31)

2. SPEED 행정 처리 지원

□ 전산장비 보급 및 체계적 관리

○ 사업개요

∙ 전산장비(PC, 모니터, 프린터) 교체 및 보급

∙ 업무수행 지원을 위한 전산장비 유지보수 운영

○ 예 산 액 : 444,260천원

○ 추진실적

∙ 전산장비보급

- 신규 : PC(18대), LCD모니터(16대), LED모니터(2대), 프린터(2대)

- 교체 : PC(263대), LCD모니터(236대), LED모니터(10대), 프린터(3대)

∙ 전산장비 유지보수 처리건수 : 1,622건

- 관리인력 : 담당공무원 1명, 외주업체 상주 3명

3. 정보통신 보안업무 추진 강화

□ 보조기억매체 보안관제시스템 구축

○ 사업개요

∙ 보안USB를 제외한 보조기억매체 저장금지 및 보안USB 사용기록

○ 예 산 액 : 96,952천원

○ 추진실적

∙ 기    간 : 2010. 2. 16∼2010. 3. 16

∙ 사업내용 : 보조기억매체 보안관제시스템 1식, 보안USB매체 850개(8GB)

□ 정보시스템 접근통제 감시시스템 구축

○ 사업개요

∙ 내부 행정망 서버에 접속하는 사용자의 접근통제

∙ 인가된 사용자들의 작업 상황을 실시간 감시 및 로그기록

○ 예 산 액 : 72,000천원

○ 추진실적

∙ 기    간 : 2010. 4. 12∼2010. 5. 12

∙ 사업내용 : 접근통제 감시시스템 1식, 감시대상 서버 라이센스 50대

□ 통합보안시스템 구축

○ 사업개요

∙ 비 인가자의 네트워크 통신망 접속을 사전 차단·통제

∙ 바이러스 방역시스템을 구축하여 사용자 단말기(PC)의 바이러스, 악성코드 등을 치료 및 예방

○ 예 산 액 : 106,000천원

○ 추진실적

∙ 기    간 : 2010. 3. 16∼2010. 4. 15

∙ 사업내용 : 통합보안시스템 1식, 바이러스 방역시스템 1식

4. 첨단 정보도시 실현기반 구축

□ 초고속 정보통신 인프라 구축

○ 사업개요

∙ 초고속 자가광통신망을 링형으로 구성, 특정구간 장애 발생시 우회로를 통한 통신 서비스

∙ 작은도서관 통신망 구축(조리, 월롱, 광탄, 파평)

○ 예 산 액 : 647,000천원(자가망 602,000천원/ 도서관 45,000천원)

○ 추진실적

∙ 기 간 : 2010. 3. 19∼2010. 6. 22

∙ 구 간

- 두지간이펌프장∼적성∼법원∼광탄 : L=29Km

- 작은도서관 : L=2Km

□ 지역아동센터 IPTV 공부방 설치

○ 사업개요 : 지역아동센터에 초고속 인터넷 이용 IPTV 설치, 저소득 소외계층 아이들의 교육기회 확대

○ 예 산 액 : 14,490천원(도 7,245천원/ 시 7,245천원)

○ 추진실적

∙ 기 간 : 2010. 6. 23∼ 2010. 7. 5

∙ 설치현황

번 호	센 터 명	주 소	모 델 명	비 고
1	비젼커뮤니티	문산읍 선유4리 419-4	스텐드	TV설치조건 - 인터넷(QOOK) : 신규가입 - 가입명의 : 센터명 - 요금(3년약정) : 1년무료, 2년유료
2	열매맺는	파주읍 연풍리 403-11	스텐드
3	새하늘	교하읍 교하리 354-18	벽걸이
4	세계로	법원읍 대능리 216-1	벽걸이
5	초록빛꿈터	문산읍 문산리 8-2	스텐드
6	사랑의꿈터	금촌동 341-44	벽걸이
7	엄마	금촌동 791-7	벽걸이
8	성체의 집	파평면 장파리 379-7	스텐드
9	아이스쿨	야동동 629	스텐드
10	솔로몬	적성면 식현리 364-2	스텐드
11	큰빛	교하읍 문발리 603-4	벽걸이
12	문산 행복한 홈스쿨	문산읍 문산리 95-39	스텐드
13	새기쁨	문산읍 문산리 86-3	벽걸이
14	새생명	아동동 292-5	시범사업	한국디지털미디어협회

5. 공간정보의 효율적인 활용과 안정적인 서비스

□ 수치지도 갱신 사업

○ 사업개요

∙기  간 : 2010. 2. 19～2010. 10. 6

∙규  모 : 191도엽 (신규 17/ 수정 174)

∙내  용 : 기 제작된 수치지도 갱신 (축적 1/1,000)

- 대상지역 : 광탄, 교하, 금촌, 문산, 법원, 조리, 파주(46.6㎢)

○ 예 산 액 : 868,000천원(국 434,000천원/ 시 434,000천원)

- 계 약 액 : 722,000천원(국 361,000천원/ 시 361,000천원)

○ 추진실적

∙2010.1.20 : 갱신 대상지역 선정완료

∙2010.1.25 : 국토지리정보원과 협약 체결

∙2010.3.24 : 항공영상촬영 완료

○ 향후계획

∙2010. 4∼9월 : 지도작업 및 성과심사(국토지리정보원 자체)

∙2010. 10월 : 사업완료

□ 위성영상 갱신 사업

○ 사업개요

∙기  간 : 2010. 3. 18～2010. 12. 31

∙내  용

- 위성영상 갱신 672㎢(해상도 0.5m 급)

- 영상처리 및 공간정보 시스템에 연계

○ 예 산 액 : 60,000천원(계약액 : 53,980천원)

○ 추진실적

∙ 2010.3.17 : 계약

∙ 2010.6. 8 : 공공측량작업규정 접수

∙ 2010.6.17 : 공공측량작업규정 승인통보

∙ 2010.7.31 : 위성영상 촬영 및 기초자료 수집

○ 향후계획

∙ 2010. 10∼11월 : 위성영상 촬영완료, 보안성검토 및 성과심사

∙ 2010. 12월 : 시스템 적용

6. U-City 구축사업

□ 유비쿼터스도시계획 수립

○ 사업개요

∙ 범  위

- 공간적범위 : 파주시 행정구역 672㎢

- 시간적범위 :  2011년∼2015년(주기 5년)

∙ 기  간 : 2010. 3. 29∼2010. 9. 22

∙ 계약자 : 나눔정보통신(주)

∙ 주요내용

- 유비쿼터스도시의 건설 등에 관한 법률 제8조에 의한 법정계획

- 파주시 특성을 고려한 유비쿼터스도시의 기본방향, 목표, 추진전략 수립

- 유비쿼터스도시의 기반시설, 서비스 구축 및 운영·관리방안 마련

○ 예 산 액 : 300,000천원(계약액 : 216,364천원)

○ 추진실적

∙ 2010. 2. 24 : 사전조사 및 용역발주

∙ 2010. 3. 29 : 착수보고회

∙ 2010. 6. 10 : 유비쿼터스도시계획 WorkShop

○ 향후계획

∙ 2010. 8월 : 중간보고회

∙ 2010. 9월 : 유비쿼터스도시계획 용역완료/보고회

□ 교하 U-City구축

○ 사업개요

∙ 범  위 : 교하 1·2지구 9.5㎢(46천세대/124천명)

∙ 기  간 : 2005. 11. 2～2011. 2. 11

∙ 대  상 : 10개 분야 48개 단위서비스

- 교통 도시정보센터, 모바일, 물순환, 방범, 보건복지, 인프라, 포탈, 환경, UIS

∙ 목표공정율 : 70%(7.31현재 40%)

○ 예 산 액 : 103,000,000천원(계약액 : 77,000,000천원)/ 신도시조성사업비

○ 추진실적

∙ 2010. 6. 17 : 「도시정보센터」구축완료

- 정보시스템 개발 : 센터상황실, 시스템 구축완료 및 시험 운영

- 정보통신 공사 : 교통, 방범, 인프라, 환경, UIS등의 구축

○ 향후계획

∙ 2010. 8월 : 도시정보센터 운영을 위한 시스템 운영자 및 관리자 교육

∙ 2010. 9월 : 도시정보센터 시험운영 실시

∙ 2010.11월 : 교하 U-City 구축사업 완료(1지구)

∙ 2011. 2월 : 교하 U-City 구축사업 완료(2지구)