2011 행정사무감사

도시산업위원회

2011년 주요업무 추진상황

도시건설국

목 차 【도 시 과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무
Ⅱ.	2011 주요업무 추진실적
1.	지역의 균형적인 발전을 위한 도시정책 추진
2.	체계적인 도시정비 추진
3.	골프장 사업 추진
4.	저탄소 녹색·문화도시 건설
5.	파주시 경관계획 수립 추진
【건 설 과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무
Ⅱ.	2011 주요업무 추진실적
1.	국·공유재산 관리
2.	도로망 확충
3.	시민과 함께하는 하천 조성
【안전관리과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무

Ⅱ.	2011 주요업무 추진실적
1.	재난취약시설 안전관리 정착
2.	자연재해 예방사업 추진
3.	민방위 시설·장비 확충사업 추진
【상하수도과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무
Ⅱ.	2011 주요업무 추진실적
1.	수돗물 공급지역 확대
2.	공공하수도 확충
【도로관리사업소】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무
Ⅱ.	2011 주요업무 추진실적
1.	원-스톱 도로굴착 지속 추진
2.	쾌적한 도로환경 조성
3.	원활한 교통소통을 위한 제설작업 추진
4.	군 방호벽 정비사업 추진
5.	선유리 통일로 교통체계개선사업(민간위탁)
6.	도로 주요구조물 점검 및 보수·보강
7.	교하신도시 특수구조물 인수·인계 점검 추진
8.	도로 미불용지 보상 추진

도 시 과  소관

2011 주요업무 추진상황

【도 시 과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
23	23	1	1	1	1	4	5	9	9	8	7	1	0	4

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현 부서 임용일	비고
도시계획과	과장	시설5급	김홍식	∙도시계획과 업무 총괄	2010.11.15 (8개월)
도시계획팀	팀장	시설6급	이은갑	∙도시계획팀 업무 총괄	2010. 2.12 (1년 5개월)
		행정7급	장연희	∙근무지지정(총무과)	2010.11.15 (8개월)
		시설7급	이종호	∙도시기본계획, 도시관리계획 도시계획위원회 운영	2008. 8. 1 (2년 11개월)
		시설7급	김길모	∙도시관리계획수립(관리지역 용도세분), 온천	2007. 7. 2 (4년)
		행정8급	황소영	∙육아휴직	2010.11.15 (8개월)
		시설8급	강은경	∙서무, 예산, 회계, 기반시설 특별회계 관리	2010. 2.12 (1년 5개월)
		시설9급	정재욱	∙군사, 도시통계	2009. 5.14 (2년 2개월)
		시간제 계약직	전종기	∙군사정책자문	2010.10.1 (9개월)
		무기계약	방지혜	∙국장실 비서	2010.11.15 (8개월)

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현 부서 임용일	비고
시설지구팀	팀장	시설6급	전재식	∙시설지구팀 업무총괄	2009. 7. 1 (2년)
		시설7급	오진호	∙지구단위계획수립 및 지정, 도시개발사업, 도시계획시설 결정 및 실시계획인가	2010. 2.12 (1년 5개월)
		시설7급	이길	∙지구단위계획수립 및 지정, 도시개발사업, 도시계획시설 결정 및 실시계획인가	2009. 7. 1 (2년)
		시설9급	허권준	∙도시계획시설결정 및 실시계획 인가, 장기미집행시설 대지보상, 토지구획정리사업 관리	2009. 1.19 (2년 6개월)
신도시팀	팀장	시설6급	김광회	∙신도시 업무 총괄	2010.11.15 (8개월)
		시설7급	유기섭	∙교하 1,2지구 조성사업	2010.11.15 (8개월)
		시설7급	이정훈	∙A1복합커뮤니티센터	2010.11.15 (8개월)
		공업8급	최성덕	∙A1복합커뮤니티센터	2010.11.15 (8개월)
		시설8급	김경준	∙교하 1,2지구 현장점검, 공동구	2010.11.15 (8개월)
		시설8급	이영훈	∙교하 3지구, 물순환시스템	2010.11.15 (8개월)
		청원경찰	김주범	∙행위제한지역 순찰	2010.11.15 (8개월)
		전문직	이희철	∙신도시 자문	2010.11.15 (8개월)
공공 디자인팀	팀장	계약직	김승희	∙공공디자인팀 업무 총괄	2008. 1.23 (3년 6개월)
		계약직	한은영	∙경관계획 수립, 경관위원회 운영, 공공디자인 협의 등	2008. 1. 2 (3년 6개월)
투자유치 TF팀	팀장	행정6급	이종칠	∙투자유치팀 업무총괄	2011. 6. 7 (1개월)
		시설7급	박지영	∙국내외 투자유치	2010. 3.11 (1년 4개월)
		시설8급	이정훈	∙국내외 투자유치	2011. 6. 7 (1개월)

Ⅱ. 2011 주요업무 추진실적

1. 지역의 균형적인 발전을 위한 도시정책 추진

□ 2020 도시기본계획 재수립 추진

○ 목표인구 재설정을 통한 도시정책 기반마련

- 급변하는 도시환경에 대응하고 시정 비전에 부합하는 도시기본계획 수립

∙ 도시기본계획상 개발축을 통한 지역균형발전 방향 제시

∙ 토지이용 및 인구배분계획

∙ 공원, 녹지, 경제, 산업, 관광, 문화시설 등의 개발 및 보전방향 지표계획

○ 추진실적 및 계획

∙ 2009. 4월 : 용역계약체결 및 착수

∙ 2010. 3월 : 파주시 도시계획위원회 사전 자문

∙ 2010. 4월 : 주민공청회 실시 및 시의회 의견청취

∙ 2010. 7월 : 2020파주 도시기본계획 민선5기 공약사항 방침결정

∙ 2010.10월 : 공약사항 반영 관련부서 협의 완료

∙ 2010.11월 : 도시계획위원회 본안 자문완료 및 경기도 승인신청

∙ 2010.12월 : 경기도 승인신청

∙ 2011. 5월 : 관련부서 협의 완료(중앙부처 포함)

∙ 2011. 6월 : 경기도 도시계획위원회 본회의 심의

∙ 2011. 7월 : 경기도 도시계획위원회 분과위 심의 및 경기도 승인

∙ 2011. 8월 : 기본계획 보고서 파주시 공고

○ 기대효과

∙ 인구확보를 통한 민간개발을 유도하여 균형발전 및 도시성장관리 체계 마련

□ 2020 도시관리계획 수립

○ 도시기본계획에 부합하는 도시관리계획 수립

- 도시기본계획에서 제시하는 도시비전에 대한 세부적 도시관리방안 마련

∙ 2020도시기본계획 재수립 용도지역 계획 수립

∙ 지역간 균형 발전을 위한 밀도계획 및 지구지정 계획 수립

∙ 시가화 예정용지 관리계획 및 도시관리계획 결정에 따른 지형도면 고시

- 불합리한 용도지역 조정을 위한 도시관리계획 재정비

∙ 토지이용 현황 및 지적과 불부합된 용도지역 정비

∙ 보전 ․ 생산 관리지역 내 입지된 생산시설(공장 등)의 용도지역

현실화

※ 보전․생산 관리지역 내 1만㎡이상 공장(A≒0.3㎢)

∙ 관리지역 세분화 이후 개발지역에 대한 용도지역 현실화 조정

※ 용도지역 조정 요구 민원(A≒0.1㎢)

○ 추진실적 및 계획

∙ 2010.  2월 : 용역계약체결 및 착수

∙ 2010.  6월 : 2020파주 도시기본계획 수립 지연에 따른 용역일시중지

∙ 2011.  8월 : 용역재착수 및 기초조사 완료

∙ 2011. 10월 : 관련부서 협의실시

∙ 2011. 12월 : 시의회 의견청취

∙ 2012.  1월 : 시 도시계획위원회 자문 및 심의(시장결정사항)

∙ 2012.  2월 : 도시관리계획 경기도 승인신청(도지사 결정사항)

∙ 2012.  5월 : 경기도 도시계획위원회 심의

∙ 2011.  6월 : 경기도 결정 고시(도지사 결정사항)

○ 기대효과

∙ 도시기본계획과 부합하고 각종 인․허가의 지침이 되는 도시관리계획 수립

∙ 난개발 방지와 체계적이고 계획적인 도시개발 유도

∙ 불합리한 용도지역 재검토를 통해 토지이용규제 완화와 민원 해소

∙ 기존 생산시설(공장, 제조업 등)의 용도지역 현실화를 통한 기업애로 해소

□ 도시계획 정보체계(UPIS) 구축

○ 사업개요

∙ 용 역 명 : 도시계획정보체계(UPIS) 구축 용역

※ Urban Planning Information System

∙ 용역기간 : 2011. 5월 ～ 2012. 2월

∙ 용 역 비 : 569백만원

○ 모든 도시계획자료 전산시스템 구축

∙ 국토부 의무화 사업으로 전국망 구축 후 대민서비스 제공 계획임

- 도시계획 도형자료 구축

- 도시계획 현황도 및 연혁도, 집행․미집행 현황도 구축

- 도시계획 도형 속성자료 구축

- 고시자료, 입안자료, 조서자료, 조서자료 연계, 도형과 조서간의 연계

- 도시계획 정보체계(UPIS) 표준시스템 도입 및 적용

○ 추진실적 및 계획

∙ 2011.  5월 : 용역 계약체결 및 착수

∙ 2011.  6월 : 기초자료 수집

∙ 2011. 11월 : 도형자료 및 속성자료 구축

∙ 2011. 12월 : 데이터 상호 연계 및 통합 DB구축

∙ 2012.  1월 : 도시계획정보체계(UPIS) 표준시스템 도입 및 적용

∙ 2012.  2월 : 용역완료 및 활용

○ 기대효과

∙ 효율적인 토지정보의 활용 및 과학적인 도시계획 정보 생산

∙ 신속한 대민 서비스를 제공하여 행정수요에 대한 만족도 향상

□ 군사기지 및 군사시설 보호구역 완화 추진

○ 군사기지 및 군사시설 보호구역 현황

( 2011. 4. 30. 기준 )

구 분	행정구역	해제지역	군사기지 및 군사시설 보호구역
			계	통제보호	제한보호 (위탁지역)
합계(㎢)	672.79	60.85	611.94	161.45	450.49 (58.87)
비율(%)	100.00	9.04	90.96	24.00	66.96 (13.06)

○ 추진실적

( 단위 : ㎢ )

구 분	2010년도	2011년도	비 고
해 제	0.77	-	군 규제 완화 요청 (2009.5.1.) 해제요청 : 59.67㎢ 위탁요청 : 15.46㎢
고도위탁	2.23	2.63

○ 2011년도 추진계획

∙ 2011. 6.  군 규제 완화 요청 (파주시→관할부대)

※ 해제요청 10.22㎢, 위탁요청 45.79㎢

∙ 2011. 7.  관할부대 방문설명 및 협의

2. 체계적인 도시정비 추진

□ 통일동산지구 제2종지구단위계획 재정비 추진

○ 사업개요

∙ 추진배경 : 1990년대부터 조성한 통일동산지구는 여건변화로 現 지구단위계획이 현실과 부합하지 않아 지구 활성화를 위하여 제2종지구단위계획 재정비

∙ 위    치：파주시 탄현면 법흥리·성동리·금산리 일원

∙ 과업기간：2010. 10월 ∼ 2011. 9월

∙ 과업규모：5.537㎢ (168만평)

∙ 사 업 비：500백만원 (2010년 2회 추경)

○ 추진실적 및 계획

∙ 2010.10월 : 용역 착수(지구단위계획 변경)

∙ 2011. 6월 : 지구단위계획(안) 작성

∙ 2011. 7월 : 주민공람, 관계기관 협의, 의회의견청취

∙ 2011. 8월 : 도시계획위원회 자문 및 심의(시→도)

∙ 2011. 9월 : 결정고시 및 지형도면 고시

□ 세종병원(종합의료시설) 도시관리계획 결정 추진

○ 사업개요

∙ 위    치：파주시 월롱면 덕은리 산186-1번지 일원(예비군훈련장 주변)

∙ 사 업 량：108,711㎡(종합의료시설 100,976㎡, 도로 7,735㎡)

∙ 유치시설 : 종합의료시설 800병상, 요양병동, 의학연구소 등

∙ 사업기간：2010년 ~ 2019년

∙ 사 업 자：의료법인 혜원의료재단 세종병원

○ 추진실적 및 계획

∙ 2009.10월 : 군부대 동의(광탄면 용미리 특공연대 내 이전)

∙ 2011. 4월 : 도시관리계획 결정(변경) 제안

∙ 2011. 6월 : 관련부서 협의

∙ 2011. 7월 : 주민공람 및 도시계획위원회 자문(시)

∙ 2011. 8월 : 도시관리계획(용도지역 변경) 도시계획위원회 심의(도)

∙ 2011. 9월 : 도시관리계획(시설) 결정 심의(시)

∙ 2012. 6월 : 실시계획인가

∙ 2012. 9월 : 공사착공

∙ 2019.12월 : 공사준공

3. 골프장 사업 추진

□ 골프장 사업 추진(12개소, 177홀)

○ 운영중(6개소, 78홀)

∙ 서원밸리(18홀 회원제, 9홀 대중제), 서서울(18홀 회원제),

∙ 베스트 밸리(9홀 대중제), J-퍼블릭골프장(6홀 대중제)

∙ 파주컨트리 클럽(18홀 대중제)

○ 공사중(4개소, 81홀)

∙ 투모로 골프장(18홀 대중제)

∙ 기산리 골프장(18홀 대중제)

∙ 스타밸리 CC 골프장(27홀 대중제)

∙ 서원밸리 골프장【기존9홀→변경27홀(대중)】및 콘도미니엄 조성(50실)

○ 행정절차 이행중(2개소, 18홀)

∙ 마장리 골프장(9홀 대중제)

∙ 한서울 골프장(9홀 대중제)

○ 추진계획

∙ 2011. 8월 : 실시계획인가 신청 예정(한서울 골프장)

∙ 2011.11월 : 실시계획인가 신청 예정(마장리 골프장)

∙ 2011.12월 : 공사준공(스타밸리 CC)

∙ 2012. 5월 : 공사준공(기산리)

∙ 2012.12월 : 공사준공(투모로, 서원밸리 대중제)

○ 기대효과

∙ 국민건강을 위한 레저기회 확대와 고용증대를 통한 지역경제 활성화

∙ 골프 대중화에 따른 수요 충족, 지역민과 함께하는 골프문화 창출

4. 저탄소 녹색∙문화도시 건설

□ 교하신도시 건설

○ 사업개요

∙ 위     치 : 교하읍 와동리외 11개리 일원

∙ 면적‧인구 : 16,499천㎡(499만평, 78천세대, 205천명)

		1‧2지구 : 955만㎡(289만평, 46천세대, 124천명)
		3지구 : 695만㎡(210만평, 32천세대, 81천명)

∙ 사 업 비：15조1,492억원(1‧2지구: 8조7,282억/3지구: 6조4,210억)

∙ 사업기간 : 2003년∼2014년/시행자 : 1‧2지구(파주시, LH), 3지구(LH)

○ 추진실적

∙ 1․2지구 조성공사 : 공정률 85%

∙ 3지구 : 4자협의체 개최(2회) 및 금융구제방안 마련

○ 추진계획

∙ 2011. 12월 : 1‧2지구 조성완료

∙ 2011. 12월 : 3지구 실시계획승인

□ 교하가람행복센터(복합 A1) 건립

○ 사업개요

∙ 사업규모 : 연면적 29,359㎡(지하2층⋅지상8층)

∙ 사 업 비 : 690억원  ※ 용 도 : 동사무소, 공연장, 수영장 등

∙ 사업기간 : 2010년 5월 ∼ 2012년 5월

○ 추진실적

∙ 2009. 7월 : 사업자 선정 및 실시설계

∙ 2010. 5월 : 공사 착공(공정율 : 21%)

○ 추진계획

∙ 2012. 5월 : 공사 준공

5. 파주시 경관계획 수립 추진

□ 파주시 경관계획 수립 추진

○ 용역 개요

∙	위    치	: 파주시 전지역

∙	내    용	: 경관자원 조사·분석, 계획수립, 경관설계지침 및 실행계획 등

∙	용 역 비	: 금366백만원

∙	기    간	: ’11. 4. 1 ∼ ’12. 3.31 (12개월)

∙	수행업체	: (주)동호, (주)준원도시경관연구센터

∙	근    거	:「경관법」제6조 및「파주시 경관 조례」제4조

○ 추진실적

∙	’10. 9. 7	: 수립 계획 보고

∙	’10.11.11	: 용역사전과제 심의

∙	’11. 1.24	: 계약 심사

∙	’11. 3. 9 ∼ 3.15	: 사업수행능력평가

∙	’11. 4. 1	: 용역 착수

∙	’11. 4.15	: 착수 보고

○ 향후 추진계획

∙	’11. 9월 : 중간보고

∙	’11.11월 : 전문가 워크숍

∙	’12. 1월 : 최종보고, 주민공청회, 시의회 의견 청취

∙	’12. 2월 : 파주시 경관위원회 심의

∙	’12. 3월 : 경기도 경관위원회 심의

○ 기대효과

∙	각종 개발 사업으로 인해 예상되는 난개발, 도시경관 획일화 및 자연경관과의 부조화 방지

∙	체계적인 경관관리를 통해 아름답고 고유한 경관으로 파주시 경쟁력 강화

건 설 과  소관

2011 주요업무 추진상황

【건 설 과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
15	15			1	1	3	3	6	6	5	5			4

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현 부서 임용일	비고
건설과장	과장	시설5급	정원모	건설과 업무총괄	2010.11.15 (8개월)
건설행정팀	팀장	행정6급	변용웅	건설행정팀 업무총괄	2010.11.15 (8개월)
		행정7급	임현진	국공유재산 무단점유, 진정민원 도유폐천부지 대부, 매각 국·공유재산 일반	2010.11.15 (8개월)
		행정7급	임정훈	국공유재산 용도폐지·무상귀속 공유재산사용허가,국공유재산 사용료 징수 및 독려	2011. 6. 7 (1개월)
		행정9급	장지현	서무, 회계, 예산	2010.11.15 (8개월)
		행정9급	김정호	전문건설업, 국공유재산관리(사용허가)	2010.11.15 (8개월)
도로건설팀	팀장	시설6급	김재군	도로건설팀 업무총괄	2010.11.15 (8개월)
		시설7급	정용언	도로정비기본계획수립 월롱첨단산업단지 진입도로 운정∼능안리간 도로	2010.11.15 (8개월)
		시설7급	곽현선	문산∼연풍간 도로확포장 도로구역결정(국도)	2010.11.15 (8개월)
		시설8급	박재영	교하공장밀집지역 진입도로 소슬APT 주변 도시계획도로 도로구역결정(지방도)	2010.11.15 (8개월)
		행정8급	윤해은	도로보상업무	2010.11.15 (8개월)
하천관리팀	팀장	시설6급	김윤회	하천관리팀 업무총괄	2010.11.15 (8개월)
		시설7급	조웅휘	소하천개수공사, 공릉천낚시단속, 하천유지관리사업, 배수문관리, 지방하천 점용허가, 예산	2010.11.15 (8개월)
		시설7급	조길현	지방하천개수공사 골재업무(허가, 신고, 등록) 국가하천 및 소하천 점용허가	2010.11.15 (8개월)
		시설9급	구경모	국가하천, 지방하천, 소하천 보상 하천 미불용지 보상	2010.11.15 (8개월)

Ⅱ. 2011 주요업무 추진실적

1. 국·공유재산 관리

□ 관리재산 현황

구 분	필지수	면 적(㎢)	금 액 (백만원)	비 고
계	41,220	86.935	1,617,309
국토해양부	23,775	76.879	148,310
경기도	5,743	3.388	308,204
파주시	11,702	6.668	1,160,795

□ 국·공유 재산관리

○ 민원처리

∙ 사용허가, 용도폐지 , 무단점유, 진정민원 등

○ 자료정비

∙ 토지합필 및 지목정리

∙ 소유권 권리보존 등 관리청 미지정 및 미등기 자료 대사

∙ 대부사항 등 DATA BASE 구축

○ 현안사업

∙ 도유폐천부지 매각 추진

∙ 국․공유 무단점유 해소

□ 도유폐천부지 매각

○ 보존부적합 토지 매각 : 보존부적합 토지의 정리를 통한 효율적 재산관리

∙ 대    상 : 200필지 73,307㎡ (적성 79, 파주 61, 기타 60)

∙ 기    간 : 2011. 4월 ～ 2012. 12월

∙ 추진단계 : 현지조사 → 대상선정 → 경기도 승인 → 매각

2. 도로망 확충

사통팔달 도로망 확충으로 지역균형발전 및 기반시설 구축

□ 자체 및 광역도로사업 : 16건  37.74Km  7,229억원

(단위 : km, 백만원)

구분		일련 번호	사 업 명	위 치	사업량	사업 기간	사 업 비				공정(%)
							계	기투자	2011	향후	공사	보상
자체사업	시행중		합계 8건		19.38		278,965	128,185	37,730	113,050
		1	파주월롱첨단 산업단지진입도로	월롱 덕은리 ～파주 봉서리	L=5.29	'06～'12	127,700	64,900	26,200	36,600	40		100
		2	문산～연풍간 (시도31호선)	파주 파주리 ～연풍리	L=3.63	'04～'12	78,900	56,100	3,600	19,200	20		100
		3	교하공장밀집지역진입도로	교하 하지석리	L=1.2	'10～'12	7,000	4,700	1,300	1,000	10		70
		4	운정역～능안리 (시도24호선 )	조리 능안리 ～상지석리	L=1.7	'06～'13	25,200	100	4,870	20,230	0		0
	계획중	5	광탄 시가지 우회도로	광탄 신산리 (분수천변)	L=1.5	'12～'14	12,200	0	0	12,200	0		0
		6	향양3리 도로확포장	파주 향양3리 ~문산 선유6리	L=2.0	'12～'14	14,540	140	0	14,400	0		0
		7	객현~구읍리간 도로확포장	적성 구읍리 ~객현리	L=3.6	'06～'14	9,500	2,050	0	7,450	0		30
		8	신산리 도시계획도로	광탄 신산리	L=0.16	'12~'13	2,000	30		1,970	0		0
		9	소슬아파트 주변 도시계획도로	문산 선유리	L=0.2	'11	765	165	600	0	0		40
		10	호수아파트 주변 도시계획도로	문산 문산리	L=0.03	'11	600		600	0	0		0
		11	등원리 도시계획도로	조리 등원리	L=0.07	'11	560		560	0	0		50
광 역 도 로 (LH 시행 사업)			합계5건		18.36		444,000	214,500	86,300	143,200
		1	신도시～성석간 도로	교하 상지석 ～고양 성석	L=2.90	'09～'11	75,800	18,000	5,000	52,800	-		18
		2	신도시 서측우회도로 (지방도357호)	교하 다율리 ～ 탄현갈현리	L=4.76	'09～'11	127,800	45,100	33,400	49,300	28		90
		3	신도시～ 일산간	고양 덕이동 ～ 대화동	L=3.20	'09～'11	111,300	84,700	26,600	-	64		98
		4	국지도56호 확장	교하 당하리 ～ 금촌	L=3.80	'09～'11	70,600	28,700	11,300	30,600	18		95
		5	지방도359호 확장	교하 당하리 ～ 금촌	L=3.70	'09～'11	58,500	38,000	10,000	10,500	26		90

□ 국가 및 경기도사업 : 9건  106.1Km  28,566억원

(단위 : km, 백만원)

구분	사업명	사업량	사업기간	사업비	비 고
국가	합계 2건	52.5		2,021,200
	서울～문산간 고속도로	L=34.7	'10～'15	1,571,200
	적성～전곡간 (국도 37호)	L=17.8	'09～'15	450,000
경기도	합계 7건	53.6		835,489
	법원～상수간 (국지 56호)	L=10.06	'05～'12	162,305
	조리～법원간 (국지 56호)	L=13.7	'07～'13	268,100
	고양～광탄간 (국지 78호)	L=9.18	'07～'12	186,030
	설마～구읍간 (지방도 371호)	L=8.03	'07～'12	113,443
	금촌～월롱간 (지방도 360호)	L=4.75	'05～'11	107,428
	장남교가설공사	L=2.14	'08～'12	46,472
	월롱～광탄간 (지방도 360호)	L=5.74	'09～'13	111,626

□ 2011년 자체 역점사업 : 4건 2,388억원

○ 월롱첨단산업단지 진입도로(5.29km, 1,277억원)

∙  보상 및 공사병행 / 산업단지 공장가동에 따라 임시개통

○ 문산∼연풍간 도로(3.63km, 789억원)

∙  기존 차량 정체 해소와 지역간 균형발전을 위한 조기착공

○ 교하 체육공원 진입도로(1.2km, 70억원)

∙  체육공원 이용활성화 및 주변공장 물류 유통여건개선 / ‘12년 준공

○ 운정역∼능안리간 도로확포장(1.7km, 252억원)

3. 시민과 함께하는 하천조성

• 하천치수기능 외 생태하천을 조성하여 시민의 생활여가 공간제공

□ 생태하천조성

○ 5건 / 26.16Km(799억원)

∙  공릉천 생태하천조성사업 외 4건

(단위 : km, 백만원)

구분	일련 번호	사 업 명	위 치	사업량	사 업 기 간	사 업 비				공정(%)		비고
						계	기투자	2011	향후	공사	보상
		계5건		26.16		79,884	17,711	16,586	45,587
국가 사업	1	공릉천 생태하천 조성사업	조리읍 장곡리 교하읍 송촌리	16.05	‘09~’14	57,400	10,943	9,500	36,957	30	29	국비100%
자체 사업	2	두포천 개수공사	파평 두포리 법원 금곡리	4.97	‘09~’12	9,383	2,555	2,500	4,328	5	63	국비60% 도비40%
	3	설마천 개수공사	적성 두지리 적성 설마리	2.21	‘09~’11	3,779	1,279	2,500		40	94
	4	보맥이천 개수공사	문산 운천리	2.33	‘07~’12	7,642	2,934	1,609	3,099	35	90	국비50% 시비50%
	5	솔개천 개수공사	적성 장현리	0.6	‘11~’12	1,680	-	477	1,203	설계	-

안전관리과  소관

2011 주요업무 추진상황

【안전관리과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
15	16	0	0	1	1	4	4	5	5	1	3	4	3	3

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현 부서 임용일	비고
	과장	행정5급	박우용	▪안전관리과 업무 총괄
재난예방팀	팀장	시설6급	김진영	▪재난예방업무 총괄	2010.11.15 (8개월)
		공업7급	김선우	▪계절별 안전관리대책(인적재난) 수립 ▪특정관리대상시설 관리 ▪시특법대상시설물 관리 ▪재난안전네트워크	2010.11.15 (8개월)
		행정7급	사수진	▪재난근무자관리▪안전관리계획서 ▪어린이 안전교육 ▪자율방재단 ▪기상특보비상연락망 관리 ▪어린이 놀이시설 관리	2009. 7. 1 (2년 0개월)
		행정8급	정지혜	▪서무, 회계, 예산 ▪재난관리기금 관리	2010. 2. 12 (1년 5개월)
		기능9급	박송재	▪사전재해영향성 검토 ▪유도선(레져시설) 점검 ▪재난취약가구 안전점검 ▪안전점검의 날 행사	2009. 7. 1 (2년 0개월)

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현 부서 임용일	비고
방 재 복구팀	팀장	공업6급	김세중	▪방재복구업무 총괄	2010. 2. 12 (1년 5개월)
		공업7급	유창민	▪자연재난 상황계획수립 ▪재난안전대책 상황실 운영 ▪풍수해저감종합계획 ▪지진,폭염,가뭄,황사종합대책	2009. 7. 1 (2년 0개월)
		시설9급	이원호	▪급경사지 유지관리 점검 ▪인명피해우려지역 관리 ▪자연재해위험지구 지정․해소 ▪재난사전대비 및 응급복구 장비임차	2009. 9. 1 (1년10개월)
방재시설팀	팀장	행정6급	윤희기	▪방재시설업무 총괄	2009. 7. 1 (2년 0개월)
		기능7급	허광일	▪방재시설 기계분야 유지관리 ▪배수펌프장 비상근무 인력배치 ▪전기안전관리자 용역 ▪읍면동 간이펌프장 점검 및 유지보수	2009. 7. 1 (2년 0개월)
		기능8급	고진호	▪방재시설 전기분야 유지관리 ▪방재시설물 공공요금 ▪배수펌프장 원격제어관리 ▪영천배수갑문 유지관리	2010.11.15 (8개월)
		정보통신9급	고상영	▪재해 예․경보시설 유지관리 ▪수위관측 및 기상관측장비 운영 ▪문자전광판, 영상회의 운영 ▪적설관측 및 영상감시반 운영	2010.11.15 (8개월)
재 난 민방위팀	팀장	행정6급	조양휘	▪민방위업무 총괄 ▪기술인력동원, 주민신고망 ▪병역신고, 충무계획 수립	2010.11.15 (8개월)
		행정7급	신승한	▪공익근무요원 관리 ▪을지연습 관리 ▪전시 민방위계획 수립	2010. 2. 12 (1년 5개월)
		별정7급	임영한	▪민방위대 편성, 화생방 ▪민방위 교육․훈련 ▪민방위 경보시설, 장비 및 물품관리 ▪대피시설, 비상급수시설 관리	2005. 2. 11 (6년 5개월)
		청원경찰	유호근	▪민방위교육장 관리	2010.11.15 (8개월)

Ⅱ. 2011 주요업무 추진실적

1. 재난취약시설 안전관리 정착

□ 재난취약시설 안전점검

○ 특정관리대상 시설물 지정 관리

∙ 대상시설 : 재난발생 위험이 높거나 재난예방을 위하여 계속 관리가 필요한 시설

- 건축물217, 교량 등 시설물50개소 상반기 안전점검 완료

○ 재난취약가구 노후 전기시설 점검 및 시설개선

∙ 대    상 : 사회소외계층(국민기초생활수급자, 독거노인 등)

∙ 기    간 : 2011. 4. 14 ～ 4. 29

∙ 재난취약가구 전기안전 점검 및 시설개선 : 375가구

□ 안전문화운동 정착

○ 안전문화운동 활성화

∙ 매월 4일 『안전점검의 날』운영 : 3회

- 19개 기관․단체 참여

- 분야별 안전문화 홍보 및 재난취약시설 점검

∙ 어린이 안전교육 : 31개교 3,289명

- 일   시 : 2011. 4. 18 ～ 6. 17

- 대   상 : 초등학교 저학년(1학년∼3학년) / 방문교육

- 내   용 : 물놀이 안전교육 및 교통체험 교육

∙ 방재안전관리교육 : 184명

- 일   시 : 2011. 6. 1

- 대   상 : 자율방재단, 재난전조정보담당관 등

- 내   용 : 각종재난에 효율적으로 대처하기 위한 전문 방재교육

2. 자연재해 예방사업 추진

□ 재난대책 상황관리 추진

○ 24시간 재난대책 상황실 유지로 신속 대응

∙ 기상특보별 재난상황근무 편성 : 3단계(준비․대비, 경계, 비상)

※ 준비(예비특보)단계부터 선제적 인원 투입

∙ 기상상황에 따른 상황판단 회의개최 신속 대응

○ 돌발성 인명피해 발생 우려지역 특별관리 - 14개소

∙ 입간판, safe line설치, 출입통제 등으로 인명피해 ZERO화 추진

○ 배수펌프장 상시 가동체제 구축으로 초기 대응 능력향상

∙ 전기안전관리자 상주 근무 및 기상특보별 근무 강화

∙ 비상용 양수기 및 모래마대 읍면동 전진배치

□ 배수펌프장 시설물 개선

○ 봉일천 배수펌프장 제진기교체 : 602백만원

○ 선유3 배수펌프장 유수지 준설 : 218백만원

○ 금촌기존 배수펌프장 원격제어설비설치 : 64백만원

□ 재해위험지구 정비사업 추진

○ 율곡재해위험지구

∙ 사업대상 : 파주시 파평면 율곡리 509번지 일원

∙ 사 업 량 : 저류지 1식(126,783㎡)

∙ 총사업비 : 11,488백만원(국비 6,893 지방비 4,595)

※ 기투자 7,878(국비 4,726  지방비 3,152)

3. 민방위 시설․장비 확충사업 추진

□ 민방위 긴급대피시설 확충

○ 사업대상 : 접경지역 12개 마을

∙ 규  모 : 12개소 3,000㎡(909평)

∙ 문산읍 3, 파주읍 1, 탄현면 3, 파평면 2, 장단출장소 3

○ 사업비 현황

∙ 사업비 : 3,905백만원

(국비 1,332 교부세 1,332 도비 342 시비 899)

○ 추진계획

∙ 실시설계용역 : 설계 용역중

∙ 공사발주/ 준공 : 읍면 예산재배정(7월초), 10월 준공완료

□ 접경지역 민방위 경보시설 확충

○ 사업개요

∙ 대  상 : 8개소

- 교하읍, 임진각, 광탄면, 탄현면, 월롱면, 적성면, 파평면, 장단출장소

∙ 사업비 : 280백만원(국비 180 도비 30 시비 70)

○ 추진계획

∙ 접경지역 민방위경보시설 확충사업 계약심사의뢰

- 경기도(계약심사담당관)

∙ 접경지역 민방위경보시설 구매설치 심사결과 통보

- 경기도(계약심사담당관)

∙ 조달청 조달발주 : 7월중

상하수도과  소관

2011 주요업무 추진상황

【상하수도과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
27	25	-	-	1	1	6	6	7	7	11	9	2	2	9

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 별	직위	직급	성명	분장사무	현부서 임용일	비고
	과장	시설5급	최귀남	상하수도과 업무총괄	2010. 2.12 (1년5개월)
수도행정팀	팀장	행정6급	김성균	수도행정팀 업무총괄	2009. 7. 1 (2년)
		행정7급	윤은주	상수도사업 민간위탁, 서무 상수도사업 공기업 운영	2009. 7. 1 (2년)
		행정8급	권지현	상수도계약, 자산, 통계	2010.11.15 (8개월)
		행정9급	최미현	하수도계약, 하수도사업 공기업 운영	2009. 9. 1 (1년 10개월)
		행정9급	박지영	상하수도 특별회계 지출 상수원보호구역	2010. 9. 1 (10개월)
		행정7급	윤혜영	육아휴직	2009. 7. 1 (2년)
		행정8급	유미령	육아휴직	2009. 7. 1 (2년)
수도요금팀	팀장	행정6급	김기홍	수도요금팀 업무총괄	2009. 7. 1 (2년)
		공업7급	이수환	지하수개발․이용 인허가, 가축매몰지 지하수(관측정) 수질검사	2011.11.15 (8개월)

담 당 별	직위	직급	성명	분장사무	현부서 임용일	비고
		세무7급	송순미	상수도요금 징수결의, 과오납 반환, 상수도 특별회계 세입	2010. 2.12 (1년 5개월)
		행정9급	박주옥	하수도요금 징수결의, 과오납 반환, 하수도 특별회계 세입	2011. 1. 1 (6개월)
		기능7급	오태일	지하수개발․이용 인허가, 지하수수질측정망․방치폐공 관리	2009. 7. 1 (2년)
		청 경	방문수	지하수 검침	2009. 7. 1 (2년)
상수시설팀	팀장	시설6급	박기홍	상수시설팀 업무총괄	2010.11.15 (8개월)
		시설7급	오태원	수자원공사 위탁관련업무, 수도정비기본계획, 배수지 건설	2010.11.15 (8개월)
		시설8급	이창원	빗물이용시설, 전용상수도 GIS관망관리, 원인자부담금	2010. 2.12 (1년 5개월)
		공업9급	임왕자	마을상수도유지관리, 저수조관리, 가정급수공사, 상수도대행업소관리	2010.11.15 (8개월)
		시설8급	이영림	육아휴직	2009. 7. 1 (2년)
하수시설팀	팀장	시설6급	김달수	하수시설팀 업무총괄	2009. 7. 1 (2년)
		시설7급	이만재	하수도정비 기본계획수립, 공공하수처리시설 건설	2010. 2.12 (2년)
		환경7급	기군도	공공하수처리시설 운영․관리	2011. 2. 1 (1년 5개월)
하수처리팀	팀장	시설6급	임상범	하수처리팀 업무총괄	2010.11.15 (8개월)
		환경7급	박태진	개인하수처리시설․배수설비신고, 분뇨수집운반업 허가 및 지도점검	2010. 2.12 (1년 5개월)
		시설8급	강재경	하수관거 정비사업, 노후하수관 개량사업	2009. 7. 1 (2년)
		공업8급	곽병도	개인하수처리시설․배수설비 준공, 지도점검	2009. 7. 1 (2년)
		공업8급	박군도	개인하수처리시설․배수설비신고, 분뇨수집운반업 허가 및 지도점검	2009. 7. 1 (2년)
		기능7급	원종현	개인하수처리시설․배수설비 준공, 지도점검	2010. 2.12 (1년 5개월)
		청 경	서영철	개인하수처리시설 사전검사 및 통수검사, 정화조청소관리	2009. 9. 1 (1년 10개월)

Ⅱ. 2011 주요업무 추진실적

1. 수돗물 공급지역 확대

□ 배수지 건설공사 현황

(단위:㎥/일, ㎥, 백만원)

배수지	시설용량	제 원					준공/기간	총사업비	비 고
계	199,300		109,300					90,096
교 하	65,500	V=	32,800		체류시간	12.1hr	2008. 12. 19	23,259	준공
법 원	6,000	V=	4,500		체류시간	19.1hr	2008. 12. 19	3,839	준공
광 탄	10,000	V=	6,000		체류시간	14.4hr	2009. 10. 30	5,047	준공
월 롱	97,000	V=	55,000		체류시간	13.6hr	2005. 7.～2012. 11.	44,307	공사중
탄 현	10,900	V=	6,000		체류시간	13.5hr	2009. 1.～2012. 03.	5,867	공사중
적 성	9,900	V=	5,000		체류시간	12.1hr	2009. 1.～2012. 03.	7,777	공사중

□ 관로확장 공사

구분	사 업 명	위 치	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	비고
계	6개사업			2,910
1	동패리 상수도확장	교하읍 동패리 일원	D100mm 이하 L=1.0km	130	2011.03. ～ 2011.10.
2	장산1리 상수도확장	문산읍 장산1리 일원	D80mm 이하 L=0.4km	55	2011.03. ～ 2011.10.
3	당동2리 상수도확장	문산읍 당동2리 일원	D80mm 이하 L=0.3km	45	2011.03. ～ 2011.10.
4	장곡리 상수도확장	조리읍 장곡리 일원	D80mm 이하 L=2.2km	270	2011.03. ～ 2011.10.
5	갈곡리 상수도확장	법원읍 갈곡리 일원	D200mm 이하 L=9.0km	1,870	2011.03. ～ 2011.10.
6	발랑2리 상수도확장	광탄면 발랑2리 일원	D100mm 이하 L=4.2km	540	2011.03. ～ 2011.10.

□ 구제역 관련 급․배수관확장 공사

구 분	사업 대상	사업량 (㎞)	수 혜 도		사업비 (백만원)				비고
			세대	인구	계	국비	도비	시비
계	237리	L=255	8,894	22,030	24,344	17,042	3,650	3,652
1차사업	166리	L=119	4,776	10,928	16,228	11,361	2,433	2,434
2차사업	71리	L=136	4,118	11,102	8,116	5,681	1,217	1,218

※사업비 확보 : 1차(2010.12.30) / 2차(2011.04.04)

○ 추진실적

• 2010. 12. 15 구제역 최초 발생

• 2011. 01. 19 용역착수

• 2011. 02. 14 공사착공

• 2011. 04. 13 수돗물 최초 공급(4월13일 최초 통수식)

• 2011. 06.    현재 공정률 89%

2. 공공하수도 확충

□ 공공하수처리시설 증․신설사업

공사명	위 치	사업량 (톤/일)	사업비 (백만원)	사업기간	비고 (공정율)
계	5개소	34,600	106,225
문산공공하수 처리시설 증설	문산읍 당동리 129-1번지 일원	9,500 (기존 7,500)	26,809	2008 ～ 2012. 6.	95%
금촌공공하수 처리시설 증설	금촌동 714번지 일원	17,000 (기존 27,000)	35,214	2008 ～ 2013. 12.	42%
통일동산공공 하수처리시설 증설	탄현면 법흥리 1298번지 일원	6,000 (기존 16,000)	23,202	2008 ～ 2012. 06.	82%
탄현공공하수 처리시설 신설	탄현면 오금리 164번지 일원	800	9,000	2008 ～ 2013. 12.	‘11.09 착공예정
파평공공하수 처리시설 신설	파평면 금파리 275번지 일원	1,300	12,000	2008 ～ 2013. 12.	‘12.03 착공예정

□ 하수관거 정비사업

공사명	위 치	사업량 (배수설비)	사업비 (백만원)	사업기간	비고
계	5개소	L=298km, 18,465가구	245,769
문산하수관거 정비사업	문산읍, 파주읍 (봉서․향양리) 일원	L=42km, 2,880가구	42,392	2005.07 ～ 2013.10
탄현하수관거 정비사업	탄현면 일원	L=21km, 658가구	18,820	2009.04 ～ 2014.10
파평하수관거 정비사업	파평면 적성면 식현리 일원	L=28km, 1,418가구	25,930	2009.04 ～ 2014.10
2006년 하수관거 정비 임대형 민자 사업(BTL)	파주, 법원, 월롱, 광탄, 금촌(아동) 일원	L=105km, 6,216가구	74,066	2006 ～ 2011.07
2010년 하수관거 정비 임대형 민자 사업(BTL)	교하, 파주, 법원 광탄, 탄현, 금촌(야동,맥금) 일원	L=102km, 7,293가구	84,561	2011 ～ 2015

도로관리사업소 소관

2011 주요업무 추진상황

【도로관리사업소 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
15	15	-	-	1	1	3	4	6	5	4	4	1	1	14

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 별	직위	직급	성명	분장사무	현부서 임용일	비고
	소장	시설5급	서상호	도로관리사업소 업무총괄	2010.11.15 (8개월)
도로관리팀	팀장	시설6급	나호준	도로관리팀 업무총괄	2010.11.15 (8개월)
		시설7급	이법주	도로점용허가(남부권) 사도설치허가, 비관리청사업인가	2010.11.15 (8개월)
		행정7급	강선희	예산, 회계, 계약	2010.11.15 (8개월)
		시설7급	이용국	도로점용허가(북부권) 접도구역 관리	2010.11.15 (8개월)
		행정8급	이효정	부당이득금 반환 소송	2010.11.15 (8개월)
		행정9급	오주연	서무, 도로점용료 징수 및 체납 관리	2011.01.01 (6개월)
		시설9급	최현석	도로굴착허가, 제한차량 운행 허가, 과적단속	2010.11.15 (8개월)

담 당 별	직위	직급	성명	분장사무	현부서 임용일	비고
도로보수 1팀	팀장	시설6급	한광우	도로보수1팀 업무총괄	2010.11.15 (8개월)
		시설7급	배준우	도로시설물 보수, 제설, 현안사항 보고	2010.11.15 (8개월)
		시설7급	이광희	도로시설물 보수, 소송, 민원	2010.11.15 (8개월)
도로보수 2팀	팀장	시설6급	이호명	도로보수2팀 업무총괄	2010.11.15 (8개월)
		시설6급	김성년	민간위탁사업, 군 방호벽 관리, 교하신도시 도로구조물 인수인계	2010.11.15 (8개월)
		시설8급	장중규	도로시설물 보수, 미불용지보상, 교량관리, 민원	2010.11.15 (8개월)

Ⅱ. 2011 주요업무 추진실적

1. 원-스톱 도로굴착 지속 추진

마구잡이 이중굴착 방지로 쾌적하고 안전한 도로환경 제공

○ 이중굴착으로 인한 주민불편 및 예산낭비 요인 제거

○ 당일굴착 및 당일복구 추진

○ 출·퇴근시간 굴착금지 및 교통혼잡 지역(도심지 등) 야간굴착만 허용

○ 횡단굴착시 이중굴착 방지를 위한 예비횡단관 매설

※ 도로굴착 심의 위원회 개최(2011. 2. 25)

(단위 : 건, km)

사업별 사업량	계	상수도	하수도	오수	도시가스	전력	통신	난방
합 계	82 (70.3)	59 (41.4)	7 (4.8)	1 (5.2)	7 (17.4)	2 (0.7)	5 (0.8)	1
파 주 시	63 (48)	55 (38)	7 (4.8)	1 (5.2)	-	-	-	-
유관기관	19 (22.3)	4 (3.4)	-	-	7 (17.4)	2 (0.7)	5 (0.8)	1

∙가정인입관(굴착길이 10m 미만)은 별도 협의 추진

2. 쾌적한 도로환경 조성

효율적인 도로관리로 깨끗하고 안전한 도로환경 조성

□ 신속한 도로유지보수(권역별 연간단가)

일련 번호	사 업 명	위 치	유지보수 처리현황	사업기간	사 업 비 (백만원)			비고
					예산액	집행액	집행잔액
	합계 10건				1,216	719	497
1	금촌권 도로시설물 유지보수	금촌 일원	46개소	'11.1월～12월	150	80	70
2	교하,탄현권 도로시설물 유지보수	교하, 탄현 일원	28개소	'11.1월～12월	150	95	55
3	조리, 광탄권 도로시설물 유지보수	조리, 광탄 일원	46개소	'11.1월～12월	150	60	90
4	문산, 파주, 월롱권 도로시설물 유지보수	문산, 파주, 월롱 일원	25개소	'11.1월～12월	150	80	70
5	법원, 파평, 적성권 도로시설물 유지보수	법원,파평, 적성일원	19개소	'11.1월～12월	150	45	105
6	가드레일, 반사경 유지보수	파주시 일원	가드레일 93개소 반사경 10개소	'11.1월～12월	100	73	27
7	차선도색(1지구) 유지보수	금촌, 교하, 조리, 광탄, 탄현	17개소	'11.1월～12월	100	100	0
8	차선도색(2지구) 유지보수	월롱, 파주, 문산, 법원, 파평, 적성	19개소	'11.1월～12월	100	100	0
9	교통표지판 유지보수	파주시 일원	89개소	'11.1월～12월	70	21	49
10	도로표지판 유지보수	“	113개소	'11.1월～12월	96	65	31

□ 도로시설물 유지보수 사업 추진

일련 번호	사 업 명	위 치	사업량	사업기간	사 업 비 (백만원)	비 고
	합계 7건				1,060
1	공릉천 자전거도로 보수	교하읍, 금촌동 일원	L=4.000m	'11. 6. 13 ～ 7. 30	500	용역중
2	금촌시가지 보도설치	금촌사거리~장안아파트	L=168m	'11. 6. 13 ～ 7. 30	41	공사중
3	월롱역앞 택시승강장 정비	월롱역 일원	L=72m	'11. 6. 9 ～ 8. 7	35	공사중
4	직천리외 1개소 사면보강	직천리, 도내리 일원	2개소	'11. 3. 10 ～ 3. 30	160	완료
5	지방도363호선 도로보수	검산동 일원	L=430m	'11. 4. 30 ～ 6. 10	95	완료
6	시도노면불량 재포장	적성, 법원, 문산일원	L=3,000m	'11. 6. 15 ～ 6. 17	191	완료
7	금촌시가지 노면파쇄 및 포장	금촌시가지	L=1,000m	'11. 5. 2 ～ 5. 6	38	완료

□ 도로주행환경 개선사업 추진

○ 과속방지턱 정비추진

∙ 현 황

(단위 : 개소)

구 분	현황	존치	정 비
			소 계	철 거	낮 춤
총 계	736	227	509	378	131

∙ 그간의 추진사항

- 2010. 10. 15 : 과속방지턱 일제조사(736개소)

- 2010. 11. 29 : 과속방지턱 정비계획 보고(내부방침)

- 2010. 12.  9 : 경찰서 협의 완료

- 2011.  3. 30 : 509개소 정비완료(철거 378, 낮춤 131)

- 2011.  5. 25 ~ 5. 31 : 존치(227개소) 과속방지턱 재조사

※ 정비대상 : 23개소(철거 10, 낮춤 2, 도색 11)

- 2011.  6.  1 ~ 6. 30 : 정비완료

○ 맨홀 정비추진

∙ 현 황

(단위 : 개소)

구 분	합 계	상수도	하수도	통 신	전 기	가 스	경 찰	육 군
수 량	24,614	2,797	14,343	3,651	1,921	354	875	673

∙ 그간 추진사항

- 2011. 2. 7 ~ 3.18 : 정비대상 맨홀 전수조사

(단위 : 개소)

구 분	합 계	상수도	하수도	통 신	전 기	가 스	경 찰	기 타
수 량	535	115	244	93	33	30	6	14

- 2011. 2.  1 : 맨홀관리 기관에 정비계획 통보

- 2011. 3. 21 : 관계기관 및 부서 회의 개최

- 2011. 4. 20 ~ 6. 3 : 535개소 정비 완료

3. 원활한 교통소통을 위한 제설작업 추진

신속하고 완벽한 제설작업을 통한 안전한 도로환경 조성

□ 제설대책 추진

○ 제설기간 : 2010.11.15 ∼ 2011.03.15(4개월간)

※ 2011. 4. 11 : 겨울철 강설 대처상황 경기도 평가 최우수 선정

○ 제설 도로현황 : 96개 노선(590㎞)

○ 장비현황

합계	보 유 장 비					임 차 장 비						시설관리공단
	소계	살포기		소형 화물차	굴삭기	소계	15톤	소형 화물차	굴삭기	그레 이다	살수차	소계	다목적차량	살수차
		대형	소형
105	55	28	16	10	1	48	28	6	6	2	6	2	1	1

○ 자재사용현황

구 분	사용량(톤)	강설횟수	비 고
2007∼2008년	2,000	7회
2008∼2009년	2,280	10회
2009∼2010년	6,550	14회
2010∼2011년	4,950	12회

※ 자재보유량 : 3,430톤(염화칼슘 1,900톤, 소금1,530톤)

□ 제설창고 건립 추진

○ 위    치 : 금촌동 466-82번지외 12필지

○ 사 업 비 : 500백만원

○ 면    적 : 9,143㎡(13필지)

○ 그간 추진사항

∙ 2009.12.24 : 대체부지 협약체결(파주시↔한국토지주택공사)

∙ 2010.09.09 : 도로구역변경결정(파주시↔경기도)

∙ 2011.05.03 : 경기도토지수용위원회 재결신청 완료(파주시↔경기도)

○ 향후 추진계획

∙ 2011.06.30 : 부지조성 설계완료(LH), 건축 실시설계완료(파주시)

∙ 2011.07.20 : 토지수용재결

∙ 2011.08.20 : 공탁완료

∙ 2011.09.30 : 부지조성 및 진입도로 완료(LH)

∙ 2011.10.01 : 건축공사 착공(도로보수원·임차장비 기사대기실,

염화칼슘 보관소, 교반시설, 장비보관창고등)

∙ 2011.11.10 : 건축공사 완료

4. 군 방호벽 정비사업 추진

차량 교행 불가한 도로에 설치된 군 방호벽을 정비하여 원활한 차량 교행

으로 사전 교통사고 예방과 보행자의 안전 및 주민불편 해소

○ 현    황

노 선 명	계	정 비 구 분			비 고
		정비대상	불필요	정비완료
총 계	52	26	16	10
국 도	3	2	1
국 지 도	5	3		2
지 방 도	14	5	5	4
시 도	12	3	7	2
도시계획도로	2			2
농 어 촌 도 로	5	2	3
마 을 안 길	11	11

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주시 검산동 산75-2번지외 2개소

∙ 사업기간 : 2011년 1월 ~ 2011년 11월

∙ 사업내용 : 방호벽 정비 3개소(2차로형 도로낙석)

∙ 총사업비 : 2,000백만원(도비50%, 시비50%)

○ 그간 추진사항

∙ 2011.  1. 30 : 실시설계용역 발주 및 착공

∙ 2011.  5. 31 : 관할군부대 군협의(9사단, 72사단)

- 방호벽설치계획 및 조건부 이행사항(폭약, 철조망, 컨테이너 등)

○ 향후 추진계획

∙ 2011.  6. 20 : 공사발주 및 착공

∙ 2011.  6. 30 : 군 협의사항 이행

∙ 2011. 11. 30 : 사업 준공

5. 선유리 통일로 교통체계개선사업(민간위탁)

○ 사업개요

∙ 위       치 : 파주시 문산읍 선유리 867-2

∙ 사   업   량 : L = 910.6m, B = 20 ~ 27m

∙ 총 사 업 비 : 4,000백만원

- 공      사 : 2,412백만원

- 토 지  보 상 : 1,446백만원(19필지 3,203㎡)

- 건 물  보 상 :   142백만원(3개동 404㎡)

∙ 사 업 기 간 : 2011. 10 ～ 2012. 10

∙ 시   공   사 : 정은이앤씨 대표 양영대

○ 그간 추진사항

∙ 2010.  5. 06 : 주택건설사업계획 승인신청

∙ 2010.  5. 18 : 통일로(국도1호선)정비사업 실시계획 인가신청

∙ 2010.  7. 22 : 협약서 체결

∙ 2010.  8. 10 : 사업비 입금(400백만원)

∙ 2010.  9. 28 : 비관리청공사 시행허가 신청

∙ 2010. 11. 30 : 비관리청공사 시행허가 완료

∙ 2011.  3. 14 : 도시계획시설 실시계획 인가 고시

∙ 2011.  4. 25 : 주택건설사업 계획 승인

○ 향후 추진계획

∙ 2011. 10. 20 : 보상계획 공고 및 보상실시

∙ 2012.  3. 30 : 공사발주 및 착공

∙ 2012. 10. 30 : 사업 완료

6. 도로 주요구조물 점검 및 보수․보강

○ 도로시설물 현황

구분 시설	교 량		터널․지하차도		육 교
	개소	연장(m)	개소	연장(m)	개소	연장(m)
계	152	5,572	9	955.6	6	323
시 도	50	2,447	7	410	6	323
농어촌도로	20	891	1	30
비법정도로	82	2,234
기 타			1	515.6

○ 그간 추진사항

∙ 2011.  2. 19 : 교하지하차도 보수(예산액 2백만원)

∙ 2011.  4. 14 : 정밀점검용역 준공 (교량6개소,예산액 90백만원)

∙ 2011.   4. 22 : 교하지하차도, 보도육교(C교) 세척완료(예산액10백만원)

∙ 2011.  6.  1 : 선문교 신축 이음장치 보수 계획 보고

○ 향후 추진계획

∙ 2011.  7. 30 : 선문교 신축 이음장치 보수(예산액 40백만원)

∙ 2011. 10. 30 : 정밀점검용역 결과 보수․보강(예산액 58백만원)

7. 교하신도시 특수구조물 인수·인계 점검 추진

○ 시설현황

(단위 : 개소, m)

합 계		지하차도		생태육교		보도육교		교 량		공동구		보행데크
개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
43	18,418	7	5,812	13	752	10	358	11	619	1	10,277	1	600

※ 보도육교 : 엘리베이터, CCTV, 통신, 전기

※ 보행데크 : 엘리베이터 9, 무빙워크 1개, CCTV, 통신, 기계시설, 전기

※ 지하차도 : 배수펌프, 전기시설

※ 공 동 구 : CCTV, 통신, 전기, 기계

○ 그간 추진사항

∙ 2010. 12. 03 : 구조물 사점점검 실시 8개소

∙ 2010. 12. 08 : 지적사항 통보

∙ 2010. 12. 30 : 2차 지적사항 통보

∙ 2011.  3. 11 : 가온지하차도 점검 및 지적사항 통보(1개소)

∙ 2011.  3. 22 : 2차 지적사항 점검 및 통보

∙ 2011.  4. 26 : 2차 지적사항 조치완료

∙ 2011.  5. 12 : 보행데크 사전 점검 (1개소)

∙ 2011.  5. 24 : 보행데크 지적사항 통보

○ 향후 추진계획

∙ 2011.  8. 30 : 공동구 관리방안 결정(자체 또는 위탁)

∙ 2011.  9. 30 : 관련 조례 등 개정 및 신설

∙ 2011. 10. 31 : 공동구 관리위원회 신설

∙ 2011. 12. 30 : 시설물 점검 및 지적사항 조치 완료

∙ 2012.  1. 30 : 시설물 인수․인계 완료

8. 도로 미불용지 보상 추진

도로에 편입되어 사유재산권에 대한 권리가 제한되어 민원발생에 따른 토지

보상비 확보로 민원해결

○ 보상신청 현황

구 분	신청필지	신청면적(㎡)	예산액(백만원)	비고
국 도	84	34,712	1,000
지방도	276	70,983	1,000
시 도	529	136,299	230

○ 그간 추진상황

∙ 2011.  4.  30 : 시도 미불용지 보상

- 탄현면 갈현리 287-9번지 외 2필지(면적 : 743㎡)

○ 향후 추진계획

∙ 2011.  6.  30 : 국도 미불용지 보상

- 조리읍 등원리 311-3번지 외 10필지(면적 : 4,626㎡)

∙ 2011.  6.  30 : 지방도 미불용지 보상

- 탄현면 문지리 31-2번지 외 10필지(면적 : 2,440㎡)