도시산업위원회

2011 행정사무감사자료

도 시 건 설 국

목 차 【도 시 과】
5-1	2020파주도시기본계획수립(재수립)
5-2	인허가된 12개소 골프장 사업 추진에 따른 주민 민원 발생 현황
5-3	저탄소 녹색·문화도시 건설
5-4	군사시설보호구역 완화 추진 현황
【건 설 과】
6-1	도로망 확충 추진현황
6-2	친환경적 하천정비사업 및 하천관련 현황
【안전관리과】
7-1	재난 취약지역시설 안전관리 정착
7-2	기후변화에 따른 방재대책 추진
【상하수도과】
8-1	수돗물 공급 확대
8-2	공공하수도 확충
8-3	간이상수도 및 약수터시설 현황 및 관리 현황
8-4	지방상수도 운영 위·수탁 효율화 추진 현황
【도로관리사업소】
9-1	안전하고 효율적인 도로환경 조성
9-2	동절기 제설 대책 추진

도 시 과  소관

5-1 2020 파주도시기본계획수립(재수립)

확인자   도 시 과 장  김 홍 식 (인)

작성자  시설지구팀장  전 재 식 (인)

□ 용도지역, 지구, 구역 지정 및 변경 현황

○ 용도지역 지정 및 변경 현황

연번	위치	용도지역		면적 (㎡)	변경사유	비고
		기정	변경
1	문산읍 선유리 878-1일원	제1종일반주거지역	제2종일반 주거지역	88,199	주택건설사업을 통한 쾌적한 주거단지의 조성을 위한 용도변경
2	광탄면 발랑리 123-1일원	생산관리지역	계획관리지역	111,555	관광휴양형(골프장) 지구단위계획 수립을 위한 용도변경
		보전관리지역	계획관리지역	142,241	관광휴양형(골프장) 지구단위계획 수립을 위한 용도변경
		관리지역(미분류)	계획관리지역	198	관광휴양형(골프장) 지구단위계획 수립을 위한 용도변경
		농림지역	계획관리지역	544,132	관광휴양형(골프장) 지구단위계획 수립을 위한 용도변경
3	파평면 덕천리 산1-4일원	농림지역	계획관리지역	35,526	사업계획변경(골프장 추가증설)에 따른 추가편입부지 용도변경
4	광탄면 영장리 산51일원	농림지역	보전관리지역	120,916	대중골프장 조성을 위하여 용도변경
		농림지역	계획관리지역	23,184	대중골프장 조성을 위하여 용도변경

○ 용도지구 지정 및 변경 현황

연번	도면표시 번호	지구명	지구의 세분	위 치	면적 (㎡)	비고
1	401	광탄발랑개발진흥지구	관광·휴양	광탄면 발랑리 123-1번지 일원	893,165

□ 실시계획인가(승인) 신청 현황

구 분	사업명	사업주체	위 치	사업규모	추진현황 및 계획
공공청사 / 도 로 / 광 장	금촌1동 주민센터	파주시장 (회계과)	파주시 아동동 291-5번지 일원	A=5,380㎡	․’10.03.08 도시관리계획 결정신청 ․’10.03.25 주민의견청취 열람공고 ․’10.04.09 시의회 의견 청취 ․’10.05.27 市도시계획위 심의 ․’10.06.18 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 ․’10.06.29 실시계획인가 신청 ․’10.07.09 주민의견청취 열람공고 ․’10.08.25 실시계획인가
도 로	신도시～성석간 도로	파주시장 (도로하천과) / LH공사	교하읍 상지석리 1995-3번지 일원	L=1,822m B=26m	․’09.04.07 실시계획인가 고시 ․’10.04.15 실시계획 변경인가 신청 ․’10.05.03 주민의견청취 열람공고 ․’10.08.27 실시계획 변경인가
도 로	지방도359호선 교차로개선사업	파주시장 (도로하천과) / LH공사	금촌동 466-82번지 일원	L=396m B=20～39.5m	․’09.05.04 실시계획인가 고시 ․’10.07.07 실시계획 변경인가 신청 ․‘11.01.28 실시계획 변경인가
체육시설	스타밸리CC	학교법인 건국대학교 대표 김경희	광탄면 삼방리 산84번지 일원	A=1,679,306㎡	․‘09.08.26 실시계획인가 ․‘09.10.08 착공(공정율 60%) ․‘10.01.27 실시계획 변경인가 ․‘11.12 공사 준공 예정
체육시설	기산리골프장	(주)노스팜 대표 이응근	광탄면 기산리 산183번지 일원	A=1,003,584㎡	․‘09.07.02 실시계획인가 ․‘09.09.17 착공(공정율 10%) ․‘10.12.02 실시계획 변경인가
체육시설	투모로CC	(주)투모로 대표 박동표	파평면 덕천리 산1-4번지 일원	A=790,027㎡	․‘07.10.15 : 도시관리계획결정 ․‘08. 9. 9 : 실시계획가(의제) ․‘08.10.21 : 착공계 수리(市) ․‘09. 5.20 : 도시관리계획변경 결정신청(市) ․‘10. 2. 5 : 중앙산지위원회 심의 (원형녹지7㏊제척) ․‘10. 6.29 : 도시관리계획변경결정 고시(市)
도 로	탄현～야당간 연결도로 (중1-111호선)	(주)아성HD 대표 조혜진	교하읍 야당리 146-8번지 일원	L=130m B=20m, A=875㎡	․’09.12.11 실시계획인가 ․’09.12.31 실시계획 변경인가 ․’10.11.22 수용재결(경기도) ․’11. 3.23 실시계획변경인가
도 로	탄현～야당간 연결도로 (중1-859호선)	(주)아성HD 대표 조혜진	교하읍 야당리 469-14번지 일원	L=15m B=20m A=316㎡	․’10. 1.21 실시계획인가 ․’10. 3. 3 실시계획 변경인가 ․’10.11.22 수용재결(경기도) ․’11. 3.23 실시계획변경인가
공 원	마장근린공원	파주시장 (문화체육과)	광탄면 기산리 산150-15번지 일원	A=265,000㎡	․’08. 8.18 도시관리계획 결정 ․’10.1.8 실시계획인가

구 분	사업명	사업주체	위 치	사업규모	추진현황 및 계획
공공·문화 체육시설	푸르지오 아파트 신축공사에 따른 지역문화복지시설 신설	(주)승기산업개발 대표이사 허용	조리읍 봉일천리 266-113 일원	A=1,289 ㎡	․’09.12.15 실시계획인가
수도공급 설비	월롱배수지 / 진입도로	파주시장 (상하수도과)	월롱면 덕은리 산134-1번지 일원	배수지 A=25,653㎡ , 진입도로 B=6m, L=1,228m , A=15,554㎡	․’07. 5.11 도시계획시설결정 ․’07.12.10 실시계획인가 ․’09.12. 7 실시계획변경인가
공 원	도시자연공원 조성공사	(주)신안건설산업 대표 우경선	아동동 221-1번지 일원	A=13,294㎡	․’09.10.23 실시계획인가 ․‘10. 3.12 실시계획변경인가 ․‘10. 7.27 실시계획변경인가
공 원	동광아파트 어린이공원 조성공사	(주)용곡 대표 백남조	파주읍 연풍리 산82-5번지	A=1,510㎡	․’09.10 .5 실시계획인가
도 로	선유 소슬아파트 진입도로 보도설치공사	파주시장 (도로하천과)	문산읍 선유리 966-49번지 일원	A=1,780㎡ L=195m B=10m	․’09. 5.28 실시계획인가 ․’09.10. 1 실시계획변경인가 ․’10.11. 실시계획변경인가
도 로	현대힐스테이트1차 아파트 진출입로 가감속차로 개설공사	(주)기창플러스 대표 신학철	문산읍 당동리 산33-20번지 일원	A=526㎡	․’09. 8. 5 도시관리계획 결정 ․’09. 9.28 실시계획인가 ․’09.10.28 공사완료공고
체육시설	파주CC	(주)파주컨트리클럽 대표 강예완	법원읍 갈곡리 359-1번지	A=987,556㎡	․‘06.11.20 도시관리계획 결정 ․‘07. 3.19 실시계획인가 ․‘09. 2 .9 실시계획변경인가 ․‘09.12.18 실시계획변경인가 ․‘10. 1.29 실시계획변경인가 ․‘10. 4 .6 실시계획변경인가 ․‘10. 5.11 실시계획변경인가 ․‘10. 7.27 실시계획변경인가
공 원	도시공원 (북부근린공원) 조성사업	(주)기창플러스 대표 신학철	문산읍 당동리 936번지	A=36,064.50	․’09. 8. 7 도시계획시설결정 ․’09. 9.15 실시계획인가 ․’09.10.30 공사완료공고
도 로	소로1-탄현28호선	파주시장 (도로하천과)	탄현면 갈현리 821-40번지	A=1,236㎡ L=57m B=10m	․’09. 9 .3 실시계획인가
도 로	신안실크벨리 2차아파트 신축에 따른 도시계획도로 개설공사 (중로1-101호선, )	(주)신안건설산업 대표이사 우경선	아동동 222번지 일원	L=70 B=20 A=3,359㎡	․’08.10.16 실시계획인가 ․’09. 8. 4 실시계획변경인가 ․’10. 3 .5 실시계획 변경인가 ․’10. 7.23 실시계획 변경인가
도 로	신안실크벨리 2차아파트 신축에 따른 도시계획도로 개설공사 ( 중로2-108호선, )	(주)신안건설산업 대표이사 우경선	아동동 222번지 일원	L=176 B=15～17	․’08.10.16 실시계획인가 ․’09. 8. 4 실시계획변경인가 ․’10. 3 .5 실시계획 변경인가 ․’10. 7.23 실시계획 변경인가
도 로	신안실크벨리 2차아파트 신축에 따른 도시계획도로 개설공사 (소로1-금촌20호선)	(주)신안건설산업 대표이사 우경선	아동동 222번지 일원	L=104 B=10～12	․’08.10.16 실시계획인가 ․’09. 8. 4 실시계획변경인가 ․’10. 3 .5 실시계획 변경인가 ․’10. 7.23 실시계획 변경인가

구 분	사업명	사업주체	위 치	사업규모	추진현황 및 계획
주 차 장	자운서원주차장	파주시장 (문화체육과)	법원읍 동문리 28-4번지	A=4,106㎡	․’09. 4.10 도시관리계획 결정 ․’09. 7.20 실시계획인가
도 로	교하～송포간도로개설공사 (중로1-10호선)	LH공사	교하읍 동패리 776-3번지	A=91,951㎡ L=2,055m) B=21～51.7m,	․‘06.9.25 실시계획인가 ․‘07.10.26 실시계획 변경인가 ․‘08.6.27 실시계획 변경인가 ․‘10. 6.24 실시계획 변경인가 ․‘10.7.15 실시계획 변경인가
공공청사	문산종합 복지센터	파주시장 (회계과)	문산읍 선유리 1333번지	A=34,656㎡	․‘09.2.6 도시관리계획 결정 ․‘09.5.4 실시계획인가 ․‘10.4.29 실시계획 변경인가
체육시설	베스트밸리 골프장	(주)베스트밸리골프클럽 대표이사 이찬규	광탄면 분수리 28-26번지 일원	A=411,962㎡	․‘06.12.4 도시관리계획 결정 ․‘07.5.21 실시계획인가 ․‘08.7.18 실시계획 변경인가 ․‘09.3.26 실시계획 변경인가
공공공지	현대 힐스테이트 2차 아파트 신축에 따른 도시계획시설공사	(주)유상건설 대표이사 이상진	문산읍 당동리 530-21번지 2필지	A=1,377㎡	․‘09.4.21 실시계획인가
환경기초 시설	문산공공하수처리시설 증설사업	파주시장 (상하수도과)	문산읍 당동리 129-1번지 일원	A=11,492㎡	․’09.3.20 실시계획인가 ․’11.6. 실시계획변경인가 신청
도 로	문산～연풍간도로 확․포장공사 (대3-2호선)	파주시장 (도로하천과)	파주읍 파주리․연풍리 일원	대로3-2호선 : L=675m	․’07.7.27 도시관리계획 결정 ․’08.6.4 실시계획인가
도 로	문산～연풍간도로 확․포장공사 (대로3-4호선)	파주시장 (도로하천과)	파주읍 파주리․연풍리 일원	대로3-4호선 L=325m	․’07.7.27 도시관리계획 결정 ․’08.6.4 실시계획인가
도 로	문산～연풍간도로 확․포장공사 (대로3-5호선)	파주시장 (도로하천과)	파주읍 파주리․연풍리 일원	대로3-5호선 L=2,444m	․’07.7.27 도시관리계획 결정 ․’08.6.4 실시계획인가
공공공지	하지석리공공공지 조성사업	파주시장 (문화체육과)	교하읍 하지석리 326-3번지 일원	A=67,053㎡	․’09.2.20 실시계획인가
공공공지	당동리 공공공지	(주)유상건설	문산읍 당동리 530-21번지 일원	A=1,378㎡	․’09.4.21 실시계획인가 ․’10.1. 5 공사완료공고
도 로	국도37호선～당동지구 연결도로 공사 (대로3-7호선)	파주시장 (균형발전과) / 경기지방공사장	문산읍 당동리 산57-1번지 일원	A=6,349㎡ L=120m B=35～64m	․’06.12.04 실시계획인가 ․’09.2.17 실시계획 변경인가 ․’10.12.9 실시계획변경인가
도 로	적성 마지리 도시계획도로 공사 (중로3-503호선)	파주시장	적성면 마지리 80-20번지 일원	B=12m L=132m	․’09.1.30 실시계획인가
도 로	적성 마지리 도시계획도로 공사 (중로3-2호선)	파주시장	적성면 마지리 54-5번지 일원	B=12m L=214m	․’09. 1.30 실시계획인가
학 교	두원공과대학 파주캠퍼스	학교법인 두원학원	파주읍 봉암리 산115번지 일원	A=87,974㎡	․‘06.7.24 도시관리계획 결정 ․‘06.9.8 실시계획 인가 ․‘08.3.3 실시계획 변경인가 ․‘09.1.9 실시계획 변경인가
도 로	당동리 공동주택 건설에 따른 도시계획도로 (중로 1-9호선) 확장 공사	(주)유상건설 대표 이상진	문산읍 당동리 167-2번지 일원	B= 20m L=73m	․‘08.11.6 실시계획 변경인가 ․‘09.1.8 실시계획 변경인가

구 분	사업명	사업주체	위 치	사업규모	추진현황 및 계획
도 로	문산도시계획도로개설 (중로 1-9호선)	(주)유상건설 대표 이상진	문산읍 당동리 521-5번지 일원	B=20m L=37m	․‘08. 7.11 도시관리계획 결정 ․‘08.10. 6 실시계획 변경인가 ․‘09. 1. 8 실시계획 변경인가
도 로	문산도시계획도로개설 (중로 2-10호선)	(주)유상건설 대표 이상진	문산읍 당동리 521-5번지 일원	B=15m L=203m	․‘08. 7.11 도시관리계획 결정 ․‘08.10 .6 실시계획 변경인가 ․‘09. 1. 8 실시계획 변경인가
도 로	통일동산지구 (대로2-755)	시티원(주) 대표 신용균	탄현면 법흥리 1709-5번지 일원	A=66,175㎡ L=1,951m B=30～36m	․‘05. 7.25 도시관리계획 결정 ․‘10. 9.16 실시계획인가 신청 ․‘10.10.27 실시계획인가
도 로	통일동산지구 (대로3-752)	시티원(주) 대표 신용균	탄현면 법흥리 1709-5번지 일원	A=4,855㎡ L=172m B=28m	․‘05. 7.25 도시관리계획 결정 ․‘10. 9.16 실시계획인가 신청 ․‘10.10.27 실시계획인가
도 로	통일동산지구 (중로1-761)	시티원(주) 대표 신용균	탄현면 법흥리 1709-5번지 일원	A=2,038㎡ L=95m B=21m	․‘05. 7.25 도시관리계획 결정 ․‘10. 9.16 실시계획인가 신청 ․‘10.10.27 실시계획인가
도 로	통일동산지구 (중로2-762)	시티원(주) 대표 신용균	탄현면 법흥리 1709-5번지 일원	A=2,121㎡ L=140m B=15m	․‘05. 7.25 도시관리계획 결정 ․‘10. 9.16 실시계획인가 신청 ․‘10.10.27 실시계획인가
도 로	통일도산지구 (중로3-751)	시티원(주) 대표 신용균	탄현면 법흥리 1709-5번지 일원	A=1,921㎡ L=159m B=12m	․‘05. 7.25 도시관리계획 결정 ․‘10. 9.16 실시계획인가 신청 ․‘10.10.27 실시계획인가
도 로	도시계획도로 (소로1-탄현1)	한국펌프공업 협동조합	문지리 189-2	A=3,484㎡ L=295m B=10m	․‘10.11.24 도시관리계획 결정 ․‘11. 3. 실시계획인가 신청 ․‘11. 5. 4 실시계획인가
도 로	문산도시계획도로개설 (중로3-4호선)	(주)유상건설 대표 이상진	문산읍 당동리 521-5번지 일원	B=6～8m L=34m	․‘08. 7.11 도시관리계획 결정 ․‘08.10 .6 실시계획 변경인가 ․‘09. 1. 8 실시계획 변경인가
도 로	문산도시계획도로개설 (소로 2-36호선)	(주)유상건설 대표 이상진	문산읍 당동리 521-5번지 일원	B=8～9m L=216m	․‘08.7.11 도시관리계획 결정 ․‘08.10.6 실시계획 변경인가 ․‘09.1. 8 실시계획 변경인가
도 로	통일공원～중에교 도로개설공사 (대로1-4호선)	파주시장	파주읍 봉서리 353-10일원	B=35m L=1,237m	․‘93.12.27 도시관리계획 결정 ․‘05. 6.13 실시계획인가 ․‘09. 1. 2 실시계획 변경인가
유 수 지	율곡유수지	파주시장 (안전관리과)	파평면 율곡리 509번지 일원	A=126,783㎡	․‘07. 1.19 도시관리계획 결정 ․‘10. 4. 6 시관리계획변경결정 ․‘10. 7.28 실시계획인가 신청 ․‘10.12.30 실시계획인가
도 로	율곡유수지 진입도로 (소3-30호선)	파주시장 (안전관리과)	파평면 율곡리 509번지 일원	L=78.1m B=5m A=566㎡	․‘07. 1.19 도시관리계획 결정 ․‘10. 7.28 실시계획인가 신청 ․‘10.12.30 실시계획인가
도 로	국도1호선 (대로1-2호선)	파주시장 (도로하천과)	문산읍 선유리 868-2번지 일원	A=27,648㎡ B=20～27m, L=916m	․‘90. 1. 5 도시관리계획 결정 ․‘10. 5.18 실시계획인가 신청 ․‘11. 3.11 실시계획인가
수도공급 설비	파주 상수도4단계 확장사업 (탄현계통)	파주시장 (상하수도과)	탄현면 금산리 산23번지 일원	탄현배수지 A=6,144㎡ 탄현가압장 A=2,079㎡	․‘10. 2.25 도시관리계획 결정 ․‘11. 1.21 실시계획인가 ․‘11. 5.17 실시계획변경 인가

구 분	사업명	사업주체	위 치	사업규모	추진현황 및 계획
수도공급설비	파주 상수도4단계 확장사업 (탄현계통)	파주시장 (상하수도과)	탄현면 금산리 산23번지 일원	탄현배수지 A=6,144㎡ 탄현가압장 A=2,079㎡	․‘10. 2.25 도시관리계획 결정 ․‘11. 1.21 실시계획인가 ․‘11. 5.17 실시계획변경 인가
수도공급 설비	파주 상수도4단계 확장사업 (적성계통)	파주시장 (상하수도과)	적성면 마지리 산22번지 일원 / 파평면 덕천리 479-3번지 일원	적성배수지 A=5,145㎡, 적성가압장 A=958㎡	․‘10. 2.25 도시관리계획 결정 ․‘10. 7.16 실시계획인가
도 로	파주 상수도4단계 확장사업 (적성계통)	파주시장 (상하수도과)	적성면 마지리 산22번지 일원	A=3,750㎡ L=179m B=7m	․‘10. 2.25 도시관리계획 결정 ․‘10. 7.16 실시계획인가
완충녹지	도시계획시설 (완충녹지) 변경사업	(주)파주전기초자	문산읍 당동리 884-14	A=5,864.1	․‘04.11.15 도시관리계획 결정 ․‘09.12.29 실시계획 변경인가
수도공급 설비	파주 상수도3단계 확장사업 (광탄계통)	파주시장 (상하수도과)	광탄면 신산리 산14-3번지 일원	배수지 A=10,681㎡	․‘08. 6. 5 도시관리계획변경결정 및 실시계획변경인가 ․‘10. 4. 2 실시계획 변경인가
도 로	근린생활시설 오피스텔 신축에 따른 도시계획도로 신설공사 (소로2-13)	(주)지엔지블루	문산읍 선유리 산21-7번지 일원	L=86m B=8m	․‘10. 1.26 실시계획인가
도 로	근린생활시설 오피스텔 신축에 따른 도시계획도로 신설공사 (소로3-19)	(주)지엔지블루	문산읍 선유리 산21-7번지 일원	L=74m B=6m	․‘10. 1.26 실시계획인가
도 로	근린생활시설 오피스텔 신축에 따른 도시계획도로 신설공사 (소로3-20호선)	(주)지엔지블루	문산읍 선유리 산21-7번지 일원	L=116m B=6m	․‘10. 1.26 실시계획인가

□ 불합리하게 결정된 도시계획시설의 정비 실적

○ 가축시장 폐지(2010.12.30)

- 폐지사유 : 주거지역과 연접된 가축시장의 폐지로 쾌적한 도시환경을 조성하고 운영중인 적성면 가축시장의 활성화 및 도시관리계획과의 정합성 유지

- 도시계획시설 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후
폐지	101	시장	가축시장	금촌동 437-4번지 일원	10,194	감)10,194	-	경고제80-343호(1980.10.14)	-

5-2 인허가된 12개소 골프장 사업 추진에 따른 주민 민원 발생 현황

확인자   도 시 과 장  김 홍 식 (인)

작성자  시설지구팀장  전 재 식 (인)

구분	사업명	사업개요	민원발생현황
			민원신청인	민원내용	조치결과
	서원밸리 (회원)	• 위치 : 광탄면 발랑리 산48-1번지 일원 • 규모 : 1,282,165㎡ • 시행자 : 서원레저(주)	-	해당없음	-
	서원밸리 (대중)	• 위치 : 광탄면 발랑리 123-16번지 일원 • 규모 : 1,282,165㎡ • 시행자 : 서원레저(주)	이영아,이영희	• 골프장 증설 예정부지내 건물 소유주민으로 주변건물 철거에 따른 거주어려움 등 조속히 보상후 사업이 추진되도록 요구함	• 민원건물에 대하여 행정절차 완료전 원만히 처리되도록 행정지도 및 실시계획인가(‘11.5.26.)에 맞춰 건축물 보상협의를 완료하였음
	서서울	• 위치 : 광탄면 용미리 산79-1번지 일원 • 규모 : 1,036,161㎡ • 시행자 : 서서울관광(주)	-	해당없음	-
	J-Public	• 위치 : 조리읍 장곡리 47-1번지 일원 • 규모 : 153,671㎡ • 시행자 : (주)포스메이트	-	해당없음	-
	베스트밸리	• 위치 : 광탄면 분수리 28-26번지 일원 • 규모 : 411,962㎡ • 시행자 : (주)베스트밸리골프클럽	-	해당없음	-
	파주CC	• 위치 : 법원읍 갈곡리 산83-1번지 일원 • 규모 : 987,556㎡ • 시행자 : (주)파주CC	-	해당없음	-
	투모로 골프장	• 위치 : 파평면 덕천리 산1-4번지 일원 • 규모 : 790,027㎡ • 시행자 : (주)투모로	-	해당없음	-
	기산리 골프장	• 위치 : 광탄면 기산리 664-6번지 일원 • 규모 : 1,008,115㎡ • 시행자 : (주)노스팜	박인수 외 52인	• 공사진행 과정에 주민의견 수렴을 무시하고 녹지를 훼손하고 있으니 감독 요청	• 동 사업은 환경영향평가법 제14조 규정에 의거 주민의견 수렴 절차를 이행하였으며 • 환경영향평가를 반영한 실시계획인가시 원형보전녹지 확보 조건을 준수하도록 사업시행자측에 지속적으로 행정지도할 계획임.
			이승범	• 골프장 홀을 신청인 건물에서 이격 • 인접부지 보강토 성토 계획 반대	• 신청인 토지 인근지역은 가능한 현지형에 맞춰 절․성토 계획고를 최소화하는 시공 계획을 수립하고 타구시 안전성 확보를 위하여 차폐식재를 계획함.
			이승범	• 골프장 17,18번홀 시공을 즉시 중단하고 상당한 이격거리를 두도록 시정 및 키가큰 수림대로 충분한 완충지대 조성 • 저류지 이전 • 대체도로 계획 요구	• 대상지 건물로부터 35m이상 이격하여 골프코스를 계획하고 타구에 따른 영향이 예상되는 지역은 충분한 수고의 차폐식재를 계획하고 있으며 유역별 흐름을 고려하여 재해영향이 없도록 저류지 계획 변경을 검토 중임. • 사업시행자측이 민원대상지 진입도로 계획에 대한 내용을 충분히 설명드리도록 조치하였음.
			김혜숙, 최종익	• 옹벽 높이 하향 조정 요구 • 방음판, 방음망 설치 요구 • 막힌 하수관 조치 후 맨홀과 ㄷ관 매설 요구 • 수목 수종 변경 요구	• 옹벽높이는 당초 계획인 10m보다 하향조정하여 5m 이하의 돌쌓기로 변경 시공함. • 환경영향평가상 민원대상지 인근에 방음․방진망 설치 계획이 없으나, 사업시행자측에 설치 권고하겠음. • 하수관거 준설 및 흄관 설치, 식재 수종 변경 요청건은 사업시행자가 수용하겠다는 입장임.
			김혜숙, 최종익	• 옹벽 높이 시정 요구 • 방음․방진망 설치 요구 • 막힌 하수관 준설 및 맨홀과 ㄷ관 매설 요구	• 돌쌓기 시공 높이를 5m 이하로 시정하도록 조치함. • 돌쌓기 시공 시정 조치 후 방음․방진망 설치 계획 • 막힌 하수관 정비와 U형관 설치 계획
			김혜숙, 최종익	• 옹벽과 성토 높이 시정 요구 • 저류지 계획 취소 요구	• 돌쌓기 시공 높이를 5m 이하로 시정하도록 조치함. • 저류지는 민원대상지 반대편 유역으로 배수되며 골프장 사업으로 인한 재해영향 감소를 위하여 저류지 계획이 필요함을 양해 바람.
			이승범	• 공사중 폐기물 불법 매립 • 성토 높이가 너무 높음. • 비산먼지, 소음․진동 불편 • 민원인 토지경계로부터 35m 이상 이격 요구 • 라이트시설 금지	• 현지 확인결과, 불법 사항을 발견하지 못하였고, 적법한 업체가 처리하고 있음. • 관련 규정에 부합하게 인가받은 사항을 준수하도록 행정지도 하고 있음. • 비산먼지에 대하여 현지 점검결과, 위법사항은 없었고 소음도 측정치에 따라 조치할 사항임. • 토지경계로부터 35m 이상 이격시 골프코스 형성에 어려움이 있어 민원요구 수용이 어려움. • 현재 라이트 시설을 계획하지 않으며 향후 필요시 인근 주민들과 협의 예정
	스타밸리CC	• 위치 : 파주시 법원읍 삼방리 산84번지 일원 • 규모 : 1,679,306㎡ • 시행자 :학교법인 건국대학교	이재하외 3인	• 사업부지 경계지점의 구거 매립에 따른 원상회복, 오․우수 배수 기능상실에 대한 복구 조치	• 사업시행자가 해당 구거를 포함하여 오․우수처리를 협의하여 시공 계획.
			이성규외 1인	• 사업부지내 토지굴착공사와 관련하여 협의매수나 수용절차를 거치지 않고 경계를 침범한 공사에 대한 공사중지 요청	• 사업시행자가 경계측량 후 경계를 명확히 표시하여 훼손이 없도록 조치
	한서울 골프장	• 위치 : 광탄면 영장리 산51번지 일원 • 규모 : 367,198㎡ • 시행자 :(주)청솔	-	해당없음	-
	마장리 골프장	• 위치 : 광탄면 마장리 산67-1번지 일원 • 규모 : 718,949㎡ • 시행자 :수억개발(주)	-	해당없음	-

5-3 저탄소 녹색‧문화도시 건설

확인자  도시과장  김 홍 식 (인)

작성자  신도시팀장  김 광 회 (인)

□ 운정3지구 사업추진 협의내용

○ 2011.03.12 4자협의체(1차)

▹ 지난 3월 10일 합의된 내용을 재확인하고 운정3지구 추진을 위하여 실시계획 승인을 위한 설계용역을 즉시 재개하고 8월 31일 까지 완료한다.

▹ 금융구제안을 4월 15일 까지 세부안을 마련하여 시행한다.

※ 3.25 LH 실시설계용역 재개 / 4.28 농협 금융구제안 시행

○ 2011.05.31 4자협의체(2차)

▹ 조속한 시일내 지장물 조사 재개

▹ 2011.6월말 LH 사업재조정 백서 발간시 사업확정(계속추진) 발표

□ 쾌적한 녹지‧공원 조성현황

○ 사업대상 : 공원 64개소[1,789천㎡], 녹지 31개소[791천㎡], 광장 12개소[45천㎡]

○ 사 업 비 : 272,393백만원

○ 공사기간 : 2008. 10 〜 2011. 12 ※공정율 : 40%

○ 세부현황                                                     (단위:천㎡)

	구 분			개소	면적
		공 원		64	1,789
		생활권 (44개소)	근린공원	10	354
			어린이공원	4	14
			소공원	30	20
		주제 (20개소)	역사공원	6	281
			문화공원	8	105
			수변공원	4	733
			체육공원	2	282
	녹 지			31	791
	광 장			12	45

5-4 군사시설 보호구역 완화 추진 현황

확인자  도  시  과  장  김 홍 식 (인)

작성자  도시계획팀장  이 은 갑 (인)

□ 군사기지 및 군사시설 보호구역 현황

( 2011. 4. 30. 기준 )

구 분	행정구역	해제지역	군사기지 및 군사시설 보호구역
			계	통제보호	제한보호 (위탁지역)
합계(㎢)	672.79	60.85	611.94	161.45	450.49 (58.87)
비율(%)	100.00	9.04	90.96	24.00	66.96 (13.06)

□ 추진실적

( 단위 : ㎢ )

구 분	2010년도	2011년도	비 고
해 제	0.77	-	군 규제 완화 요청 (2009.5.1.) 해제요청 : 59.67㎢ 위탁요청 : 15.46㎢
고도위탁	2.23	2.63

□ 2011년도 추진계획

○ 2011. 6.  군 규제 완화 요청 (파주시→관할부대)

※ 해제요청 10.22㎢, 위탁요청 45.79㎢

○ 2011. 7.  관할부대 방문설명 및 협의

□ 무건리 훈련장 이주단지 조성 추진현황

○ 사업개요

- 위    치 : 법원읍 가야리 일원 (1공병 도하중대 등 3개부대 주둔지)

- 면    적 : 49,900㎡ (계획세대 : 82세대)

- 시 행 자 : 육군참모총장 (육군 제1군단장)

- 사업시간 : 2007. 1월 ～ 2011. 12월

○ 추진사항

- 2008. 12. 28 : 부대이전 결정 통보 (국방부 정책실무협의회)

※ 3개 부대 이전 및 이전비용 국방부 부담

- 2009. 12. 30 : 도시관리계획 ( 용도지구 : 취락지구 ) 결정 및 지형도면 고시

- 2010.  1. 13 : 국방․군사시설사업 실시계획승인 고시 (국방부고시 제2010-1호)

※ 시행기간 : 2010. 1. 1 ～ 2011. 12. 31

- 2010.  5. 26 : 이주단지 기존 부대(3개) 이전완료 (※ 철거완료 ‘10. 10월)

- 2011.  1. 19 : 공동위원회 소위원회 개최

※ 개최결과 : 조건부 심의의결(잔여지는 상가용지 분양, 오현리 이주민들에게만 분양, 구역 우측 충분한 완충녹지 확보 등 7개 조건)

- 2011.  2. 25 : 도시관리계획(제1종지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시

○ 추진계획

- 2011.  7월 : 이주대상자 확정 및 분양계약

※ 잔여세대 발생시 분양방법 검토 중 (무건리사업단)

- 2011.  8월 : 실시계획 인가 및 공사착공

- 2011. 12월 : 이주단지 조성공사 준공

○ 위치도

이주단지

A=49,900㎡

도시계획도로

L=265m, B=25m

(A=5,765㎡)

상가 요청지

A=3,915㎡

○ 토지이용계획도

건 설 과  소관

6-1 도로망 확충 추진현황

확인자  건 설 과 장  정 원 모 (인)

작성자  도로건설팀장  김 재 군 (인)

□ 자체도로망 확충

○ 파주월롱첨단산업단지 진입도로

- 사업개요

∙ 위    치 : 월롱면 덕은리 ~ 파주읍 봉서리

∙ 사업기간 : 2006. ~ 2012. 12.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=5.29㎞, B=25m

∙ 사 업 비 : 1,277억원(국 702.5 / 도 183.5 / 시 391)

- 추진상황

∙ 2008. 10월 : 실시설계용역 완료

∙ 2009.  4월 : 공사착공 (도급-원하건설 외 1, 감리-동명기술공단 외 1)

∙ 2011.  6월 : 공사 50%, 보상 100%

- 향후 추진계획

∙ 2011. 12월 : 공사 70% (1·2구간 개통, 신문산대교 완료)

∙ 2012. 12월 : 공사완료

○ 문산~연풍간 도로확포장

- 사업개요

∙ 위    치 : 파주읍 파주리 ~ 파주읍 연풍리

∙ 사업기간 : 2004. 2. ~ 2012. 10.

∙ 사업규모 : 도로확포장 L=3.63㎞, B=25m

∙ 사 업 비 : 789억원(공사 306, 보상 483)

- 추진상황

∙ 2006.  6월 : 실시설계용역 완료

∙ 2008.  6월 : 실시계획인가

∙ 2009.  6월 : 보상완료

∙ 2010.  3월 : 공사착공 (도급/국제산업 외 1, 감리/동명기술공단 외 1)

- 향후 추진계획

∙ 2011. 12월 : 공사 28% (토공 및 구조물)

∙ 2012. 10월 : 공사완료

○ 교하공장밀집지역 진입도로 개설공사

- 사업개요

∙ 위    치 : 교하읍 교하리 ~ 하지석리 일원

∙ 사업기간 : 2009. ~ 2011. 12.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=1.2㎞, B=12m

∙ 사 업 비 : 70억원(공사 30, 보상 40)

- 추진상황

∙ 2010.  3월 : 보상계획공고

∙ 2010.  5월 : 도시관리계획결정 및 지형도면 고시

∙ 2010.  6월 : 공사착공 (태형종합건설 외 2)

∙ 2011.  6월 : 공사 45%, 보상 90%

- 향후 추진계획

∙ 2011.  8월 : 보상완료

∙ 2011. 12월 : 공사완료

○ 운정역~능안리간 도로확포장

- 사업개요

∙ 위    치 : 교하읍 상지석리 ~ 조리읍 능안리

∙ 사업기간 : 2006. ~ 2013.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=1.7㎞, B=12m

∙ 사 업 비 : 252억원(공사 90, 보상 150, 기타 12)

- 추진상황

∙ 2008.  3월 : 농어촌도로 기본계획 변경

∙ 2010.  8월 : 도로확포장공사 추진 내부방침 확정

∙ 2011.  5월 : 보상계획공고

∙ 2011.  6월 : 보상 15%

- 향후 추진계획

∙ 2011.  7월 : 도시관리계획 및 도로구역 결정

∙ 2012.  1월 : 공사착공

∙ 2013. 12월 : 공사완료

○ 광탄시가지 우회도로 개설

- 사업개요

∙ 위    치 : 광탄면 신산리 일원(분수천변)

∙ 사업기간 : 2007. ~ 2013.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=1.5㎞, B=12~15m

∙ 사 업 비 : 122억원(공사 52, 보상 70)

- 추진상황

∙ 2007.  7월 : 광탄주민 293인 도로개설요구 주민서명 제출

∙ 2008.  4월 : 경기도 투융자심사

∙ 2009.  2월 : 공여지발전종합계획 확정 및 도시관리계획(변경)결정

- 향후 추진계획

∙ 2012.  1월 : 실시설계용역 착수

∙ 2012.  5월 : 실시계획인가 승인

∙ 2013.  4월 : 보상완료

∙ 2013. 10월 : 공사완료

○ 향양3리 도로확포장

- 사업개요

∙ 위    치 : 파주읍 향양3리 ~ 문산읍 선유6리

∙ 사업기간 : 2006. ~ 2013.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=2.0㎞, B=8m

∙ 사 업 비 : 145.4억원(공사 50.4, 보상 95)

- 추진상황

∙ 2006. 10월 : 타당성조사용역 완료

∙ 2008. 11월 : 사전환경성검토 완료

∙ 2008. 12월 : 도시관리계획결정 및 지형도면 고시

∙ 2009.  2월 : 공여지발전종합계획 확정

- 향후 추진계획

∙ 2011. 10월 : 투융자심사

∙ 2012. 12월 : 보상완료

∙ 2013. 10월 : 공사완료

○ 객현~구읍리간 도로확포장

- 사업개요

∙ 위    치 : 적성면 구읍리 ~ 객현리

∙ 사업기간 : 2005. ~ 2013.

∙ 사업규모 : 도로확장 L=3.6㎞, B=8.5~10m

∙ 사 업 비 : 95억원(공사 64, 보상 31)

- 추진상황

∙ 2004. 11월 : 투융자심사 완료

∙ 2008.  2월 : 실시설계용역 완료

∙ 2008. 12월 : 농어촌도로 기본계획(변경)고시

∙ 2010.  6월 : 농어촌도로 노선지정(일부구간)

- 향후 추진계획

∙ 2012. 10월 : 보상완료

∙ 2013. 10월 : 공사완료

○ 신산리 도시계획도로 개설

- 사업개요

∙ 위    치 : 광탄면 신산리 (동신APT 주변)

∙ 사업기간 : 2005. ~ 2013.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=0.16㎞, B=8m

∙ 사 업 비 : 20억원(공사 4, 보상 16)

- 추진상황

∙ 2006.  1월 : 실시설계용역 착수

∙ 2006. 10월 : 투융자심사 및 실시설계용역 완료

- 향후 추진계획

∙ 2012. 10월 : 실시계획인가 승인

∙ 2013.  5월 : 보상완료

∙ 2013. 10월 : 공사완료

○ 소슬아파트 주변 도시계획도로 개설공사

- 사업개요

∙ 위    치 : 문산읍 선유리

∙ 사업기간 : 2011.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=0.2㎞, B=10m

∙ 사 업 비 : 7.65억원(공사 2, 보상 5.65)

- 추진상황

∙ 2008.  4월 : 실시설계용역 완료

∙ 2009.  2월 : 도시관리계획 결정

∙ 2009.  3월 : 보상계획 알림

∙ 2009.  5월 : 실시계획인가

∙ 2011.  3월 : 수용재결신청 및 공사착공

- 향후 추진계획

∙ 2011.  8월 : 보상완료

∙ 2011. 10월 : 공사완료

○ 호수아파트 주변 도시계획도로

- 사업개요

∙ 위    치 : 문산읍 문산리

∙ 사업기간 : 2011.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=0.03㎞, B=8m

∙ 사 업 비 : 6억원(공사 1, 보상 5)

- 추진상황

∙ 2011.  3월 : 실시설계용역 완료

∙ 2011.  4월 : 보상계획 공고

※ 기반시설부담금 반환으로 기 편성된 예산감액 (2회추경 예산편성)

- 향후 추진계획

∙ 2011.  8월 : 보상완료

∙ 2011. 10월 : 공사완료

○ 등원리 도시계획도로

- 사업개요

∙ 위    치 : 조리읍 등원리

∙ 사업기간 : 2011.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=0.07㎞, B=6m

∙ 사 업 비 : 5.6억원(공사 1, 보상 4.6)

- 추진상황

∙ 2011.  3월 : 실시설계용역 완료

∙ 2011.  4월 : 보상계획 공고

※ 기반시설부담금 반환으로 기 편성된 예산감액 (2회추경 예산편성)

- 향후 추진계획

∙ 2011.  8월 : 보상완료

∙ 2011. 10월 : 공사완료

□ 광역도로망 확충

○ 신도시~성석간 도로

- 사업개요

∙ 위    치 : 교하읍 상지석리 ~ 고양시 성석동

∙ 사업기간 : 2006 ~ 2013.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=2.9㎞, B=25m (파주시구간 1.7㎞)

∙ 사 업 비 : 758억원(공사 278, 보상 480)

- 추진상황

∙ 2009.  4월 : 실시계획인가 및 공사계약

∙ 2010.  5월 : 광역교통개선대책 변경심의 요청

- 향후 추진계획

∙ 2011. 12월 : 광역교통개선대책 변경

∙ 2013. 12월 : 공사완료

○ 신도시 서측우회도로

- 사업개요

∙ 위    치 : 교하읍 다율리 ~ 탄현면 갈현리

∙ 사업기간 : 2006 ~ 2012.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=4.76㎞, B=25m

∙ 사 업 비 : 1,278억원(공사 524, 보상 754)

- 추진상황

∙ 2009.  3월 : 도로구역 결정

∙ 2009.  5월 : 공사착공 (금호건설)

∙ 2009.  7월 : 보상계획공고

∙ 2011.  6월 : 공정 45%, 보상 95%

- 향후 추진계획

∙ 2011. 12월 : 지장물보상 및 철거 / 목동지하차도, 오도교 하부공

∙ 2012. 12월 : 공사완료

○ 신도시~일산간 도로

- 사업개요

∙ 위    치 : 고양시 덕이동, 대화동 ~ 교하읍 동패리

∙ 사업기간 : 2006 ~ 2011.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=3.28㎞, B=25m

∙ 사 업 비 : 1,113억원(공사 389, 보상 724)

- 추진상황

∙ 2009.  4월 : 실시계획인가 및 공사착공 (극동건설, 대한GNS)

∙ 2009.  6월 : 용지 및 지장물 보상

∙ 2009.  7월 : 보상계획공고

∙ 2011.  6월 : 공정 94%, 보상 100% (고양시구간 공사진행)

- 향후 추진계획

∙ 2011.  8월 : 공사완료

○ 국지도56호선 확장

- 사업개요

∙ 위    치 : 교하읍 당하리 ~ 금촌동

∙ 사업기간 : 2009. ~ 2011.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=3.8㎞, B=25m

∙ 사 업 비 : 706억원(공사 375, 보상 331)

- 추진상황

∙ 2009.  3월 : 도로구역결정

∙ 2009.  6월 : 보상계획공고

∙ 2009. 10월 : 공사착공 (호성종합건설, 동광건설)

∙ 2011.  6월 : 공정 40%, 보상 100%

- 향후 추진계획

∙ 2012.  6월 : 공사완료

○ 지방도359호선 확장

- 사업개요

∙ 위    치 : 교하읍 당하리 ~ 금촌동

∙ 사업기간 : 2009. ~ 2011.

∙ 사업규모 : 도로개설 L=3.7㎞, B=25m

∙ 사 업 비 : 585억원(공사 256, 보상 329)

- 추진상황

∙ 2008. 12월 : 도로구역결정(시도)

∙ 2009.  3월 : 도로구역결정(지방도) 및 비관리청공사 인가

∙ 2009.  5월 : 공사계약 및 착공 (한신공영)

∙ 2011.  6월 : 공정 40%, 보상 95%

- 향후 추진계획

∙ 2011. 12월 : 와동지하차도 완료

∙ 2012. 12월 : 공사완료

□ 국가도로망 확충

○ 서울~문산간 고속도로

- 사업개요

∙ 사업기간 : 2007. ~ 2015. 7.

∙ 사업규모 : L=34.7km, B=23.4~30.6m(4~6차로)(파주시구간 L=13km)

∙ 사 업 비 : 1조5,712억원(공사비 7,483, 보상비 8,229)

- 추진상황

∙ 2007.  4월 : 제3자 제안공고

∙ 2009.  6월 : 서울접근 노선 협의(국토부, 서울시, 경기도)

∙ 2009. 12월 : 분야별 협상 및 관련기관 협의

∙ 2010. 10월 : 기본설계 완료

∙ 2011.  3월 : 파주시 구간 노선협의

- 향후 추진계획

∙ 2011.  6월 : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정

∙ 2011.  9월 : 실시설계완료 및 실시계획 승인

∙ 2012.  1월 : 공사착공 / 2016.12 준공

∙ 2017.  1월 : 개통 및 운영개시 / 2046. 12(30년)

○ 적성~전곡간 도로확포장공사

- 사업개요

∙ 사업기간 : 2002. ~ 2015. 10.

∙ 사업규모 : L=17.8km, B=20m(4차로)(파주시구간 L=6.6km)

∙ 사 업 비 : 4,500억원(공사비 3,000, 보상비 1,500)

- 추진상황

∙ 2004. 12월 : 실시설계 완료

∙ 2007.  5월 : 도로구역결정 고시

∙ 2008.  8월 : 총사업비 협의완료(국토해양부)

∙ 2009.  2월 : 공사착공(현대건설)

∙ 2009. 10월 : 보상계획공고

∙ 2011.  4월 : 공사 16%/ 보상 ∙%

- 향후 추진계획

∙ 2011. 12월 : 공사 18%/ 보상 45%

∙ 2015. 10월 : 공사준공

□ 경기도 도로망 확충

○ 법원~상수간 도로확포장공사

- 사업개요

∙ 사업기간 : 2005. 3. ~ 2012. 10.

∙ 사업규모 : L=10.06km, B=20m(4차로)

∙ 사 업 비 : 1,578억원(공사비 1,053, 보상비 525)

- 추진상황

∙ 2003. 12월 : 실시설계 완료

∙ 2005.  5월 : 공사착공

∙ 2011.  5월 : 공사 70%/ 보상 ∙%

- 향후 추진계획

∙ 2012. 10월 : 공사준공

○ 조리~법원간 도로확포장공사

- 사업개요

∙ 사업기간 : 2007. 11. ~ 2013. 7.

∙ 사업규모 : L=13.7km, B=20m(4차로)

∙ 사 업 비 : 2,701억원(공사비 1,416, 보상비 1,285)

- 추진상황

∙ 2006.  1월 : 실시설계 완료

∙ 2007. 11월 : 공사착공(도급:현대건설 감리:건화 외 1)

∙ 2011.  5월 : 공사 8%/ 보상21.7%

- 향후 추진계획

∙ 2011. 10월 : 공사 14% / 보상 31%

∙ 2013.  7월 : 공사준공

○ 고양~광탄간 도로확포장공사

- 사업개요

∙ 사업기간 : 2007. ~ 2012.

∙ 사업규모 : L=9.18km, B=18.5m(4차로)

∙ 사 업 비 : 1,861억원(공사비 802 보상비 1,059)

- 추진상황

∙ 2006.  2월 : 실시설계 완료(용미~광탄)

∙ 2007.  2월 : 실시설계완료(덕양~용미)

∙ 2007. 12월 : 공사착공(덕양~용미)

∙ 2011.  5월 : 공사 12%/ 보상19%

- 향후 추진계획

∙ 2011. 10월 : 공사 14% / 보상 31%(덕양~용미)

∙ 2012. 12월 : 공사준공.

○ 설마~구읍간 도로확포장공사

- 사업개요

∙ 사업기간 : 2007. 2. ~ 2012. 2

∙ 사업규모 : L=8.03km, B=20.0m(4차로)

∙ 사 업 비 : 1,134억원(공사비 901 보상비 233)

- 추진상황

∙ 2004.  2월 : 실시설계 완료

∙ 2007.  2월 : 공사착공

∙ 2011.  5월 : 공사 40%/ 보상95%

- 향후 추진계획

∙ 2012.  2월 : 공사준공

○ 금촌~월롱간 도로확포장공사

- 사업개요

∙ 사업기간 : 2005. 1. ~ 2012. 12

∙ 사업규모 : L=4.75km, B=20.0m(4차로)

∙ 사 업 비 : 1,104억원(공사비 578 보상비 578 기타 39)

- 추진상황

∙ 2004.  2월 : 실시설계 완료

∙ 2005.  1월 : 공사착공

∙ 2011.  5월 : 공사 55%/ 보상79%

- 향후 추진계획

∙ 2012. 12월 : 공사준공

○ 월롱~광탄간 도로확포장공사

- 사업개요

∙ 사업기간 : 2004. 5. ~ 2012. 12

∙ 사업규모 : L=5.74km, B=20.0m(4차로)

∙ 사 업 비 : 1,116억원(공사비 705 보상비 411)

- 추진상황

∙ 2007.  2월 : 실시설계 완료

∙ 2008.  6월 : 공사착공

- 향후 추진계획

∙ 2012. 12월 : 공사준공

○ 장남교 가설공사

- 사업개요

∙ 사업기간 : 2008. 2. ~ 2012. 7.

∙ 사업규모 : L=2.14km, B=11.0m(2차로)

∙ 사 업 비 : 465억원(공사비 413 보상비 52)

- 추진상황

∙ 2007.  3월 : 실시설계 완료

∙ 2008.  2월 : 공사착공

∙ 2011.  4월 : 공사 40% / 보상 96%

- 향후 추진계획

∙ 2012.  7월 : 공사준공

6-2 친환경적 하천정비사업 및 하천관련 현황

확인자  건 설 과 장   정 원 모 (인)

작성자  하천관리팀장   김 윤 회 (인)

□ 친환경적 하천정비사업

○ 두포천 개수공사

- 사업개요

․ 위    치 : 파평면 두포리～ 법원읍 금곡리

․ 사 업 량 : L = 4.97Km(교량2개, 배수통관6개,어도2개)

․ 사 업 비 : 9,383백만원(국 5,630 / 도 3,753)

(단위:백만원)

구 분		총사업비	기투자	2010	2011	향후	비 고
합 계		9,383	1,388	1,167	2,500	4,328
시설비	설계비	223	223
	보상비	3,472	1,160	1,166	1,146
	공사비	5,251			1,270	3,981
기타부대비		437	5	1	84	347

․ 사업기간 : 2009. 1월～2012. 12월

․ 공    정 : 63%(보상), 5%(공사)

- 추진사항

․ 2009. 4. 24 : 하천공사 승인(경기도)

․ 2009. 6. 01 : 군부대 협의완료(7296부대)

․ 2009. 6. 15 : 실시설계용역완료

․ 2009.11. 15 : 파주시설계자문완료

․ 2011. 3. 17 : 1차분 공사착공(축제L=1.041㎞, 호안0.667m, 배수통관2개, 어도1개)

- 추진계획

․ 2011. 8.1 : 1차분 공사준공

․ 2012. 12월 : 전체분 공사완료

○ 설마천 개수공사

- 사업개요

․ 위    치 : 적성면 두지리～마지리

․ 사 업 량 : L = 2.21Km(산책로1.5㎞, 배수통관8개, 여울공2개)

․ 사 업 비 : 3,779백만원(국 2,267 / 도 1,512)

(단위:백만원)

구 분		총사업비	기투자	2010	2011	향후	비 고
합 계		3,779	279	1,000	2,500	0
시설비	설계비	147	147
	보상비	676	127	366	183
	공사비	2,853		544	2,309
기타부대비		103	5	90	8

․ 사업기간 : 2009. 1월～2011. 10월

․ 공    정 : 94%(보상), 40%(공사)

- 추진사항

․ 2009.  4. 24 : 하천공사 승인(경기도)

․ 2009.  6. 15 : 실시설계용역완료

․ 2010.  3.  8 : 군부대협의 완료

․ 2010.  7.  1 : 1차분 공사착공(축제 및 호안 367m, 하도정비 264m)

․ 2010. 11. 17 : 1차분 공사준공

․ 2011.  1. 27 : 2차분 공사착공(축제L=1.5㎞, 호안L=0.7㎞,산책로L=1.5㎞ )

- 추진계획

․ 2011.  1. 27 : 2차분 및 전체분 공사준공

○ 보맥이천 개수공사

- 사업개요

․ 위    치 : 문산읍 운천리 일원

․ 사 업 량 : L = 2.33km, 교량 10개소

․ 사 업 비 : 7,642백만원(국 3,570 / 시 4,071)

(단위:백만원)

구 분		총사업비	기투자	2010	2011	향후	비고
합 계		7,642	1,829	1,105	1,609	3,099
시설비	설계비	133	133
	보상비	2,498	1,688	512	-	298
	공사비	4,991		588	1,606	2,797
기타부대비		20	8	5	3	4

․ 사업기간 : 2007. 2월～2012. 10월

․ 공    정 : 90%(보상), 공사(35%)

- 추진사항

․ 2010.  4. 10 : 1차분 공사착공(축제 및 호안 L=0.46㎞)

․ 2010.  7. 30 : 1차분 공사준공

․ 2010. 10.  9 : 2차분 공사착공(축제 및 호안 L=0.46㎞)

․ 2010. 12. 10 : 2차분 공사준공

․ 2011.  1. 20 : 3차분 공사착공(축제 및 호안 L=1.4㎞)

- 추진계획

․ 2011.  6. 28 : 3차분 공사준공

․ 2012. 10월 : 공사준공(전체분)

○ 솔개천 개수공사

- 사업개요

․위    치 : 적성면 장현리 일원

․사 업 량 : L = 0.6km, 교량 1개소

․사 업 비 : 1,680백만원(국 840 / 시 840)

(단위:백만원)

구 분		총사업비	기투자	2010	2011	향후	비고
합 계		1,680	0	0	477	1,203
시설비	설계비	85			85
	보상비	517			391	126
	공사비	1,075				1,075
기타부대비		3			1	2

․ 사업기간 : 2011. 2월～2012. 10월

․ 공    정 : 설계중

- 추진사항

․ 2011.  2. 14 : 실시설계용역 착수

․ 2011.  7. 13 : 실시설계용역 완료

- 추진계획

․ 2012.  2월 : 공사착공

․ 2012. 10월 : 공사준공

□ 소하천 점용료 부과․징수 내역

구분	점용현황		사 용 료 (천원)						비고
			부과액		징수액		체납액
	건수	면적	건수	금액	건수	금액	건수	금액
경작 및 기타	34	2,860	34	776	34	776	-	-

□ 하천부지 점용 및 사용료 부과 징수 현황

○ 점용 및 사용료 부과 징수 현황(국가 및 지방하천)

(단위 : ㎡ / 천원)

구분	점용현황		사 용 료						비고
			부과액		징수액		체납액
	건수	면적	건수	금액	건수	금액	건수	금액
경작 및 기타	395	1,994,632	395	50,239	395	50,239	-	-

□ 공릉천 생태하천 조성사업 추진 현황

○ 사업개요

- 위    치 : 조리읍 장곡리(하나로마트～교하읍 송촌리(송촌대교)

- 사 업 량 : L=16㎞

(자전거도로 L=8.3㎞, 산책로L=16㎞, 교량13개소, 수변공원조성, 관찰데크 등)

- 사 업 비 : 57,400백만원(국 57,400)

- 사업기간 : 2009. 2월 ～ 2014. 1월

○ 추진사항

- 2007. 12. 26 : 실시설계용역 준공

- 2008. 12. 23 : 하천점용허가 취소

- 2009. 01. 30 : 파주시 건의사항 제출(서울청)

- 2009. 02. 25 : 공사착공(완경사축제1.1㎞, 호안 1.5㎞-좌안2지구)

- 2009. 03. 27 : 보상업무 위․수탁협약 체결(파주시↔서울청)

- 2009. 05. 27 : 자전거도로 연장 및 우선착공건의(서울청)

(자전거도로 자유로 연장L=15.4㎞)

- 2009. 06. 30 : 환경영향평가 협의완료(기간:5월～6월)]

- 2009. 11. 15 : 1차분 공사준공

- 2010.  3.  2 :  2차분 공사착공(완경사축제3.0㎞, 저수호안 1.5㎞)

- 2010. 12. 13 :  2차분 공사준공

- 2011.  1. 21 :  3차분 공사착공

(완경사축제0.35㎞, 저수호안5.388㎞, 인도교1개소, 자전거교 6개소)

○ 추진계획

- 2011. 11. 20  : 3차분 공사준공

- 2014. 1월 : 전체분 공사준공

□ 낚시등의 금지구역내 위반자 과태료 부과․징수 내역

○ 단속개요

- 하    천 : 공릉천(국가하천)

- 구    간 : 16.1Km(교하읍 송촌리 ∼ 조리읍 장곡리)

※ 낚시해제 구간 L=4㎞(금촌천 합류부∼영천배수갑문)

- 인    원 : 2개조(4명) /연중(주․야간)

- 용 역 비 : 100백만원(2010년도 100백만원)

○ 부과현황

(단위 : 천원)

구분	과 태 료				비고
	부과액		징수액
	건수	금액	건수	금액
합 계	0	0	0	0	2007년도부터 낚시금지단속 및 홍보에 따른 주민홍보정착단계에 있고 또한 2010.9.1부터 일부구간 낚시허용으로 위반자 없음.
2010년	0	0	0	0
2011년	0	0	0	0

안전관리과  소관

7-1 재난 취약지역시설 안전관리 정착

확인자 : 안전관리과장  박 우 용 (인)

작성자 : 재난예방팀장  김 진 영 (인)

□ 재난 취약시설 안전 점검 현황

【 2010년 】

○ 설연휴대비 다중이용시설 안전점검

∙ 점검기간 : 2010. 1. 28 ~ 1. 29

∙ 대    상 : 설연휴 재난취약시설 5개소

∙ 점 검 반 : 시·유관기관

∙ 점검분야 : 가스, 전기, 소방시설의 안전성 및 유사시 긴급 대피통로 확보 등

○ 해빙기대비 안전점검

∙ 점검기간 : 2010. 2. 22 ~ 3. 19

∙ 대    상 : 해빙기 재난취약시설 16개소

∙ 점 검 반 : 시·유관기관, 안전관리자문단 합동점검

∙ 점검분야 : 절개지, 낙석 위험지역, 석축·옹벽, 대형공사장 안전관리 실태

○ 우기대비 대형공사장 안전점검

∙ 점검기간 : 2010. 6. 11 ~ 6. 20

∙ 대    상 : 대형공사장 39개소

∙ 점 검 반 : 시·안전관리자문단 합동점검

∙ 점검분야 : 대형공사장 안전관리 실태 점검

○ 추석연휴대비 다중이용시설 안전점검

∙ 점검기간 : 2010. 9. 1 ~ 9. 10

∙ 대    상 : 추석연휴 재난취약시설 17개소

∙ 점 검 반 : 시·유관기관, 안전관리자문단 합동점검

∙ 점검분야 : 유사시 긴급 대피통로 확보 및 시설분야별 안전기준 준수

【 2011년 】

○ 설연휴대비 다중이용시설 안전점검

∙ 점검기간 : 2011. 1. 24 ~ 1. 27

∙ 대    상 : 설연휴 재난취약시설 15개소

∙ 점 검 반 : 시·유관기관

∙ 점검분야 : 가스, 전기, 소방시설의 안전성 및 유사시 긴급 대피통로 확보 등

○ 해빙기대비 안전점검

∙ 점검기간 : 2011. 2. 23 ~ 3. 31

∙ 대    상 : 해빙기 재난취약시설 28개소

∙ 점 검 반 : 시·유관기관, 안전관리자문단 합동점검

∙ 점검분야 : 절개지, 낙석 위험지역, 석축·옹벽, 대형공사장 안전관리 실태

○ 우기대비 대형공사장 안전점검

∙ 점검기간 : 2011. 6. 11 ~ 6. 20

∙ 대    상 : 대형공사장 34개소

∙ 점 검 반 : 시·안전관리자문단 합동점검

∙ 점검분야 : 대형공사장 안전관리 실태 점검

□ 재난 취약가구 노후 전기시설 점검 및 개선 현황

【 2010년 】

○ 재난취약가구 안전점검 정비사업 추진현황

∙ 대    상 : 273가구(국민기초생활수급자)

∙ 기    간 : 2010. 3. 11 ~ 3. 22

∙ 사 업 비 : 13백만원(국비 7백만원 도비 6백만원)

∙ 점검기관 : 한국전기안전공사 파주고양지사

∙ 내    용 : 전기시설 점검 및 보수

계	시설개선 현황							비고
	누전차단기 교 체	개폐기 교 체	분전함	형광등 기 구	삼파장 램 프	콘센트	멀티탭
134가구	34	26	8	22	27	2	15	273가구 점검 134가구 보수

【 2011년 】

○ 재난취약가구 안전점검 정비사업 추진현황

∙ 대    상 : 375가구(국민기초생활수급자)

∙ 기    간 : 2011. 4. 14 ~ 4. 29

∙ 사 업 비 : 22백만원(국비 10백만원 도비 12백만원)

∙ 점검기관 : 한국전기안전공사 파주고양지사

∙ 내    용 : 전기시설 점검·보수 및 화재감지기 무상 설치

계	시설개선 현황							비고
	누전차단기 교 체	개폐기 교 체	배선 정리	형광등 기 구	삼파장 램 프	콘센트	멀티탭
75가구	29	18	2	3	13	2	8

※ 375가구 점검실시 및 화재감지기 무상설치 / 75가구 시설보수

7-2 기후변화에 따른 방재대책 추진

확인자 : 안전관리과장  박 우 용 (인)

작성자 : 방재시설팀장  윤 희 기 (인)

□ 방재시설물 성능개선

【 2010년 】

○ 문산 배수펌프장 펌프 용량 증설

∙ 사 업 량 : 펌프용량 증설(총 110톤/분)

※ 기존 570톤(95톤/분*6대) ⇒ 증설 680톤(95톤/분×4대+150톤/분×2대)

∙ 사업기간 : 2010. 1. 29 ∼ 4. 29

∙ 총사업비 : 443백만원

○ 금촌2 배수펌프장 노후 제진기 교체

∙ 사 업 량 : 노후 제진기 교체(기존 유압식 ⇒ 로타리식)

∙ 사업기간 : 2010. 1. 21 ~ 4. 21

∙ 총사업비 : 662백만원

○ 선유4 배수펌프장 노후 제진기 교체

∙ 사 업 량 : 노후 제진기 교체(기존 유압식 ⇒ 로타리식)

∙ 사업기간 : 2010. 10. 1 ∼ 12. 29

∙ 총사업비 : 351백만원

○ 선유3 배수펌프장 건물 리모델링

∙ 사 업 량 : 노후 건물 리모델링 1식

∙ 사업기간 : 2010. 3. 24 ∼ 5. 22

∙ 총사업비 : 372백만원

【 2011년 】

○ 봉일천 배수펌프장 제진기 교체

∙ 사 업 량 : 노후 제진기 교체(기존 유압식 ⇒ 로타리식)

∙ 사업기간 : 2011. 1. 27 ~ 4. 27

∙ 총사업비 : 602백만원

○ 선유3 배수펌프장 유수지 준설

∙ 사 업 량 : 유수지 준설 1식(준설량 : 7,925톤)

∙ 사업기간 : 2011. 1. 31 ~ 3. 29

∙ 총사업비 : 218백만원

○ 금촌기존 배수펌프장 원격제어설비 설치

∙ 사 업 량 : 원격제어설비 설치 1식

∙ 사업기간 : 2011. 2. 28 ~ 5. 27

∙ 총사업비 : 64백만원

□ 재난 예방경보시설 확충

【 2010년 】

○ 영상감시(CCTV)시스템 신설

∙ 사 업 량 : 2개소 2대(임진강유역)

∙ 위    치 : 늘로천 합류부, 리비교

∙ 사업기간 : 2010. 2. 18 ～ 3. 18

∙ 사 업 비 : 53백만원

○ 수위관측 시설물 정비

∙ 사 업 량 : 레이다 수위계 4대 및 초음파 수위계 4대 교체

UPS 보강 8개소, 함체보강, 수위서버 교체

장남교 수위센서 교체

∙ 위    치 : 9개소(도마산교, 마장교, 칠정교, 대능교, 부곡교, 가월교,

어유1교, 청안내교, 장남교)

∙ 사업기간 : 2010. 3. 26 ～ 5. 25

∙ 사 업 비 : 83백만원

【 2011년 】

○ 영상감시시스템(CCTV) 확충

∙ 사 업 량 : 하천주변 야영객 인명피해 예방을 위한 CCTV 장비 교체

∙ 사업대상 : 5개소(비룡대교, 통일대교, 장남교, 육갑문, 영천배수갑문)

∙ 사업기간 : 2011. 2. 24 ~ 3. 25

∙ 총사업비 : 46백만원

상하수도과  소관

8-1 수돗물 공급 확대

확인자  상하수도과장  최 귀 남 (인)

작성자  상수시설팀장  박 기 홍 (인)

□ 구제역 관련 긴급 급·배수관 확장공사 현황

○ 사업현황 [1차(2010.12.30) / 2차(2011.4.4) 예산확보]

구 분	사업 대상	사업량 (㎞)	수 혜 도		사 업 비 (백만원)				비고
			세대	인구	계	국비	도비	시비
계	237리	L=255	8,894	22,030	24,344	17,042	3,650	3,652
1차사업	166리	L=119	4,776	10,928	16,228	11,361	2,433	2,434
2차사업	71리	L=136	4,118	11,102	8,116	5,681	1,217	1,218

○ 추진실적

▪ 2010. 12. 15 구제역 최초발생

▪ 2011. 01. 19 용역착수 (2월14일 최초 공사착공)

▪ 2011. 04. 13 수돗물 최초 공급(4월13일 통수식)

▪ 2011. 06.    현공정 89%  ※ 의정부 국도유지사무소 도로굴착 협의지연

□ 민북지역 상수도공급 추진 현황

○ 사업위치 : 파주시 군내면 일원(3개리, 6개대대)

○ 사 업 량 : 관로매설(D300㎜이하) L=32.8km / 가압장 1개소

○ 사 업 비 : 10,169백만원 (도비 3,402  시비 5,210 특별교부 1,557)

○ 사업기간 : 2010. 12. ～ 2013. 12.

○ 연차별 추진계획 및 수혜도

구 분	추 진 계 획				비고
	사 업 량	사업비 (백만원)	수 혜 도
			지역및부대	급수인구
계	L=32.8km 가압장1개소	10,169	3개리 / 6개대대	271세대 / 3,649명
1단계	L=11.6km 가압장 1개소	5,016	통일촌 JSA대대	158세대 / 446명 1,000명	2011년
2단계	L=9.9km	2,182	대성동 3개대대	55세대 / 198명 1,200명	2012년
3단계	L=11.3km	2,971	해마루촌 2개대대	58세대 / 160명 645명	2013년

○ 추진실적

▪ 2011.  2. : 국도1호선 도로굴착 심의(서울국토관리청)

▪ 2011.  3. : 실시설계 용역완료(1단계)

▪ 2011.  4. : 계약심사 의뢰(파주시→경기도 감사담당관)

▪ 2011.  5. : 계약심사 결과 통보(경기도 감사담당관→파주시)

▪ 2011.  6. : 설계내역 수정 중(경기도 계약심사 결과내용 반영)

□ 안정적인 물 공급을 위한 배수지 조성사업 추진내역

(단위:㎥/일, ㎥, 백만원)

배수지	시설용량	제 원					준공/기간	총사업비	비 고
계	199,300		109,300					90,096
교 하	65,500	V=	32,800		체류시간	12.1hr	2008. 12. 19	23,259	준공
법 원	6,000	V=	4,500		체류시간	19.1hr	2008. 12. 19	3,839	준공
광 탄	10,000	V=	6,000		체류시간	14.4hr	2009. 10. 30	5,047	준공
월 롱	97,000	V=	55,000		체류시간	13.6hr	2005. 7.～2012. 11.	44,307	공사중
탄 현	10,900	V=	6,000		체류시간	13.5hr	2009. 1.～2012. 03.	5,867	공사중
적 성	9,900	V=	5,000		체류시간	12.1hr	2009. 1.～2012. 03.	7,777	공사중

□ 마을상수도 지방상수도 전환 10개년사업 추진현황

○ 10개년 계획 및 추진실적

구 분	계	2010년까지	2011	2012	2013	2014 ～2017
10개년 계획	110	49	7	8	7	39
추진실적(계획)	97(13)	79	18	(8)	(5)	-

□ 수도정비기본계획 변경 수립 내용

○ 용역위치 : 파주시 전역

○ 용역기간 : 2011. 2. ∼ 2012. 1.

○ 용 역  비 : 1,100백만원

○ 용역내용

2020 파주도시기본계획에 맞는 급수인구 증가와 균형발전을 위한 민북

지역 등 급수구역 확대

▪ 수도정비에 관한 기본방침

▪ 수돗물의 중장기 수급에 관한 사항

▪ 수도공급 구역에 관한 사항

▪ 수도시설에 배치․구조 및 공급능력(상수도 유수율 제고 포함)

○ 추 진 실 적

▪ 2010. 10. : 용역과제 사전심의

▪ 2010. 11. : 계약심사

▪ 2010. 12. : 용역계약 심의

▪ 2011. 01. : 사업수행능력 평가

▪ 2011. 02. : 용역착수 ( ‘11. 6월 현재 30% 공정율)

8-2 공공하수도 확충

확인자  상하수도과장  최 귀 남 (인)

작성자  하수시설팀장  김 달 수 (인)

하수처리팀장  임 상 범 (인)

□ 공공하수처리시설 증설3개소, 신설2개소 추진 현황

○ 사업개요

사업명	위 치	사업량 (톤/일)	사업비 (백만원)	사업기간	추진사항 및 향후계획
계		5개소	106,225
문산증설	문산읍 당동리 일원	9,500	26,809	2008~ 2012	• 2007.02. : 대형공사 입찰심의 • 2008.12. : 공사착공 • 2012.06. : 공사준공
금촌증설	금촌동 일원	17,000	35,214	2008~ 2013	• 2008.08. : 기본계획등 용역 • 2009.06. : 공사착공 • 2013.12. : 공사준공
통일동산 증설	탄현면 법흥리 일원	6,000	23,202	2008~ 2012	• 2008.09. : 기본계획등 용역 • 2009.06. : 공사착공 • 2012.06. : 공사준공
탄현신설	탄현면 오금리 일원	800	9,000	2008~ 2013	• 2008.04. : 기본계획등 용역 • 2011.07. : 설치인가 • 2011.09. : 공사착공
파평신설	파평면 금파리 일원	1,300	12,000	2008~ 2013	• 2008.04. : 기본계획등 용역 • 2011.07. : 설치인가 • 2012.03. : 공사착공

○ 기대효과

▪ 공동주택건설 및 산업단지 조성등 급격한 인구증가에 대비한 공공하수도          확충으로 청정 도시기반 구축

▪ 처리용량 초과로 인한 수질오염을 예방하여 안전한 생태계보호와 쾌적한          주거환경 개선

□ 하수관거 정비 재정사업 3개소, 민자사업 3개소 추진 현황

○ 사업개요

사업명	위 치	사업량 (배수설비)	사업비 (백만원)	사업 기간	추진사항 및 향후계획
계	5개소	L=298㎞ 18,465가구	245,769
문산 하수관거 정비사업	문산읍, 파주읍 (봉서, 향양리) 일원	L=42㎞ 배수설비 2,880가구	42,392	2005 ～ 2013	∙2008. 09 : 공사착공 ∙2009. 02 : 설치인가 ∙2013. 10 : 공사준공
탄현 하수관거 정비사업	탄현면 일원	L=21㎞ 배수설비 658가구	18,820	2009 ～ 2014	∙2009. 11 : 실시설계 완료 ∙2011. 02 : 재원협의 완료 ∙2011. 09 : 공사착공
파평 하수관거 정비사업	파평면, 적성면 식현리 일원	L=28㎞ 배수설비 1,418가구	25,930	2009 ～ 2014	∙2009. 11 : 실시설계 완료 ∙2011. 04 : 재원협의 완료 ∙2012. 03 : 공사착공
2006년 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	파주읍, 법원읍, 월롱면, 광탄면, 금촌동(아동) 일원	L=105㎞ 배수설비 6,216가구	74,066	2006 ～ 2011	∙2008. 04 : 실시협약 체결 ∙2008. 09 : 공사착공 ∙2011. 07 : 공사준공
2011년 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	교하읍, 법원읍, 파주읍, 광탄면, 탄현면, 금촌동 (야동, 맥금)일원	L=102㎞ 배수설비 7,293가구	84,561	2011 ～ 2015	∙2011. 01 : 시의회 동의 ∙2011. 04 : 기본계획 착수 ∙2012. 07 : 실시협약 체결

※ 추진중인 민자사업은 2개 사업임.

○ 기대효과

▪ 미처리 지역 하수 조기 처리를 통한 방류하천 수질개선

▪ 개인하수처리시설 설치 면제에 따른 주민부담 경감

▪ 공공하수처리시설 운영효율 증대 및 친환경 도시조성

8-3 간이상수도 및 약수터시설 현황 및 관리 현황

확인자  상하수도과장  최 귀 남 (인)

작성자  상수시설팀장  박 기 홍 (인)

□ 약수터 수질점검 및 조치 현황

지역	시설명	수 질 검 사 결 과						조치사항
		2010. 1분기	2010. 2분기	2010. 3분기	2010. 4분기	2011. 1분기	2011. 2분기
문산읍	도토리	적 합	적 합	부적합	적 합	적 합	부적합	소독실시
파주읍	연풍3리	적 합	적 합	적 합	부적합	적 합	부적합	소독실시
	안용주골	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
법원읍	대 능	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	천 현	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	율 곡	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	부적합	소독실시
교하읍	심 학	적 합	적 합	부적합	적 합	적 합	부적합	소독실시
	고인돌	적 합	부적합	부적합	적 합	부적합	부적합	소독실시
월롱면	등정골	적 합	부적합	적 합	적 합	적 합	적 합	소독실시
광탄면	묘 지	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	감사교육원	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
파평면	두 포	부적합	적 합	적 합	적 합	적 합	부적합	소독실시
	새 일	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
아동동	시 청	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합

※ 부적합 시설(7개소) 소독후 6월15일 재검실시

□ 약수터 시설 유지관리 및 지원 현황

구 분	유지관리 및 지원 현황	사업실시	예산액	비고
총 계			3,472천원
심 학	집수정 열쇠 수리	2010.02.03	150천원
공 통	음용 컵 구입	2010.02.22	340천원
공 통	무균채수병 구입	2010.02.23	814천원
심학, 고인돌	자외선 살균기 램프 및 필터 구입	2010.03.30	742천원
대 능	약수터 보수공사	2010.09.08	881천원
공 통	먹는물 소독약 구입	2010.10.08	545천원

□ 간이상수도 수질검사 및 조치현황

지역	시설명	수 질 검 사 결 과						비고
		2010. 1분기	2010. 2분기	2010. 3분기	2010. 4분기	2011. 1분기	2011. 2분기
총계		41개소	37개소	35개소	31개소	31개소	24개소
금촌	창골	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
문산읍	운천1리	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	-	폐 지
	마정3리	적 합	부적합	-	-	-	-	폐 지
	당동3리	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	-	폐 지
법원읍	점동	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	설원동	적 합	적 합	부적합	적 합	적 합	적 합
	황샛말	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	주차장	적 합	적 합	적 합	-	-	-	폐 지
	양가터	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	부적합	6.2 재취수 및 적합 판정
	부작골	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	동해동	적 합	-	-	-	-	-	폐 지
교하읍	다락골	적 합	-	-	-	-	-	폐 지
	방곡동	적 합	-	-	-	-	-	폐 지
월롱면	용상동	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	야동	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	능산1리	적 합	적 합	적 합	-	-	-	폐 지
	영태4리	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
탄현면	금산대촌	적 합	적 합	적 합	-	-	-	폐 지
	성동대촌	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	샘텃말	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	만우리	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
광탄면	양지동	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	옥계동	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	토란동	적 합	적 합	-	-	-	-	폐 지
	방축1리	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	-	폐 지
	샛터	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	-	폐 지
	안골	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	-	폐 지

지역	시설명	수 질 검 사 결 과						비 고
		2010. 1분기	2010. 2분기	2010. 3분기	2010. 4분기	2011. 1분기	2011. 2분기
파평면	웃장마루	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	빙곡동	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	용산골	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	-	폐 지
	장담동	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	-	폐 지
적성면	가월리	적 합	-	-	-	-	-	폐 지
	자장리	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	장현1리	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	장현2리	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	객현2리	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	폐 지
	구읍3리	적 합	적 합	적 합	-	-	-	폐 지
	설마리	적 합	적 합	적 합	부적합	적 합	적 합
장단 출장소	백연리	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	동파리	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합
	조산리	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합	적 합

※ 간이상수도 18개 폐지시설은 지방상수도 전환(상수도 공급)

8-4 지방상수도 운영 위․수탁 효율화 추진 현황

확인자  상하수도과장  최 귀 남 (인)

작성자  수도행정팀장  김 성 균 (인)

□ 고객만족 서비스 향상

○ 고객만족도 조사 결과

▪ 69.7점(2009년) → 76.36점(2010년)

○ 추진내용

▪ 고객접점직원 확대 배치

▪ 계량기 동파 방지팩 무료 배포 등

□ 유수율 제고

○ 유수율

▪ 84.3%(2009년) → 84.6%(2010년)

○ 주요내용

▪ 노후계량기 교체공사

▪ 노후관로 개․대체

□ 시설개선 및 운영 효율화

○ 성 과

▪ 설비 과학화 및 자동화 수준 향상

○ 주요내용

▪ 적성계통 누수감지시스템 도입

▪ 정수처리공정 감시제어시스템 구축

▪ 수처리 공정 및 펌프운영 방법 개선(무인 운영)

도로관리사업소 소관

9-1 안전하고 효율적인 도로환경 조성

확인자  도로관리사업소장  서 상 호 (인)

작성자  도로보수1팀장  한  광  우 (인)

작성자  도로보수2팀장  이  호  명 (인)

□ 도로시설물 유지보수 5개 권역별 처리 현황

○ 권역별 유지보수 개요 및 처리현황

일련 번호	사 업 명	위 치	유지보수 처리현황	사업기간	사 업 비 (백만원)			비고
					예산액	집행액	집행잔액
	합계 10건
1	금촌권 도로시설물 유지보수	금촌 일원	46개소	'11.1월～12월	150	80	70
2	교하,탄현권 도로시설물 유지보수	교하, 탄현 일원	28개소	'11.1월～12월	150	95	55
3	조리, 광탄권 도로시설물 유지보수	조리, 광탄 일원	46개소	'11.1월～12월	150	60	90
4	문산, 파주, 월롱권 도로시설물 유지보수	문산, 파주, 월롱 일원	25개소	'11.1월～12월	150	80	70
5	법원, 파평, 적성권 도로시설물 유지보수	법원,파평, 적성일원	19개소	'11.1월～12월	150	45	105
6	가드레일, 반사경 유지보수	파주시 일원	가드레일 93개소 반사경 10개소	'11.1월～12월	100	73	27
7	차선도색(1지구) 유지보수	금촌, 교하, 조리, 광탄, 탄현	17개소	'11.1월～12월	100	100	0
8	차선도색(2지구) 유지보수	월롱, 파주, 문산, 법원, 파평, 적성	19개소	'11.1월～12월	100	100	0
9	교통표지판 유지보수	파주시 일원	89개소	'11.1월～12월	70	21	49
10	도로표지판 유지보수	“	113개소	'11.1월～12월	96	65	31

□ 주민불편 도로시설물 정비 추진 현황(보도, 과속방지턱, 방호벽 등)

○ 보도블록 정비추진 현황

- 금촌동 보도설치공사

∙ 위    치 : 금촌사거리 ~ 장안미래아파트

∙ 사 업 량 : 보도설치 L=168m, B=0.9m∼1.5m

∙ 사 업 비 : 41백만원

∙ 사업기간 : 2010. 6. 13 ~ 7. 30

∙ 2011. 4. 26 : 실시설계 용역 준공

∙ 2011. 6.  9 : 공사착공

∙ 2011. 7. 30 : 공사준공

○ 과속방지턱 정비추진 현황

- 개요 : 주요간선도로에 설치된 과속방지턱 중 시설기준에 적합하지 않은 방지턱을 정비

- 과속방지턱 정비현황

구 분	현황	존치	정 비
			소 계	철 거	낮 춤
총 계	736	227	509	378	131

- 2010. 10. 15. : 과속방지턱 일제조사(736개소)

- 2010. 11. 29 : 과속방지턱 정비계획 보고(내부방침)

- 2010. 12.  9 : 경찰서 협의 완료

- 2011.  3. 30 : 509개소 정비완료(철거 378, 낮춤 131)

- 2011.  5. 25 ~ 5. 31 : 존치(227개소) 과속방지턱 재조사

※ 정비대상 : 23개소(철거 10, 낮춤 2, 도색 11)

- 2011.  6.  1 ~ 6. 30 : 정비완료

○ 방호벽 정비추진 현황

- 사업개요

∙ 위    치 : 파주시 검산동 산75-2번지외 2개소

∙ 사업기간 : 2011년 1월 ~ 2011년 11월

∙ 사업내용 : 방호벽 정비 3개소(2차로형 도로낙석)

∙ 총사업비 : 2,000,000천원(도비50%, 시비50%)

- 추진사항

∙ 2011. 01. 30 : 실시설계용역 발주 및 착공

∙ 2011. 05. 31 : 관할군부대 군협의(9사단, 72사단)

⇒ 방호벽설치계획 및 조건부 이행사항(폭약, 철조망, 컨테이너 등)

- 향후 추진계획

∙ 2011. 06. 20 : 공사발주 및 착공

∙ 2011. 06. 30 : 군 협의사항 이행

∙ 2010. 11. 30 : 사업 준공

○ 맨홀 정비추진 현황

- 맨홀 현황

구 분	합 계	상수도	하수도	통 신	전 기	가 스	경 찰	육 군
수 량	24,614	2,797	14,343	3,651	1,921	354	875	673

- 그간 추진현황

∙ ‘11. 2. 7 ~ 3.18 : 정비대상 맨홀 전수조사

구 분	합 계	상수도	하수도	통 신	전 기	가 스	경 찰	기 타
수 량	535	115	244	93	33	30	6	14

∙ 2011. 2.  1 : 맨홀관리 기관에 정비계획 통보

∙ 2011. 3. 21 : 관계기관 및 부서 회의 개최

∙ 2011. 4. 20 ~ 6. 3 : 535개소 정비 완료

9-2 동절기 제설 대책 추진

확인자  도로관리사업소장  서 상 호 (인)

작성자  도로보수1팀장  한  광  우 (인)

□ 제설사업 추진관련 사업비 지출 현황

○ 동절기 제설재 구입

- 물량 : 6,388톤(소금 1,944톤, 염화칼슘 4,307톤, 친환경액상 137톤)

- 금액 : 1,380백만원

○ 동절기 제설 임차장비 용역

- 기간 : 2010.11.15 ~ 2011.3.30

- 금액 : 771백만원

○ 동절기 제설장비 구입

- 금액 : 230백만원

- 내용 : 대형살포기 4대, 배토판 4대 구입(2011.1.22)

※ 2011. 4. 11 : 겨울철 강설 대처상황 경기도 평가 최우수 선정