도시산업위원회

2011 행정사무감사자료

지 역 개 발 국

목 차 【균형발전과】
10 - 1	미군반환공여지 개발 추진현황
10 - 2	산업단지 조성 추진현황
10 - 3	민통선북방지역사업 추진현황
10 - 4	소규모 주민편익사업 추진현황
【주 택 과】
11 - 1	살기 좋은 공동주택단지 조성사업 추진 현황
11 - 2	도시 주거환경 정비사업 추진
【건 축 과】
12 - 1	건축 허가 민원 현황
12 - 2	농촌 주거환경 조성
【교통정책과】
13 - 1	대중교통 확충
13 - 2	교통안전시설 정비 및 확충 현황
13 - 3	운송사업 질서 확립 및 선진화
13 - 4	벽지노선 및 교통약자를 위한 버스 관리

목 차 【도시미관과】
14 - 1	고품격 도시경관 조성
14 - 2	밝고 쾌적한 가로환경 조성 사업추진
14 - 3	주차공간 확충 시민편익 제고
14 - 4	불법주정차 지도단속 및 과태료부과징수 현황
【차량사업소】
15 - 1	자동차등록 관리현황
15 - 2	건설기계 등록 관리현황
15 - 3	자동차 관련 체납 과태료 징수 현황

균형발전과 소관

10-1 미군반환공여지 개발 추진현황

확인자 : 균형발전과장  한 천 수 (인)

작성자 : 공여지개발팀장  안 석 훈 (인)

□ 캠프하우즈(공원 및 도시개발사업)

○ 사업개요

- 위    치 : 조리읍 봉일천리 79-173번지 일원

- 사업기간 : 2010년 ∼ 2015년

- 사업규모 : 1,083,844㎡(328천평)

※ 공원조성 641,912㎡(194천평) / 도시개발 441,932㎡(134천평)

- 사 업 비 : 1조2천9백억원

※ 근린공원-1천5백억원(국비 654, 시비 846) / 도시개발-1조1천4백억원(민자)

- 사업내용

・공 여 지 : 박물관, 실내체육관, 아트센터, 도서관, 캠핑장

・주변지역 : 아파트 3,620세대, 연립주택 580세대, 초・중학교

- 시 행 자 : 파주시, (주)티앤티공작

○ 추진실적

- 2009. 10. 27 : 사업시행자 선정(티앤티 공작)

- 2009. 10. 30 : 사업협약서 체결

- 2010.  1. 29 : 사업시행승인 신청서 제출

- 2010. 2~3월 : 관련부서 및 기관 협의

- 2011.  1. 21 : 공원부지 감정평가 의뢰(대한감정, 미래새한감정)

- 2011.  3. 11 : 주민의견 청취 공람·공고(3.11~3.25)

○ 향후계획

- 2011.  7월  : 사업시행승인 및 고시

- 2011.  9월  : 보상실시(’11. 9월 ~ ’12. 3월)

- 2012.  3월  : 실시계획인가 및 착공

- 2015. 12월  : 사업 완료

□ 캠프 게리오웬(도시개발사업)

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 선유리 430번지 일원

- 사업기간 : 2011년 ~ 2016년

- 사업규모 : 1,010,900㎡(306천평)

※ 반환지 311,744㎡(94천평)/ 주변지 699,156㎡(212천평)

- 사 업 비 : 5,500억원(발전종합계획-전액민자)

○ 추진실적

- 건설경기 침체 장기화로 사업시행자 선정 지연

○ 향후계획

- 2011.  9월  : 사업시행자 공모 공고

- 2011. 12월  : 사업시행자 선정

- 2012. 10월  : 도시개발사업 시행승인(도시개발구역지정 및 개발계획수립)

- 2013.  6월  : 실시계획인가

- 2016. 12월  : 개발사업 완료

□ 캠프 에드워드 주변지역 개발사업

○ 사업개요

- 위    치 : 월롱면 영태리 600번지 일원

- 사업기간 : 2011년 ~ 2016년

- 사업규모 : 2,152,416㎡(651천평)

- 사 업 비 : 8,000억원(발전종합계획)

○ 추진실적

- 건설경기 침체 장기화로 사업시행자 선정 지연

○ 향후계획

- 2011.  9월 : 사업시행자 공모 공고

- 2011. 12월 : 사업시행자 선정

- 2012. 10월 : 도시개발사업 시행승인(도시개발구역지정 및 개발계획수립)

- 2013.  6월 : 실시계획인가

- 2016. 12월 : 개발사업 완료

□ 이화여대 등 개발

【 이화여자대학교(캠프 에드워드)】

○ 사업개요

- 위    치 : 월롱면 영태리 563-5번지 일원

※ 캠프 에드워드(Camp Edwards) 및 주변지역

- 부지면적 : 299,418㎡(91천평)

- 주요시설 : 캠퍼스, 국제연구센터, 이화글로벌평화센터 등

- 사업기간 : 2008년 ～ 2019년

○ 추진실적

- 2007.  5.  7 : 도시관리계획(연구시설)결정·고시

- 2008.  3. 25 : 사업시행승인 신청 및 사업시행승인(1·2단계)

- 2008.  7. 17 : 사업시행승인(3단계 : 연구시설→학교시설)

- 2010.  2. 25 : 공여지 감정평가 완료(한국감정원 외 2개 기관)

- 2010.  5. 31 : 사업시행(변경)승인 신청 / 850천㎡→299천㎡(감551천㎡)

- 2010.  8. 16 : 사업시행(변경) 승인 고시

- 2010. 10. 28 ∼ 12. 13 : 공여지 토지매수 협의(국방부 수용불가)

- 2011.  2. 14 ∼  3. 21 : 경기도 주관 이화여대 유치관련 대책회의(5회)

○ 향후계획

- 2011.  7월  : 토지협의매수 완료

- 2011.  9월  : 실시계획인가 및 고시

- 2011. 10월  : 건축허가

- 2011. 11월  : 공사착공

- 2019. 12월  : 사업준공

【○○대학교(캠프 스텐톤)】

○ 사업개요

- 위    치 : 광탄면 신산리 303번지 일원

※ 캠프 스텐톤(Camp Stanton) 및 주변지역

- 부지면적 : 975,467㎡(295천평)

※ 반환지 236,137㎡(71천평) / 주변지 739,330㎡(223천평)

- 주요시설 : 캠퍼스, 교육연구시설 등

- 사업기간 : 2011년 ～ 2016년

○ 추진실적

- 2008.  1. 15 : 양해각서 체결

- 2008.  3. 12 : 개발행위허가 제한고시(파주시)

- 2008.  6. 30 : 건축허가제한 공고(경기도)

- 2009.  2.  2 : 발전종합계획(2단계) 확정(행정안전부)

- 2010.  2. 17 : 사업취소 통보(국민대→파주시)

- 2010.  5. 26 : 건축허가제한 기간연장(2011. 3.11 까지)

- 2011.  3. 12 : 개발행위허가 및 건축허가 제한 해제

○ 향후계획

- 2011.  9월 : 사업시행자 공모 공고

- 2011. 12월 : 사업시행자 선정

- 2012. 10월 : 사업시행 승인

- 2013.  6월 : 실시계획인가

- 2016. 12월 : 사업완료

【○○대학교(캠프 자이언트)】

○ 사업개요

- 위    치 : 문산읍 선유리 산18-1번지 일원

※ 캠프 자이언트(Camp Giant) 및 주변지역

- 부지면적 : 205,983㎡(62천평)

※ 반환지 111,159㎡(33천평) / 주변지 94,824㎡(29천평)

- 주요시설 : 캠퍼스, 교육연구시설 등

- 사업기간 : 2011년 ～ 2016년

○ 추진실적

- 2007.  2. 27 : 양해각서(MOU) 체결

- 2007. 11.  5 : 개발행위허가의 제한 및 지형도면고시

- 2008.  1. 15 : 1단계 발전종합계획 확정(행정안전부)

- 2008. 10. 10 : 사업취소 통보(서강대→파주시)

- 2010.  2.  5 : 개발행위제한 해제

- 2010.  2.  9 : 건축허가제한 해제

○ 향후계획

- 2011.  9월 : 사업시행자 공모 공고

- 2011. 12월 : 사업시행자 선정

- 2012. 10월 : 사업시행 승인

- 2013.  6월 : 실시계획인가

- 2016. 12월 : 사업완료

□ 미군공여지 관련 집단민원 발생 건수 및 내용 : 해당없음

10-2 산업단지 조성 추진현황

확인자 : 균형발전과장  한 천 수 (인)

작성자 : 산업단지팀장  신 정 하 (인)

□ 출판문화정보 국가산업단지(2단계)

○ 사업개요

- 위    치 : 교하읍 신촌리, 문발리 일원

- 면    적 : 687,203㎡(208천평)

- 사업기간 : 2004년 ～ 2012년(현 공정율 62%)

- 사 업 비 : 167,200백만원

- 시 행 자 : 한국토지주택공사(LH)

○ 추진실적

- 2008.  2. 11 : 개발계획(변경) 승인

- 2009.  1.  2 : 2단계 실시계획 승인

- 2009.  5. 27 : 공사착공

○ 향후계획

- 2012. 12월 : 사업 준공인가(업체수 : 120개 기업)

□ 신촌 일반산업단지

○ 사업개요

- 위    치 : 교하읍 신촌리 일원

- 면    적 : 189,796㎡(57천평)

- 사업기간 : 2007년 ～ 2010년

- 사 업 비 : 82,000백만원

- 시 행 자 : 파주자유로산업단지 사업협동조합(조합장 : 헬스원 대표이사 한상근)

○ 추진실적

- 2007. 10.  1 : 산업단지 지정

- 2008. 12.  4 : 실시계획 승인

- 2009.  4. 13 : 공사착공

- 2010.  8. 11 : 사업 준공(업체수 : 47개 기업)

□ 법원 일반산업단지

○ 사업개요

- 위    치 : 법원읍 대능리 일원

- 면    적 : 695,280㎡(210천평)

※ 1지구 345,280㎡(104천평), 2지구 350,000㎡〕(106천평)

- 사업기간 : 2008년 ～ 2013년

- 사 업 비 : 256,700백만원

- 시 행 자 : 파주시

○ 추진실적

- 2009. 6. 29 : 산업단지계획 승인신청(1,2지구)

- 2010. 3. 19 : 산업단지계획 승인(1,2지구)

○ 향후계획

- 2012.  6월 : 공사착공

- 2013. 12월 : 사업 준공인가(업체수 : 89개 기업)

□ 적성 일반산업단지

○ 사업개요

- 위    치 : 적성면 가월리 일원

- 면    적 : 466,500㎡(141천평)

- 사업기간 : 2009년 ～ 2013년

- 사 업 비 : 58,800백만원

- 시 행 자 : (주) KBIZ 파주산단

○ 추진실적

- 2010.  1. 13 : 사업시행 양해각서 체결(파주시↔중소기업중앙회)

- 2011.  2. 14 : 군 협의(변경) 완료(25사단)

- 2011.  3. 15 : 투자 및 사업설명회 개최

- 2011.  5. 24 : 산업단지계획 승인 신청

- 2011.  6. 10 : 합동설명회 개최(열・공람 6.2 ~ 7. 1)

○ 향후계획

- 2011. 11월 : 산업단지계획 승인

- 2011. 12월 : 공사착공

- 2013.  6월 : 사업 준공인가(업체수 : 67개 기업)

10-3 민통선북방지역사업 추진현황

확인자  균형발전과장  한 천 수 (인)

작성자  균형개발팀장  피 영 일 (인)

□ 접경지역 및 민통선북방지역 지원사업

○ 지원사업 내역

- 사업대상

∙ 접경지역 : 법원읍, 파주읍, 적성면, 파평면, 장단출장소

∙ 민북지역 : 탄현면 일부(낙하리등 6개리), 군내면, 진동면, 진서면, 장단면

- 사업내용 : 생활환경 개선․생산기반 시설정비․문화․복지․체육시설 확충

○ 접경지역 지원사업 연도별 예산 내역

(단위 : 백만원)

연 도	사업건수	예 산 액			비 고
		계	국 비	도 비
계	49	10,895	7,626	3,269
2011	30	5,212	3,648	1,564
2010	19	5,683	3,978	1,705

○ 민통선북방지역 지원사업 연도별 예산 내역

(단위 : 백만원)

연 도	사업건수	예 산 액			비 고
		계	도 비	시 비
계	7	860	430	430
2011	1	160	80	80
2010	6	700	350	350

○ 접경지역사업 지원 내역(2011)

읍 면	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)			비 고 (추진부서)
			계	국비	도비
합 계	30개소		5,212	3,648	1,564
소 계	5개소		1,475	1,033	442
법원읍	대능리 농로포장	L=450m	200	140	60	법원읍
	삼방리 농로포장	L=280m	140	98	42	“
	대능리 보도정비	L=600m	490	343	147	“
	간판이 아름다운거리조성	간판110개	401	281	120	“
	갈곡리 마을회관신축	A=184㎡	244	171	73	“
소 계	7개소		1,184	829	355
파주읍	백석1리 배수로정비	L=250m	230	161	69	파주읍
	봉암리 농로포장	L=1,100m	120	84	36	“
	백석4리 배수로정비	L=250m	120	84	36	“
	봉서2리 배수로정비	L=600m	146	102	44	“
	부곡2리 마을회관신축	A=170㎡	244	171	73	“
	봉암4리 마을회관신축	A=200㎡	244	171	73	“
	봉암2리 마을회관 리모델링	A=277㎡	80	56	24	“
소 계	5개소		880	617	263
적성면	가월∼주월간 농로재포장	L=1,085m	70	49	21	적성면
	적성게이트볼장 인조잔디설치	A=374㎡	35	25	10	“
	적성동보119센터 증축 및 리모델링	A=109㎡	90	63	27	“
	마지리 간판사업	간판120개	441	309	132	“
	장현1리 마을회관신축	A=200㎡	244	171	73	“

○ 접경지역사업 지원 내역(2011)

읍 면	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)			비 고 (추진부서)
			계	국비	도비
소 계	7개소		811	568	243
파평면	장파1리 배수로정비	L=73m	150	105	45	파평면
	늘노리 배수로정비	L=246m	110	77	33	“
	율곡4리 인도설치	L=472m	150	105	45	“
	덕천리 도로확포장	L=156m	150	105	45	“
	늘노리 족구장정비	A=374㎡	60	42	18	“
	덕천리 실내게이트볼장신축	A=309㎡	120	84	36	“
	율곡리 광고물정비	간판21개소	71	50	21	“
소 계	6개소		862	601	261
장 단 출장소	백연리 배수로정비	L=382m	250	175	75	장단출장소
	정자리 석축설치	L=304m	200	140	60	“
	거곡리 중앙배수로 석축설치	L=300m	200	140	60	“
	하포리 농로포장	L=1,000m	100	70	30	“
	백연리 마을회관 리모델링	A=365㎡	60	41	19	“
	백연리 복지회관방수	A=312㎡	52	35	17	“

○ 접경지역사업 지원 내역(2010)

읍 면	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)			비 고 (추진부서)
			계	국비	도비
합 계	19개소		5,683	3,978	1,705
소 계	2개소		631	442	189
법원읍	법원리 간판정비	간판450개	498	349	149	법원읍
	동문리 농로포장	L=320m	133	93	40	“
소 계	6개소		2,073	1,453	620
파주읍	파주리 보도설치	L=650m	245	172	73	파주읍
	파주리 농로포장	L=1,700m	367	257	110	“
	향양1리 세천정비	L=400m	225	158	67	“
	연풍2리 배수로 및 농로포장	L=300m	138	97	41	“
	통일공원 테니스장 리모델링	리모델링1식	790	553	237	문화체육과
	연풍체육공원 리모델링	리모델링1식	308	216	92	“
소 계	3개소		517	362	155
적성면	객현2리 마을회관 신축	A=264㎡	264	185	79	적성면
	적성체육공원 공중화장실 신축	A=80㎡	183	128	55	“
	적성체육공원 급수시설정비	음수대 2	70	49	21	“
소 계	3개소		978	685	293
파평면	장파리 인도설치	L=200m	115	81	34	파평면
	파평초등학교 진입로 인도설치	L=184m	299	209	90	“
	파평체육공원 리모델링	A=7,140㎡	564	395	169	문화체육과
소 계	5개소		1,484	1,036	448
장 단 출장소	백연리 농산물직판장 캐노피설치	캐노피1식	99	68	31	장단출장소
	백연리(공덕지구)배수로설치	L=450m	295	206	89	“
	서곡리 석축설치 및 농로포장	L=250m	86	59	27	“
	동파리 마을회관 지붕개량	A=264㎡	49	34	15	균형발전과
	지방도372호선 도로포장	L=1,024m	955	669	286	“

○ 민통선북방지역사업 지원 내역(2011)

읍 면	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)			비 고 (추진부서)
			계	도비	시비
합 계	1개소		160	80	80
장단출장소	조산리 농로포장	L=700m	160	80	80	장단출장소

○ 민통선북방지역사업 지원 내역(2010)

읍 면	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)			비 고 (추진부서)
			계	도비	시비
합 계	6개소		700	350	350
장단 출장소	조산리 농로 및 배수로정비	L=790m	148	74	74	장단출장소
	정자리 석축설치	L=210m	98	49	49	“
	조산리 국기계양대 보수	시설보수 1식	8	4	4	“
	조산리 농로포장	L=160m	14	7	7	“
	해마루촌 환경정비	환경개선 1식	100	50	50	균형발전과
	해마루촌 석축재시공	L=680m	332	166	166	“

□ 소규모 주민숙원 사업

○ 지원사업 내역

- 사업대상 : 소규모 주민숙원사업 및 시급한 현안사업

- 사업내역 : 소규모포괄사업, 마을회관정비 등

○ 소규모 주민편익사업 연도별 예산 내역

(단위 : 백만원)

연 도	사업건수	예 산 액			비 고
		계	도 비	시 비
계	75	2,279		2,279
2011	24	660		660
2010	51	1,619		1,619

○ 소규모 주민편익사업 지원 내역(2011)

읍 면	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고 (추진부서)
합 계	24개소		660
소 계	1개소		20
교하읍	문발리 하수도정비	L=40m	20	교하읍
소 계	1개소		45
문산읍	선유3리 마을회관 리모델링	A=93.58㎡	45	문산읍
소 계	2개소		50
조리읍	오산1리 마을안길정비	A=1,505㎡	20	조리읍
	조리읍 관내 마을안길정비	A=1,581㎡	30
소 계	2개소		70
광탄면	창만1리 마을회관 리모델링	A=262.32㎡	55	광탄면
	용미4리 마을회관 방수	A=282.32㎡	15	“
소 계	3개소		103
탄현면	통일동산(중앙공원) 둘레길조성	L=4.2㎞	40	탄현면
	유승앙부와즈2단지 경로당환경개선	A=161㎡	15	“
	출판단지 경관녹지정비	A=2,855㎡	48	공원과
소 계	1개소		50
적성면	적성향교 주차장 및 진입도로포장	A=815㎡	50	적성면
소 계	1개소		60
파평면	파평면 야구장 조성	A=10,000㎡	60	문화체육과
소 계	9개소		185
금촌1동	금신초교 주차장포장	A=666㎡	20	금촌1동
	모범운전자회사무실 수도설치 및 건물보수	수도시설1식	2	교통정책과
	야동8통 하수도정비	L=70m	42	균형발전과
	검산11통 배수로보강	L=80m	10	“
	맥금12통 부락진입로정비	L=24m	24	“
	맥금12통 농로정비	L=20m	15	“
	금촌16통 마을안길정비	L=50m	18	“
	금촌16통 마을안길법면보강	L=35m	14	“
	맥금14통 용수로정비	L=400m	40	“
소 계	2개소		33
금촌2동	파주스타디움내 다목적교육장설치	A=97㎡	19	문화체육과
	택시종사자 휴게공간 시설물설치	A=10㎡	14	교통정책과
소 계	2개소		44
장 단 출장소	통일대교 남문 상황실 보수	A=66㎡	4	장단출장소
	국도1호선 도로보수	L=115m	40	“

○ 소규모 주민편익사업 지원 내역(2010)

읍 면	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고 (추진부서)
합 계	51개소		1,619
소 계	8개소		311
교하읍	연다산리 하수도 정비	L=95m	29	교하읍
	신촌리 마을안길 정비	L=150m	19	“
	교하체육공원 시설보강	락카룸 1개소	18	“
	동패리 하수도 정비	L=100m	40	“
	야당5리 경로당 보수	보수 1식	10	“
	구 교하소방파출소 리모델링	리모델링 1식	89	“
	주말농장 원두막 및 화장실설치	원두막, 화장실 각2개	19	농업진흥과
	심학산 약천사 약수터 정비	약수터 1식	87	공원과
소 계	4개소		110
문산읍	마정2리 하수도 정비	L=200m	30	문산읍
	운천파출소 정비	A=149㎡	15	“
	운천2리 마을회관 화장실개선	A=4.8㎡	20	“
	운천4리 마을회관 리모델링	A=200㎡	45	“
소 계	5개소		246
조리읍	공릉저수지주변 산책로조성	편책 A=150㎡	30	조리읍
	공공디자인시범지역 보도설치	L=270m	77	“
	동문그린시티APT체육공원설치	A=648㎡	45	“
	봉일천1,6,7리 통합마을회관정비	1식	49	“
	등원1리 마을회관 리모델링	A=190㎡	45	“
소 계	2개소		48
법원읍	동문2리 하수도 정비	L=180m	34	법원읍
	가야리 농로포장	L=150m	14	“
소 계	1개소		21
파주읍	연풍리 공동화장실 보수	A=40㎡	21	파주읍
소 계	5개소		215
광탄면	신산리 간판개선사업(1지구)	간판 30개	30	광탄면
	신산리 간판개선사업(2지구)	간판 79개	60	“
	신산리 푸른공원 조성	꽃밭조성 A=8,083㎡	30	“
	신산초교 운동장 육상트랙설치	L=400m	50	“
	마장3리 마을회관 리모델링	A=193㎡	45	“

○ 소규모 주민편익사업 지원 내역(2010)

읍 면	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고 (추진부서)
소 계	1개소		41
탄현면	오금2리 마을안길포장공사	L=580m	41	탄현면
소 계	7개소		110
월롱면	영태2리 농로확․포장공사	L=40m	14	월롱면
	덕은4리 마을안길 소교량 정비	L=6m	19	“
	덕은2리 농로숭상공사	L=120m	18	“
	영태6리 마을안길숭상공사	L=50m	10	“
	정자이전 설치	정자1식	2	“
	방범용CCTV월롱관제센터이전	CCTV 35대	7	총무과
	덕은1리 참살기 좋은마을 가꾸기	A=2,040㎡(연못조성)	40	균형발전과
소 계	1개소		44
적성면	농로사리부설(구읍2-객현1)	L=1,815m	44	적성면
소 계	1개소		35
파평면	파평복지회관 주변정비	포장 A=300㎡	35	회계과
소 계	4개소		107
장 단 출장소	정자리 농로포장공사	L=500m	40	장단출장소
	동파리마을상수도 누수보수및밸브설치	밸브 7개	10	“
	도라산역 근무초소 전기시설	전기시설 1식	6	문화체육과
	민북지역 미불용지 보상금	5필지(A=2,283㎡)	51	균형발전과
소 계	12개소		331
금촌1동	맥금12통 하수도 정비	L=45m	49	금촌1동
	검산10통 하수도 정비	L=40m	17	“
	맥금13통 하수도 정비	A=95m	44	“
	금촌체육공원 관리사무소 신축	A=60㎡	30	문화체육과
	아동1통 도로 법면보강	L=40m	20	금촌1동
	아동1통 마을안길포장	L=100m	14	“
	아동1통 진입로 재포장	L=200m	29	“
	야동8통 마을안길포장	L=80m	19	“
	검산9통 마을안길포장	L=130m	15	“
	맥금12통 전원마을 진입로포장	L=400m	14	“
	금촌16통 마을안길 및 하수도	L=100m	35	“
	야동7통 마을회관 리모델링	A=105㎡	45	“

10-4 소규모 주민편익사업 추진현황

확인자  균형발전과장  한 천 수 (인)

작성자  균형개발팀장  피 영 일 (인)

○ 읍ㆍ면ㆍ동별 마을회관 운영현황

연번	마을명		준공연도	연간활용일수	단독 또는 겸용	겸용용도
계	234개 마을
1	교하읍	하지석리	2002	365일	겸용	경로당
2	교하읍	상지석1리	1994	365일	겸용	경로당
3	교하읍	상지석2리	1985	365일	겸용	경로당
4	교하읍	상지석4리	1994	365일	겸용	경로당
5	교하읍	당하1리	1971	365일	겸용	경로당
6	교하읍	와동1리	2007	365일	겸용	경로당
7	교하읍	야당3리	1998	365일	겸용	경로당
8	교하읍	야당4리	2002	365일	겸용	경로당
9	교하읍	야당5리	1987	365일	겸용	경로당
10	교하읍	동패1리	2000	365일	겸용	경로당
11	교하읍	동패2리	2004	365일	겸용	경로당
12	교하읍	동패3리	2003	365일	겸용	경로당
13	교하읍	동패4리	2003	365일	겸용	경로당
14	교하읍	산남리	2005	365일	겸용	경로당
15	교하읍	문발1리	2003	365일	겸용	경로당
16	교하읍	신촌리	1990	365일	겸용	경로당
17	교하읍	송촌리	2000	365일	겸용	경로당
18	교하읍	연다산1리	2001	365일	겸용	경로당
19	교하읍	연다산2리	2009	365일	겸용	경로당
20	교하읍	오도1리	1963	365일	겸용	경로당

연번	마을명		준공연도	연간활용일수	단독 또는 겸용	겸용용도
21	교하읍	오도2리	1998	365일	겸용	경로당
22	교하읍	다율1리	-	365일	겸용	경로당
23	교하읍	다율2리	1994	365일	겸용	경로당
24	법원읍	법원1,5,6리	2007	365일	단독	해당없음
25	법원읍	법원2리	1994	365일	단독	해당없음
26	법원읍	법원3리	2005	365일	단독	해당없음
27	법원읍	갈곡리	1991	365일	단독	해당없음
28	법원읍	오현2리	1980	365일	단독	해당없음
29	법원읍	직천2리	1994	365일	단독	해당없음
30	법원읍	금곡1리	2006	365일	단독	해당없음
31	법원읍	금곡2리	2008	365일	단독	해당없음
32	법원읍	웅담1리	2007	365일	단독	해당없음
33	법원읍	웅담2리	1996	365일	단독	해당없음
34	법원읍	웅담3리	2004	365일	단독	해당없음
35	법원읍	동문1리	1988	365일	단독	해당없음
36	법원읍	동문2리	1993	365일	겸용	임대(주택)
37	법원읍	가야2리	1988	365일	단독	해당없음
38	법원읍	가야3리	2005	365일	단독	해당없음
39	법원읍	대능1리	1979	365일	단독	해당없음
40	법원읍	대능2,4,5,6리	2004	365일	단독	해당없음
41	법원읍	대능3리	1989	365일	단독	해당없음
42	법원읍	삼방리	1998	365일	단독	해당없음
43	문산읍	문산1리	1979	365일	단독	해당없음
44	문산읍	문산2리	2004	365일	겸용	경로당
45	문산읍	문산3리	2002	365일	겸용	경로당
46	문산읍	선유1리	1978	365일	겸용	경로당
47	문산읍	선유2리	1975	365일	단독	해당없음
48	문산읍	선유3리	2002	365일	겸용	경로당

연번	마을명		준공연도	연간활용일수	단독 또는 겸용	겸용용도
49	문산읍	선유4리	1983	365일	단독	해당없음
50	문산읍	선유5리	1978	365일	단독	해당없음
51	문산읍	선유6리	1978	365일	겸용	경로당
52	문산읍	이천1리	1995	365일	단독	해당없음
53	문산읍	이천2리	2004	365일	단독	해당없음
54	문산읍	이천3리	1978	365일	단독	해당없음
55	문산읍	당동1리	2010	365일	겸용	임대(주택)
56	문산읍	당동2리	2006	365일	겸용	경로당
57	문산읍	사목1리	1993	365일	겸용	경로당
58	문산읍	사목2리	1987	365일	겸용	경로당
59	문산읍	사목3리	2010	365일	단독	해당없음
60	문산읍	마정1리	1992	365일	겸용	경로당
61	문산읍	마정2리	-	365일	단독	해당없음
62	문산읍	마정4리	2002	365일	겸용	경로당
63	문산읍	장산1리	1997	365일	겸용	경로당
64	문산읍	장산2리	2006	365일	겸용	경로당
65	문산읍	운천1리	1997	365일	겸용	경로당
66	문산읍	운천2리	1994	365일	겸용	경로당
67	문산읍	운천3리	1997	365일	겸용	경로당
68	문산읍	운천4리	2004	365일	단독	해당없음
69	문산읍	임진리	2000	365일	겸용	경로당
70	문산읍	내포1리	2001	365일	겸용	경로당
71	문산읍	내포2리	2001	365일	겸용	경로당
72	문산읍	내포3리	1999	365일	단독	해당없음
73	문산읍	내포4리	2000	365일	단독	해당없음
74	조리읍	대원1리	1985	365일	겸용	임대(공장)
75	조리읍	대원1리	2004	365일	단독	해당없음
76	조리읍	대원2리	2006	365일	단독	해당없음

연번	마을명		준공연도	연간활용일수	단독 또는 겸용	겸용용도
77	조리읍	봉일천2리	1994	365일	겸용	경로당,임대
78	조리읍	봉일천4리	1985	365일	겸용	임대(주택)
79	조리읍	봉일천4리	1987	365일	겸용	임대(점포)
80	조리읍	봉일천5리	1995	365일	단독	해당없음
81	조리읍	봉일천6리	1985	365일	단독	해당없음
82	조리읍	뇌조1리	2005	365일	단독	해당없음
83	조리읍	뇌조2리	2001	365일	단독	해당없음
84	조리읍	뇌조3리	1996	365일	단독	해당없음
85	조리읍	오산1리	1992	365일	단독	해당없음
86	조리읍	오산2리	2010	365일	단독	해당없음
87	조리읍	장곡1리	2006	365일	단독	해당없음
88	조리읍	장곡2리	2006	365일	겸용	경로당
89	조리읍	장곡3리	1989	365일	단독	해당없음
90	조리읍	등원1리	1998	365일	단독	해당없음
91	조리읍	능안리	1996	365일	단독	해당없음
92	파주읍	파주2리	2006	365일	단독	해당없음
93	파주읍	파주3리	1992	365일	단독	해당없음
94	파주읍	파주4리	1975	365일	단독	해당없음
95	파주읍	파주5리	1998	365일	단독	해당없음
96	파주읍	연풍1리	1984	365일	단독	해당없음
97	파주읍	연풍2리	1997	365일	단독	해당없음
98	파주읍	연풍4리	2002	365일	단독	해당없음
99	파주읍	부곡1리	1998	365일	단독	해당없음
100	파주읍	부곡2리	1983	365일	단독	해당없음
101	파주읍	부곡3리	1985	365일	단독	해당없음
102	파주읍	백석1리	1995	365일	단독	해당없음
103	파주읍	백석4리	2003	365일	단독	해당없음
104	파주읍	봉암1리	2004	365일	단독	해당없음

연번	마을명		준공연도	연간활용일수	단독 또는 겸용	겸용용도
105	파주읍	봉암2리	1998	365일	단독	해당없음
106	파주읍	봉암3리	1978	365일	단독	해당없음
107	파주읍	봉암4리	1975	-	단독	해당없음
108	파주읍	봉서1리	1993	365일	단독	해당없음
109	파주읍	봉서3리	2005	365일	단독	해당없음
110	파주읍	향양1리	2004	365일	단독	해당없음
111	파주읍	향양2리	1990	365일	단독	해당없음
112	파주읍	향양3리	2008	365일	단독	해당없음
113	탄현면	축현2리	1976	365일	단독	해당없음
114	탄현면	축현3리	1976	365일	단독	해당없음
115	탄현면	금승리	1987	365일	단독	해당없음
116	탄현면	낙하리	2003	365일	단독	해당없음
117	탄현면	오금1리	1974	365일	단독	해당없음
118	탄현면	오금2리	1975	365일	단독	해당없음
119	탄현면	문지리	1974	365일	겸용	임대(편의점)
120	탄현면	금산1리	1983	365일	단독	해당없음
121	탄현면	만우리	1979	365일	단독	해당없음
122	탄현면	대동리	2008	365일	겸용	임대(편의점)
123	탄현면	성동리	2001	365일	겸용	임대(편의점)
124	탄현면	법흥1리	1997	365일	단독	해당없음
125	탄현면	법흥2리	2003	365일	단독	해당없음
126	탄현면	갈현3리	2001	365일	단독	해당없음
127	탄현면	법흥3리	2008	365일	단독	해당없음
128	광탄면	용미1리	1992	365일	단독	해당없음
129	광탄면	용미2리	1997	365일	단독	해당없음
130	광탄면	용미4리	1997	365일	단독	해당없음
131	광탄면	분수1리	1992	365일	단독	해당없음
132	광탄면	분수2리	2009	365일	단독	해당없음

연번	마을명		준공연도	연간활용일수	단독 또는 겸용	겸용용도
133	광탄면	분수3리	1993	365일	단독	해당없음
134	광탄면	신산1리	1997	365일	단독	해당없음
135	광탄면	신산3리	1978	365일	단독	해당없음
136	광탄면	신산4리	2002	365일	단독	해당없음
137	광탄면	신산5리	1993	365일	단독	해당없음
138	광탄면	창만1리	1989	365일	단독	해당없음
139	광탄면	창만2리	1972	365일	단독	해당없음
140	광탄면	창만3리	1972	365일	단독	해당없음
141	광탄면	창만4리	2006	365일	단독	해당없음
142	광탄면	창만5리	1990	365일	단독	해당없음
143	광탄면	마장1리	1998	365일	단독	해당없음
144	광탄면	마장2리	1980	365일	단독	해당없음
145	광탄면	마장3리	1991	365일	단독	해당없음
146	광탄면	마장4리	1996	365일	단독	해당없음
147	광탄면	기산리	2007	365일	단독	해당없음
148	광탄면	영장1리	2007	365일	단독	해당없음
149	광탄면	영장2리	1989	365일	단독	해당없음
150	광탄면	영장2리	2008	365일	단독	해당없음
151	광탄면	영장3리	1989	365일	단독	해당없음
152	광탄면	발랑2리	1974	365일	단독	해당없음
153	광탄면	발랑3리	1974	365일	단독	해당없음
154	광탄면	방측1리	1997	365일	단독	해당없음
155	광탄면	방축2리	1995	365일	단독	해당없음
156	광탄면	방축3리	1982	365일	단독	해당없음
157	월롱면	능산1리	1998	365일	단독	해당없음
158	월롱면	능산2리	2002	365일	단독	해당없음
159	월롱면	덕은1리	1974	365일	단독	해당없음
160	월롱면	덕은1리	2006	365일	단독	해당없음

연번	마을명		준공연도	연간활용일수	단독 또는 겸용	겸용용도
161	월롱면	덕은2리	2004	365일	단독	해당없음
162	월롱면	덕은3리	2005	365일	단독	해당없음
163	월롱면	덕은4리	2010	365일	단독	해당없음
164	월롱면	덕은5리	2004	365일	단독	해당없음
165	월롱면	도내1리	2006	365일	단독	해당없음
166	월롱면	도내3리	1997	365일	단독	해당없음
167	월롱면	영태1리	1996	365일	단독	해당없음
168	월롱면	영태3리	2001	365일	단독	해당없음
169	월롱면	영태4리	1995	365일	단독	해당없음
170	월롱면	영태5리	1995	365일	단독	해당없음
171	월롱면	영태6리	2009	365일	단독	해당없음
172	월롱면	위전1리	1979	365일	단독	해당없음
173	월롱면	위전2리	1993	365일	단독	해당없음
174	월롱면	위전3리	2005	365일	단독	해당없음
175	월롱면	위전4리	1994	365일	단독	해당없음
176	파평면	두포2리	2004	365일	단독	해당없음
177	파평면	두포3리	1987	365일	단독	해당없음
178	파평면	율곡1리	1988	365일	단독	해당없음
179	파평면	율곡3리	1995	365일	단독	해당없음
180	파평면	율곡4리	2006	365일	단독	해당없음
181	파평면	마산1리	1997	365일	단독	해당없음
182	파평면	마산2리	1994	365일	단독	해당없음
183	파평면	금파1리	1993	365일	단독	해당없음
184	파평면	금파2리	2003	365일	단독	해당없음
185	파평면	늘노리	2005	365일	단독	해당없음
186	파평면	덕천리	1991	365일	단독	해당없음
187	파평면	장파1리	2003	365일	단독	해당없음
188	파평면	장파2리	2003	365일	단독	해당없음

연번	마을명		준공연도	연간활용일수	단독 또는 겸용	겸용용도
189	적성면	마지1리	2007	365일	단독	해당없음
190	적성면	식현1리	2007	365일	단독	해당없음
191	적성면	식현1리	1984	365일	단독	해당없음
192	적성면	식현2리	1984	365일	단독	해당없음
193	적성면	식현2리	1987	365일	단독	해당없음
194	적성면	설마리	2006	365일	단독	해당없음
195	적성면	적암리	1986	365일	단독	해당없음
196	적성면	어유지1리	1975	365일	단독	해당없음
197	적성면	어유지2리	2007	365일	단독	해당없음
198	적성면	장현1리	1986	365일	단독	해당없음
199	적성면	장현2리	1986	365일	단독	해당없음
200	적성면	율포리	1992	365일	단독	해당없음
201	적성면	객현1리	1997	365일	단독	해당없음
202	적성면	객현2리	1979	365일	단독	해당없음
203	적성면	구읍1리	1990	365일	단독	해당없음
204	적성면	구읍2리	2007	365일	단독	해당없음
205	적성면	구읍3리	1996	365일	단독	해당없음
206	적성면	가월리	2007	365일	단독	해당없음
207	적성면	주월리	2007	365일	단독	해당없음
208	적성면	두지리	1985	365일	단독	해당없음
209	적성면	자장리	2004	365일	단독	해당없음
210	적성면	장현리	2009	365일	단독	해당없음
211	군내면	백연리	1987	365일	겸용	경로당
212	군내면	조산리	1998	365일	겸용	경로당
213	진동면	동파리	2002	365일	겸용	경로당
214	금촌1동	아동1통	1987	365일	단독	해당없음
215	금촌1동	아동2통	1990	365일	단독	해당없음
216	금촌1동	아동3통	1990	365일	단독	해당없음

연번	마을명		준공연도	연간활용일수	단독 또는 겸용	겸용용도
217	금촌1동	아동4통	1985	365일	단독	해당없음
218	금촌1동	아동6통	1988	365일	단독	해당없음
219	금촌1동	야동7통	1978	365일	단독	해당없음
220	금촌1동	야동7통	1994	365일	단독	해당없음
221	금촌1동	야동8통	1986	365일	단독	해당없음
222	금촌1동	검산9통	1989	365일	단독	해당없음
223	금촌1동	검산10통	1989	365일	단독	해당없음
224	금촌1동	검산11통	1985	365일	단독	해당없음
225	금촌1동	맥금12통	1976	365일	단독	해당없음
226	금촌1동	맥금12통	1992	365일	단독	해당없음
227	금촌1동	맥금13통	1993	365일	단독	해당없음
228	금촌1동	맥금14통	1985	365일	단독	해당없음
229	금촌1동	금촌15통	1983	365일	단독	해당없음
230	금촌1동	금촌16통	1985	365일	단독	해당없음
231	금촌1동	금촌17통	1989	365일	단독	해당없음
232	금촌2동	3통(금촌)	1989	365일	단독	해당없음
233	금촌2동	5통(금촌)	1977	365일	단독	해당없음
234	금촌2동	6통(금촌)	1992	365일	단독	해당없음

주택과 소관

11-1 살기 좋은 공동주택단지 조성사업 추진 현황

확인자  주 택 과 장  송 종 완 (인)

작성자  공동주택관리팀장  김 원 전 (인)

□ 살기좋은 아파트 마을 만들기 평가 추진 실적

○ 2010년 평가추진

- 참가대상 및 포상내역

․ 사용검사 후 입주민이 95% 이상 입주된 100세대 이상 공동주택으로 그룹별 신청

규모	참가대상		세대수 구분	반기별 사업비 지원기준			비고
	단지	세대		표창등급	표창단지수	사업비(만원)
4 그룹	148	52,092	4	4	6	4,900
특대규모 그룹	18	24,764	1,000세대이상	우수	1	1,200	반기별 년간 총 2회 우수단지 지원
대 규 모 그룹	31	16,209	300～1,000	우수	2	900
중 규 모 그룹	43	8,126	100～300	우수	2	700
소 규 모 그룹	56	2,993	100세대미만	우수	1	500

- 선정절차

․ 시민단체 및 공동주택 전문가와 외부단체 등으로 구성된 평가위원의 평가 후 선정

평가위원별 평가내용		선정절차	비고 (항목별 낙제점수)
시민단체(5인) 등 주택관련 전문가(3인)		우수
▪평가표에 의한 서류평가 (129점)	▪시설물관리상태 육안평가 (71점) -청결: 조경,재활용 40점 -질서: 주차장관리 13점 -안전: 교통시설관리 10점 놀이터관리 8점	▪그룹별 격월(1,3,5,7,9,11월) 평가하여 점수합산 후 반기별 시상	▪청결:배점합계70%미달 ▪질서:배점합계70%미달 ▪안전:배점합계70%미달

- 참가 단지 : 27개 단지/ 13,314세대

- 우수 단지

․상반기 : 장안밀레니엄아파트, 장안미우아파트, 금촌주공아파트, 봉일천성원아파트, 그린시티동문아파트

․하반기 : 사업일몰로 인하여 미추진

□ 공동주택 시설물 관리 보조금 지원 추진 실적

○ 2010년도 보조금 지원현황

일련 번호	선정내역	단지명	소재지	보조금 (단위:만원)	비 고
계				4,400
1	상반기 특대규모 우수	그린시티동문아파트	조리읍 대원리 218	1,200
2	상반기 대규모 우수	금촌주공아파트	금촌동 922	900
3	상반기 대규모 우수	봉일천성원아파트	조리읍 봉일천리 156-1	900
4	상반기 중규모 우수	장안밀레니엄아파트	금촌동 792-1	700
5	상반기 중규모 우수	장안미우아파트	아동동 339	700

11-2 도시 주거환경 정비사업 추진

확인자  주 택 과 장  송 종 완 (인)

작성자  주거정비팀장  박 진 춘 (인)

□ 도시 및 주거환경정비사업 추진 현황

○ 시공사 선정 (4개소)

지구명	위치	면적(㎡)	세대수	추진현황
문산3리 지구	문산리 81-61번지 일원	47,758	680	∙2008. 7.24 정비구역지정 ∙2008.09.12 추진위원회 승인 ∙2008.12. 8 조합설립인가 ∙2009. 5.26 시공사선정(한신공영) ∙2011. 6. 사업시행인가에 따른 관련부서 협의·보완
금촌새말 지구	금촌동 390-36번지 일원	148,888.8	1,970	∙2009. 2.25 정비구역지정 ∙2009. 6. 3 추진위원회 승인 ∙2009. 9.22 조합설립인가 ∙2009.12.23 시공사선정(롯데건설) ∙2010. 4.13 정비계획변경 고시
금촌율목 지구	금촌동 341번지 일원	53,791	751	∙2008. 9.22 정비구역지정 ∙2008.12.15 추진위원회 승인 ∙2009.10.30 조합설립인가 ∙2009.12.19 시공사선정(SK건설) ∙2011. 6. 정비계획변경에 따른 관련부서 협의·보완
금촌2동 제2지구 (율목2지구)	금촌동 337-15번지 일원	34,775	496	∙2009. 6.12 정비구역지정 ∙2010. 1.18 추진위원회 승인 ∙2010. 4.19 조합설립인가 ∙2010. 9.11 시공사선정(SK건설)

○ 정비구역 지정 (1개소)

지구명	위치	면적(㎡)	세대수	추진현황
문산4리 지구	문산리 17-92번지 일원	19,471	456	∙2009. 5.21 정비구역지정

○ 추진위원회 승인 (2개소)

지구명	위치	면적(㎡)	세대수	추진현황
문산1-5 지구	문산리 31-1번지 일원	27,200	597	∙2009.12. 2 추진위원회 승인 ∙2011. 4.19 정비구역지정 신청 ∙2011. 6. 관련부서 협의·보완
조리1-6 지구	봉일천리 183-20번지 일원	47,910	515	∙2009.12.14 추진위원회 승인

○ 협신연립주택 재건축

지구명	위치	면적(㎡)	세대수	추진현황
협신주택	아동동 275-13번지	5,624	110	∙2008. 4.16 추진위원회 승인 ∙2011. 3. 2 사업시행인가 ∙2011. 6. 감정평가 준비

건축과 소관

11-2 도시 주거환경 정비사업 추진

확인자  주 택 과 장  송 종 완 (인)

작성자  주거정비팀장  박 진 춘 (인)

□ 도시 및 주거환경정비사업 추진 현황

○ 시공사 선정 (4개소)

지구명	위치	면적(㎡)	세대수	추진현황
문산3리 지구	문산리 81-61번지 일원	47,758	680	∙2008. 7.24 정비구역지정 ∙2008.09.12 추진위원회 승인 ∙2008.12. 8 조합설립인가 ∙2009. 5.26 시공사선정(한신공영) ∙2011. 6. 사업시행인가에 따른 관련부서 협의·보완
금촌새말 지구	금촌동 390-36번지 일원	148,888.8	1,970	∙2009. 2.25 정비구역지정 ∙2009. 6. 3 추진위원회 승인 ∙2009. 9.22 조합설립인가 ∙2009.12.23 시공사선정(롯데건설) ∙2010. 4.13 정비계획변경 고시
금촌율목 지구	금촌동 341번지 일원	53,791	751	∙2008. 9.22 정비구역지정 ∙2008.12.15 추진위원회 승인 ∙2009.10.30 조합설립인가 ∙2009.12.19 시공사선정(SK건설) ∙2011. 6. 정비계획변경에 따른 관련부서 협의·보완
금촌2동 제2지구 (율목2지구)	금촌동 337-15번지 일원	34,775	496	∙2009. 6.12 정비구역지정 ∙2010. 1.18 추진위원회 승인 ∙2010. 4.19 조합설립인가 ∙2010. 9.11 시공사선정(SK건설)

○ 정비구역 지정 (1개소)

지구명	위치	면적(㎡)	세대수	추진현황
문산4리 지구	문산리 17-92번지 일원	19,471	456	∙2009. 5.21 정비구역지정

○ 추진위원회 승인 (2개소)

지구명	위치	면적(㎡)	세대수	추진현황
문산1-5 지구	문산리 31-1번지 일원	27,200	597	∙2009.12. 2 추진위원회 승인 ∙2011. 4.19 정비구역지정 신청 ∙2011. 6. 관련부서 협의·보완
조리1-6 지구	봉일천리 183-20번지 일원	47,910	515	∙2009.12.14 추진위원회 승인

○ 협신연립주택 재건축

지구명	위치	면적(㎡)	세대수	추진현황
협신주택	아동동 275-13번지	5,624	110	∙2008. 4.16 추진위원회 승인 ∙2011. 3. 2 사업시행인가 ∙2011. 6. 감정평가 준비

교통정책과 소관

13-1 대중교통 확충

확인자  교통정책과장  정 명 기 (인)

작성자  대중교통팀장  이 승 욱 (인)

□ 대중교통노선 현황(전체) 및 변경내역

○ 대중교통노선현황(전체)

- 관내업체(시내·외·공영) : 3개업체 /  69개노선  /  608대

<신성교통(주)>

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
합계	56개				549
소계	50개				486
시내	2	일반	출판단지~원당역	산남리,거그뫼,가좌동,송산동	3	24
	3	일반/벽지	대화동~봉일천	신원@,중상,청석궁,운정역	1	10
	05	일반	고양동~마두역	관산동,원당,풍동,일산병원	3	21	노선단축(당초 주엽역)
	5	일반	파비뇽아울렛~원당역	문발리,덕이동,고양시청	2	18
	8	일반	다율리~백석역	교하택지,교하신도시,대화역	12	99	노선변경(교하신도시구간)
	31	일반	법원읍~불광동	연풍리,광탄삼거리,봉일천	11	55
	34	일반	불광동~의정부	구파발,은평뉴타운,송추	12	76
	37	일반/벽지	신산리~감사교육원입구	신애유치원,마장리,영장리	1	14	노선변경(보광사 경유)
	52	일반	교하~구파발	교하택지,운정역,관산동	8	48	노선변경(교하신도시구간)
	55	일반	킨텍스~불광동	일산시장,성석초교,관산동	4	26
	55-2	일반	대화역~구파발	킨텍스,성석초교, 관산동	2	12	증차 1대
	56	일반	다율리~김포공항	교하신도시,대화역,개화역	15	90	노선변경(교하신도시구간)
	60	일반	금촌~웅지세무대	월롱역,LG디스플레이	4	32	노선변경(웅지세무대)
	76	일반	다율리~신촌역	가좌마을,덕이동,암센타,수색	18	86	노선변경 및 증차 3대
	85-1	일반	고양동~공항동	관산동,원당,능곡고교,김포공항	9	54	증차 3대

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
시내	90	일반	맥금동~백석역	금촌택지,봉일천,동문@	32	192
	92	일반/벽지	금촌~적성	문산,선유리,두포리,장파리	14	72	증차 1대
	93	일반/벽지	문산~대성동	통일촌, JSA	2	16	증회 1회(벽지구간 : 해마루촌,도라산역)
	100	일반	불광동~한라@	구파발,대자동,벽제	9	75
	150	일반	맥금동~김포공항	교하신도시,대화역,백석역	25	114	노선변경(교하신도시구간) 및 증차 5대
	151	일반	다율리~대화역	교하신도시,삽다리,대화역	3	39	노선변경(교하신도시구간)
	330	일반	고양동~불광역	고양시장,삼송역,구파발	8	88	증차 2대
	333	일반/벽지	금촌~구파발	낙머리,보광사,고양동	7	35
	340	일반	금촌~의정부	관산동,고양동,장흥,송추	2	10
	350	일반	부곡리~구파발역	장흥관광지,일영,효자동,지축동	3	30	노선변경(장흥관광지)
	360	일반	불광동~의정부	연신내,구파발,일영,장흥,송추	11	62
	550	일반	내유동~북변동	주엽역,일산동구청,두포동	5	30
	567	일반	금촌~신촌역	일산,원당,삼송동,홍은동	22	93	노선변경(교하신도시구간) 및 증차 2대
	600	일반	법원읍~강선마을	연풍리,월롱역,금촌,대화역	18	90	노선변경(교하신도시구간) 및 증차 6대
	700	일반	다율리~중산마을	교하택지,주엽역,중산초교	8	64
	780	일반	출판단지~증산교	가좌마을,덕이동,암센타,수색	4	24	감차 1대
	850	일반	고양동~행신역	대자동,화정역,고양경찰서	5	42
	900	일반	맥금동~대화역	금촌택지,교하신도시,현대백화점	15	90	노선변경(교하신도시구간) 및 증차 4대
	919	일반	교하~원당역	교하신도시,대화역,암센타	11	55	노선변경(교하신도시구간) 및 감차 1대
	33	좌석형	광탄~공항동	낙머리,봉일천,중산,김포공항	12	60	감차 1대
	85	좌석형	고양동~공항동	관산동,원당,행신동,김포공항	17	108
	773	좌석형	맥금동~신촌역	금촌택지,가라뫼,가좌,신촌	13	60	노선변경(교하신도시구간)
	777	좌석형	교하~신촌역	교하신도시,가라뫼,가좌,신촌	10	50	노선신설

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
시내	200	직행 좌석	맥금동~합정역	법흥리,삽다리,대화,마두	13	55
	909	직행 좌석	문산~서울역	금촌,금촌택지,금능리,구파발	20	92
	2000	직행 좌석	교하~서울역	교하신도시,대화역,광화문	27	140	노선변경(교하신도시구간)
	2200	직행 좌석	맥금동~합정역	통일동산,헤이리,출판단지	11	66	노선변경(통일동산구간)
	2300	직행 좌석	교하∼합정역	교하택지,교하신도시	5	30	노선신설
	3200	직행 좌석	원당~인천공항	덕양구청,능곡역,행신동	9	52
	8880	간선 급행	교하~서울역	청석마을,교하택지,고양BRT	3	15	운행회수 3회 증회
	9000	직행 좌석	금촌~영등포	금촌택지,교하신도시,당산역	5	25	노선신설 및 노선변경 (출판단지 경유)
	9030	직행 좌석	교하~영등포	교하택지,교하신도시,당산역	6	36	노선신설
	9080	직행 좌석	금촌역~서울역	금촌택지,봉일천,구파발	10	60	형간전환(간선급행→직행좌형) 및 노선번호변경(당초 8800번)
	M7111	광역 급행	교하~서울역	교하신도시,광화문	15	84	노선신설 및 업체전환 3대 증차
농어촌(공영)	9	일반	금촌~웅지세무대	금촌,팜스프링,LG디스플레이	1	13
소계	6개				63
시외	3000	직행	금촌~인천	금촌택지,마두역,계양	22	76	노선변경(교하신도시구간)
	3700	직행	의정부~인천	송추,원당,김포공항,부평	25	99
	5000	직행	문산~부천	월롱,일산,계산역,경인교대역	12	48	노선변경(교하신도시구간)
	5500	직행	교하~부천	교하신도시,계산역,경인교대역	1	5	노선변경(교하신도시구간) 및 기점변경(당초 금촌),2회증회
	5600	직행	문산~인천공항	월롱,금촌주공3,교하택지	2	7	노선변경(교하신도시구간)
	6000	직행	금촌~여의도환승센터	금촌역,현대1차,교하택지	1	4	노선변경(교하신도시구간)

<신일여객(합)>

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
계	12개				58
시내(11)	10	일반	갈곡리～대화역	파주,광탄,금촌,교하신도시	13	65	노선신설
	11	일반 /벽지	갈곡리~문산터미널	선유삼거리,선유리,이천리	7	83	증차 1대
			갈곡리~파주병원	문산,파주,도내리		1
			갈곡리~문산터미널	선유리,이천리,동문리		8	1회 증회(벽지구간)
	12	일반	법원~문산	통일로,파주리,연풍리	7	74
	14	일반	문산~광탄	파주리,연풍리,광탄삼거리	1	10
	15	일반	비암리~금촌	검정리,광탄,오산리,낙머리	1	8
	17	일반	갈곡리~불광동	연풍,월롱,금촌택지,봉일천	6	30	노선번호 변경(당초 303번)
	19	일반/ 벽지	법원리~어둔리	대능리, 삼방리	1	3
			법원리~직천리	갈곡리,오현리		3
	22	일반	문산역~선유삼거리	선유주공@,선유리	2	30	노선번호 변경(당초 111번)
		일반/ 벽지	문산~직천리	동문리,금곡리,웅담리		6
	23	일반	세아아파트~문산여고	꿈에그린@,문산터미널,두산위브	1	28	노선분할 및 증회
	30	일반	적성~불광동	법원,연풍,월롱,봉일천,관산동	17	61
	30-1	일반	적성~금촌택지	웅담,금곡,연풍,월롱역,금촌	1	7
농어촌(공영)	11-1	일반	두포리~문산터미널	마산리,용산골,선유리	1	11	노선연장(문산역 경유)

<신일운수>

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
계	1개				1
농어촌 (공영)	17	일반	파주 ~ 파주	부곡리,백석리,봉암리,봉서리	1	9

- 관외업체(시내·외) : 8개업체 / 19개노선  / 225대

<서울 신성교통(주)>

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
계	5개				90
시내	703	일반	광탄~서울역	고양동,벽제, 구파발, 불광동	27	133
	760	일반	금촌~영등포	벽제,구파팔,불광동,당산역	21	80
	9709	직행 좌석	맥금동~서울역	봉일천,벽제,구파발,불광동	19	108
	9710	직행 좌석	문산~미도파	봉일천,벽제,구파발,불광동	16	84
	9714	직행 좌석	교하다율리~서울역	교하택지,고양BRT,연세대	7	39

<제일여객(주)>

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
계	2개				33
시내	706	좌석	교하~서울역	이마트,백석역,원당역,구파발	20	85	노선변경(교하신도시구간)
	7733	일반	교하~구파발	삽다리,일산,원당	13	64	노선변경(교하신도시구간)

<평안운수>

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
계	4개				48
시내	32-1	일반	의정부～금촌	양주,가래비,법원,파주,월롱	5	21
	35	일반	법원읍~도봉산역	갈곡리,효촌리,양주역,의정부역	12	70	노선신설
	55-2	일반	영장리~의정부	기산리,홍죽리,주내역,의정부역	1	2
시외	32	일반	의정부～금촌	양주,가래비,법원,파주,월롱	30	135

<명진여객>

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
계	2개				15
시내	25	일반	의정부~적성	의정부시청앞,양주시청,북부역	11	56
	25-1	일반	의정부~적성	의정부시청앞,양주시청,북부역	4	20

⑤대양운수(주)

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
계	2개				3
시내	52	일반	동두천~어유지리	늘목리,간파리,적암초교	2	17
	61	일반	동두천~어유지리	어유지리, 객현리	1	16
		일반	전곡~적성			8

<명성운수(주)>

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
계	2개				33
시내	66	일반	교하～수색역	대화역,마두역,가라뫼,수색역	17	102	노선변경(교하신도시구간) 및 증차 5대
	1500	직행 좌석	교하～영등포	대화역,일산동구청,당산역	16	96	노선신설

<경기고속(주)>

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
계	1개				2
시외	다3	직행	문산 ~ 인천공항	금촌역,교하(운정동문1차@)	2	4	휴업(2011.4.11~2012.3.31)

< (주)진흥고속>

종별	노선 번호	운행 형태	기ㆍ종점	주요 경유지	운행대수	운행회수	변경내역
계	1개				1
시외	다2-7-170	직행	춘천 ~ 문산	강촌,가평,청평,마석,구리,화정	1	2	노선신설

- 마을버스 : 10개업체 / 40개노선  /  95대

<(주)금촌여객>

종별	노선 번호	기ㆍ종점	주요 경유지	운행 대수	운행 횟수	변경내역
계	4개			11
마을	011	금신초교~두보장미	동문A,경신A,파라다이스A,금촌역,의료원	6	110
	022	용상골~영태리	문산제일고,순달교,대하마트,금촌역,파주여고	1	14
	023	영태리~팜스프링	파주여고,팜스프링A,금촌역	1	13
	068	유승아파트~뇌조리	문산제일고,금촌역,시청,조리읍,봉일천시장	3	38

<동원교통>

종별	노선 번호	기ㆍ종점	주요 경유지	운행 대수	운행 횟수	변경내역
계	2개			3
마을	061	광탄~금촌역	창만리,오산리,등원리,파주스타디움,의료원	1	12
	062	용미리~금촌역	분수리,오산리,등원리,조리읍,파주스타디움,의료원	2	13

<명진교통>

종별	노선 번호	기ㆍ종점	주요 경유지	운행 대수	운행 횟수	변경내역
계	1개			3
마을	092	백학~적성	백학면사무소,원당리,노곡리,주월리,가월리,구읍리	3	24

<문산여객>

종별	노선 번호	기ㆍ종점	주요 경유지	운행 대수	운행 횟수	변경내역
계	3개			6
마을	050	홈플러스~행복센터	현대힐스테이트A,세아A,주공,터미널,문산역	1	31	노선신설
	051	홈플러스~통일공원	주공,힐스A,세아A,터미널,시장,문산역,봉서리,붉은밭	3	86
	052	홈플러스~문산역	현대힐스테이트A,세아A,터미널	2	93

<신일운수>

종별	노선 번호	기ㆍ종점	주요 경유지	운행 대수	운행 횟수	변경내역
계	2개			3
마을	021	문산~금촌의료원	봉서2,3리,파주읍,백석리,도내리,파주여고	2	12
	067	비암리~금초의료원	발랑리,창만리,광탄,오산리,금촌역	1	7

<(주)우리교통>

종별	노선 번호	기ㆍ종점	주요 경유지	운행 대수	운행 횟수	변경내역
계	4개			8
마을	030	웅지세무대~금촌택지	검산초교,금촌역,의료원,노인복지회관,중앙도서관	3	35
	031	금산리~금촌고교	탄현중,웅지세무대,축현리,검산초교,금촌역,의료원	2	23
	032	낙머리~낙머리	PX마을,앞골,금촌역,현대타워,로터리,의료원	1	20
	033	탄현면사무소~금촌로터리	금산리,탄현산업단지,성동사거리,유승.검산초교,금촌역	2	23

<파주교통>

종별	노선 번호	기ㆍ종점	주요 경유지	운행 대수	운행 횟수	변경내역
계	2개			7
마을	065	동문아파트~문산제일고	대원리,조리읍,파주스타디움,금촌역,팜스프링A	6	100	증차1대
	066	동문아파트~금촌역	대원리,조리읍,파주스타디움,노인회관,도서관,금능역	1	15

<파주운수>

종별	노선 번호	기ㆍ종점	주요 경유지	운행 대수	운행 횟수	변경내역
계	1개			1
마을	091	적성~전곡(한탄강)	객현리,어유지리,봉화촌,양원리	1	7

<한전운수>

종별	노선 번호	기ㆍ종점	주요 경유지	운행 대수	운행 횟수	변경내역
계	3개			4
마을	053	마정~문산역	사목리,반구정,세성,북중,신원A,시장,하모니	2	47	증회운행
	054	세성~문산역	세성,자연앤,홈플러스,당동주공,신원,시장	1	29	노선신설
	055	문산역~문산역	내포리,월롱역,문산역,선유리,임진리,화석정	1	19

<(주)한일운수>

종별	노선 번호	기ㆍ종점	주요 경유지	운행 대수	운행 횟수	변경내역
계	18개			49
마을	034	문산~금촌	낙하리,내포리,오금리,금산리,탄현면,검산초,시청	3	22
	035	금촌~금촌	맥금동,만우리,성동리,경모공원,영어마을,이주단지	1	11
	036	금촌~금촌	맥금동,이주단지,경모공원,성동리,만우리,갈현삼거리	2	22
	037	금촌~아쿠아랜드	금촌택지,금촌역,맥금동,탄현면,금산리,오금리	2	14
	038	문산~대동리	낙하리,금승리,오금리,만우리	1	10	노선신설
	058	문산~마정	여우고개,운천리,장산,임진강역	5	80	증차1대
	063	금촌~팔학골	금촌역,시청,의료원,파주스타디움,조리읍,공릉입구	1	15
	064	금촌~장곡리(하니랜드)	금촌역,시청,의료원,조리읍사무소,공릉입구,토파즈A	4	52
	071	금촌~연다산리	노인회관,금촌택지,로터리,순달교,교하읍,오도리,교하택지	1	12
	073	유승아파트~출판단지	팜스프링A,금촌역,노인회관,금촌택지,E마트,교하택지	6	46	경로변경
	077	금촌~송촌리	노인회관,금촌택지,순달교,교하읍,오도리,교하택지	1	12
	078	맥금동~출판단지	대방A,팜스프링A,금촌역,금촌택지,교하택지	7	54
	079	금촌~산남리	금능역,이마트,교하읍,다율리,교하택지,출판단지	1	10
	084	운정역~교하택지	가람마을,휴먼시아,한라비발디,벽산아파트,삽다리	1	14	노선분리 및 단축
	085	운정역~운정역	현대1차,한라비발디,한울마을,벽산,휴먼빌A	4	92	증차2대
	086	운정역~운정역	운정사거리,동문,현대1차,월드1차,해솔마을	2	84	증회운행
	087	운정역~출판단지	운정사거리,지산중,현대1·2차,월드1·2차,교하택지	4	48	경로변경
	088	금촌~상지석리	금촌택지,봉일천,상지석리,운정역	3	36	노선분리 및 단축

□ 버스노선 신설 및 증차 현황

- 신설 : 15개 노선 111대(시내 11개 106대 / 시외 1개 2대 / 마을 3개 3대)

-　증차 : 14개 노선  37대(시내  10개  32대 / 마을 4개 5대)

- 증회 :  8개 노선  51회(시내  5개  27회 / 시외 1개  2회 / 마을 2개 22회)

연도	구분	종류	노선 번호	노 선			운행대수(대)		확충내용
				기점	주요 경유지	종점	기존	변경
2010년	합계		20개				123	197	74대 증차(신설포함)
	소계		7개				0	44
	신설	시내	35	법원읍	갈곡리,양주역	도봉산역	-	12	노선신설(9.1)
			37	신산리	마장리,영장리	감사교육원	-	1	노선신설(3.1)
			52	교하	운정역,관산동	구파발	-	8	노선신설(9.13)
			56	다율리	교하신도시,대화역	김포공항	-	15	노선신설(5.21)
			9000	금촌	교하신도시,당산역	영등포	-	5	노선신설(3.1)
		시외	다2-7-170	춘천	강촌,가평,마석,화정	문산	-	2	노선신설(4.9)
		마을	038	문산	낙하리,오금리,만우리	대동리	-	1	노선신설(5.6)
	소계		13개				123	153	증차 30대, 2회증회
	증차 · 증회	시내	11	갈곡리	자운서원,동문리,선유리	문산터미널	7	8	증차1대 / 벽지구간 동문리 증회 1회(3.2)
			66	교하	대화역,마두역,가라뫼	수색역	12	17	증차5대(11.2)
			76	다율리	가좌마을,암센타,수색	신촌역	15	18	증차 3대(3.2)
			92	금촌	월롱,문산,파평	적성	12	13	증차1대(7.17)
			93	문산	통일촌,수복마을	대성동	2	2	벽지구간 도라산역 증회 1회(4.10)
			150	맥금동	교하,대화역,백석역	신촌역	20	25	증차 5대(1.29)
			567	금촌	교하,일산,원당,구파발	신촌역	20	22	증차 2대(6.24)
			600	법원읍	파주,월롱,금촌,교하	강선마을	12	16	증차 4대(4.26 )
			900	맥금동	탄현,금촌,교하	대화역	11	15	증차 4대(3.6)
		마을	033	탄현	금산리,성동리	금촌	1	2	증차 1대(3.11)
			058	문산	운천리,장산리	마정	4	5	증차 1대(3.3)
			065	동문A	대원리,조리읍	금촌	5	6	증차 1대(6.21)
			085	운정역	벽산A,휴먼빌A	운정역	2	4	증차 2대(12.30)

연도	구분	종류	노선 번호	노 선			운행대수(대)		확충내용
				기점	주요 경유지	종점	기존	변경
2011년	합계		16개				37	111	74대 증차(신설포함)
	소계		8개				0	67
	신설	시내	10	갈곡리	파주,광탄,금촌,교하	대화역	-	13	노선신설(5.2)
			777	교하	교하신도시,일산	신촌역	-	10	노선신설(4.27)
			1500	교하	교하신도시,일산	영등포	-	16	노선신설(3.23)
			2300	교하	교하신도시,당산역	합정역	-	5	노선신설(3.27)
			9030	교하	교하신도시,당산역	영등포	-	6	노선신설(4.16)
			M7111	교하	교하신도시,광화문	서울역	-	15	노선신설(1.29)
		마을	050	홈플러스	당동주공,터미널,문산역	행복센터	-	1	노선신설(5.25)
			054	세성	자연앤,홈플러스	문산역	-	1	노선신설(4.27)
	소계		8개				37	44	증차 7대, 증회 49회
	증차 · 증회	시내	23	세아@	꿈에그린@,문산터미널	문산여고	1	1	증회 21회(3.8)
			93	문산	통일촌,수복마을	대성동	2	2	벽지구간 해마루촌 1회 증회(3.5)
			600	법원읍	파주,월롱,금촌,교하	강선마을	16	18	증차 2대(4.5)
			8880	교하	교하택지, 일산신도시	서울역	3	3	증회 3회(4.10)
			M7111	교하	교하신도시, 제2자유로, 광화문	서울역	10	15	증차 5대(6.1)
		시외	5500	교하	교하신도시	부천	1	1	증회 2회(3.27)
		마을	053	마정	사목리,반구정,세성,북중	문산역	2	2	증회 10회(6.7)
			086	운정역	동문2차,현대1차	운정역	2	2	증회 12회(4.29)

※ 소외지역 노선과 증차 없이 증회된 노선만 증회 산정(증차된 노선은 증회 미산정)

□ 버스노선 변경 민원신청 및 처리 현황

민원인	접수일	노선 번호	기ㆍ종점	민원내용	처리결과	비 고
광탄면 신산리 주 민	2010. 1. 6	-	-	신산리∼마장리 구간 버스노선 개설 요청	37번 벽지노선 개설 운행 (2010. 3. 1)	시내
파평면	2010. 1. 11	11-1	두포리～ 문산	문산역 경유 요청	문산역 경유 운행 (2010. 2.21)	공영 버스
교하읍 동패리	2010. 3. 5	2200	맥금동∼ 합정역	교하택지 지역 경유 요청	운행소요 시간이 길어져 기존이용 승객의 교통불편 발생으로 불가 (2010. 3월)	시내
분수리 기업인협의회	2010. 5. 7	703	광탄～ 서울역	분수리 공단지역으로 노선운행 요청	미경유 지역 민원 발생으로 불가 (2010. 5.13)	시내 버스
탄현면 유승앙브와즈	2010. 6. 25	2200	맥금동∼ 합정역	유승앙브와즈 지역 일부노선 변경 요청	노선변경 운행 (2010. 7.17)	시내
교하읍 현대2차아파트 입주자대표회의	2010. 8.	-	-	신도시내 계획도로 개통에 따른 버스 노선변경 문의	신도시내 계획도로 개통에 맞춰 노선변경 (2010. 9. 3)	시내 시외 마을
금촌택지 서원마을 7단지	2010. 10.	3000	금촌~ 인천터미널	시외버스 우체국 정류소 추가 정차 요청	경기도 불가회신 (2010.10. 6)	시외
탄현면 맛고을 상가 번영회	2010. 12.2	-	-	신세계 아울렛 개장에 따른 외래 방문객 증가 예상에 대비해 맛고을내 교통량 증가에 대한 대중교통 대책	노선별 이용승객 증가시 차량을 증차시켜 접근성 향상과 교통편의 증대 (2010.12. 3)	시내 마을
금촌동 증앙하이츠관리사무소장	2010.12	17 909 9080	법원~불광동 문산~서울역 금촌~서울역	중앙하이츠 정문 앞 도로 버스 운행 요청	기존 이용승객 불편발생으로 불가 (2010.12.13)	시내
법원읍 금곡리 주민 30인	2010. 12.24	30	적성~ 불광동	시내버스 30번노선 배차간격 10분내로 단축 요청	향후 이용승객 증가시 차량 증차 (2010.12.29)	시내

민원인	접수일	노선 번호	기ㆍ종점	민원내용	처리결과	비 고
조리읍 능안리 주 민	2011. 2.	90	맥금동~백석역	능안리 우회도로에 봉일천 시내로 연계되는 노선이 부족하여 지역주민 불편으로 90번 노선 우회도로로 운행 요청	마을버스 노선 변경 운행 (2011.2.)	시내 마을
탄현면 파주프리미엄아울렛	2011. 2.	-	-	파주프리미엄 아울렛 개점에 따른 노선경유 및 정차	기존 운행노선 정차 (2011.2.22)	시내 마을
교하읍 월드1차입주자 대표회의	2011. 3.28	-	-	신도시 구간 노선조정으로 아파트 앞으로 운행되던 노선이 줄어들어 대체노선 신설과 마을버스 배차간격 단축 요청	신규 노선신설과 노선별 승객수요 증가시 증차 (2011.4.1)	시내 마을
교하읍 현대1차입주자 대표회의	2011. 4.1	-	-	신도시 구간 노선조정에 따른 노선확충, M7111번 증차	단계별 입주에 따른 지속적 노선확충 추진(2011.4.7)	시내 마을
교하읍 월드1차입주자 대표회의	2011. 4.4	-	-	신도시 구간 노선조정에 따른 노선확충, 마을버스 배차간격 단축 요청	단계별 입주에 따른 지속적 노선확충 추진(2011.4.7)	시내 마을
교하읍 현대2차입주자 대표회의	2011. 4.7	-	-	신도시 구간 노선조정에 따른 금촌행 버스 신설, 운정역 마을버스 노선변경	금촌방면 연계노선 확충 및 운정역 마을버스 노선변경(2011.4.8)	시내 마을
웅지 세무대	2009. 9.30	030	웅지세무대∼ 금촌택지	웅지세무대학생 통학 편의 제공 요청	1대 증차운행 (2010.1.11)	마을
교하읍 다율5리 주민	2010. 2.19	087	운정역∼ 출판단지	다율리 지역 경유요청	운정역 환승편의를 위한 노선 경유 (2010.4.18)	마을
봉일천 고등학교	2010. 3.23	065	동문A∼ 문산제일고	등·하교시간 통학편의를 위해 증차 요청	1대 증차운행 (2010.6.21)	마을
탄현면 낙하리 주민	2010. 5.27	038	문산터미널∼ 대동리	대중교통노선이 없는 낙하리(방촌로구간)지역 경유요청	낙하리 지역 노선 경유 (2010.5.29)	마을
조은석	2010. 12.	053	마정∼ 문산역	힐스테이트2차↔ 문산역 노선 증회 요구	노선신설(054)	마을
이계관	2011. 1.19	084	운정역~ 교하택지	가람마을 1단지 벽산·한라 아파트 경유하여 운정역 운행 요구	088 노선 분리 및 단축운행(084)	마을
김병수	2011. 1.25	088	금촌∼ 상지석리	능안리 증회 및 증차 운행요구	088 노선 분리 및 단축운행	마을

□ 개인택시 및 영업용택시 인구비례 증차 계획현황

○ 연차별 증차 현황(2011년～2014년)

(단위: 대)

연도별	계	2011	2012	2013	2014	비고
합 계	59	23	28	4	4
개인택시	51	23	20	4	4
일반택시	8		8

13-2 교통안전시설 정비 및 확충 현황

확인자  교통정책과장  정 명 기 (인)

작성자  교통시설팀장  김 용 수 (인)

□ 교통신호기 및 경보등 신설 현황

○ 신호등 신설

(단위 : 백만원)

연도	사업명	사업비	위치	사업량	설치완료일	비고
	계	388
2010	교통신호기 설치공사	42	파주시의회 앞	· 교통신호기 1식 · 제어기 신설 1식	2010. 3.20
		25	주월교 사거리	· 제어기 신설 1식	2010. 6. 2
		83	월롱역 앞	· 교통신호기 1식	2010. 7.20
2011	교통신호기 설치공사	74	문산자유초교	· 교통신호기 1식 · 제어기 신설 1식	2011. 3.23
		37	광탄하나로마트 앞	· 교통신호기 1식 · 제어기 신설 1식	2011. 4.29
		20	도마산초교 앞	· 교통신호기 1식	2011. 5.18
		54	통일전망대 삼거리	· 교통신호기 1식 · 제어기 신설 1식	2011. 6.11
			NFC입구	· 교통신호기 1식	2011. 6.11
		53	자유로 자동차극장	· 교통신호기 1식 · 제어기 신설 1식	2011. 6.11

○ 경보등 신설

(단위 : 백만원)

연도	사업명	사업비	위치	사업량	설치완료일	비고
	계	91
2010	경보등 설치공사	25	조리읍 뇌조리 외 1개소	· 경보등 2식	2010. 4. 1
		15	조리읍사무소 앞	· 경보등 1식	2010. 5.31
		6	법원읍 대능리	· 경보등 1식 · 제어기 신설 1식	2010. 6. 3
		4	법원읍 금곡리	· 경보등 1식	2010. 9.14
		2	광탄면 방축리	· 제어기 신설 1식	2010. 9.28
		17	문산읍 세성아파트앞	· 경보등 1식	2010.10. 1
2011	경보등 설치공사	22	법원읍 금곡리 석산입구 외1개소	· 경보등 1식 · 제어기 신설 1식	2011. 4.12

□ 버스정류소 안내전광판 확대 구축 현황

○ 사 업 비 : 553백만원

○ 사업내용 : 49대(금촌 42, 교하 2, 조리 5), 센터시스템 1식

○ 사업기간 : 2010. 5월 ∼ 2011. 1월

연번	읍면동	정류소명	연번	읍면동	정류소명
1	금촌동	독점말	26	금촌동	쇄재마을5단지
2	금촌동	독점말	27	금촌동	노인복지회관
3	금촌동	팜스프링아파트	28	금촌동	노인복지회관
4	금촌동	팜스프링아파트	29	금촌동	금촌로터리
5	금촌동	금촌1동사무소	30	금촌동	금촌로터리
6	금촌동	금촌역	31	금촌동	우체국앞
7	금촌동	금촌사거리	32	금촌동	우체국앞
8	금촌동	금촌사거리	33	금촌동	중앙도서관
9	금촌동	장안아파트	34	금촌동	중앙도서관
10	금촌동	파주시청	35	금촌동	금향초교
11	금촌동	한국전력	36	금촌동	금향초교
12	금촌동	한국전력	37	금촌동	금촌농협
13	금촌동	흰돌아파트	38	금촌동	장안아파트
14	금촌동	흰돌아파트	39	금촌동	KT파주지사
15	금촌동	파주스타디움	40	금촌동	KT파주지사
16	금촌동	금촌로터리	41	금촌동	대하마트
17	금촌동	새꽃마을1단지	42	금촌동	대하마트
18	금촌동	새꽃마을1단지	43	교하읍	트리플메디컬타운
19	금촌동	보건소	44	교하읍	숲속길마을
20	금촌동	미래여성병원	45	조리읍	조리읍사무소
21	금촌동	금화초교3단지	46	조리읍	조리읍사무소
22	금촌동	금화초교3단지	47	조리읍	봉일천시장
23	금촌동	후곡마을4단지	48	조리읍	봉일천시내
24	금촌동	후곡마을4단지	49	조리읍	조리농협
25	금촌동	쇄재마을5단지

13-3 운송사업 질서 확립 및 선진화

확인자  교통정책과장   정 명 기  (인)

작성자  운수지도팀장   이 완 용  (인)

□ 운수사업장 지도 점검 결과

○ 버스 운수사업장 지도․점검결과

(단위: 건, 천원)

연도별	적발현황	조치결과		위 반 사 항	비 고
		시정조치	과태료등 부과
합 계	452	203	249 / 6,659
2010	301	87	214 / 5,215	- 무정차통과 - 배차간격 미준수 - 안전운행 불이행 - 버스 청결상태 불량
2011	151	116	35 / 1,444

○ 전세버스 지도․점검결과

(단위: 건, 천원)

연도별	적발현황	조치결과				위 반 사 항	비 고
		시정 조치	영업 정지	고발	과태료등 부과
합 계	72	70		1	1/900
2010	63	61		1	1/900	- 사업범위 외 영업행위 - 교통사고 관리대장 작성미흡 - 명의이용 금지위반
2011	9	9	-	-	-

○ 화물자동차 운수사업 지도․점검결과

(단위: 건, 천원)

연도별	적발현황	조치결과				위 반 사 항	비 고
		시정 조치	영업 정지	고발	과태료등 부과
합 계	78	20	2	14	42/4,200
2010	49	10	-	3	36/3,600	- 자가용 유상운송 - 상호 미표시 - 자격증 미게시 - 중대교통사고
2011	29	10	2	11	6 / 600

□ 밤샘주차 및 사업용 차량 차고지 지도․단속 결과

(단위: 건, 천원)

연도별	적발현황	조치결과			위 반 사 항	비 고
		경고 조치	영업 정지	과태료등 부과
합 계	809	359	51	399/77,390
2010	617	244	42	331/66,990	- 차고지외 밤샘주차
2011	192	115	9	68/10,400

13-4 벽지노선 및 교통약자를 위한 버스 관리

확인자  교통정책과장  정 명 기 (인)

작성자  대중교통팀장  이 승 욱 (인)

□ 벽지노선 버스 증차 요구 민원 사항

○ 시내버스

민원지역	노선 번호	민원내용	처리결과	비 고
파평면 지역주민	11-1	문산역 경유 요청	문산역 경유운행 (2010. 2. 21)	공영버스
광탄면 지역주민	-	신산리∼마장리 구간 버스노선 개설 요청	벽지노선개설 운행 37번 (2010. 3. 1)	벽지노선
법원읍 동문리	11	벽지노선 구간 증차 요청	1대증차, 1회증회 운행 (7회→8회) (2010. 3. 2)	벽지노선
광탄면 영장리	37	37번 노선 영장리 보광사까지 운행요청	1일 14회 중 2회운행 (2010. 3. 13)	벽지노선
도라산역 남북출입국사무소	93	운행회수 증회요청 (2→3회)	1회 증회운행 (2010. 4. 10)	벽지노선
적성면 파평면 지역주민	92	증차로 배차시간 단축	1대 증차 운행 (2010. 7. 17)	벽지노선
동파리 해마루촌	93	운행회수 증회 및 막차시간 연장 건의(5→6회 / 21:30)	1회 증회, 막차시간 연장 운행 (2011. 3. 5)	벽지노선

○ 마을버스

민원지역	노선 번호	민원내용	처리결과	비 고
뇌조리 지역주민	068	배차간격 단축 요청	2대 증차운행으로 배차간격 단축(2009.10. 5)
운천,장산리 지역주민	058	배차간격 단축 요청	2대 증차운행으로 배차간격 단축(2010. 2.27)	2009, 2010 각 1대씩 증차운행
금승,오금리지역주민	038	문산지역을 바로 갈 수 있는 버스 노선 신설 요청	문산지역 접근편의를 위한 노선 신설(2010. 5. 3)

□ 교통약자를 위한 저상버스 확보 현황

○ 저상버스 연도별 구입 계획

연도별	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	비고
구입대수(누계)	2	3(5)	9(14)	18(32)	15(47)	23(70)	25(95)	25(120)
보유대비 구입 비율(%)	0.7	1.7	4.7	10.6	15.6	23	31.5	40

(단위: 대)

※ 구입비율은 전체 일반형 시내버스 대수(301대/좌석형 제외) 대비 저상버스 대수 비율

○ 저상버스 구입 현황

(단위 : 대/천원)

업체명	합 계	2010년 이전	2011년		비고
			예산액	지원액
계	41 / 3,852,800	32 / 2,964,500	1,485,000	9 / 888,300
신성교통(주)	34 / 3,160,600	28 / 2,568,400		6 / 592,200
(합)신일여객	7/ 692,200	4 / 396,100		3 / 296,100

도시미관과 소관

14-1 고품격 도시경관 조성

확인자    도시미관과장  김 태 회 (인)

작성자  광고물관리팀장  김 윤 정 (인)

□ 시민참여형 간판개선 사업 추진내역

사업명	사업 대상	개선사업 계획						사업비(천원)
		광고물 종류	계	가로		돌출	지주	사업비 (100%)	보조금 (73%)	자부담 (27%)
				입체 (LED)	판류
2011년 시민참여형 간판개선사업	87개 업소 105개 간판	사업전	117	0	98	18	1	194,899	142,471	52,428
		사업후	105	66	22	16	1

○ 사업개요

○ 추진사항 및 계획

- 2011. 3.  4 : 사업공고

- 2011. 4월  : 사업신청서 접수

- 2011. 5월  : 사업대상지 선정 및 설치계획서 접수

- 2011. 6. 13 : 보조금 교부 결정(광고물관리 심의위원회)

- 2011. 6. 17 : 보조금 교부 통보

- 2011. 6. 30 : 인허가 절차이행 후 간판 설치 완료

- 2011. 7. 31 : 보조금 정산보고서 제출

□ 불법광고물 양성화 추진 현황

(단위 : 건)

구분	합계	가로형	세로형	돌출	지주이용	옥상	기타 (창문이용 등)
계	1,450	1,256	9	119	57	7	2
2010년	1,450	1,256	9	119	57	7	2

□ 불법간판 철거 현황

○ 유동광고물 정비실적

(단위 : 건)

구분	합계	현수막	입간판	에어라이트	벽보․전단	기타
계	502,255	15,218	1,699	651	446,331	38,356
2010년	417,356	9,205	1,272	472	375,999	30,408
2011년	84,899	6,013	427	179	70,332	7,948

※ 기타 : X-배너(물통) 등

○ 고정광고물 정비실적

(단위 : 건)

구분	합계	가로형	세로형	돌출	지주이용	옥상	차량이용	공공목적	기타
계	5,910	2,180	502	1,071	701	82	931	2	441
2010년	4,510	1,594	446	957	461	76	566	2	408
2011년	1,400	586	56	114	240	6	365	-	33

※ 기타 : 창문이용 광고 등

□ 선진 간판문화 조성 시민포럼 운영 현황

○ 추진목적

- 광고업체․공무원의 옥외광고물 관리 전문성 강화

- 간판에 대한 범국민 인식 개선과 도시품격 향상

- 시민욕구와 지역특성에 맞는 간판문화 선진화 정책 추진

○ 추진계획

- 참여대상 : 시민, 광고업자, 전문가, 공무원

- 개최시기 : 2011년 하반기 중 시행예정

- 운영방법 : 한국옥외광고센터 등 간판 문화운동 전문기관

- 운영내용

∙ 운영기간 : 2 ∼ 3일

∙ 운영내용 : 간판 이론 교육, 현장체험, 분임 토의

▶ 이론교육 : 선진 옥외광고 사례, 옥외광고 비즈니스, 관련 법률

▶ 현장체험 : 간판 우수 거리 견학

▶ 분임토의 : 주변 좋은 간판을 찾아 평가 및 토론, 창의적 아이디어 도출

14-2 밝고 쾌적한 가로환경 조성 사업추진

확인자    도시미관과장  김 태 회 (인)

작성자  가로물관리팀장  최 호 진 (인)

□ 가로시설 취약지구 조명개선 및 도시미관 정비추진 내역

○ 가로시설 취약지역 가로/보안등 신설 및 정비사업

- 사업개요

∙ 사업내용 : 마을길, 커브길, 교통사고 위험지역 등 가로시설 취약지구

∙ 사 업 량 : 가로/보안등 신설 및 정비(신설 100, 정비 300등)

∙ 예 산 액 : 440백만원

∙ 사업기간 : 2011. 1월 ~ 2011. 12월

- 추진실적

∙ 보안등 설치요청 민원 현장 확인 및 신설(75W-202등)

∙ 교통사고 발생 위험지역 등 취약지역 가로등 설치(250W-38등)

∙ 보안등 수요변동, 도로폐쇄 등 불필요한 보안등 이설 및 철거(36등)

∙ 가로등 정밀 안전진단 실시(가로등 8,124등, 분전반 374면)

⇒ 가로등 부적합 시설 52개소 정비완료

- 향후계획

∙ 주기적인 로드체킹과 현장 확인으로 야간 안전사고 및 범죄 취약지구 밝기 개선

○ 지방도 가로등 정비사업

- 사업개요

∙ 사업내용 : 주요 간선도로 가로시설 취약구간 가로등 신설 및 교체

∙ 사 업 량 : L=11.6km / 가로등 신설(34등) 및 노후등기구 교체(500등)

∙ 예 산 액 : 310백만원(도 155 / 시 155)

∙ 사업기간 : 2011. 1월 ～ 2011. 12월

- 추진실적

∙ 국지도 56호선(법원읍) 노후 가로등 교체(L=0.9km/34등 신설, 36등 철거)

- 향후계획

∙ 지방도 360호선(통일동산 지구) 노후등기구 교체공사 추진 500등

(등기구 교체 L=6.8km/300등,  글러브 교체 L=3.9km 200개)

□ 노점상 및 노상적치물 지도 단속 결과

○ 노점상 및 노상적치물 정비사업

- 사업개요

∙ 사업내용 : 파주시 주요 도로변 노점상 및 노상적치물 정비

∙ 단속인력 : 자체4명, 용역6명

∙ 예 산 액 : 300백만원

∙ 사업기간 : 2011. 1월 ～ 2011. 12월

- 추진실적

∙ 2011. 6월 : 2011년도 상반기 노점상 및 노상적치물 정비용역 수행중

※ 노점상 및 노상적치물 지도 단속 현황

구 분	단속건수	현장자진 철거	현장수거	과태료부과	비 고
계	949	949	-	-

- 향후계획

∙ 2011. 8월 : 2011년도 하반기 노점상 및 노상적치물 정비용역 착수

14-3 주차공간 확충 시민편익 제고

확인자  도시미관과장  김 태 회 (인)

작성자  주차시설팀장  이 성 용 (인)

□ 공릉천변 주차장 조성

○ 위    치 : 교하읍 하지석리 440번지(국토해양부)

○ 사 업 량 : 주차장 120면 조성(A=2,891㎡)

○ 사 업 비 : 32,000천원 (영농보상비 7,000 / 주차장 조성비 25,000)

○ 사업기간 : 2011. 7월 ~ 8월

○ 추진현황

- 서울지방국토관리청 사토장 지정 지연으로 사업지 성토 지연

※ 2011. 6. 13 : 사업지 성토완료(국토청 시공사)

2011. 6. 20 : 현장확인

2011. 7월   : 조성공사

□ 공영주차장 운영 수입 현황(주차장별)

(기준년도 2010년)

계	금 1,664,996,990원
금촌권 공영주차장(3개소)	금 814,769,630원
시청주차장	금 101,705,230원
통일동산 주차장	금 114,958,800원
임진각관광지 주차장	금 595,783,820원
노상주차장	금 37,779,510원

14-4 불법주정차 지도단속 및 과태료부과징수 현황

확인자  도시미관과장  김 태 회 (인)

작성자  주차시설팀장  이 성 용 (인)

작성자  주차질서팀장  박 노 정 (인)

□ 불법주정차 단속 및 과태료부과징수 현황

(단위 : 건/백만원)

구 분	단 속	부 과 ①		수 납 ②		과오납 ③		체 납 ④=①-(②-③)
	건 수	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합계	73,660	73,559	3,082	47,205	1,651	182	7	26,536	1,438
2010년	50,669	51,933	2,161	34,739	1,229	155	6	17,349	938
2011년	22,991	21,626	921	12,466	422	27	1	9,187	500

□ 불법주정차 단속용 CCTV 설치 현황

(단위 : 대)

구 분	설치수량	비 고
2010년	6대	금촌6
2011년	5대 (이전설치)	월롱2,법원2,금촌1

차량사업소 소관

15-1 자동차등록 관리현황

확인자  차량사업소장  심 재 희 (인)

작성자  차량등록팀장  김 영 기 (인)

□ 2010 자동차 등록현황

○ 자동차 등록현황(2010. 12 31 현재)

(단위: 대)

읍면동별	계	승용	승합	화물	특수	비고
계	140,569	104,456	10,191	25,670	252
교하읍	42,319	34,551	2,465	5,232	71
문산읍	17,497	12,126	2,212	3,120	39
조리읍	12,525	9,243	924	2,348	10
법원읍	5,532	3,688	478	1,354	12
파주읍	5,475	3,718	371	1,369	17
광탄면	6,036	3,849	428	1,756	3
탄현면	6,433	4,635	433	1,360	5
월롱면	5,760	4,390	314	1,041	15
적성면	3,462	1,806	252	1,041	3
파평면	3,425	2,459	148	809	9
금촌2동	16,890	12,869	1,022	2,970	29
금촌1동	14,731	10,806	1,116	2,770	39
장단출장소	484	316	28	140	0

○ 자동차 민원처리현황(2010. 1. 1 ～ 2010. 12. 31)

(단위: 건)

신규등록	이전등록	변경등록	말소	저당등록	증명발급	기타
6,998	10,455	57,007	11,341	5,665	136,791	2,924

□ 2011 자동차 등록현황

○ 자동차 등록현황(2011. 5. 31 현재)

(단위: 대)

읍면동별	계	승용	승합	화물	특수	비고
계	143,382	107,176	10,125	25,807	274
교하읍	43,757	35,872	2,480	5,316	89
문산읍	18,519	13,076	2,181	3,221	41
조리읍	12,566	9,274	897	2,385	10
법원읍	5,581	3,731	483	1,355	12
파주읍	5,461	3,712	353	1,380	16
광탄면	6,012	3,847	433	1,730	2
탄현면	6,449	4,631	430	1,379	9
월롱면	6,087	4,688	334	1,052	13
적성면	3,380	1,802	231	1,344	3
파평면	3,378	2,443	146	780	9
금촌2동	16,879	12,977	990	2,885	27
금촌1동	14,751	10,782	1,131	2,795	43
장단출장소	562	341	36	185	0

○ 자동차 민원처리현황(2011. 1. 1 ～ 2011. 5. 31)

(단위: 건)

신규등록	이전등록	변경등록	말소	저당등록	증명발급	기타
3,641	5,603	25,895	10,133	2,335	100,764	0

15-2 건설기계등록 관리현황

확인자  차량사업소장  심 재 희 (인)

작성자  차량등록팀장  김 영 기 (인)

□ 2010 건설기계 등록현황

○ 건설기계 등록현황(2010.12.31 현재)

(단위: 대)

기계별 읍면별	계	굴삭기	지게차	덤프트럭	콘크리트믹서트럭	기타
계	2,879	511	1,202	348	646	172

*건설기계관리정보시스템 고도화사업 미완료로 2011년 이전 자료 읍․면․동별 작성 불가

○ 건설기계 민원처리현황(2010. 1. 1 ～ 2010. 12. 31)

(단위: 건)

신규등록	이전등록	변경등록	말소	저당등록	면허증발급
259	538	2,246	71	551	523

□ 2011 건설기계 등록현황

○ 건설기계 등록현황(2011. 5. 31 현재)

(단위: 대)

기계별 읍면별	계	굴삭기	로더	지게차	덤프트럭	콘크리트믹서트럭	기타
계	2,903	490	101	1,243	359	632	78
교하읍	306	34	13	233	17	5	4
문산읍	166	29	4	58	31	41	3
조리읍	541	137	15	163	130	83	13
법원읍	123	23	3	82	1	12	2
파주읍	192	17	3	134	2	33	3
광탄면	299	25	23	214	10	22	5
탄현면	90	7	4	79	0	0	0
월롱면	206	22	9	99	18	40	18
적성면	53	22	9	21	0	0	1
파평면	70	22	5	33	8	0	2
금촌동	838	145	12	116	142	396	27
장단출장소	19	7	1	11	0	0	0

○ 건설기계 민원처리현황 (2011. 1. 1 ～ 2011. 5. 31)

(단위: 건)

신규등록	이전등록	변경등록	말소	저당등록	면허증발급
108	201	712	27	280	523

15-3 자동차 관련 체납 과태료 징수 현황

확인자  차량사업소장  심 재 희 (인)

작성자  차량등록팀장  김 영 기 (인)

작성자  차량관리팀장  김 수 태 (인)

작성자  차량세무팀장  김 복 숙 (인)

□ 자동차 관련 체납 과태료 징수 현황

(단위:백만원)

연도별	과목별	징수결정액		정리액		체납액		정리율
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
2010	계	21,697	2,240	14,322	914	7,375	1,326	40.8%
	등록위반	900	105	883	97	17	8	92.4%
	검사지연	5,298	575	3,691	268	1,607	307	46.6%
	책임보험	15,168	1,508	9,472	511	5,696	997	33.9%
	건설기계	292	43	244	31	48	12	72.1%
	이륜자동차	39	9	32	7	7	2	77.8%
2011	계	8,100	705	4,531	200	3,569	505	28.4%
	등록위반	402	41	378	36	24	5	87.8%
	검사지연	2,005	190	1,231	64	774	126	33.7%
	책임보험	5,625	468	2,868	96	2,757	372	20.5%
	건설기계	53	4	45	3	8	1	75.0%
	이륜자동차	15	2	9	1	6	1	50.0%