맑은물환경사업단

상하수도 분야 주요업무 추진계획

1		깨끗하고 안정적인 물 공급 체계 구축

◈ ‘2020년 도시기본계획’의 수요량에 대비한 상수도 시설 확충 조기 달성과 질 좋은 물 공급을 위한 2-Line 공급 체계 구축

□ 『2020년 대비 상수도시설 확충』 조기 달성

□ 추진현황

∙급수인구 : 668천명(2020년)

∙시설용량 : 258천톤/일(2020년 수요량 : 248천톤/일)

∙총사업비 : 922억원(기투자 798 / 2012년 124)

∙사업기간 : 2004년～2012년

□ 주요사업

∙상수도 3단계 확장사업(월롱 97,000㎥/일)

∙상수도 4단계 확장사업(탄현 10,900㎥/일, 적성 9,900㎥/일)

□ 균형발전을 위한 취약지역 상수도 확장

□ 추진현황

▪상수도보급률 : 2010년 92% ⇒ 2011년 97.2% ⇒ 2012년 98%

※ 농촌지역 상수도보급률 7년 앞당김

□ 주요사업

∙민북지역 상수도 확장사업(통일촌, 대성동, 해마루촌/ 14.7㎞/ 28억원)

∙신도시주변 농촌지역 출수불량개선(상지석동, 야당동/ 1.0㎞/ 10억원)

∙갈곡리 상수도 확장사업(5.0㎞/ 9억원)

□ 안정적이고 질 좋은 물 공급

□ 안정적인 물공급을 위한 취수원 2-LINE 구축(임진강, 팔당)

※ 주취수원(금파취수장) + 보조취수원(팔당)

∙2-LINE 구축 필요성

- 갈수기시 취수원 감소 대비 안정적 원수 확보

- 각종 수질사고 발생시 대체 취수원 긴급 확보

- 국가 비상사태 등 위기상황 발생시 취수 대응

□ 문산정수장 고도정수처리시설 가동(오존, 활성탄)

□ 내구연한(8년)이 지난 수도계량기를 친환경 소재로 교체

∙황동 → 플라스틱, 스테인리스 등 / 2,500여 가구

□ 1990년 이전에 매설된 노후관 교체(3.5km, 15억원)

※ 수도관 부식으로 인한 녹 제거로 맑은 물 공급

2		공공하수처리시설 건설

◈ 인구증가에 대비하고 농촌지역 하수처리를 위한 공공하수처리시설 건설로 생명력 있는 물(水)환경 조성

□ 현   황

□ 운영 중 : 13개소, 122,420톤

∙공공하수 : 8개소, 122,000톤 / 소규모 : 5개소 420톤

□ 추진 중 : 5건, 34,600톤

∙인구증가 대비 하수처리시설 증설(문산, 통일동산, 금촌)

∙하수처리시설 농촌지역 확대(탄현, 파평)

구분	사업명	사업량	사업비(억원)				사업기간	현공정
			총사업비	기투자	2012년	향후
계	5개소	34,600톤/일	1,059	600	163	296
증설	문산	9,500톤/일	268	259	9	-	2007 ~ 2012	99%
	통일동산	6,000톤/일	229	167	62	-	2008 ~ 2012	85%
	금촌	17,000톤/일	352	126	79	147	2008 ~ 2013	42%
신설	탄현	800톤/일	90	38	6	46	2009 ~ 2014	착공
	파평	1,300톤/일	120	10	7	103	2009 ~ 2014	계약준비

※ 하수도 보급률 68% ⇒ 2014년 83%

□ 기대효과

□ 인구증가에 대비하고 미처리 구역인 농촌 취락지역 하수도         확대 보급으로 지역균형발전에 기여

3		청정(淸淨)도시 구현을 위한 하수도 정비

◈ 체계적인 하수관거 정비를 통한 친환경 도시를 조성하고   저지대 하수도 설치로 침수피해 사전예방

□ 하수관거 정비

□ 재정사업 3개소, 민자사업(BTL) 1개소

∙농촌지역까지 하수관거 보급 확대

∙민자사업을 통한 전지역 하수관거 조기 설치

사업명	사업량	사업비(억원)				사업기간	현공정
		총사업비	기투자	2012년	향후
계	211㎞	1,717	291	42	1,384
문산관거	42㎞	424	260	21	143	2005 ～ 2013	65%
탄현관거	21㎞	188	25	12	151	2009 ～ 2014	착공
파평관거	28㎞	259	6	3	250	2009 ～ 2014	설계완료
2011년 BTL	120㎞	846		6	840	2011 ～ 2017	기본 설계중

※ 하수관거 보급률 71% ⇒ 2016년 87%

□ 기대효과

∙개인하수처리시설 설치면제에 따른 주민부담 경감

∙공공하수처리시설 운영효율 증대 및 방류하천 수질개선

∙배수불량 우수관거 정비를 통한 침수피해 사전예방

□ 저지대 침수지역 하수도 설치사업

□ 위    치 : 조리읍 오산리, 동패동, 송촌동 일원

□ 사 업 량 : L=0.25㎞

□ 사 업 비 : 205백만원(시비)

□ 사업기간 : 2012. 01 ~ 2012. 06

□ 기대효과 : 침수피해 방지 및 지역주민 생활환경 개선

4		약수터 관리 체계 구축

◈ 각 읍․면․동에 산재되어 관리가 미흡한 약수터를 효율적인

관리체계의 구축으로 건강한 생활환경 조성

□ 현  황

□ 약수터 : 40개소

∙지정약수터 : 14개소 / 미지정 약수터 : 26개소

※ 상시 이용인구가 50인 이상일 경우 지정

∙매월 1회 수질검사 실시 → 홈페이지에 게시, 표지판 부착

□ 문제점

□ 공원 및 산림 내에 설치된 약수터의 청결 및 수질관리가 어려움

∙동물 및 등산객들로 인한 오염발생(각종 세균증가)

□ 깨끗하고 위생적인 관리 개선 요구 민원 증가

∙직원1명이 각 읍․면․동에 산재되어 있는 약수터 관리 한계

□ 개선방안

□ 효율적인 관리체계 확립

∙사회단체 등 지역주민 활용한 약수터별 관리책임단체 위촉

시		읍․면․동		지정단체
․수질검사 ․교육 및 포상 ․인센티브제공		․약수터별 관리책임단체(자)지정
				․주변청결 및 소독활동

환경시설 분야 주요업무 추진계획

1		음식물쓰레기 배출방법 개선

◈ 음식물쓰레기 감량화 정책 시행 및 자발적인 시민 참여를

통한 사회․경제적 비용절감

□ 추진배경

□ 2013년도 음폐수 해양투기 전면 금지 및 녹색성장위원회「음식물 쓰레기 줄이기 종합대책」추진으로 2012년까지 발생량 20%이상 저감

□ 현황

□ 수거량 : 25,232톤/년

□ 처리비용 : 약 32억원/년 (20% 줄일 경우 약 6억원 절감)

□ 주민이 부담하는 처리비용 비율이 낮아 음식물쓰레기 과다 배출

(주민부담률 : 33.2%)

□ 추진계획

□ 공동주택 음식물쓰레기 수거 수수료 개선(정액제 → 종량제)

∙음식물쓰레기 계량 및 인식장치 설치

- 2011년 : 546세대 시범사업 / 22백만원

- 2012년 : 32,000세대 / 560백만원

- 2013년 : 37,000세대 / 640백만원(공동주택 전체 확대 및 정착)

□ 음식물쓰레기 줄이기 운동 참여 분위기 확산

∙시민주도의 음식문화개선 교육․홍보 추진

∙학교, 음식점, 군부대 등 다량배출자의 자발적 동참 유도

∙감량우수 세대 및 기관 인센티브 제공

2		건강한 생활환경 조성

◈ 공중화장실을 위생적으로 관리하고 생태하천조성 및 운정 스포츠센터 개장으로 시민의 건강한 생활환경 조성

□ 가고 싶은 공중화장실 운영

□ 공중화장실 현황 : 466개소(공중 : 377개소 / 개방 : 89개소)

□ 필요성

∙공중화장실에 대한 시민들의 위생편의 욕구 증대

□ 추진계획

∙공중화장실 표찰 제작(관리책임자 지정운영) : 466개소

∙사회단체 등을 통한 상시점검체계 구축

∙공중화장실 환경개선사업 : 30개소 30,000천원

- 시각장애인을 위한 음성안내 장치 설치 등

□ 소년소녀가장, 복지시설 등 사회적 약자 거주시설의 화장실개선사업 : 10개소 50,000천원

□ 자연이 숨 쉬는 생태하천 조성

□ 하천 자정능력, 친수기능 등을 복원하여 친환경적인 생태하천 조성으로 자연교육 장소 제공

∙헤이리 : 1.2km / 3,000백만원(2012년 ∼ 2013년)

∙금촌천 : 3.7km (2012년 타당성 조사 및 실시설계)

□ 운정 스포츠센터 개장

□ 위    치 : 파주시 와동동 993번지 일원

□ 시설규모 : 지하1층, 지상2층 / 건축연면적 : 9,994㎡

□ 주요시설 : 수영장(50m×10레인), 헬스장, 에어로빅장 등

□ 개 장 일 : 2012. 3월중(예정)

3		친환경 물관리 추진

◈ 공장 증축에 대비한 폐수처리장을 증설하고 하천으로    배출되는 오염물질의 총량을 관리하여 목표수질 달성

□ 산업단지 폐수종말처리시설 설치

□ 운영 중 : 3개소, 124,000톤/일(LCD 10.5만톤, 월롱 9천톤, 문산 1만톤)

□ 추진 중 : 3건, 133,000톤/일

사업명	사업량 (톤/일)	사업비(억원)				사업기간	현공정
		계	기투자	‘12년	향후
계	133,000	1,304	273	628	403
파주LCD (2-2단계)	35,000	150 (국비)	30	120		2011∼2012	공사중 92%
파주LCD (3단계)	90,000	976 (자부담)	240	450	286	2011∼2013	공사중 45%
월롱첨단 (2단계)	8,000	178 (국비)	3	58	117	2011∼2013	실시설계중

□ 폐수처리장 신재생에너지 생산

□ 태 양 광 : 월롱첨단(190kw 1,364백만원)

□ 소 수 력 : 파주LCD(150kw증설 500백만원)

□ 기대효과 : 전력절감110백만원/년, 온실가스감축량 657CO2톤/년

□ 한강수계 수질오염총량관리 추진

□ 하천유입 오염물질 총량 관리 ⇒ 총량범위 내 개발사업 허용

□ 수질오염총량제 시행계획 수립 (2012. 9 ∼ 2013. 5)

∙사 업 비 : 85백만원(한강수계관리기금)

□ 시행계획 수립을 위한 사전준비

∙오염원 조사 실시 (2012. 2 ∼ 6)

- 조사대상 : 생활계, 산업계, 축산계, 토지계 등

∙비점오염저감시설 타당성 조사 (2012. 2 ∼ 2012. 11)

- 사 업 비 : 98백만원(시비)