도시산업위원회

2012년 행정사무감사자료

맑은물환경사업단

목 차 【상하수도과】
19 - 1	상수도 확장 추진
19 - 2	공공하수처리시설 건설
19 - 3	간이상수도 및 약수터 현황 및 관리 현황
19 - 4	상수원보호구역 주민지원사업 집행내역 및 집행액
19 - 5	구제역 관련 급․배수관 확장공사 추진현황

【환경시설과】
20 - 1	음식물쓰레기 배출방법 개선
20 - 2	공중화장실 관리 현황
20 - 3	금촌천 도심하천 생태복원사업, 헤이리 생태하천 복원사업 추진현황 및 향후계획
20 - 4	환경기초시설 정비
20 - 5	친환경 물관리 추진
20 - 6	민간위탁시설 연구용역 결과 제출
20 - 7	파주시 스포츠센터(민간위탁금) 운영현황(2011년) 및 문제점, 개선방안

상하수도과 소관

19-1 상수도 확장 추진

확인자  상하수도과장  김 재 군 (인)

작성자  상수시설팀장  박 기 홍 (인)

□ 상수도 확장 추진

(단위 : Km, 백만원)

사 업 명	사업량	사업비					사업기간	현공정
		계	국비	도비	시비	기타
계	32.01	70,915	-	474	70,441	-
봉서2리 상수도	0.56	200	-	-	200	-	2012. 6	공사중 99%
등원2리 상수도	0.48	100	-	-	100	-	2012. 5	공사중 100%
운정 야당간	0.06	1,000	-	-	1,000	-	2012. 6	공사중 57%
갈곡리 상수도	5.91	900	-	-	900	-	2012. 6	공사중 95%
민북지역 상수도	8.9	1,580	-	474	1,106	-	2012. 10	발주 준비중
출수불량 및 취약지	16.1	1800	-	-	1800	-	2012. 10
상수도3단계	배수지 (2개소)	49,600	-	-	49,600	-	2004 ~ 2012
상수도4단계	배수지 (2개소)	15,735	-	-	15,735	-	2010 ~ 2012

□ 기대효과

○ 상수도 공급을 통한 깨끗하고 안정적인 생활용수 공급

○ 주 생활 환경 개선을 통한 삶의 만족도 향상

19-2 공공하수처리 시설 건설

확인자  상하수도과장  김 재 군 (인)

작성자  하수시설팀장  유 창 민 (인)

하수처리팀장  임 상 범 (인)

□ 사업 추진현황

○ 공공하수처리시설 건설(증설 3, 신설 2)

(단위 : 톤/일, 백만원)

사업명	사업량	사업비					사업기간	현공정
		계	국비	도비	시비	기타
계	34,600	110,686	32,158	11,063	11,062	56,403
문산 증설	9,500	26,818	4,524	2,262	2,261	17,771	2008 ~ 2012	공사중 99%
통일동산 증설	6,000	22,981	-	-	-	22,981	2008 ~ 2012	공사중 97%
금촌 증설	17,000	35,214	10,078	5,039	5,039	15,058	2008 ~ 2013	공사중 57%
탄현 신설	800	13,673	9,156	1,962	1,962	593	2008 ~ 2014	공사중 5%
파평 신설	1,300	12,000	8,400	1,800	1,800	-	2008 ~ 2014	발주 준비중

○ 하수관거 정비(재정 3, 민자 1)

(단위 : Km, 백만원)

사업명	사업량	사업비					사업기간	현공정
		계	국비	도비	시비	기타
계	212	168,140	59,059	-	25,970	83,111
문산 관거	46	43,883	30,443	-	13,440	-	2005 ~ 2013	공사중 65%
탄현 관거	21	14,106	9,720	-	4,386	-	2009 ~ 2014	공사중 5%
파평 관거	28	25,930	18,119	-	7,811	-	2009 ~ 2014	발주 준비중
2011년 BTL	117	84,221	777	-	333	83,111	2011 ~ 2017	협상중

□ 기대효과

○ 미처리 지역 하수 조기 처리를 통한 방류하천 수질개선

○ 개인하수처리시설 설치 면제에 따른 주민부담 경감

○ 공공하수처리시설 운영효율 증대 및 친환경 도시조성

19-3 간이상수도 및 약수터시설 현황 및 관리 현황

확인자  상하수도과장  김 재 군 (인)

작성자  상수시설팀장  박 기 홍 (인)

□ 간이상수도 수질검사 및 조치 현황

지역	시설명	수 질 검 사 결 과						비고
		2011년도				2012년도
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기
총계		31개소	24개소	19개소	16개소	13개소	10개소
금촌	창골	적합	적합	적합	적합	적합	적합
문산	운천1리	적합	-	-	-	-	-	전환
	당동3리	적합	-	-	-	-	-
법원	점동	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	설원동	적합	적합	적합	적합	적합	-	전환
	황샛말	적합	적합	-	-	-	-
	양가터	적합	적합	적합	적합	적합	부적합	소독
	부작골	적합	적합	적합	적합	적합	적합
월롱	용상동	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	야동	적합	적합	-	-	-	-	전환
	영태4리	적합	적합	적합	적합	적합	부적합	소독
탄현	성동대촌	적합	적합	적합	적합	-	-	전환
	샘텃말	적합	적합	적합	적합	-	-
	만우리	적합	적합	적합	적합	-	-
광탄	양지동	적합	적합	-	-	-	-	전환
	옥계동	적합		-	-	-	-
	방축1리	적합	-	-	-	-	-
	샛터	적합	-	-	-	-	-
	안골	적합	-	-	-	-	-
파평	웃장마루	적합	적합	-	-	-	-	전환
	빙곡동	적합	적합	적합	적합	적합	-
	용산골	적합	-	-	-	-	-
	장담동	적합	-	-	-	-	-
적성	자장리	적합	적합	적합	적합	적합	-	전환
	장현1리	적합	적합	적합	-	-	-
	장현2리	적합	적합	적합	-	-	-
	객현2리	적합	적합	적합	-	-	-
	설마리	적합	적합	적합	적합	적합	부적합	소독
장단 출장소	백연리	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	동파리	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	조산리	적합	적합	적합	적합	적합	적합

□ 약수터 수질점검 및 조치 현황

지역	시설명	수 질 검 사 결 과
		2011년							2012년
		3월	5월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
문산	도토리	적합	부적합	부적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
파주	연풍3리	적합	부적합	부적합	적합	적합	부적합	적합	적합	적합	적합	적합
	안용주골	적합	적합	부적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
법원	대 능	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	천 현	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	부적합	적합	적합
	율 곡	적합	부적합	부적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
교하	심 학	적합	부적합	부적합	부적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	고인돌	부적합	부적합	부적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	-	-
월롱	등정골	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
광탄	묘 지	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	감사교육원	적합	적합	부적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
파평	두 포	적합	적합	부적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	새 일	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
금촌	시 청	적합	-	적합	적합	적합	적합	동결	동결	동결	적합	적합

※ 2011년 6~7월 지속적인 장마로 채수 미시행

□ 약수터 시설 유지관리 및 지원현황

(단위 : 천원)

연도	구분	유지관리 및 지원현황	사업실시	예산액	비고
	총계			5,309
2011년	공통	채수용 아이스박스 구매	2011.6.	385
	한우물	약수터 배관공사 및 되메우기	2011.7.	980
	천현	약수터 지붕보수 및 길이연장	2011.7.	1,532
2012년	고인돌	시건장치 및 벤치설치	2012.4.	400
	도토리	약수터 지붕확장 및 보수	2012.4.	2,012

19-4 상수원보호구역 주민지원사업 집행내역 및 집행액

확인자  상하수도과장 김재군 (인)

작성자  수도행정팀장 이현주 (인)

□ 2011년도

(단위 : 천원)

연번	사업명	예산액	집행액	잔액	지원내역	준공일	비고
계		180,000	180,000	0
1	상수원보호구역 주민지원사업	137,500	137,500	0	유기질비료 15,600포	2011. 3.30
2	상수원보호구역 주민지원사업	17,000	17,000	0	해충기피제 720포/170병	2011. 3.30
3	상수원보호구역 주민지원사업	25,500	25,500	0	우렁이종패 5,100kg	2011. 6.29

□ 2012년도

(단위 : 천원)

연번	사업명	예산액	집행액	잔액	지원내역	준공일 (준공예정)	비고
계		179,997	179,997	0
1	상수원보호구역 주민지원사업	138,059	138,059	0	유기질비료 16,080포	2012. 3.30
2	상수원보호구역 주민지원사업	17,438	17,438	0	해충기피제 700포/172병	2012. 6.15
3	상수원보호구역 주민지원사업	24,500	24,500	0	우렁이종패 5,100kg	2012. 6.15

19-5 구제역관련 급․배수관 확장공사 추진현황

확인자  상하수도과장  김 재 군 (인)

작성자  상수시설팀장  박 기 홍 (인)

□ 구제역 상수도 확장공사

○ 상수도 관로 확장공사

- 사 업 비 : 37,765백만원 (국 26,911  / 도 5,426  / 시 5,428)

- 착 공 일 : 2011. 3. 8

- 준 공 일 : 2012. 3. 27

- 사 업 량 : 289.4km

․ 가압장 13개소 신설

․ 상수관로 289.4 km

․ 공급세대수 9,376세대

․ 아스콘 전면 포장복구 L=127km

□ 추진성과

○ 구제역 가출 매몰지 일원에 깨끗한 수돗물을 공급하고자 추진한 가축 매몰지

상수도 보급 사업을 통해 급수보급률 향상에 크게 기여함.

○ 가축매몰지 상수도 보급 사업을 당초 상수도 보급률 계획을 7년 앞당김

(당초 92% ⇒ 97%)

환경시설과 소관

20-1 음식물쓰레기 배출방법 개선

확인자  환경시설과장 박찬규  (인)

작성자  환경관리팀장 박준태  (인)

□ 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업 추진현황

○ 2011년 시범사업 (시 20백만원)

- 2011. 11.   : 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업 설명회 및 접수

- 2012. 1. 19 : 주민설명회 (금촌 건일장미 5차, 문산 자연앤꿈에그린 6단지)

- 2012. 2.  7 : 시범사업 준공 (RFID 개별계량기기 10대 546세대)

○ 2012년 구축사업 (560백만원, 국 168 / 도 196 / 시 196)

- 2012. 3. 29 : 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업 설명회

- 2012. 4. 12~13 : RFID개별계량기기 설치 공동주택 현장 견학

- 2012. 4. 30 : 시범사업 공동주택 신청 (41개단지, 22,405세대)

- 2012. 5. 18~29 : 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업 입찰공고

- 2012. 6.  1 : 제안서 평가 위원회

- 2012. 6 ~  : 27,000세대 RFID개별계량기기 설치

□ 음식물쓰레기 종량제 실시에 따른 사업효과

○ RFID개별계량기기 설치에 따른 음식물쓰레기 배출량 25% 감량효과

20-2 공중화장실 관리 현황

확인자  환경시설과장  박 찬 규 (인)

작성자  환경관리팀장  박 준 태  (인)

□ 공중화장실 현황

○ 2012년도

(단위 : 개소)

총 계	공중화장실	개방화장실	비고
496	427(공공 239, 민간 257)	70(공공 20, 민간 50)

□ 공중화장실 환경개선사업 추진현황

○ 공중화장실 현황

(단위 : 개소)

총계	개방 화장실	공공시설	교육시설 복지시설	주유소	기타
496	70	139	131	94	62

○ 환경개선 사업 계획

- 표찰 부착 사업

· 2012. 5. : 현장 조사

· 2012. 6. : 미부착 및 불량 표찰 개선 조치(총350개)

- 장애인 음성안내 시스템 설치사업

· 2012. 5. : 현장 조사

· 2012. 6. : 장애인 음성안내 시스템 장비 설치(총30개)

□ 소년소녀가장, 복지시설 화장실 개선사업 추진현황

○ 2011년도 추진현황(시 50백만원)

- 2011. 2. ~ 6. : 개선사업 실시

· 장애인종합복지관, 새기쁨지역아동센터(1차)

· 촛불공동체, 열매맺은지역아동센터, 다문화가정(2차)

· 장애인연합회, 아들의집(3차)

○ 2012년도 추진현황

- 2012. 3. : 개선사업 대상지 선정(1차) : 4개소

· 장애인종합복지관, 다문화가정(2), 평화원

- 2012. 6. : 개선사업 대상지 선정(2차) : 5개소

- 2012. 7. : 준공예정

20-3 금촌천 도심하천 생태복원사업,

헤이리 생태하천 추진현황 및 향후계획

확인자  환경시설과장  박 찬 규 (인)

작성자  수질환경팀장  허 순 무  (인)

□ 금촌천 도심하천 생태복원사업

○ 사업개요

- 위    치 : 금촌동, 금촌역 일원

- 사업기간 : 2011년 ~ 2014년

- 사 업 량 : 3.7km

- 사 업 비 : 26,000백만원(2012년 500백만원)

○ 추진실적 및 계획

- 2011. 6.10 : 금촌천 도심하천 생태복원사업 협약체결

- 2011.12.26 : 기본계획 수립 완료

- 2012. 5.25 : 기본계획 기술검토 결과 통보(환경부)

- 2012. 8.   : 실시설계용역 착수

- 2013년 ~ 2014년 : 공사착공 및 준공

□ 헤이리 생태하천 복원사업

○ 사업개요

- 위    치 : 탄현면 통일동산 헤이리마을 일원

- 사업기간 : 2011년 ~ 2013년

- 사 업 량 : 1.2km

- 사 업 비 : 3,000백만원(2011년 142백만원, 2012년 200백만원)

○ 추진실적 및 계획

-  2011. 5.30 : 기본 및 실시설계 착수(142백만원)

-  2011.11.25 : 기본 및 실시설계 완료

-  2012. 4.30 : 생태하천 복원사업 심의결과 통보(경기도)

-  2012. 10. ~ 2013. 12. : 공사착공 및 준공

20-4 환경기초시설 정비

확인자  환경시설과장  박 찬 규 (인)

작성자  환경시설팀장  우 상 완 (인)

□ 폐열(스팀) 관로시설 추진현황

○ 현황

- 위    치 : 파주시환경관리센터 ~ LGD

- 사 업 량 : 5.5㎞ 관로매설

- 사업기간 : 2009. 9. ~ 2010. 4.

- 사 업 비 : 103억원(민간 선투자 후 열판매수익금으로 상환)

○ 추진실적

구분	공급량(톤/월)	판매액(백만원)	비 고
계	150,971	4,939
2010년도	72,512	2,218
2011년도	62,785	2,046
2012년도	15,674	675

□ 가축분뇨 공공처리시설 개선사업 추진현황

○ 2011년 개선사업 추진현황

(단위 : 백만원)

구분	사업비	사업기간	비 고
계	1,070
가축분뇨공공처리시설 한외여과막구매설치	300	2011. 4. ~ 2011. 6.
축분혼합처리시설 고액분리기 및 MBR막 구매 설치	570	2011. 4. ~ 2011. 7.
가축분뇨공공처리시설 브로워 구매설치	200	2011. 10. ~ 2011. 12.

○ 2012년 개선사업 추진현황

(단위 : 백만원)

구분	사업비	사업기간	비 고
계	790
축분혼합처리시설 도장공사 및 MBR막 구매 설치	240	2012. 4. ~ 2012. 5.
가축분뇨공공처리시설 고속침전기 및 한외여과막 구매설치	300	2012. 4. ~ 2012. 7.
가축분뇨공공처리시설 분리탈수기 구매설치	250	2012. 4. ~ 2012. 7.

□ 환경관리센터 매립시설 설치(2단계 증설) 추진현황

○ 사업개요

- 목   적 : 파주·김포지역 생활폐기물 소각 후 발생하는 소각재 매립시설 1단계가 2013년 매립 완료 예정에 따라 2단계 매립시설 증설

- 사업규모 : 매립용량 67,073㎥

구분	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	계
매립용량(㎥)	55,463	67,073	95,173	102,003	58,608	378,320
비고	2013년 매립완료예정	설치사업 대상

- 사 업 비 : 2,393백만원(국비 30 / 도비 35 / 시비 35 )

○ 추진실적 및 계획

- 2011. 4. : 실시설계 용역

- 2012. 3. : 위·수탁협약 체결(市↔한국환경공단)

- 2012. 6. : 발주

- 2012. 7. : 착공

- 2012.12. : 준공

□ 운정신도시 자동집하시설 추진현황

○ LH분 자동집하시설 현황(시공사 : 태영건설, 공법사 : 엔백)

위 치	사업기간	사업비	주요시설	투입구(‘12.3월 현재)
운정 1,2지구	2007. 9. ~ 2012. 8.	1,205,000 백만원	집하장 4개소 수송관로 70.5㎞ 투입시설 988개소	민자분 : 11단지, 247개 LH분 : 9단지, 203개 학교 : 11개소, 33개

○ 주요추진사항(2011년)

- 2011. 6. 1~11.31 : 시운전 실시

- 2011. 9. 26 : 합동점검실시(관련공무원 및 전문가 참여)

- 2011.10. 17 : 우선협상대상자 선정 ☞엔백(주)&(주)태영건설

- 2011.11. 24 : 최종 점검 실시(합동점검 조치사항 확인)

- 2011.11. 30 : 민간위탁운영 계약

○ 주요추진사항(2012년)

- 2012. 6.  : 인계·인수

20-5 친환경 물관리 추진

확인자  환경시설과장  박 찬 규 (인)

작성자  환경관리팀장  허 순 무  (인)

□ 산업단지 폐수종말처리시설 설치 추진현황

사업명	사업량 (톤/일)	사업비(억원)				사업기간	현공정
		계	기투자	2012년	향후
계	133,000	1,304	273	745	286
파주LCD (2-2단계)	35,000	150 (국비)	30	120		2011~2012	공사중 98%
파주LCD (3단계)	90,000	976 (자부담)	240	450	286	2011~2013	공사중 60%
월롱첨단 (2단계)	8,000	178 (국비)	3	175		2011~2013	공사중 10%

○ 파주LCD(2-2단계) 폐수종말처리시설 설치

- 2011. 2.22 : 공사착공

- 2011. 5. 1 : 종합시운전 개시

- 2012.10.  : 공사준공

○ 파주LCD(3단계) 폐수종말처리시설 설치

- 2011. 4.25 : 공사착공

- 2012. 6. 1 : 3-1단계(45,000톤/일) 완료 및 시운전개시

- 2013.12.  : 3-2단계(45,000톤/일) 준공예정

○ 월롱첨단(2단계) 폐수종말처리시설 설치

- 2011.11.29 : 실시설계 착수

- 2012. 5.25 : 실시설계 완료 및 공사착공

- 2013. 7.  : 공사준공

□ 신재생에너지 지방보급사업 추진현황

○ 파주LCD폐수처리장 소수력발전사업

- 사 업 량 : 330kw(2011년 220, 2012년 110)

- 사업기간 : 2011년 ~ 2012년

- 총사업비 : 1,925백만원(2011년 1,425  2012년 500)

- 추진실적 및 계획

· 2011.12.26 : 1단계 준공(220kW/1,425백만원)

· 2012. 5. ~ 7. : 2단계 증설(110kW/500백만원)

○ 폐수처리장 태양광발전사업

- 사 업 량 : 409kw(파주LCD 100kw, 문산첨단 35kw,  월롱첨단274kw)

- 사업기간 : 2010년 ～ 2012년

- 총사업비 : 2,538백만원(2010년 924, 2011년 250, 2012년 1,364 )

- 추진실적 및 계획

· 2010.11. 8 : 파주LCD 태양광 발전사업 준공(100kW/924백만원)

· 2011.12.26 : 문산첨단 태양광 발전사업 준공 (35kW/250백만원)

· 2012. 4. ~ 12. : 월롱첨단 태양광발전사업 추진(274kW/1,364백만원)

20-6 민간위탁시설 연구용역 결과 제출

확인자  환경시설과장  박 찬 규 (인)

작성자  환경시설팀장  우 상 완 (인)

□ 2011년도

구분	사업비	사업기간	비고(용역결과)
2012년도 파주시환경관리센터 민간위탁운영비 산정 원가계산용역	19백만원	2011. 4. ~ 2011. 8.	▪소각·매립·스팀공급시설 ⇒ 6,077백만원 ▪재활용선별장 ⇒ 1,147백만원 ▪스포츠센터 ⇒ 2,024백만원
2012년도 운정환경관리센터 민간위탁운영비 산정 원가계산용역	16백만원	2011. 7. ~ 2011.10.	▪소각·음식물처리시설 ⇒ 4,345백만원 ▪스포츠센터 ⇒ 1,480백만원

□ 2012년도

구분	사업비	사업기간	비고(용역중)
2013년도 환경관리센터 민간위탁운영비 산정 원가계산용역	20백만원	2012. 4. ~ 2012. 8.	▪파주시환경관리센터 (소각·매립·스팀공급시설/ 재활용선별장/스포츠센터) ▪운정환경관리센터 (소각·음식물처리시설/ 스포츠센터)

20-7 파주시 스포츠센터(민간위탁금) 운영현황(2011년) 및 문제점, 개선방안

확인자  환경시설과장  박 찬 규 (인)

작성자  환경시설팀장  우 상 완 (인)

□ 운영현황

○ 위    치 : 탄현면 낙하리 153번지 일원

○ 시설규모 : 7,144(㎡) / 지상3층, 지하1층

○ 주요시설 : 수영장(25M×11레인), 에어로빅장, 헬스장, 스쿼시장 등

○ 위탁현황

- 운 영 사 : 코오롱글로벌(주) / 34명

- 위탁기간 : 2009. 1. 1 〜 2011.12.31

- 회 원 수 : 1,600명/월

- 2011년 정산결과

(단위 : 백만원)

수입액	지출액	적자부담금
		계	파주시(88%)	수탁사(12%)
995	1,943	948	834	114

□ 문제점

○ 개장 후 10여년 경과되어 운정, 청석스포츠센터에 비해 시설물 전체 노후화

○ 젊은 층의 수요와 사회추세를 반영한 프로그램 부족

□ 개선방안

○ 중·장기적 예산확보를 통한 노후화 개선 및 사회추세를 반영한 신규 프로그램 개설