맑은물환경사업단

보   고   순   서

□ 주요업무 추진계획
【상하수도 분야】
○ 민북지역 상수도 확장 추진		81
○ 공공하수처리시설 건설		82
○ 청정(淸淨)도시 구현을 위한 하수도 정비		83
○ 물 재이용 관리계획 수립 용역		84
【환경시설 분야】
○ 대형폐기물 수거체계 개선		85
○ 환경기초시설 통합 운영		86
○ 파주LCD 폐수종말처리시설 설치 사업(4단계)		87
○ 한강수계 수질오염총량제 추진		88

상하수도 분야 주요업무 추진계획

1		민북지역 상수도 확장 추진

◈ 안전한 상수도 공급으로 주민 및 병영 생활 환경 개선

◈ 지역간 균형 발전 도모

□ 개 요

□ 공급대상 : 3개 마을 / 6개 군부대 (수혜대상 : 3,361명)

□ 사업시기 : 2011 ∼ 2014

□ 사 업 량 : 상수도 관로매설(L=35.7km), 가압장 1개소

□ 사 업 비 : 10,200백만원

□ 그간 추진사항

□ 2012. 11월 : 통일촌 및 군부대(경의선경비대, 도라대대) 상수도 공급 완료

□ 2013. 12월 : 대성동 및 군부대(JSA대대) 상수도 공급완료

□ 향후계획

□ 해마루촌 상수도 공급

□ 상수도관로(D150mm 이하, L= 6.48km) 매설

□ 사 업 비 : 1,337백만원 (도 267,  시 1,070)

□ 기대효과

□ 노후된 지하수 관정 시설과 지하수원 고갈로 불편을 겪는      민북지역 주민에게 안전하고 깨끗한 상수도 공급

2		공공하수처리시설 건설

◈ 인구증가에 대비하고 농촌지역 하수처리를 위한 공공   하수처리시설 건설과 생명력 있는 물(水)환경 조성

□ 사업목적

□ 인구증가에 대비하고 농촌지역 하수처리를 위한 공공하수처리시설 건설로 생명력 있는 물환경 조성

□ 사업현황

□ 운영중 : 15개소, 137,920톤

(공공하수: 10개소 137,500톤, 소규모 : 5개소 420톤)

□ 사업중 : 4건 19,800톤/일(증설: 금촌,적성, 신설: 탄현,파평)

구분	사업명	사업량 (톤/일)	사업비(억원)				사업기간	현공정
			총사업비	기투자	2014년	향후
계		19,800	720	486	189	45
증설 사업	금촌	17,000	388	322	66		2008∼2014	88%
	적성	700	75	7	45	23	2013∼2015	용역중
신설 사업	탄현	800	122	67	45	10	2008∼2014	54%
	파평	1,300	135	90	33	12	2008∼2015	7.7%

※ 하수시설 보급률 83% → 2014년 88% → 2015년 91.6%

□ 기대효과

□ 하수처리구역 확대를 통한 도시, 농촌지역의 균형발전 기여

□ 미처리 하수 하천유입 차단으로 수질개선

3		청정(淸淨)도시 구현을 위한 하수도 정비

◈ 체계적인 하수관로 정비를 통한 친환경 도시조성    및 침수피해 예방

□ 사업현황 : 재정사업 4개소, 민자사업(BTL) 1개소

구분	사업명	사업량 (㎞)	사업비 (억원)				사업기간	현공정
			총사업비	기투자	2014년	향후
계	-	228	1,691	635	463	593	-
재정 사업	문산관거	46	452	384	68	-	2005～2014	84%
	탄현관거	21	145	84	61	-	2009～2014	55%
	파평관거	28	214	85	47	82	2009～2015	40%
	적성(가월․주월)관거	6	50	-	5	45	2014～2016	신규
민자 사업	11년BTL	127	830	82	282	466	2011～2016	15%

※ 하수관거 보급률 73% → 2014년 77% → 2016년 88%

□ 기대효과

□ 농촌 취락지역 하수도 확대 보급 ⇒ 지역균형발전 기여

□ 배수불량 우수관거 정비 ⇒ 침수피해 예방

□ 미처리 하수 하천유입 차단 ⇒ 친환경 도시 조성

4		물 재이용 관리계획 수립 용역

◈ 물의 재이용을 촉진하여 물 자원을 효율적으로 활용

□ 개요

□ 목    적 : 환경부 물 재이용 기본계획(2011∼2020) 수립에 따라 하위계획인 『파주시 물 재이용 관리계획』을 수립하여 물 자원을 효율적으로 활용

□ 용역기간 : 2013. 7월 ∼ 2014. 6월

□ 용역내용 : 물재이용 현황 및 목표설정․물 재이용에 따른  하천영향 분석․사업계획 수립․사업시행 및 재정계획

□ 사 업 비 : 700백만원(기투자 300, 2014년 400)

□ 그간 추진사항

□ 2013. 7.30. : 용역착공

□ 2013. 8.14. : 용역착수 보고

□ 2013.10.25. :　물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례안 입법예고

□ 2013.12.12. :　2013년 제13회 파주시 조례규칙심의회 개최결과 회신

□ 향후 추진계획

□ 2014. 1월 : 1차 중간보고

□ 2014. 3월 : 2차 중간보고

□ 2014. 5월 : 3차 중간보고

□ 2014. 6월 : 과업 준공

□ 기대효과

□ 빗물(지붕)이용시설, 중수도 및 하․폐수처리수 재이용 관리계획을 수립하여 물 자원을 효율적으로 활용

환경시설 분야 주요업무 추진계획

1		대형폐기물 수거체계 개선

◈ 폐가전 무료수거

◈ 대형폐기물 인터넷 배출 신고

□ 추진방향

❍ 대형폐기물 인터넷 배출신고 및 폐가전 무료 수거를 통하여 불법처리로 인한 2차 환경오염을 예방하고 시민 편의를 도모하고자 함.

□ 추진계획

❍ 폐가전 무료수거

▪「파주시 생활폐기물 배출방법 및 수수료 등의 부과·징수에 관한 조례」개정

⇒ 대형폐기물 수집운반처리 수수료 중 폐가전 수수료 면제

❍ 대형폐기물 인터넷 배출신고

▪인터넷으로 대형폐기물 배출 신고 및 수수료를 납부할 수 있도록 파주시 홈페이지에 컨텐츠 추가

□ 향후계획

❍ 2014. 2월 : 파주시 생활폐기물 배출방법 및 수수료 등의 부과징수에 관한 조례 개정

❍ 2014. 5월 : 대형폐기물 인터넷 배출신고 컨텐츠 개설

❍ 2014. 7월 : 대형폐기물 배출체계 홍보(수수료 변경, 배출방법 등)

□ 기대효과

❍ 시민편의 증진 및 폐가전 적정처리 유도

2		환경기초시설 통합운영

◈ 민간위탁비용 절감을 통한 시 재정 기여

◈ 시설의 효율적 운영을 통한 폐기물의 안정적 처리

□ 통합운영 현황

구 분		규 모	운영비	위 치	협약 기간	운영사
파주시 환경관리센터	소각시설	200 (톤/일)	62 억원/년	탄현면 낙하리	2014. 1. ～ 2016. 12.	코오롱 환경 서비스 (주) 외 1개사
	매립시설	28,370 (㎡)
	스팀 공급시설	5.5 (km)
재활용 선별장		50 (톤/일)	13 억원/년
운정 환경관리 센터	소각시설	90 (톤/일)	52 억원/년	파주시 와동동
	음식물 처리시설	60 (톤/일)

□ 기대효과

❍ 관리인력 일원화를 통한 인건비 절감

❍ 시설간 폐기물 연계처리를 통한 운영비 절감

❍ 조직의 탄력적 운용을 통한 시설관리 효율 증대

3		파주LCD 폐수종말처리시설 설치사업(4단계)

◈ 기업경쟁력 강화와 미래산업 투자 촉진을 통한 국가    경제 부흥 및 경제 활성화 기대

□ 추진배경

❍ LG디스플레이의 미래 OLED 시장 선점을 위한 투자확대

□ 사업현황

❍ 사 업 량 : 50,000톤/일(건축,토목,기계,전기,설비)

❍ 사 업 비 : 77,544백만원(국비 54,280 원인자 23,264)

❍ 사업기간 : 2014년 ∼ 2017년

□ 그간 추진사항

❍ 2013.04.24. : 4단계 사업 설명(환경부)

❍ 2013.05.08. : 국고보조사업 신청(환경부)

❍ 2013.09.02. : 기본계획 변경승인 신청(한강유역환경청)

□ 향후계획

❍ 2014. 4월 : 기본 및 실시설계 착수

❍ 2015. 3월 : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2015. 5월 : 공사착공

❍ 2017.12월 : 공사준공

□ 기대효과

❍ LG디스플레이 OLED 8조 2천억 투자(7천여명 일자리 창출)

❍ 대규모 공사로 인한 파주시 지역경제 활성화

❍ 환경기반시설 충족으로 안정적인 기업 생산활동 기여

4		한강수계 수질오염총량제 추진

◈ `13년 6월부터 `20년 12월까지 수질오염총량제 시행에 따라 하천 목표수질 준수를 위해 계획적인 개발사업 관리

□ 수질오염총량제 시행계획 승인 추진

❍ 수질오염총량관리 경기도 기본계획(2013.5.30 환경부 승인)에 맞춘 파주시 시행계획 승인 신청(2013.11.28 파주시→경기도)

▪기본계획에서 정한 오염부하량을 단위유역별·연차별 할당

▪삭감시설(환경기초시설) 신·증설 연차별 추진계획 수립

❍ 경기도 등 관계기관 검토 후 시행계획 승인 예정

▪시행계획에서 정한 단위유역별·연차별 부하량 내에서 개발사업 오염부하량 할당 협의

□ 총량제 이행평가 및 모니터링 실시

❍ 2013년 총량제 이행평가 실시(한강수계관리기금 65,000천원)

▪전국오염원조사를 통해 2013년 오염원 현황 분석

▪2013년 삭감·배출시설 모니터링 결과 분석

❍ 2014년 이행평가 대비 모니터링 실시(한강수계관리기금 85,354천원)

▪삭감시설 22개소 및 개별 배출시설(오·폐수시설) 31개소에 대해 모니터링 실시

▪시설용량에 따라 주기적(8일 간격, 월1회, 분기1회) 실시