맑 은 물 환 경 사 업 단

보   고   순   서

□ 주요업무 추진계획
【상하수도 분야】
○ 깨끗하고 안정적인 물 공급		89
○ 공공하수처리시설 건설		90
○ 청정(淸淨)도시 구현을 위한 하수도 정비		91
【환경시설 분야】
○ 쓰레기와의 사랑과 전쟁 추진		92
○ 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업		93
○ 친환경 수질관리 추진		94

상하수도 분야 주요업무 추진계획

1		깨끗하고 안정적인 물 공급

◈ ‘2020년 도시기본계획’의 수요량에 대비한 상수도 시설 확충 조기 달성과 균형발전을 위한 상수도 확장

□ 『2020년 대비 상수도시설 확충』조기 달성

□ 추진현황

∙급수인구 : 668천명(2020년)

∙시설용량 : 258천톤/일(2020년 수요량 : 248천톤/일)

∙총사업비 : 922억원(기투자 881 / 2013년 41)

∙사업기간 : 2004년 ～ 2012년

□ 추진실적

∙상수도 3단계 확장 사업(광탄 6천톤/일)

∙상수도 4단계 확장 사업(탄현 11천톤/일, 적성 10천톤/일)

□ 추진계획

∙상수도 3단계 확장 사업(월롱 97천톤/일)

□ 균형발전을 위한 취약지역 상수도 확장

□ 민북지역 상수도 확장 : 3개 마을, 6개 군부대/ 35.7㎞/ 102억원

∙사업완료 : 1개 마을, 3개 군부대/ 14.75km/ 56억원

- 통일촌, 도라대대, JSA경비대대, 경의선 경비대대

∙향후계획 : 2개 마을, 3개 군부대/ 20.95km/ 46억원

- 해마루촌, 대성동, 민정중대, 백학대대, 일월성대대

□ 농촌지역 소규모 상수도 확장 : 7개리/ 6.8㎞/ 7억원

∙지리적 여건으로 인한 미공급 지역과 상수도 공급 후 조성된   주거지역에 대한 상수도 공급

- 운천, 당동, 축현, 창만, 율곡, 가야, 법원

2		공공하수처리시설 건설

◈ 인구증가에 대비하고 농촌지역 하수처리를 위한 공공하수처리시설 건설로 생명력 있는 물(水)환경 조성

□ 현   황

□ 운영 중 : 15개소 137,920톤

∙공공하수 : 10개소 137,500톤

∙소규모 : 5개소 420톤

□ 추진 중 : 4건 19,800톤

∙인구증가 대비 등 하수처리시설 증설(금촌, 적성)

∙하수처리시설 농촌지역 확대 신설(탄현, 파평)

구분	사업명	사업량	사업비(억원)				사업 기간	현공정
			총사업비	기투자	2013년	향후
계		19,800 톤/일	690	253	197	240
증설 사업	금촌	17,000 톤/일	356	194	128	34	2008 ～ 2014	65%
	적성	700 톤/일	75	-	16	59	2013 ～ 2014	용역준비
신설 사업	탄현	800 톤/일	125	43	10	72	2008 ～ 2014	32%
	파평	1,300 톤/일	134	16	43	75	2008 ～ 2015	5%

※ 하수도 보급률 73% ⇒ 2014년 83%

□ 기대효과

□ 하수처리구역 확대를 통한 도시, 농촌지역의 균형발전 기여

□ 미처리 하수 하천유입 차단으로 하천수질 개선

3		청정(淸淨)도시 구현을 위한 하수도 정비

◈ 체계적인 하수관거 정비를 통한 친환경 도시조성 및

침수피해 예방

□ 사업현황 : 재정사업 3개소, 민자사업(BTL) 1개소

구분	사업명	사업량	사업비(억원)				사업기간	현공정
			총사업비	기투자	2013년	향후
계		222㎞	1,680	348	278	1,054
재정 사업	문산 관거	46㎞	439	293	70	76	2005～2014	67%
	탄현 관거	21㎞	141	37	33	71	2009～2014	11%
	파평 관거	28㎞	259	8	103	148	2009～2015	2%
민자 사업	11년 BTL	127㎞	841	10	72	759	2011～2016	사업시행자 지정 완료

※ 하수관거 보급률 73% → 2014년 77% → 2016년 88%

□ 기대효과

□ 농촌 취락지역 하수도 확대 보급으로 지역균형발전 기여

□ 배수불량 우수관거 정비로 침수피해 예방

□ 하수처리 후 하천유입으로 친환경 도시 조성

환경시설 분야 주요업무 추진계획

1		쓰레기와의 사랑과 전쟁 추진

◈ 쓰레기가 소중한 자원이라는 인식의 전환으로 쓰레기

무단투기 행위를 근절하여『깨끗한 파주』이미지 조성

□ 추진배경

□ 2013년도 경기도 역량 과제인『쓰레기와의 사랑과 전쟁』의 추진을 위한 범시민적 생활환경 개선활동 전개

□ 추진방향

□ 시민 인식 전환을 위한 홍보 및 교육

□ 취약지역(산업단지, 전통시장, 공원, 하천, 도로) 중점 관리

□ 우수기관, 단체, 읍면동 평가 시상

□ 추진계획

□ T/F팀 구성

□「클린파주데이」매월 운영

□ 나눔장터 활성화

□ 환경기초시설 체험활동 프로그램 운영

□ 기관·단체별 담당임무 지정

□ 1사 1취약 지역 지정 환경 정화활동 실시

□ 도로환경감시단 운영

2		음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업

◈ 100세대 이상 공동주택 음식물쓰레기 종량제 전면시행

◈ 음식물쓰레기 수수료 부과방식 정액제에서 종량제로 변경

□ 현  황

□ 수 거 량 : 26,692톤/년

□ 처리비용 : 약 40억원/년 (20% 줄일 경우 약 8억원 절감)

□ 시범사업(‘11 〜 ‘12년)

구 분	예산액 (백만원)	종량제기기 (대)	시행세대수 (세대)	비고
음식물쓰레기 종량제 사업(1차)	20 (시20)	10	546	건일장미5차 등 2개소
음식물쓰레기 종량제 사업(2차)	560 (국168,도196,시196)	318	23,276	팜스프링 등 41개소

□ 추진계획

□ 파주시 공동주택 전면 시행 (‘13년)

구 분	예산액 (백만원)	종량제기기 (대)	시행세대수 (세대)	비고
음식물쓰레기 종량제 전면시행	900 (국270,도315,시315)	511	34,896	푸르지오 등 65개소

∙공동주택 음식물쓰레기 종량제 실시에 따른 수수료 가격 결정

∙음식물류폐기물 발생억제와 수집‧운반 및 재활용에 관한 조례 개정

3		친환경 수질관리 추진

◈ 폐수처리시설 증설 및 생태하천 복원을 통한 친환경 수질 관리

◈ 월롱폐수처리장내 주민친화시설 다목적 실내체육관 조성

◈ 하천으로 배출되는 오염물질 총량 관리로 목표수질 달성

□ 폐수종말처리시설 설치 운영

□ 운 영 : 204천톤/일(LCD 185천톤, 문산 10천톤, 월롱 9천톤)

□ 증 설 : 53천톤(LCD 45천톤, 월롱 8천톤)

□ 월롱폐수처리장 다목적 실내체육관 조성

□ 사업기간 : ‘12. 11. ∼ ‘13. 12.

□ 건축면적 : 2,145㎡(650평)/ 4,600백만원

□ 주요시설 : 배드민턴, 핸드볼, 농구, 배구, 탁구, 스쿼시, 헬스 등

□ 헤이리 생태하천 복원

□ 사업기간 : ‘11. 1. ∼ ‘13. 11.

□ 사 업 량 : 1.2km(호안조성, 식물식재 등)/ 3,000백만원

□ 한강수계 수질오염총량관리 추진

□ 하천유입 오염물질 총량 관리 ⇒ 총량범위 내 개발사업 허용

∙대상물질 : 생물화학적산소요구량(BOD), 총인(TP)

□ 수질오염총량제 시행계획 수립 진행 중(`12. 9. ∼ `13. 5.)

∙연차별 부하량 할당 및 개발사업 우선순위 선정/ 85백만원

□ 이행평가를 위한 환경기초시설 모니터링(`13. 6. ∼ 12.)

∙대상시설 : 공공하수․폐수처리시설, 축산폐수공공처리시설, 분뇨처리시설(총22개소)/ 29백만원