2013 행정사무감사

도시산업위원회

2013년 주요업무 추진상황

맑은물환경사업단

목 차 【상하수도과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무
Ⅱ.	2013 주요업무 추진실적
1.	상수도 확장 추진
2.	공공하수도 확충
【환경시설과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무
Ⅱ.	2013 주요업무 추진실적
1.	음식물쓰레기 종량제
2.	안정적인 폐기물관리 추진
3.	친환경 물 관리 추진
4.	한강수계 수질오염총량관리 추진

상하수도과 소관

2013 주요업무 추진상황

【상하수도과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
30	29	1	1	1	1	6	6	13	12	6	7	3	2	9

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현 부서 임용일	재직 기간
	단 장	행정4급	전상오	맑은물환경사업단 업무총괄	2011. 7. 25	1년10월
	과 장	시설5급	김재군	상하수도과 업무총괄	2012. 2. 13	1년3월
수도행정팀	팀 장	행정6급	이현주	수도행정업무 업무총괄	2011. 7. 25	1년10월
		행정7급	이제은	하수도공기업운영 (예산, 경영평가, 결산, 통계)	2012. 11. 5	6월
		행정7급	이효정	상수도예산, 계약, 자산, 통계	2013. 4. 1	1월
		행정7급	염태성	서무, 상수도사업 민간위탁, 상수도사업 공기업 운영(경영평가, 결산)	2012. 11. 5	6월
		행정8급	최강기	일반회계 계약, 지출, 상수원보호구역 관리, 차량관리	2011. 7. 25	1년10월
		행정9급	표지은	상하수도급여, 지출	2012. 11. 5	6월
수도요금팀	팀장	행정6급	이희창	수도요금업무 총괄	2012. 2. 13
		행정8급	박주옥	상수도요금 징수결의 및 과오납반환 상수도특별회계세입	2011. 1. 1	2년4월
		행정8급	박지영	지하수이용신고․이용부담금관리	2010. 9. 1	2년8월

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현 부서 임용일	재직 기간
수도요금팀		행정9급	김남희	하수도요금 징수결의 및 과오납반환 하수도특별회계세입	2013. 1. 2	4월
		기능6급	오태일	지하수이용신고․이용,부담금관리	2009. 7. 1	3년10월
		청 경	방문수	지하수검침	2009. 7. 1	3년10월
상수시설팀	팀장	시설6급	유광형	상수시설업무 총괄	2012. 10. 29	7월
		시설7급	윤이영	상수도시설관리	2012. 11. 5	6월
		시설7급	정정희	배수지공사	2012. 2. 22	1년3월
		기능7급	송춘석	약수터관리, 급수공사 시행	2012. 11. 5	6월
		청 경	노구호	공동약수터관리	2012. 4. 16	1년1월
하수시설팀	팀장	공업6급	유창민	하수시설업무 총괄	2012. 2. 13	1년3월
		시설7급	이만재	하수도정비기본계획수립 공공하수처리시설 건설	2010. 2. 12	3년3월
		환경7급	기군도	하수처리장 운영, 수질TMS, 총인처리시설	2011. 2. 1	2년3월
		시설9급	이지우	하수슬러지 자원화 시설 설치	2012. 10. 29	7월
하수관리팀	팀장	시설6급	임상범	하수관리업무 총괄	2010. 11. 15	2년6월
		공업7급	손용수	공공하수도 유지보수 및 준설	2012. 11. 15	6월
		시설7급	김길모	하수관거정비사업, 노후하수관 개량사업	2012. 11. 5	6월
		청 경	고수남	개인하수처리시설 감시	2013. 3. 1	2월
오수관리팀	팀장	공업6급	이화연	오수관리업무 총괄	2013. 4. 1	1월
		공업7급	양정호	개인하수처리시설 신고 및 준공	2012. 2. 22	1년3월
		공업7급	곽병도	개인하수처리시설 신고 및 준공	2009. 7. 1	3년10월
		환경8급	현동호	개인하수처리시설 신고 및 준공, 분뇨재활용 허가 및 지도점검	2011. 7. 25	1년10월
		기능7급	원종현	개인하수처리시설 신고 및 준공	2010. 2. 12	3년3월

Ⅱ. 2013 주요업무 추진실적

1. 상수도 확장추진

2012년말 파주시 상수도 보급률은 95%이며, 안전한 상수도를 안정적으로 공급하도록 2015년 보급률 96.5%를 목표로 상수도 미 공급 지역에 관로 확장공사를 지속적으로 추진

○ 소규모 상수도 확장공사

∙ 위    치 : 관내 상수도 미급수 지역 (소규모 주거 및 공장 밀집지)

∙ 사 업 량 : L=9.7km  D150mm이하

∙ 사 업 비 : 9백만원(시 9)

∙ 사업기간 : 2013. 3. ~ 2013. 10.  (공정율 30%)

○ 민북지역 상수도 확장공사

∙ 위    치 : 군내면 대성동 일원

∙ 사 업 량 : L=8.9km  D80mm 이하

∙ 사 업 비 : 1,580백만원(도 474  / 시 1,106)

∙ 사업기간 : 2012. 5. ~ 2013. 11.  (UN 정전위원회 협의중)

○ 상수도 3단계 확장공사

∙ 위    치 : 월롱면, 광탄면, 금촌동, 교하동일원

∙ 사 업 량 : 배수지 신설 2개소, 배수관로 14.89km (D1,100mm이하)

∙ 사 업 비 : 49,600백만원 (2012년 4,150백만원)

∙ 사업기간 : 2004. 7. ~ 2013. 11.  (공정율 95%)

- 광탄배수지 완공 (2010년)

- 월롱배수지 공사중 (2013. 7월 완공 예정)

2. 공공하수도 확충

□ 공공하수처리시설 사업

하수도보급률은 72%로 인구증가에 대비하고 농촌지역 하수처리를 위해 2014년까지 통일동산, 금촌, 탄현, 파평, 적성에 하수처리장을 증설 및 신설하여 하수도 보급률 83%를 목표로 생명력 있는 물환경 조성을 추진

○ 통일동산 공공하수처리시설 증설사업

∙ 위    치 : 탄현면 법흥리 1298번지 일원

∙ 사 업 량 : 총용량 22,000톤/일 (기존 16,000 증설 6,000)

∙ 사 업 비 : 21,947백만원(부담금 21,947)

∙ 사업기간 : 2008 ~ 2014(공정율 97%)

○ 금촌 공공하수처리시설 증설사업

∙ 위    치 : 금촌동 714번지 일원

∙ 사 업 량 : 총용량 44,000톤/일 (기존 27,000 증설 17,000)

∙ 사 업 비 : 35,644백만원(국 10,078 / 도 5,039 / 시 5,039 / 부담금 15,488)

∙ 사업기간 : 2008 ~ 2014(공정율 85%)

○ 탄현 공공하수처리시설 설치사업

∙ 위    치 : 탄현면 오금리 164번지 일원

∙ 사 업 량 : 처리용량 800톤/일

∙ 사 업 비 : 13,462백만원(국 9,007 / 도 1,931 / 시 1,931 / 부담금 593)

∙ 사업기간 : 2008 ~ 2014(공정율 40%)

○ 파평 공공하수처리시설 설치사업

∙ 위    치 : 파평면 금파리 275번지 일원

∙ 사 업 량 : 처리용량 1,300톤/일

∙ 사 업 비 : 12,557백만원(국 8,790 / 도 1,884 / 시 1,883)

∙ 사업기간 : 2008 ~ 2014(공정율 15%)

○ 적성 공공하수처리시설 증설사업

∙ 위    치 : 적성면 가월리 193번지 일원

∙ 사 업 량 : 총용량 2,700톤/일 (기존 2,000 증설 700)

∙ 사 업 비 : 7,550백만원(국 3,386 / 도 726 / 시 725 / 부담금 2,713)

∙ 사업기간 : 2013 ~ 2014(설계용역중)

□ 하수관거 정비사업

급격한 인구증가와 농촌지역 균형발전을 고려한 체계적인 하수관거 정비를 통해 하천 수질개선 등 청정도시 구현에 기여하고자 하며, 현재 73%인 하수관거 보급률을 2016년까지 88% 달성을 목표로 사업 추진

○ 문산 하수관거 정비사업

∙ 위    치 : 문산읍, 파주읍(봉서리, 봉암리, 향양리) 일원

∙ 사 업 량 : L=46㎞, 배수설비 2,274가구

∙ 사 업 비 : 43,915백만원 ( 국 30,409 / 시 13,506 )

∙ 사업기간 : 2005 ~ 2014 (공정율 70%)

○ 탄현 하수관거 정비사업

∙ 위    치 : 탄현면 일원

∙ 사 업 량 : L=21㎞, 배수설비 658가구

∙ 사 업 비 : 14,106백만원 (국 9,720 / 시 4,386)

∙ 사업기간 : 2009 ~ 2014 (공정율 18%)

○ 파평 하수관거 정비사업

∙ 위    치 : 파평면, 적성면(식현리) 일원

∙ 사 업 량 : L=28㎞, 배수설비 1,418가구

∙ 사 업 비 : 25,930백만원 ( 국 18,119 / 시 7,811 )

∙ 사업기간 : 2009 ~ 2015

○ 2011년 하수관거정비 임대형 민자사업 (BTL)

∙ 위    치 : 파주읍, 광탄면, 탄현면, 월롱면, 교하동, 금촌동 일원

∙ 사 업 량 : L=128㎞, 배수설비 4,748가구

∙ 사 업 비 : 83,103백만원 ( 국 582 / 시 459 / 민자 82,062 )

∙ 사업기간 : 2011 ~ 2016

환경시설과 소관

2013 주요업무 추진상황

【환경시설과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
17	16			1	1	4	4	5	5	7	6

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
환 경 시설과	과장	행정5급	김용수	∙환경시설과 업무 총괄	2012.10.29.	7월
환경관리팀	팀장	환경6급	박준태	∙환경관리팀 업무 총괄 ∙폐기물처리기본계획 수립 ∙읍면동 평가	2011.7.25.	1년10월
		환경7급	정주연	∙회계, 예산, 서무 ∙생활폐기물 청소대행 운영 ∙시설관리공단 청소업무	2013.4.2.	1월
		환경8급	강민영	∙쓰레기와의 사랑과전쟁 ∙쓰레기 무단투기 관리 ∙종량제 봉투 제작 관리	2012.8.27.	9월
		환경8급	김은미	∙농촌폐비닐 관리 ∙음식물종량제 추진	2011.7.25.	1년10월
		시설9급	윤원진	∙자동집하시설 관리 ∙공중화장실 관리	2011.8.26.	1년9월

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현 부서 임용일	재직 기간
환경시설팀	팀장	시설6급	조웅휘	∙환경시설팀 업무 총괄	2012.10.29.	7월
		시설7급	어윤천	∙파주환경순환센터 관리 → 분뇨,가축분뇨,음식물 ∙사용종료 매립장 관리	2010.11.15.	2년6월
		환경7급	경형구	∙환경관리센터 운영 → 소각, 음식물처리시설 ∙주민지원기금 운용관리	2012.11.5.	6월
		행정9급	김누리	∙스포츠센터 운영관리	2011.8.26.	1년9월
수질환경팀	팀장	공업6급	허순무	∙수질환경팀 업무 총괄 ∙금파폐수종말처리시설 관리 ∙환경사범 사건송치	2010.11.15.	2년6월
		시설7급	장진구	∙폐수종말처리시설 설치 ∙생태하천 복원사업 ∙신재생에너지 설치사업	2008.8.1.	4년9월
		환경8급	이주원	∙폐수종말처리시설 관리 ∙수질오염사고 관련 업무	2012.11.5.	6월
오염총량팀	팀장	환경6급	조윤옥	∙오염총량팀 업무 총괄	2010.11.15.	2년6월
		공업7급	박군도	∙수질오염총량 관리 ∙미군반환공여지 토양정화	2011.7.25.	1년10월
		공업9급	오동진	∙물환경 관리계획 수립 ∙전국 오염원 조사	2012.11.5.	6월

Ⅱ. 2013 주요업무 추진실적

1. 음식물쓰레기 종량제

□ 사업개요

○ 2013년도 음식물쓰레기 종량제 전면 시행을 통한 배출량 감축

∙ 정액제→배출량에 따른 수수료 차등 부과

∙ 음식물쓰레기 20% 이상 감량 목표

□ 추진계획

구 분		추진방향		비 고
계	161,859	유형별	세대수
종량제 봉투	100,821	단독주택	74,409	종량제 전면실시 중
		20~60세대 공동주택	1,707	정액제→종량제 봉투
		운정신도시	24,755	자동집하시설
RFID	60,988	60세대 이상 공동주택	60,988	정액제→종량제

□ 실시현황

구 분	대상 세대수	실시 세대수	비고
총 세대수	161,859	143,406	총 세대수 중 88.6% 종량제 실시
종량제 봉투	100,871	99,164
RFID	60,988	44,242

○ 사 업 비 : 1,580백만원 (국 468 / 도 546 / 시 566)

※ '11년(20백만원), ‘12년(560백만원), ’13년(1,000백만원)

□ 향후계획

○ 2013. 6 ~ 8.

∙ 20~60세대 공동주택 종량제 홍보 (수거통→종량제 봉투 변경)

∙ 공동주택 개별계량기기 설치 완료

○ 2013. 9. : 종량제 전면 실시

2. 안정적인 폐기물관리 추진

□ 파주시 환경관리센터 매립시설(2단계) 추진현황

○ 추진배경 : 1단계 폐기물 매립시설 매립완료 예정에 따라 2단계 매립시설 증설을 통하여 안정적인 폐기물 관리 추진

○ 위    치 : 파주시 탄현면 낙하리 산10-1번지 일원(10,154㎡)

○ 사 업 량 : 67,073㎥(매립용량)

○ 용    도 : 소각잔재(바닥재, 비산재) 매립용

○ 사업기간 : 2012년 ~ 2013년

○ 사 업 비 : 2,393백만원

○ 공 정 률 : 30%

※ 매립시설(1단계) 운영현황

∙ 매 립 량 : 50,508㎥(소각재 : 41,712㎥, 복토량 : 8,796㎥)

∙ 매 립 률 : 91%

∙ 소각재 발생량 : 12.3㎥/일(2012년 기준)

3. 친환경 물 관리 추진

□ 헤이리 생태하천 복원사업

○ 위    치 : 탄현면 법흥리 통일동산내(헤이리 마을)

○ 사 업 량 : L=1.2km

○ 사업기간 : 2011년 ~ 2013년

○ 사 업 비 : 3,000백만원 (국 2,100 / 도 450 / 시 450)

※ '11년(142백만원), ‘12년(437백만원), ’13년 (2,421백만원)

○ 공정률 : 40%

□ 파주LCD 폐수종말처리시설 설치사업(2-2단계)

○ 위    치 : 월롱면 덕은리 1229번지(79,270㎡)

○  사 업 량 : 35,000톤(기계,전기,설비)

○ 처리공법 : BIO-SAC(유동상 생물막) 공법

○ 사업기간 : 2011년 ~ 2012년

- 2011. 2.22：공사착공

- 2012. 7.31：공사준공

○ 사 업 비 : 15,048백만원 (국 15,048)

※ ‘11년 3,004백만원, ’12년 12,044백만원

□ 파주LCD 폐수종말처리시설 설치사업(3단계)

○ 사 업 량 : 90,000톤/일(토목,건축,기계,전기,조경)

○ 처리공법 : A2O + MBR(생물막여과) 공법

○ 사업기간 : 2011년 ～ 2014년

○ 사 업 비 : 97,600백만원 (LG디스플레이 자부담)

○ 추진사항

- 2011. 3.31 : 3단계 공사착공

- 2012. 5. 1 : 3-1단계(45,000톤/일) 시운전 개시

- 2012.10.31 : 3-1단계 준공

○ 향후계획

- 2013. 9.   : 3-2단계(45,000톤/일) 공사 착공

- 2014.12.   : 3-2단계(45,000톤/일) 공사 준공

□ 월롱첨단 폐수종말처리시설 설치사업(2단계)

○ 위    치 : 월롱면 능산리 663번지 일원

○ 사 업 량 : 8,000톤/일(토목구조물, 기계,전기,설비)

○ 사업기간 : 2011년 ~ 2014년

○ 처리공법 : BIO-SAC(유동상 생물막) 공법

○ 사 업 비 : 17,824백만원 (국 17,824)

※ ‘11년 300백만원, ’12년 17,524백만원

□ 법원일반산업단지 폐수종말처리시설 설치사업

○ 위    치 : 법원읍 대능리 ~ 문산첨단폐수종말처리장(연계처리)

○ 사업기간 : 2010년 ～ 2015년

○ 시설용량 : 관로 L=8km(D300mm), 중계펌프장 1개소

○ 사 업 비 : 6,975백만원 (국 4,882 원인자부담 2,093)

※ ‘12년 399백만원, ’13년 1,435백만원, 향후 5,141백만원

4. 한강수계 수질오염총량관리 추진

□ 수질오염총량관리 추진 현황

○ 경기도 기본계획 수립 (`11. 6 ~ `13. 5)

∙ 2012. 5.24 : 경기도 기본계획(안) 주민공청회 실시

∙ 2012. 5.29 : 경기도 기본계획(안) 최종보고회 실시

∙ 2012. 7.24 : 경기도 기본계획(안) 승인 신청(경기도 → 환경부)

∙ 2013. 5.30 : 경기도 기본계획 환경부 승인

○ 파주시 시행계획 수립 (`12. 9 ~ `13. 11)

∙ 2012. 6. 8 : 파주시 시행계획 수립 용역계약

∙ 시행계획 내용

- 오염원 그룹별 부하량 및 개발사업 부하량 산정

- 연차별 할당부하량 및 삭감부하량 산정

- 연차별 삭감이행계획 수립

○ 2013. 6. 1일부터 한강수계 수질오염총량제 전면 시행

∙ 개발부하량 내 사업 추진 협의

□ 향후계획

○ 2013.11 : 파주시 시행계획 승인신청 (파주시→경기도)

○ 총량관리위원회를 통한 총량 개발사업 우선순위 선정

○ 매년 이행평가를 위한 삭감시설 모니터링 실시