맑은물환경사업단

보   고   순   서

□ 주요업무 추진계획
【상하수도 분야】
○ 생명력 있는 맑은 물 환경 조성		83
○ 인구증가에 대비한 공공하수처리시설 확충		84
○ 청정(淸淨)도시 구현을 위한 하수도 정비		85
【환경시설 분야】
○ 편리하고 안전한 대형폐기물 배출		86
○ 개발과 환경보전의 조화를 통한 지역경제 성장		87
○ 한강수계 수질오염총량제 추진		88

상하수도 분야 주요업무 추진계획

1		생명력 있는 맑은 물 환경 조성

◈ 안전하고 깨끗한 물 공급으로 시민욕구에 부응

◈ 미급수 지역 위주의 상수도 확장공급 추진

□ 상수도 현황

구 분	세 부 내 용
시설용량	219,000㎥/일(지방 96,000㎥/일, 광역 123,000㎥/일)
취·정수시설	취수1개소, 정수1개소, 고도정수처리시설
급·배수시설	가압장 46개, 배수지 6개, 급수전 42,507전
관로시설	관로 1,875㎞(도․송수 16㎞, 배수 1,059㎞, 급수 800㎞)
급수현황	급수율 96%, 유수율 86.25%

□ 민간위탁 현황

□ 사업형태 : 한국수자원공사에 수도시설 운영·관리업무 위탁

□ 사업기간 : 2009년 ∼ 2028년(20년)/ 2009. 7. 1. 위탁협약 체결

□ 총사업비 : 2,883억원(시설개량 1,116/ 운영관리 1,767)

□ 위·수 탁 업 무 : 지방상수도 시설개선 및 운영관리, 고객 및 요금관리 등

□ 민북지역 상수도 확장추진

□ 공급대상 : 3개 마을/ 6개 군부대(수혜대상 : 3,361명)

□ 사업시기 : 2011년 ∼ 2014년

□ 사 업 량 : 상수도 관로매설(L=35.7km), 가압장 1개소

□ 사 업 비 : 10,200백만원

□ 추진상황 및 계획

2012. 11월				→	2014. 4월				→	2014. 4월				→	2014. 9월
통일촌 공급 완료					대성동 공급 완료					해마루촌 착공					해마루촌 공급 예정

2		인구증가에 대비한 공공하수처리시설 확충

◈ 인구증가에 대비하고 농촌지역 하수처리를 위한 공공   하수처리시설 건설과 생명력 있는 물(水)환경 조성

□ 사업현황

□ 운영중 : 15개소 154,920톤(공공하수 10개소 154,500톤/ 소규모 5개소 420톤)

사업명	사업량 (톤/일)	운영기간	처리장명	위탁업체명	운영비 (백만원)
계	154,920				16,614
금촌하수도 민간투자사업	27,000	2005.3.14. ~ 2020.3.13.	금촌 하수처리장	파주엔바이로(주)	3,253
문산하수도 민간투자사업	17,000	2008.1.1. ~ 2022.12.31.	문산, 파주, 법원, 광탄	에코술이홀(주)	4,462
재정사업	110,920	2011.12.16. ~ 2014.12.15.	통일동산, 적성, 문산증설, 금촌증설, 운정, 소규모하수도	㈜티에스케이워터 ㈜우호건설 청록엔지니어링(주)	8,899

□ 사업중 : 3개소 2,800톤/일

구분	사업명	사업량 (톤/일)	사업비(억원)				사업기간	현공정
			총사업비	기투자	2014년	향후
계	3개소	2,800	332	164	125	43
신설 사업	파평	1,300	135	90	33	12	2008~2015	34%
	탄현	800	122	67	47	8	2008~2014	60%
증설 사업	적성	700	75	7	45	23	2013~2015	10%

□ 하수도 보급률 : 2013년 92.9%  → 2014년 92.95%  → 2015년 93%

3		청정(淸淨)도시 구현을 위한 하수도 정비

◈ 체계적인 하수관로 정비를 통한 친환경 도시조성    및 침수피해 예방

□ 사업현황

□ 운영중 : 민자사업(BTL) 1개소

사업명	사업량	운영기간	처리구역	위탁업체명	운영비 (백만원)
2006년 파주시 하수관거정비 임대형 민자사업 (BTL)	하수관로 100㎞ 배수설비 5,412가구	2011.7.29. ~ 2031.7.28.	파주읍, 법원읍, 월롱면, 광탄면, 금촌동 일원	청정파주 주식회사	1,326

□ 사업중 : 재정사업 4개소, 민자사업(BTL) 1개소

구분	사업명	사업량 (㎞)	사업비 (억원)				사업기간	현공정
			총사업비	기투자	2014년	향후
계	5개소	228	1,682	619	453	610
재정 사업	문산관거	46	452	384	68	-	2005～2014	90%
	탄현관거	21	145	84	61	-	2009～2014	75%
	파평관거	28	214	79	37	98	2009～2015	45%
	적성관거 (가월․주월)	6	50	-	4	46	2014～2016	신규
민자 사업	11년 BTL	127	821	72	283	466	2010～2016	20%

□ 하수관거 보급률 : 2013년 88%  → 2014년 94%  → 2015년 96%

환경시설 분야 주요업무 추진계획

1		편리하고 안전한 대형폐기물 배출

◈ 대형폐기물 수거체계 개선으로 시민 불편 해소

◈ 대형폐가전 무상수거로 시민 부담 경감

□ 대형폐기물 인터넷 배출신고 시행

□ 스티커 구입을 위한 슈퍼마켓 방문 불편 해소

□ 유선 배출신고 불필요

∙수거요청을 하지 않아 폐기물이 방치되는 사례 방지

□ 대형폐가전 무상 방문수거 실시

□ 재활용 가치가 높은 대형폐가전에 대한 수수료 면제

∙시민 부담 경감 및 불법처리‧투기 방지

□ 가정 방문수거로 시민 편의 증진 및 제품 파손 경감

□ 추진상황 및 계획

2014. 4월				→	2014. 7월				→	2014. 8월				→	2014. 9월
조례 개정					인터넷 콘텐츠 개발					시민홍보					시행

※ 대형폐기물 배출방법 변경

구 분		변 경 전	변 경 후
대형 폐기물	수수료 납부	슈퍼마켓에서 스티커 구입	슈퍼마켓에서 스티커 구입 또는 인터넷으로 수수료 납부
	배출신고	유선 신고	유선 또는 인터넷 신고
대형폐가전		수수료 납부, 문 앞 배출	수수료 면제, 무상 방문수거

2		개발과 환경보전의 조화를 통한 지역경제 성장

◈ 안정적인 수질관리로 기업생산활동 기여

◈ LG디스플레이의 미래 OLED시장 선점을 위한 투자 확대

□ 폐수종말처리시설 현황

구 분 (산업단지)	위 치	시설규모(㎥/일)			운영업체	비 고
		계획용량	현용량	유입량
파주LCD	월롱면 엘씨디로 305	280,000	185,000	145,000	코오롱워터앤에너지
문산첨단	파주읍 돈유1로 13	15,000	10,000	3,500
월롱첨단	월롱면 휴암로 434	17,000	17,000	6,500
금파산단	파평면 청송로 208번길 30	190	190	90	입주자협의회

□ 민간위탁 현황

□ 대    상 : 3개소(LCD·문산·월롱) 폐수종말처리시설

□ 예 산 액 : 26,300백만원(2014년도 예산)

□ 계약기간 : 2010. 9. 1. ∼ 2015. 8. 31.(5년간)

□ 운영업체 : ㈜코오롱워터앤에너지 파주사업소

□ 파주LCD 폐수종말처리시설(4단계) 확충 추진

□ 위    치 : 월롱면 엘씨디로 305

□ 기    간 : 2014년 ∼ 2017년

□ 사 업 비 : 775억원(국 543, 원인자 232)

□ 사 업 량 : 5만톤(토목, 건축, 기계, 전기, 설비)

□ 기대효과

∙LG디스플레이 투자 촉진 및 파주시 지역경제 활성화

- OLED 8조 2천억원 투자, 일자리창출 7천명

∙환경기반시설 충족으로 안정적인 기업 생산활동 기여

□ 추진상황 및 계획

2014. 6월				→	2014. 10월				→	2015. 5월				→	2017. 12월
기본계획 변경승인					기본설계 및 실시설계 착수					공사 착공					공사 준공

3		한강수계 수질오염총량제 추진

◈ 수질오염총량제 시행에 따른 하천 목표수질 준수를 위하여 계획적인 개발사업 관리

□ 개   요

□ 하천 목표수질 준수를 위해 오염물질 배출부하량 관리

□ 연차별 할당부하량을 준수하기 위해 개발 및 삭감사업 관리

□ 추진경과

□ 2013. 5. 30. : 경기도 기본계획 승인(환경부 → 경기도)

□ 2014. 5. 28. : 파주시 시행계획 승인(경기도 → 파주시)

□ 2014. 5. 29. : 2013년도 이행평가서 제출(파주시 → 한강청)

□ 추진계획

□ 2013년 총량제 이행평가 실시(한강수계관리기금 65,000천원)

∙전국오염원조사를 통한 2013년 오염원 현황 분석

∙2013년 삭감·배출시설 모니터링 결과 분석

∙연차별 할당부하량 준수유무 분석 및 조치계획 수립

□ 2014년 이행평가 대비 모니터링 실시(한강수계관리기금 85,354천원)

∙삭감시설 22개소 및 개별 배출시설 31개소에 대한 모니터링 실시

∙시설용량에 따라 주기적(8일 간격, 월1회, 분기1회) 실시