맑은물환경사업단

보   고   순   서

□ 주요업무 추진계획
【상하수도 분야】
○ 깨끗한 물 공급을 위한 상수관 개선사업		75
○ 상수도 보급 확대를 위한 급수취약지 개선사업		76
○ 하수처리수 「공업용수」재이용 사업		76
○ 공공하수처리시설 건설		77
○ 청정(淸淨)도시 구현을 위한 오수관로 정비		78
【환경시설 분야】
○ 깨끗하고 투명한 청소행정 구현		79
○ 공공수역 수질환경 보전		80
○ 환경순환센터 개선사업 추진		81

상하수도 분야 주요업무 추진계획

1		깨끗한 물 공급을 위한 상수관 개선사업

◈ 믿고 마시는 건강한 수돗물

◈ 노후 상수관 교체를 통한 가정에 깨끗한 수돗물 공급

□ 상수도 관망 정비용역 추진

□ 사업지 : 파주시 전역(897백만원, L=1,875km)

□ 블럭화 관망 운영 및 교체대상 노후관 선정(2015. 12월)

□ 환경부 G-BEST 시범사업

□ 광탄지역 지능형 상수관망 관리 도입(2,000백만원 국비50%, 기업50%)

※ 유량계, 압력계, 잔류염소측정기, 에너지회수 시스템, 스마트 수도계량기 등 시험설치

□ 광탄 지역 통합관리 시스템(계측장비등) 무상구축

□ 수량, 수질의 최적관리로 상수도의 안정적 공급 기여

□ 노후 상수관 교체

□ 사업지 : 8개 지역(1,430백만원, L=12km)

※ 조리읍 봉일천리, 법원읍 대능리, 광탄면 신산리, 월롱면 영태리,

아동동, 금촌동, 검산동, 연다산동

2		상수도 보급 확대를 위한 급수취약지 개선사업

◈ 안전한 상수도 보급 확대

◈ 상수도 급수관 확장 시공으로 급수 취약지역 수돗물 공급

□ 급수 취약지역 상수도 확장 추진

□　사업지 : 8개 지역(950백만원, L=9km, 105가구주택45, 공장60)

※ 월롱면 덕은리, 탄현면 축현리(2개소), 적성면 구읍리, 맥금동,
조리읍 장곡리, 상지석동, 연다산동

3		하수처리수 「공업용수」재이용 사업

◈ 물재이용시설을 건설하여 버려지는 하수를 공업용수로 자원화 추진

◈ 수질오염총량제 시행으로 도시개발면적 추가확보

□ 하수처리장 방류수 재이용시설 설치사업

□ 금촌·운정 하수처리수를 공업용수(LGD산업단지)로 재이용

∙사업기간 : 2014년～2018년(운영 20년간)

∙사 업 량 : 40,000톤/일

∙사 업 비 : 709억원(국비54%, 지방비6%, 민자 40%)

□ 향후계획

∙‘15.  01  사업적격성 조사검토 의뢰(공공투자관리센터)

∙‘16∼’18  착공 및 준공

□ 기대효과

∙수질오염총량제 시행으로 도시개발면적 확보(958만㎡/290만평)

∙운영기간 5억/년, 향후 20억/년 市수익 창출

4		공공하수처리시설 건설

◈ 하수처리구역 확대를 통한 도시, 농촌지역의 균형발전 기여

◈ 미처리 하수 하천유입 차단으로 수질개선

□ 사업현황

□ 운영중 : 15개소, 154,920톤

(공공하수: 10개소 154,500톤, 소규모 : 5개소 420톤)

□ 사업중 : 3건 2,800톤/일(증설 : 적성, 신설 : 탄현, 파평)

구분	사업명	사업량 (톤/일)	사업비(억원)				사업기간	현공정
			총사업비	기투자	2015년	향후
계		2,800	332	291	32	9
증설	적성	700	75	45	21	9	2013∼2016	10%
신설 사업	탄현	800	122	116	6		2008∼2015	95%
	파평	1,300	135	130	5		2008∼2015	65%

※ 하수시설 보급률 93% → 2015년 93.2% → 2016년 93.4%

5		청정(淸淨)도시 구현을 위한 오수관로 정비

◈ 체계적인 오수관로 정비를 통한 친환경 도시조성

◈ 침수피해 예방을 위한 배수불량 하수관로 정비

□ 사업현황

□ 운영중 : 민자사업( 2006년 BTL ) - 8개 처리분구
(오수관로 100㎞, 배수설비 5,412가구)

□ 사업중 : 재정사업 3개소, 민자사업( 2011년 BTL ) 1개소

구분	사업명	사업량 (㎞)	사업비 (억원)				사업기간	현공정
			총사업비	기투자	2015년	향후
계		181	1,220	616	535	69	-
재정 사업	탄현관거	21	145	145	-	-	2009～2015	92%
	파평관거	28	214	116	98	-	2009～2015	65%
	적성(가월․주월)관거	5	40	-	7	33	2015～2017	신규
민자 사업	11년 BTL	127	821	355	430	36	2011～2016	42%

※ 오수관로 보급률 50.5% → 2015년 66% → 2016년 70.9%

환경시설 분야 주요업무 추진계획

1		깨끗하고 투명한 청소행정 구현

◈ 생활폐기물 수거체계 개선을 통한 깨끗한 도시환경 조성

◈ 생활폐기물 수집·운반 대행업체 지도·점검 강화를 통한 투명성 및 공정성 증대

□ 생활폐기물 수거체계 개선

□ 지역전담제 도입을 통한 수거체계 일원화

□ 개선안

업체명	변경전	변경후
		지 역	청소항목	구 분
㈜진환경	공동주택 쓰레기 (생활,음식물,대형)	교하동 운정1,2,3동	생활, 음식물, 재활용, 가로청소	생활, 음식물, 재활용, 가로청소
㈜파주환경공사	공동주택 쓰레기 (생활,음식물,대형)	조리읍	생활, 음식물, 재활용, 가로청소
㈜하나 환경	운정신도시 (가로청소,대형,재활용)	운정신도시	가로청소
시설관리공단	그 외 지역 (생활,음식물,재활용,가로청소)	그 외 지역	생활, 음식물, 재활용, 가로청소
		파주시 공동주택, 금촌택지지구 단독주택, 교하신도시, 파주출판도시, 운정신도시	대형폐기물	대형폐기물
㈜씨에스	민간위탁 지역 외 (대형폐기물)	시설관리공단 외 전지역	대형폐기물

□ 기대효과

∙수거체계 일원화에 따른 주민편의 증대

∙인력관리 효율성 제고 및 지역 청소 책임의 명확화

□ 생활폐기물 수집·운반 대행업체 지도·점검 강화

□ 정기·수시 지도·점검 실시

∙민간위탁금 부정수급 여부 등 철저히 확인

□ 평가제 내실화를 통한 청소행정 서비스 수준 향상 제고

∙평가 횟수 확대(연 1회 → 2회)

∙평가단 현장평가 강화 및 시민참여 확대

2		공공수역 수질환경 보전

◈ 안정적인 수질관리로 기업 생산활동 기여

◈ 파주LCD 산업단지 내 수질오염사고 사전 예방

□ 파주LCD 폐수종말처리시설 확충사업(4단계)

□ 위    치 : 월롱면 엘씨디로 305

□ 기    간 : 2014년 ∼ 2018년

□ 사 업 비 : 837억원(국 586, 원인자 251)

□ 사 업 량 : 50,000톤/일(토목, 건축, 기계, 전기, 설비)

□ 기대효과

∙LG디스플레이 투자 촉진 및 파주시 지역경제 활성화

∙환경기반시설 적기 충족으로 안정적인 기업 생산활동 기여

□ 추진사항 및 계획

2014. 10.				→	2015. 10.				→	2018. 12.
기본계획 변경승인					공사 착공					공사 준공

□ 파주LCD 완충저류시설 설치 시범사업 추진

□ 위    치 : 월롱면 엘씨디로 305

□ 기    간 : 2015년 ∼ 2017년

□ 사 업 비 : 270억원(국 189, 원인자 81)

□ 사 업 량 : 13,000톤

□ 기대효과

∙파주LCD 산업단지 화재·폭발·누출 등 대형 환경오염 사고 발생 시 2차 수질오염 피해 예방으로 공공수역 수질보전

□ 추진계획

2015. 5.				→	2015. 12.				→	2016. 4.				→	2017. 10.
실시설계 용역 착수					실시설계 용역 준공					공사 착공					공사 준공

3		환경순환센터 개선사업 추진

◈ 노후된 설비를 교체하여 안정적인 수처리로 수질개선 및 가동효율을 높여 유지관리비 절감

□ 사업개요

□ 사업위치 : 파주읍 봉암리 1001-2 등 6필지

□ 시설현황 : 분뇨처리시설 140㎥/일

□ 사업기간 : 2014년 ∼ 2016년

□ 예 산 액

(단위 : 백만원)

총사업비	2014년	2015년	2016년	비 고
3,148	259	1,392	1,497	국50%,도25%,시25%

□ 사업내용

구 분	주요사업	비 고
2015	수중교반기설비, 활성탄여과기, 메탄올주입설비 협잡물종합처리기, 미세·조대 이송콘베이어
2016	옥외인입(H변대)시설, 감시제어시설, 계측기함

□ 추진실적 및 계획

□ 2014.11.17. : 설계용역 착수

□ 2015. 3.10. : 한강유역환경청 재원협의 완료

□ 2015. 3.16. : 설계용역 완료

□ 2015. 4.15. : 공사 착공

□ 2016. 8.31. : 공사 준공