2007 행정사무감사

도시산업위원회

2007 주요업무 추진상황

도시개발사업단

목 차 【공영개발과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무
Ⅱ.	2007 주요업무 추진실적
1.	교하신도시 조성
2.	LCD 클러스터 구축
3.	제2자유로 및 김포～관산간 도로 건설
【균형개발과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무
Ⅱ.	2007 주요업무 추진실적
1.	미군반환공여지 개발 추진
2.	주민숙원사업 추진
3.	대학설립 추진
【교통개발과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무

Ⅱ.	2007 주요업무 추진실적
1.	대중교통 활성화
2.	화물운송시장의 수급불균형 해소 및 안정화
3.	교통사고 저감사업
【차량사업소】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황
2.	분장사무
Ⅱ.	2007 주요업무 추진실적
1.	UP-grade 민원행정서비스를 위한 청사환경 개선

공영개발과  소관

2007 주요업무 추진상황

【공영개발과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
16	16	1	1	1	1	3	3	6	5	4	5	1	1

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
이주보상 담당	∙ 이주보상, 서무, 예산, 회계
신도시 담당	∙ 파주신도시 1,2,3지구 계획수립 및 지원, 주요개발구상
산업단지 담당	∙ 파주월롱․파주LCD․문산첨단산업단지 ∙ 파주신촌․파주축현 산업단지
광역교통 담당	∙ 운정지구 광역교통개선대책 ∙ 경의선 복선 전철화

Ⅱ. 2007 주요업무 추진실적

1. 교하신도시 조성

○ 지속가능한 친환경 도시, 생활환경 중심 도시, 변화있는 경관과

주거유형이 공존하는 최첨단 IT기술 도시 건설

□ 사업개요

∙ 위    치 : 교하읍 와동리외 10개리 일원

∙ 면적 및 계획인구 : 16,477천㎡(498만평, 218천명, 80천세대)

┌ 1․2지구 : 9,549천㎡(289만평, 124천명, 46천세대)

└ 3지구  : 6,928천㎡(209만평, 94천명, 34천세대)

∙ 사업기간 : 2003 ～ 2013(1,2지구 : 2009 / 3지구 : 2013)

∙ 시 행 자 : 파주시, 대한주택공사 공동시행

□ 추진상황

∙ 2001.  1.  4 : 1지구 지정 고시(건교부)

∙ 2003.  5. 20 : 1지구 택지개발계획 승인·고시(건교부)

∙ 2003. 12. 13 : 2지구 지정 고시(건교부)

∙ 2004. 12. 30 : 1,2지구 지정변경, 택지개발계획 및 1지구 실시계획승인

고시(건교부)

∙ 2005.  6. 30 : 1지구 착공

∙ 2006. 10. 27 : 3지구 예정지구 열람공고(～11.16) 및 행위제한 고시

∙ 2006. 12. 28 : 1,2지구 통합실시계획 승인

□ 향후계획

∙ 2007.  6. 30 : 3지구 지구지정

∙ 2008.  3. 30 : 2지구 착공

∙ 2009.  9. 30 : 최초 입주(1지구 한라․일신건영 2,060세대)

∙ 2009. 12. 30 : 1,2지구 사업 준공

∙ 2013. 12. 30 : 3지구 사업준공

2. LCD 클러스터 구축

○ 낙후된 접경지역에 대규모 LCD관련 투자유입과 중소기업 유치로

지역경제 활성화와 지역균형 개발

□ 파주LCD지방산업단지 조성

○ 사업개요

∙ 위    치 : 월롱면 덕은리, 탄현면 금승리 일원

∙ 사 업 량 : 1,713천㎡(518천평)

∙ 사 업 비 : 3,313억원(도비 110   시비 110   기타 3,093)

∙ 사업기간 : 2003 ～ 2007

∙ 시 행 자 : 파주시, 경기지방공사 공동시행

∙ 입주업체 : LG.philips LCD사, 대성가스(주), 한국SMT(주), 희성전자

∙ 추진공정 : 100%

○ 추진상황

∙ 2004.  2. 23 : 실시계획 승인 고시(경기도고시 제2004-49호)

∙ 2004.  7. 30 : 부지조성공사 착공

∙ 2006.  4.  6 : 제영향평가(변경) 협의 완료

∙ 2006.  9.  4 : 지구지정 및 실시계획(변경) 승인 고시

∙ 2007.  5. 30 : 공공시설물 인계인수관련 합동점검

○ 향후계획

∙ 2007.  7.    : 시설물 인계인수, 산업단지 준공

□ 문산첨단산업단지 조성

○ 사업개요

∙ 위    치 : 문산읍 당동․선유리, 파주읍 향양리 일원

∙ 사 업 량 : 1,953천㎡(591천평)

- 외투기업(당동) : 640천㎡(194천평)

- 국내기업(선유) : 1,313천㎡(397천평)

∙ 사 업 비 : 5,629억원(도비 140   시비 140   기타 5,349)

∙ 사업기간 : 2004 ～ 2008(2개지구 동시개발)

∙ 시 행 자 : 파주시, 경기지방공사 공동시행

∙ 입주업체 : LCD관련 약 90여개업체(당동 : 15개업체, 선유 75개업체)

∙ 추진공정 : 당동 - 67.46%  선유 - 89.86%

○ 추진상황

∙ 2004. 11. 15 : 지구지정 승인

∙ 2005.  6. 24 : 실시계획 승인

∙ 2005.  7. 22 : 부지조성공사 착공

∙ 2006. 10. 30 : 개발계획 및 실시계획변경 승인

○ 향후계획

∙ 2008.  6.    : 부지조성공사 완료

∙ 2008. 12.    : 시설물인수인계 및 산업단지 준공

□ 월롱첨단산업단지 조성

○ 사업개요

∙ 위    치 : 월롱면 능산리, 문산읍 내포리 일원

∙ 사 업 량 : 840천㎡(255천평)

∙ 사 업 비 : 2,534억원(도비 60   시비 60   기타 2,414)

∙ 사업기간 : 2006 ～ 2010

∙ 시 행 자 : 파주시, 경기지방공사 공동시행

∙ 입주업체 : LG전자, LG화학, LG이노텍, LG마이크론

○ 추진상황

∙ 2006.  1. 26 : 산업단지 입지후보지 결정

∙ 2006.  7.  4 : 사전환경성 및 사전재해영향성 협의 완료

∙ 2006.  7. 25 : 지구지정 승인 신청(시 → 경기도)

∙ 2006.  9. 25 : 수도권정비위원회 심의 완료

∙ 2006. 12. 20 : 지구지정 및 개발계획승인(경기도)

∙ 2007.  1. 24 : 제영향평가(초안) 협의 요청(환경․교통․재해․인구)

∙ 2007.  4.  6 : 환경영향평가 주민 공청회 개최

∙ 2007.  4. 10 : 제영향평가(초안) 협의 완료

∙ 2007.  6.  4 : 지정변경 및 실시계획 승인 신청에 따른 실과협의중

○ 향후계획

∙ 2007.  8.    : 제영향평가(본안) 협의 완료

∙ 2007.  9.    : 실시계획 승인, 부지 조성공사 착공

∙ 2010. 10.    : 산업단지 준공

3. 제2자유로 및 김포 ~ 관산간 도로건설

□ 사업개요

	제2자유로	김포～관산간 도로
사업구간	운정지구～대화I.C～강매I.C～상암동	장월I.C～운정I.C
사업규모	연장 22.78 ㎞ / 6차로	연장 7.54 ㎞ / 6～8차로
사업기간	2003～2009
시행주체	경기도, 대한주택공사(비관리청 공사시행)
사 업 비	14,792억원 ※ 운정(11,112) / 교하(2,022) / 국제전시장(1,658)	4,052억원

□ 추진상황

∙ 2006.  7.  5 : 교하신도시 1,2지구 광역교통개선대책 승인(건교부)

∙ 2007.  2. 13 : 지방도 노선인정 승인(건교부)

∙ 2007.  4. 17 : 김포～관산간도로 도로구역결정 자료제출(경기도)

∙ 2007.  6.  7 : 제2자유로 도로구역결정 자료제출(경기도)

□ 향후계획

∙ 2007.  7～8 : 공사발주 의뢰

∙ 2007.  8. 30 : 도로구역 결정 공고 및 주민열람

∙ 2007.  9. 10 : 환경․교통․사전재해영향평가 등 협의완료

∙ 2007.  9～10 : 도로구역 결정고시(경기도)

∙ 2007.  9～10 : 비관리청공사 허가 (경기도)

∙ 2007. 10～11 : 공사계약 및 착공(주공)

∙ 2009. 11～12 : 공사준공

균형개발과  소관

2007 주요업무 추진상황

【균형개발과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
9	9			1	1	3	3	3	3	2	2

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
공여지담당	∙ 미군반환공여지 개발추진 ∙ 국가균형발전업무 ∙ 서무, 회계, 예산
접경지담당	∙ 소규모 주민숙원사업 ∙ 살기좋은지역만들기사업 ∙ 민북개발사업 ∙ 접경지역지원사업 ∙ 마을회관 및 새마을시설물 관리
학교설립담당	∙ 이화여대설립추진 ∙ 서강대설립추진 ∙ 특목고설립추진

Ⅱ. 2007 주요업무 추진실적

1. 미군반환공여지 개발 추진

□ 미군반환공여지 개발

○ 공여지 반환 : 14개소(미국ꋼ한국)

∙주둔기지(10) : 캠프하우즈․에드워드․스텐톤․자이언트․게리오웬

그리브스․보니파스, 리버티벨, 찰리블럭, 프리덤브리지

∙사격장 등(4) : 텍사스사격장, 공수훈련장, 선착장, 다그마노스훈련장

○ 공여지별 활용계획

공 여 지	도 입 시 설
캠프하우즈	•교육·문화 Park •문화(체육)공원 •건강테마파크
캠프에드워드	•교육연구복합단지
캠프스텐톤	•Game Park•교육연구복합단지•택지개발
캠프자이언트	•교육연구복합단지
캠프게리오웬	•패션(IT)특화단지 •교육연구복합단지
캠프그리브스	•Peace Park •국제교류협력단지

○ 추진상황

∙ 2006.  3.  3 : 미군반환공여구역주변지역등 지원 특별법 제정

∙ 2006 . 9.  4 : 시행령 제정

∙ 2006.  9. 29 : 미군반환공여지 발전종합계획 수립 용역 발주

∙ 2006. 12.  7 : 반환공여지 단기(1차)종합계획 제출

∙ 2007.  3. 28 : 미군반환공여지 종합개발계획 수립 용역 완료

○ 향후계획

∙ 2007.  7. 31 : 단기(1차) 종합계획 승인(행자부)

∙ 2007. 12. 31 : 연도별 사업계획 승인(행자부)

∙ 2008.  3. ～ : 사업시행자 승인(파주시)

2. 주민숙원사업 추진

□ 접경지역지원사업

○ 사업개요

∙ 사업내용 : 생활환경 개선․생산기반 시설정비 등

∙ 사 업 량 : 초리골특화마을조성사업외 20개소

∙ 사 업 비 : 6,596백만원 (국비 4,617 도비 1,979)

○ 추진상황 : 공사중 21

○ 향후계획

∙ 2007. 10. 30 : 사업 완료(21개소)

□ 민통선 북방지역 개발사업

○ 사업개요

∙ 사업내용 : 생산 및 생활 기반시설

∙ 사 업 량 : 통일촌 직판장 증축 및 리모델링외 4개소

∙ 사 업 비 : 1,400백만원 (도비 700  시비 700)

○ 추진상황 : 준공 1, 공사중 4

○ 향후계획

∙ 2007. 10. 30  : 사업 완료(5개소)

□ 소규모 주민숙원사업

○ 사업개요

∙ 사업내용 : 마을회관 4동, 주민숙원사업 10개소

∙ 사 업 비 : 1,116백만원(시비)

○ 추진상황

∙ 주민숙원사업 : 준공 4, 공사중 2, 설계중 4

∙ 마을회관 : 준공 1, 공사중 3

○ 향후계획

∙ 2007.  7. 10 : 착공(4개소)

∙ 2007. 10. 30 : 사업 완료(14개소)

3. 대학설립 추진

□ 이화여대(2010. 3월 개교예정)

○ 개    요

∙ 위    치 : 월롱면 영태리 629번지 일원

∙ 부지면적 : 794,030㎡(240천평)

○ 추진상황

∙ 2006. 10. 11 : 대학유치를 위한 양해각서 체결

∙ 2007.  5.  7 : 도시관리계획(연구시설) 결정․고시

∙ 2007.  5. 15 : 2007년도 공유재산 관리계획 변경(의회 의결)

○ 향후계획

∙ 2007.  7～8 : 보상협약 체결 및 보상업무 위수탁협약 체결

∙ 2007.  12월 : 반환공여지 연도별 사업계획승인(행정자치부)

「특별법」에 의거 사업승인 신청(이화여대)

도시계획시설(연구시설→학교)변경 결정 등 의제사항 협의 추진

□ 서강대(2010. 3월 개교예정)

○ 개    요

∙ 위    치 : 문산읍 선유리 산18-1번지 일원

∙ 부지면적 : 204,468㎡(62천평)

○ 추진상황

∙ 2007.  2. 27 : 대학유치를 위한 양해각서 체결

∙ 2007.  3～4 : 미군공여지 및 주변지역 개발행위 및 건축허가 제한 공고

○ 향후계획

∙ 2007. 12월 :「특별법」에 의거 사업승인 신청(서강대)

도시계획시설(학교)변경 결정 등 의제사항 협의 추진

□ 두원공과대학(2008. 3월 개교예정)

○ 개   요

∙ 위    치 : 파주읍 봉암리 산 115외 5

∙ 부    지 : 88,040㎡(26,641평) / 연면적 16,248㎡(4,915평)

∙ 규    모 : 전문대 3개학과 / 정원 760명

(디스플레이, 디스플레이생산자동학과, 디지털콘텐츠)

∙ 건축착공 : 2006. 10. 31 [공정률 : 22%]

○ 추진상황

∙ 2006.  7. 14 : 도시관리계획(용도지역변경, 학교) 결정 고시

∙ 2006.  9.  5 : 도시계획시설(학교) 실시계획 인가

∙ 2006. 10. 31 : 파주캠퍼스 기공식

○ 향후계획

∙ 2007. 12. 31 : 본관, 산학관 준공

∙ 2008.   3월 : 개교

□ 신흥대학(2009. 3월 개교예정)

○ 개    요

∙ 위    치 : 법원읍 삼방리 산 93-13외 6필지

∙ 부    지 : 371,847㎡(112,484평) / 연면적 7,590㎡(2,296평)

∙ 규    모 : 4개학과 / 정원 256명

(전자통신과, 영어통역과, 웹프로그램, 소프트웨어)

○ 추진상황

∙ 2006.  7. 11 : 신흥대학 일부이전계획 변경승인 신청(교육인적자원부)

- 문산읍 내포리 산120번지 일원→법원읍 삼방리 산 93-13외 6필지

∙ 2006.  12월 : 학교법인 재산용도(수익용↔교육용)를 변경하여 부지매입

불가 통보(교육부)

○ 향후계획

∙ 2007.  7월 : 신흥대학 일부이전계획 변경승인 재신청(교육인적자원부)

□ 한서울 관광대학(2009. 3월 개교예정)

○ 개    요

∙ 위    치 : 탄현면 금산리 산 41-1번지외 15필지

∙ 부    지 : 197,989㎡(57,955평) / 연면적 191,689㎡(5,720평)

∙ 규    모 : 4개학과 / 정원 480명

(호텔경영, 외식서비스, 관광외식, 제빵과)

○ 추진상황

∙ 2006. 8.  7 : 학교법인 태성학원 설립허가

∙ 2007. 1.  5 : 군작전성 검토결과 부동의 회신

∙ 2007. 3. 21 : 군작전성 검토 재협의(제5003부대)

∙ 2007. 4.  9 : 군작전성 검토결과 부동의 회신

∙ 2007. 5. 14 : 도시관리계획(학교) 입안 제안(태성학원→파주시)

∙ 2007. 5. 28 : 보완 통보(파주시→태성학원)

○ 향후계획

∙ 2007.  7월  : 군작전성 검토 재협의 예정

∙ 2007.  8월  : 도시관리계획(학교) 결정 예정

교통개발과  소관

2007 주요업무 추진상황

【교통개발과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
15	14			1	0	4	4	4	3	5	6	1	1

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
대중교통담당	∙ 지방대중교통계획 수립 ∙ 여객운송사업 및 대여사업 인․허가 및 등록 ∙ 운송사업자 재정 및 유가보조금 지원
운수지도담당	∙ 화물자동차운송사업 인․허가 및 등록 ∙ 사업용차량 지도 단속 ∙ 자동차관리법 위반 행정처분
교통시설담당	∙ 어린이보호구역 정비 ∙ 교통안전시설 설치 및 관리 ∙ 교통체계개선사업 등 안전사고 저감 대책 추진 ∙ 교통영향평가

Ⅱ. 2007 주요업무 추진실적

1. 대중교통 활성화

□ 대중교통 노선 확충

○ 교하택지, 헤이리아트벨리, 영어마을, 통일동산 지역의 대중교통 불편      해소를 위한 버스 노선 확충

○ 노선신설

∙ 2000번(교하택지～서울역, 22대)← 9704번 양도양수

∙ 9번(금촌～LG 필립스, 1대)

∙ 23번(팜스프링～영태2리, 1대)

∙ 100-86번(출판단지～운정역, 1대)

○ 노선연장 및 조정

∙ 773번(맥금동～신촌역) → 이마트 굴곡노선 조정

∙ 2000번(교하～서울역) → 교하택지～대화역 직행운행

∙ 909번(문산～불광동) → 서울역 노선연장

∙ 3번(봉일천～일산터미널) → 금촌역 노선연장

∙ 6번(금촌로타리～웅지세무대) → 금촌택지 노선연장

∙ 92번(금촌～적성터미널) → 어유지리 노선연장

∙ 93번(문산～JSA) → 도라산역 노선연장

∙ 900번(맥금동～일산신도시) → 유승앙브와즈 굴곡노선 조정

∙ 100-88번(금촌～이마트) → 굴곡노선 조정

∙ 100-30번(탄현～금촌택지) → 노선분리로 운행횟수 증회

○ 노선통합 및 분리

∙ 신성교통 200번(맥금동~합정역)과 2200번을 200번으로 통합

∙ 한일운수 100-86번을 100-87번으로 분리

□ 수도권 통합요금제를 위한 대중교통 체계 개선

○ 목    적 : 수도권 마을․시내버스, 전철간 환승시 요금부담 경감을              위한 요금체계 정비

○ 내    용

∙ 시내․마을버스 정류장 정비

- 마을버스 정류장간 거리측정(36개 노선)

- 시내버스 정류장 위치 측정(731개소)

∙ 마을버스 카드 단말기 일제 장착(71대)

∙ 시내, 마을버스 요금조정

- 시내버스 구간요금제, 단일요금제를 거리비례제로 일원화

- 마을버스 구간요금제 폐지

□ 마을버스 재정지원

○ 사업개요

∙ 대    상 : 10개업체/36개노선/71대

∙ 지 원 액 : 710백만원

∙ 지원내용 : 버스구입비, 재정지원(적자노선 보조, 보험료, 피복비 등)

○ 추진상황

∙ 2007.  3. 14 : 버스구입비 40백만원 지원(명진교통, 1대)

∙ 2007.  5. 11 : 상반기 특별재정지원 214백만원(10개업체, 보험료)

∙ 2007.  9월  : 하반기 특별재정지원 456백만원(예정)

2. 화물운송시장의 수급불균형 해소 및 안정화

○ ‘04. 4월 화물차의 신규허가 금지에 따라 발생한 불법 증차, 허가

취소, 감차차량을 색출하기 위해 번호판 전면 교체 추진

- 번호판 교체 후 불법증차 및 말소된 차량운행 불가

○ 부실업체에 대한 구조조정

- 3년마다 허가기준에 관한 사항 신고

□ 사업용화물자동차 번호판 교체

○ 사업개요

∙ 추진기간 : 2007. 1. 1 ～ 12. 31

∙ 교체대상 : 4,775대

∙ 교체실적

- 용달화물 : 356대(66%), 개별화물 : 259대(56%), 일반화물 : 985대(26%)

□ 화물자동차운수사업허가기준 신고

○ 사업개요

∙ 신고기간 : 2007. 4. 21 ～ 7. 20 (3개월간)

∙ 신고대상 : 1,109개업체

∙ 내    용 : 자본금, 차고지, 사업장 소재지, 보험가입 여부 등

○ 추진실적

- 용달화물 : 282개 업체(53%)

- 개별화물 : 190개 업체(42%)

- 일반화물 :   5개 업체( 4%)

3. 교통사고 저감사업

□ 어린이보호구역 정비사업

○ 사업개요

∙ 위    치 : 뽀뽀뽀어린이집 외 2개소

∙ 내    용 : 미끄럼방지시설, 안전휀스, 노면표시, 교통안전표지판

∙ 사업예산 : 352백만원

○ 추진상황

∙ 2007. 3. 13 : 계약의뢰

∙ 2007. 3. 28 : 공사착공

∙ 2007. 9. 30 : 공사준공

□ 교통안전시범도시 추진사업

○ 사업개요

∙ 기    간 : 3년(2007 ～ 2009)

∙ 목    적 : 교통사고 사망자수 감축

∙ 주요내용 : 안전진단실시 및 교통안전사업추진

∙ 소요예산 : 30억원(도비 : 15억, 시비 : 15억)

○ 향후계획

∙ 안개 잦은곳 개선사업 추진

- 위  치 : 56번 국지도 구간

- 기  간 : 2007. 7월 ～ 2007. 10월

- 사업비 : 200백만원

∙ 대각선 횡단보도 시범사업

- 위  치 : 금촌6단지 입구 교차로, 교하7단지 교차로

- 기  간 : 2007. 7월 ～ 2007. 10월

- 사업비 : 100백만원

□ 교통시설물 정비 및 확충

○ 사업개요

∙ 위    치 : 파주시 관내

∙ 사 업 량 : 신호등 및 교통안전표지판 등 127종

∙ 사업기간 : 2007. 2월 ～ 2007.12월

∙ 사업예산 : 800백만원

○ 추진상황

∙ 2007. 1.  9 : 계약의뢰

∙ 2007. 1. 22 : 공사착공

※ 교통표지판정비(통합․신설 : 313개, 정비 : 1,255개)

□ 파주시 ITS 기본계획 및 기본설계 용역

○ 사업개요

∙ 사업기간 : 2007. 6월 ～ 2007. 12월

∙ 사 업 비 : 300백만원

∙ 사업내용

- 파주시 ITS 구축목표 및 기본계획 구상

- 파주시 특성에 맞는 서비스 도출 및 우선순위 선정

- 교하신도시 U-City와 통합연계 방안 제시

- ITS구축 및 운영에 따른 재원확보방안 도출

○ 향후계획

- 2007.  7월 : 용역착수

- 2007. 12월 : 용역완료

□ 교통약자 이동편의 증진계획 용역

○ 사업개요

∙ 사업기간 : 2007. 7월 ～ 2008. 2월

∙ 사 업 비 : 70백만원

∙ 사업내용

- 교통약자이동편의 시설 분석 및 보행환경개선 계획

- 교통약자를 위한 이동편의 증진정책의 기본방향 및 목표설정

- 재원확보방안 도출

○ 향후계획

∙ 2007.  7월 : 용역착수

∙ 2007. 12월 : 용역완료

차량사업소  소관

2007 주요업무 추진상황

【차량사업소 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8～9급		기능직
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
10	10	-	-	1	1	2	3	3	2	3	3	1	1

2. 분장사무

담 당 별	분 장 사 무	비 고
차량등록담당	∙ 자동차 및 건설기계등록 (신규,이전,변경,말소) ∙ 자동차등록원부 발급(열람) ∙ 자동차등록번호판 교부대상자관리 ∙ 자동차임시운행허가 ∙ 자동차압류(해제)등록 ∙ 자동차,이륜차 전산관리 ∙ 건설기계조종사면허 관리
차량관리담당	∙ 자동차관련 책임보험(대인,대물)업무 ∙ 무보험운행자처리 ∙ 자동차검사안내 및 관리 ∙ 자동차 말소(도난,수출) ∙ 자동차관련 과태료 징수결정

1. UP-grade 민원행정서비스를 위한 청사환경 개선

○ 청사에 대한 보수와 시설물에 대한 효율적인 관리로, 시민이 만족하는

주민편익중심의 행정서비스 제공 및 쾌적한 사무 환경 조성

□ 차량사업소 내부시설 정비공사

∙ 목  적 : 청사 내부구조의 보온․단열미비로 인한 민원인의 불만으로            내부시설을 개선, 대주민 서비스 향상에 기여

∙ 사업량 : 463.59㎡(140평)

○ 추진상황 : 공사완료/ 진도100%

∙ 사업기간 : 2007. 4. 10  ～ 5. 28

∙ 사 업 비 : 150백만원

∙ 사업내용 : 회의실증축, 사무실 목공사, 천정단열재등

○ 기대효과

∙ 청사 환경 개선 및 시민이 만족하는 민원서비스 제공