2017 행정사무감사

도시산업위원회

2017년 주요업무 추진상황

안전건설교통국

목 차 【안전총괄과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		7
2.	분장사무		7
Ⅱ.	2017 주요업무 추진실적
1.	안전문화운동 패러다임 전환		8
2.	재난 예방 및 대응 시스템 구축		8
【건 설 과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		11
2.	분장사무		11
Ⅱ.	2017 주요업무 추진실적
1.	사통발달 희망파주路 건설 구축 가속화 추진		13
2.	치수․이수․친수기능이 확보된 하천 조성		14
3.	2017년 자체 역점사업 추진사항		15
【철도교통과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		19
2.	분장사무		19

Ⅱ.	2017 주요업무 추진실적
1.	수도권광역급행철도(GTX) 추진		21
2.	지하철 3호선 연장		21
3.	문산-도라산 전철화 사업		22
4.	교통안전시설 확충		22
5.	교통관련 기본계획 수립 용역 추진		23
【대중교통과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		27
2.	분장사무		27
Ⅱ.	2017 주요업무 추진실적
1.	출퇴근이 편한 굿모닝버스체계 구축		29
2.	택시 서비스 향상으로 이용만족도 증진 도모		30
【주 택 과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		33
2.	분장사무		33
Ⅱ.	2017 주요업무 추진실적
1.	행복주택 추진		35
2.	공동주택 시설보수비 지원사업 추진		35
3.	공동주택관리 공감행정 운영		36
4.	도시․주거 환경 정비사업 추진		36

【건 축 과】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		39
2.	분장사무		39
Ⅱ.	2017 주요업무 추진실적
1.	건축신고 효력상실 사전예고제 추진실적		41
2.	건축물품질 무한돌봄사업 추진실적		41
3.	건축사와 함께 하는 무료건축상담실 운영실적		41
【차량등록사업소】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		45
2.	분장사무		45
Ⅱ.	2017 주요업무 추진실적
1.	다양한 행정서비스로 민원편의 도모		47
2.	자동차과태료 체납액 정리율 제고		48
【도로관리사업소】
Ⅰ.	기본현황
1.	인력현황		51
2.	분장사무		51
Ⅱ.	2017 주요업무 추진실적
1.	신속한 도로유지 보수체계		53
2.	원활한 교통소통을 위한 제설작업 추진		54

안전총괄과 소관

2017 주요업무 추진상황

【안전총괄과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8급		9급		전문 경력관		기타 (청경, 상용, 무기계약 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
23	22	1	1	1	0	5	6	8	8	4	2	3	5	1	0	3

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
안전건설교통국장		시설4급	정원모	∙안전건설교통국 업무총괄	2014. 7. 1	2년10월
안전총괄과장		행정6급	이종칠	∙안전총괄과 업무 총괄	2017. 2. 7	2월
안 전 기획팀	팀 장	행정6급	이태희	∙안전기획업무 총괄	2016. 2.11	1년 2월
	주무관	행정7급	이효정	∙ 국서무, 안전문화운동	2016. 2.11	1년 2월
	주무관	행정7급	손호윤	∙ 예산, 회계	2014. 8. 5	2년 8월
	주무관	행정8급	오선혜	∙ 과서무, 의용소방대, 충무계획	2016. 8. 8	8월
안 전 협력팀	팀 장	방송통신6급	김재석	∙안전협력업무 총괄	2015. 2.16	2년 2월
	주무관	행정7급	신혜경	∙안전한국훈련, 축제점검	2016. 8. 8	8월
	주무관	공업7급	배영수	∙국가안전대진단, 시특법 시설	2016.10.10	6월
	주무관	방재안전9급	김성욱	∙재난상황실, 어린이놀이시설	2016. 2.11	1년 2월
	주무관	행정9급	김유진	∙안전신문고, 재난대응매뉴얼	2016.10.10	6월
안 전 대책팀	팀 장	시설6급	김민섭	∙안전대책업무 총괄	2017. 2. 7	2월
	주무관	행정7급	김명기	∙자연재해위험지구 등	2014. 8. 5	2년 8월
	주무관	방재안전9급	김영록	∙재해사전대비, 복구계획 등	2016. 2.11	1년 2월
	주무관	시설9급	엄현식	∙인명피해 우려지역 등	2016.10.10	6월
방 재 시설팀	팀 장	공업6급	박한수	∙방재시설업무 총괄	2014. 1. 1	3년 4월
	주무관	공업7급	조상영	∙배수펌프장 관리	2016. 2.11	1년 2월
	주무관	방송통신7급	김환태	∙재난예경보시설 운영	2014. 8. 5	2년 8월
	주무관	행정9급	노진경	∙방재시설 관리 등	2017. 3. 2	2월
민방위팀	팀 장	행정6급	한성희	∙민방위업무 총괄	2016.10.10	6월
	주무관	행정7급	이정현	∙사회복무요원, 을지연습	2017. 3. 1	2월
	주무관	공업8급	신중하	∙민방위 시설 및 장비관리	2014. 3. 3	3년 1월

Ⅱ. 2017 주요업무 추진실적

1. 안전문화운동 패러다임 전환

□ 매월 ‘안전점검의 날’ 운영

○ 내    용 : 월별 재난취약현장 안전점검 및 캠페인 실시

○ 추진실적 : 16개 읍·면·동 3,941명/ 944개소 안전점검

□ 생활안전 교육

구 분	기 간	대 상	추진실적	비 고
어린이	2017. 4. ~ 12.	초등학교 36개교	8개교/ 1,060명
청소년	2017. 3. ~ 12.	중·고등학교 45개교	28개교/ 14,838명
시민안전	2017. 3. ~ 6.	일반시민 640명	6개 읍면동/ 170명	16개 읍면동 ※ 하반기 별도
안전체험교실	2017. 1. ~ 12.	유치원생, 학생 등	27개소/ 914명	민방위교육장

○ 내    용 : 심폐소생술 및 응급처치 실습, 화재 및 지진 등 체험

□ 시설물 일제 안전점검

○ 국가안전대진단 실시(2017. 2. 6 ～ 3.31) : 4개 분야 711개 시설

○ 해빙기안전점검 실시(2017. 2.13 ～ 3.31) : 4개 분야 237개 시설

2. 재난 예방 및 대응 시스템 구축

□ 사전예방 및 원격시스템, 모니터링 강화

○ 여름철 자연재난 예방대책 추진

∙ 인명피해 우려 재해취약지역 지정(64개소) 및 주민대피계획 수립

∙ 재해취약시설 점검 및 정비 : 급경사지(14개소), 하천급류 지역(13개소)

∙ 재난대비 임차장비 및 위험수목 제거 단가계약 운영

○ 풍수해저감종합계획 재수립 용역 추진(2016. 5. 9 ~ 2018. 5. 8)

○ 배수펌프장 정비(선유3 유수지 정비, 문산당동 원격제어시스템 구축)

○ 영상감시시스템 신규 설치 3개소(특공연대, 고산천 상류, 둔방이길)

건설과 소관

2017 주요업무 추진상황

【건 설 과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8급		9급		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
16	16	0	0	1	1	3	3	6	6	4	4	2	2	2

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
건설과장		시설5급	최귀남	∙건설과 업무 총괄	2012.10.29	4년 7월
건 설 행정팀	팀 장	행정6급	정관조	∙건설행정팀 업무 총괄	2017. 2. 7	3월
	주무관	행정7급	노경덕	∙국·공유재산 관리	2017. 2. 7	3월
	주무관	행정7급	조선녀	∙예산, 회계, 전문건설업 등록	2014. 8. 5	2년 9월
	주무관	행정8급	표지은	∙서무, 도유폐천부지 관리	2016.10.10	7월

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
도 로 건설팀	팀 장	시설6급	한광우	∙도로건설팀 업무 총괄	2016. 3. 1	1년 2월
	주무관	시설7급	임거기	∙서울~문산, 제2외곽순환, 제2통일로, 국도 업무 협의	2014.10. 6	2년 7월
	주무관	시설7급	김창구	∙국지도·지방도 업무 협의, 평화누리길 자전거도로, 접경지역 사업관리	2014. 1. 1	3년 4월
	주무관	시설8급	이영림	∙도시계획도로, 운정~능안, 시도1호선, 야당동 도로 개설	2015. 7.27	1년10월
	주무관	시설8급	장지영	∙자전거도로계획, 농어촌 도로 정비계획, 주민참여 예산, 설계자문위원회, 보상, 보도설치	2015. 2.16	2년 3월
	주무관	방재9급	박 용	∙보도정비계획, 심학초교 진입도로, 도로교통량조사, 소규모 도로개설, 보도설치	2016. 2.11	1년 3월
하 천 건설팀	팀 장	시설6급	임상범	∙하천관리팀 업무 총괄	2015. 7.27	1년10월
	주무관	시설7급	윤신영	∙국가하천 유지관리, 금촌천 생태하천복원, 야영·취사·낚시 단속	2016. 2.11	1년 3월
	주무관	시설7급	강재경	∙소하천 유지관리, 눌노천, 수내천, 맨박골천, 배수문관리, 골재업, 비법정교량	2016. 8. 8	9월
	주무관	시설8급	최현석	∙지방하천 유지관리, 금곡천, 큰골천, 비관리청 허가	2017. 2. 7	3월
	주무관	시설9급	정휘원	∙하천점용, 공유수면, 미불용지 및 위탁보상	2016.10.10	7월

Ⅱ. 2017 주요업무 추진실적

1. “사통발달 희망파주路” 건설 구축 가속화 추진

□ 2017년 도로건설 사업 현황

(단위: ㎞, 억원, %)

사업명		위치	사업량	사업 기간	사업비				공정		비고
					계	기투자	2017	향후	공사	보상
총 계( 14 건 )			211.92		62,049	20,393	7,555.5	34,100.5
국가	소계(3건)		94.49		51,761	15,407	6,614	29,740
	서울~문산 (고속국도17호)	서울 강서구 ~ 문산 내포리	35.6	2007~ 2020	22,941	12,576	4,686	5,679	3	89	보상 공사
	김포~파주~포천 (고속국도400호)	김포 통진읍 ~ 포천 가산면	51	2008~ 2024	27,000	1,368	1,609	24,023	0	0	실시 설계
	적성~전곡간 (국도37호/3공구)	적성 객현리 ~ 연천 전곡리	7.89	2002~ 2018	1,820	1,463	319	38	80	100
경기도	소계(6건)		45.72		8,277	4,481	569	3,227
	조리~법원 (국지도56호)	조리 등원리 ~ 법원 대능리	13.7	2007~ 2018	3,093	2,691	294	108	65	95
	용미~광탄 (국지도78호)	고양시 벽제 ~ 광탄 용미리	4.65	2007~ 2015	851	30	0	821	99	100
	설마~구읍 (지방도371호)	양주 남면 ~ 적성 가월리	8.03	2007~ 2018	1,350	1,224	80	46	70	98
	월롱~광탄 (지방도360호)	월롱 위전리 ~ 광탄 방축리	5.74	2004~ 미정	1,691	200	30	1,461	0	9.4	보상
	적성~두일 (지방도371호)	조리 뇌조리 ~ 파평 율곡리	11.8	2014~ 2020	1,020	302	85	633	0	0	설계 (서울청)
	내포IC~임월교 (지방도359호)	임월교 ~ 내포IC	1.8	2015~ 2018	272	34	80	158	0	0	설계
파주시	소계(4건)		63.67		611	312	138.5	160.5
	운정~능안	상지석동 ~ 조리 능안리	2.5	2006~ 2018	252	105	12.5	134.5	12	61	보상 공사
	평화누리길 자전거도로	문발동 ~ 적성 두지리	59	2011~ 2018	177	81	70	26	83	0	공사
	향양3리 도로확포장	조리 뇌조리 ~ 파평 율곡리	2	2006~ 2017	146	107	39	0	65	95	보상 공사
	적성전통시장 우회도로	적성 마지리 ~ 적성 구읍리	0.17	2016~ 2017	36	19	17	0	10	30	보상 공사
L H	소계(1건)		8.07		1,400	193	234	973
	시도1호선	문발공단 ~ 삽다리삼거리	8.07	2013~ 2019	1,400	193	234	973	0	20	보상 공사

2. 치수·이수·친수기능이 확보된 하천 조성

□ 2017년 하천사업 현황

(단위: ㎞, 백만원, %)

사업명		위치	사업량	사업 기간	사업비				공정		비고
					계	기투자	2017	향후	공사	보상
총 계( 11 건 )			45.49		472,135	107,379	24,429	340,327
국 가 하천	소계(3건)		25.89		349,143	55,511	6,208	287,424
	문산천 (월롱지구) 하천환경정비	동문천 합류부 ~ 파주 부곡리	9.8	2013~ 2017	29,629	27,046	2,583	0	90	100	서울청
	문산천 (문산지구) 하천정비	임진강 합류부 ~ 동문천 합류부	1.8	2014~ 2018	44,514	23,765	3,625	17,124	33	95	서울청
	임진강 (마정‧거곡) 하도정비	문산 마정리 진동면 거곡리	7.61	2012~ 용역중지	275,000	4,700	0	270,300	0	0	서울청
			6.68
지방하천	소계(4건)		11.3		93,928	46,052	13,903	33,973
	금촌천 도심하천 생태복원사업	금촌역 일원	1.9	2012~ 2017	26,000	21,137	4,863	0	70	89
	눌노천 개수공사	법원 웅담리 일원	1.7	2011~ 2017	10,751	10,651	100	0	90	100
	답곡천 수해상습지 개선사업	파평 금파리 ~ 적성 자장리	4.5	2013~ 2018	32,968	12,164	4,500	16,304	23	71	경기도
	동문천 수해상습지 개선사업	법원 동문리 일원	3.2	2014~ 2020	24,209	2,100	4,440	17,669	0	49	경기도
소하천	소계(4건)		8.3		29,064	5,816	4,318	18,930
	큰골천 개수공사	광탄 발랑리	0.9	2014~ 2018	5,984	2,600	2,318	1,066	58	94
	금곡천 개수공사	법원 금곡리	0.7	2014~ 2018	2,680	1,616	700	364	55	99
	수내천 개수공사	군내 정자리	5.0	2015~ 2020	18,000	1,200	1,000	15,800	0	51
	맨박골천 개수공사	문산 장산리	1.7	2016~ 2019	2,400	400	300	1,700	0	66

3. 2017년 자체 역점사업 추진사항

○ 평화누리길 자전거도로 조성

∙ 접경지역(파주, 고양, 연천)을 잇는 평화누리길 자전거도로 네트워크        를 구축함으로서 생활자전거 이용활성화 및 지역관광 발전

∙ 추진사항

- 2016. 4. : 통일동산~내포IC 구간(9.64km) 착공

- 2017. 5. : 통일동산~내포IC 구간(9.64km) 준공

- 2017. 6. : 파평면 장파리~적성면 두지리 구간(6.4km) 완료(예정)

- 2018.12. : 임월교~반구정 구간(3.5km) 완료(예정)

○ 향양3리 도로확‧포장공사

∙ 낙후된 파주 북부지역의 균형발전과 지역경제 활성화를 위한 조기개통 추진

∙ 추진사항

- 2017. 2.27 : 1차분 준공      - 2017. 2.28 : 2차분 착공

- 2017.12.   : 준공예정         ※전체공정률 공사(65%), 보상(95%)

○ 적성전통시장 우회도로 개설

∙ 적성 지역의 발전과 관광 산업 추진으로 경제 수요가 증가함에 따라        지역주민과 방문객의 이용편의 및 접근성 향상의 필요성 증대

∙ 추진사항

- 2017. 1. : 공사 발주, 감정평가 및 분할측량

- 2017. 3. : 착공 (보상 병행추진)

- 2017.12. : 준공예정

○ 금촌천 도심하천 생태복원사업

∙ 집중호우시마다 재해에 취약하고 수질이 악화되는 문제점이 있어         치수기능 확보 및 수질환경 개선을 통해 사람과 하천이 함께 어우        러지는 자연친화적인 공간으로 조성하여 시민주거환경 향상

∙ 추진사항

- 2017.  6 : 보행데크교 설치 완료(예정)

- 2017. 12 : 준공예정

철도교통과 소관

2017 주요업무 추진상황

【철 도 교 통 과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8급		9급		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
13	13	0	0	1	1	4	4	3	2	2	3	3	3	1

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
철도교통과장		시설5급	이병준	∙철도교통과 업무 총괄	2015. 7. 3	1년10월
교 통 정책팀	팀 장	시설6급	김성년	∙교통정책팀 업무 총괄	2015. 7.27	1년 9월
	주무관	시설8급	이지형	∙교통대책, 특별교통수단운영, 물류창고업, 부담금, 도시교통기본정비계획 등 수립	2015. 7.27	1년 9월
	주무관	행정9급	양아영	∙서무,회계,승용차요일제	2016. 8. 8	9월

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
철 도 추진팀	팀 장	시설6급	나호준	∙철도추진팀 업무 총괄	2014.10. 6	2년 7월
	주무관	행정7급 (임기제)	안용성	∙GTX·지하철3호선 파주건설, 광역교통개선대책 수립	2005. 2.11	12년 3월
	주무관	행정8급 (임기제)	강민구	∙경의선, 문산·도라산전철화, 교통영향평가	2011. 9.22	5년 8월
교 통 시설팀	팀 장	공업6급	김해원	∙교통시설팀 업무 총괄	2014. 8. 5	2년 9월
	주무관	행정7급 (임기제)	박대현	∙교통안전계획수립, 교통 신호체계, 버스 정류소 관리	2016. 3. 1	1년 2월
	주무관	시설9급	김진혁	∙보호구역(어린이·노인· 장애인) 유지관리 및 신규설치	2015. 7.27	1년 9월
교통 정보팀	팀 장	공업6급	김세중	∙교통정보팀 업무 총괄	2016. 2.11	1년 3월
	주무관	공업8급	박시환	∙지능형교통시스템(ITS) 계획 수립, 교통정보센터 유지관리, 마을버스정보 관리	2015.11. 9	1년 6월
	주무관	공업9급	김기민	∙ITS 현장시설물 유지관리, 버스정보시스템(BIS) 추진·교체·유지관리, 홍보물관리	2015. 2.16	2년 2월

Ⅱ. 2017년 주요업무 추진실적

1. 수도권광역급행철도(GTX) 추진

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 고양 킨텍스~운정신도시, 6.1km, 4,400억원

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2023년

※ GTX를 운정까지 연장반영 이후, 문산차량기지 공용방안에 대해 협의 추진

□ 추진현황

○ 2016. 6.27 : ’제3차 국가철도망 구축계획‘ 파주시 사업 확정·고시(국토부)

○ 2016.12. 6 : ’16년도 하반기 예비타당성 조사‘ 대상사업 선정(기재부)

○ 2017. 1.10 : 예비타당성 조사 용역 착수(한국개발연구원)

○ 2017. 1.24 : GTX ‘파주~삼성’ 동시착공 정책 토론회 개최

□ 향후계획

○ 조속한 예·타 통과를 통해 ‘GTX 민자시설사업 기본계획’(`17. 9월)에 파주~삼성으로 노선을 확정하여 전구간 동시 사업착공 추진

2. 지하철 3호선 연장

□ 사업개요

노선명	노 선	연장	총사업비
운교선	대화역(3)~운정신도시	7.6km	8,383억원
금촌·조리선	지축역(3)~삼송(3)~벽제~조리~금촌	16km	1조 9,200억원

□ 추진현황

○ 2016.12.16 : ’파주시 철도망 효율화 구축방안 연구‘ 용역 착수

* 용 역 사 : 한국교통연구원 / 용역기간 : 2016.12 ~ 2018. 6

○ 2017. 1. 5  : ’파주시 철도망 효율화 구축방안 연구용역‘ 착수보고회 개최

□ 향후계획

○ 운 교 선 : ‘예비타당성 조사’ 신청을 위한 사전타당성 용역 추진 및 관계기관 사전협의 추진

○ 금촌조리선 : 조리읍의 캠프하우즈 개발 및 고양시의 통일로 인근 개발계획과 연계하여 향후 국가철도망 구축계획에 반영 추진

3. 문산-도라산 전철화 사업

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 문산역 ~ 임진강역 ~ 도라산역, 9.7km, 388억원(국비)

○ 사업내용 : 전력선 설치, 승강장 개조 등

□ 추진현황

○ 2015.12. 3 : ｢문산~도라산 전철화사업｣ 설계비(10억원) 확보(국토부)

○ 2016. 9. 6 : 실시설계 착수(시행 : 한국철도시설공단)

□ 향후계획

○ 2017. 8. : 실시설계 완료

○ 2017.12. : ｢문산-도라산 전철화사업｣ 실시계획 승인(국토부)

○ 2018.    : 공사 착공

○ 2019.    : 공사 준공

4. 교통안전시설 확충

(단위 : 천원)

사업명	사업기간	사업비	위 치	사업내용
계		453,000
교통신호시설 설치공사	2017. 3. ~ 2017. 6.	400,000	- 문산 세성아파트 앞, 금촌 체육공원, 산내6·8단지, 야동7통 마을회관, 산남동 122, 금촌 파라다이스, 맥금14통 , 금촌1동 주민센터, 희성전자, 월롱 119 안전센터	신호등 10개소
버스정류장 LED 조명등 설치	2017. 2. ~ 2017. 3.	23,000	- 교하동 SBS 전원마을 등 60개소 ㆍ SBS 전원마을 등 31개소 신설 ㆍ창만사거리 등 29개소 보수	31개소 신설, 29개소 보수
어린이 보호구역 개선사업	2017. 5. ~ 2017. 6.	30,000	- 창조어린이집	차선도색 안전표지판 과속방지턱 미끄럼방지포장

5. 교통관련 기본계획 수립 용역 추진

(단위 : 천원)

사업명	사업비	용역내용	추진실적 및 계획
도시교통정비 기본(변경) 및 중기계획 수립용역 (도시교통정비촉진법 제5조,제8조, 교통약자 이동편의 증진법 제7조)	200,000	◯ 사업기간 - 2016. 4. 1 ~ 2017. 1.31 ㆍ도시교통현황 및 전망, 투자사업 계획 ㆍ교통약자 이동편의 증진계획 ㆍ지속가능 지방교통물류 발전계획 수립	- 2016. 4. 1 : 과업착수 - 2016. 6. 3 : 착수보고 - 2016. 8. 8 : 용역중지 ※상위계획 반영을 위한 용역중지 - 2017. 12 : 경기도 심의 및 확정고시
교통안전 기본계획 수립용역 (교통안전법 제17조 및 같은 법 시행령 제13조)	150,000	◯ 사업기간 - 2017. 3. ~ 2017.11 ㆍ교통안전수준 분석 및 교통사고 발생 원인 분석 ㆍ교통안전정책 목표설정 및 부분별 추진계획 수립	- 2017. 3.22 : 과업착수 - 2017. 5. : 심의위원회 구성 - 2017. 5. : 착수보고 - 2017. 8. : 중간보고 - 2017.10. : 최종보고

대중교통과 소관

2017 주요업무 추진상황

【대중교통과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8급		9급		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
14	14	0	0	1	1	3	3	5	5	3	2	2	3	7

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
대중교통과장		행정5급	이동림	∙대중교통과 업무 총괄	2015. 2.16	2년 3월
버스팀	팀 장	행정6급	이성용	∙버스팀 업무 총괄	2015. 7.27	1년10월
	주무관	행정7급	김지영	∙버스 재정지원, 저상버스 도입, 유가보조금	2017. 2. 7	3월
	주무관	행정7급	서윤범	∙전세버스 인허가 및 처분	2016. 8. 8	9월
	주무관	시설8급	임지산	∙시내버스 인허가	2015. 7.27	1년10월
	주무관	행정9급	노현아	∙서무, 회계	2016. 10.10	7월
	주무관	시설9급	정찬세	∙마을버스 인허가	2016. 8. 8	9월

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
택 시 화물팀	팀 장	행정6급	최호진	∙택시화물팀 업무 총괄	2015. 7.27	1년10월
	주무관	행정7급	이구복	∙택시 인·면허	2015.11. 9	1년 6월
	주무관	행정7급	박재용	∙화물 인허가, 차고지 설치 확인	2016. 2.11	1년 3월
운 수 지도팀	팀 장	행정6급	이창우	∙운수지도팀 업무 총괄	2014. 8. 5	2년 9월
	주무관	공업7급	서천종	∙자동차관리·대여사업, 불법구조변경	2010.11.15	6년 6월
	주무관	시설8급	김태양	∙마을버스, 화물자동차 행정처분	2017. 2. 7	3월
	주무관	시설9급	정우철	∙시내버스, 단속택시 행정처분 및 지도단속	2016. 8. 8	9월

Ⅱ. 2017 주요업무 추진실적

1. 출퇴근이 편한 굿모닝버스체계 구축

□ 2층버스 도입 사업

○ 사업개요

∙ 도입대수 : 총 11대

∙ 도입노선 : 광역버스 7111번, 200번, 2200번, 9030번, 9710번 등

∙ 사 업 비 : 4,950백만원(도비 1,650, 시비 1,650, 업체 1,650)

∙ 사업내용 : 출퇴근 입석 및 증차 요구를 해소하기 위해 파주와 서울을 왕복하는 광역버스 노선에 2층버스 도입

○ 추진사항

∙ 2016.12.      파주시 2층버스 도입 물량 11대 선정

∙ 2017. 3.      2층버스 1대 운행개시 - 광역버스 7111번

○ 추진계획

∙ 2017. 9.      2층버스 7대 운행개시

∙ 2017.12.      2층버스 3대 운행개시

□ 멀티환승거점정류소 개선사업

○ 사업개요

∙ 설치장소 : 총 3개소(운정 새암공원, 산내마을6‧8단지, 교하 숲속길마을7단지)

∙ 사 업 비 : 600백만원(도비 180, 시비 420)

∙ 설치물량 : 버스승강장, 버스정보안내기, 방범CCTV, 줄서기유도선 등

○ 추진사항

∙ 2016.12.      멀티환승거점정류소 개선사업 실시설계 완료

∙ 2017. 4.      멀티환승거점정류소 개선사업 착공

○ 추진계획

∙ 2017. 6.      멀티환승거점정류소 개선사업 준공 및 운영

2. 택시 서비스 향상으로 이용만족도 증진 도모

□ 파주 브랜드택시 운영비 지원

○사업개요

∙콜서비스를 제공하여 택시와 이용 승객간 효율적 매칭으로 시민편의        및 만족도 향상

연도	지원액	지원기준	비고
2017. 4월현재	41,040천원	모뎀통신비 대당 15,000원*689대	2017년도 예산액 : 124,020천원

○지원현황

○추진계획

∙매월 말 지급

□ 택시카드결제 수수료, 택시카드단말기 통신료 지원

○사업개요

∙현금 외 요금결제 수단으로 시민에게 서비스제공 및 택시업계 경영 투명성 제고

○지원현황

∙카드결제수수료

연도	지원액	지원기준	비고
2017. 4월현재	22,511천원	7천원미만 카드결제금액의 1.9%	‘17년도 예산액 : 159,279천원

∙카드단말기 통신료

연도	지원액	지원기준	비고
2017. 4월현재	2,409천원	1,760원 / 대당	‘17년도 예산액 : 14,572천원

○추진계획

∙분기지급

주택과 소관

2017 주요업무 추진상황

【주 택 과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8급		9급		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
18	16	0	0	1	1	3	3	6	6	4	2	4	4	1

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
주택과장		시설5급	박진춘	∙주택과 업무 총괄	2014. 7.14	2년10월
공동주택 개발팀	팀 장	시설6급	임세웅	∙공동주택개발업무 총괄	2014. 1. 1	3년 4월
	주무관	시설7급	김윤성	∙주택건설사업계획승인 ∙공동주택 건축허가	2017. 2. 7	3월
	주무관	시설8급	조영태	∙주택건설사업계획승인 ∙공동주택 건축허가	2016. 8. 8	9월
	주무관	시설9급	박은혜	∙주택건설사업계획승인 ∙공동주택 건축허가	2015.11. 9	1년 6월
	주무관	사무 운영7급	기세경	∙서무, 회계	2017. 2. 7	3월

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
공동주택관리팀	팀 장	시설6급	오인택	∙공동주택관리업무 총괄	2015. 7.27	1년 9월
	주무관	시설7급	이준희	∙공동주택관리 업무 ∙공동주택 감사	2016. 2.11	1년 3월
	주무관	시설8급	전찬호	∙공동주택관리 업무 ∙시설물관리 보조금 지원 사업 추진	2016. 8. 8	9월
	주무관	시설9급	황연일	∙행위허가(신고) 및 불법관리 ∙입주자대표회의구성신고	2016.10.10	7월
도시 재생팀	팀 장	시설6급	최정석	∙주거정비업무 총괄	2012.10.29	4년 6월
	주무관	시설7급	최근명	∙도시재생 사업추진 ∙정비사업 연계형 뉴스테이 사업	2014. 1. 1	3년 4월
	주무관	복지7급	정은정	∙주거급여	2014.10. 6	2년 7월
	주무관	행정7급	윤혜영	∙도시재생 사업추진 ∙용주골 특수상황지역개발 사업 추진	2017. 2. 7	3월
	주무관	시설9급	황인대	∙도시 및 주거환경정비 기본계획 운영 ∙정비사업 추진	2016. 2.11	1년 3월
	주무관	시설9급	김하경	∙임대사업자 등록 ∙임대주택 단지내 보안등 전기요금 지원	2016.10.10	7월

Ⅱ. 2017 주요업무 추진실적

1. 행복주택 추진

구 분		법원읍	광탄면	파주·적성
사업위치		법원리 431-49번지 일원	신산리 582번지 일원	부지 선정 중
사업규모		250세대 (16∼45㎡)	250세대 (16∼45㎡)	파주(250) / 적성(150) (16∼45㎡)
추진 실적	공모사업선정	2016. 4. 22	2016. 9. 22	-
	사업승인고시	2017. 1. 18	-	-
향후 계획	사전절차 (2017년)	-	▪LH와 업무협약 ▪군부대 동의 및 토지 교환 등 행정절차 이행	▪LH 및 군부대 협의 절차 이행 ▪하반기 행복주택 공모 신청
	공사착공	2017. 11.	2018
	공사준공 및 입주	2019. 12.	2020

2. 공동주택 시설보수비 지원사업 추진

□ 사업개요

○ 사업대상 : 2017년 장안밀레니엄 아파트 등 12개 단지

○ 사 업 비 : 310,000천원

○ 보조금 지원범위

∙ 지원대상 : 준공 후 10년 이상 경과된 주택건설사업승인 대상 공동주택

구 분	지원실적			비고
	계	2015년 이전	2016년
건	114	99	15
지원금액(천원)	3,053,404	2,266,130	387,274

□ 추진실적

○ 2017. 2. 14. : 보조금 지급 결정‧통보

○ 2017. 6.     : 사업완료(예정)

3. 공동주택관리 공감행정 운영

□ 사업개요

○ 찾아가는 공동주택 순회교육

∙ 공동주택 단지를 직접 방문하여 관리비 절감, 입대의 선거 절차,

공동체 활성화 방안, 사업자 선정 절차 등 매주2개단지 실시

○ K-apt(공동주택관리정보시스템) 모니터링

∙ 공동주택 각종 공사·용역 관련 선정지침 위반사항 등 일일 점검

□ 추진실적

구분 년도별	찾아가는 공동주택 순회교육	K-apt(공동주택관리정보시스템) 모니터링
합계	134	473
2016	100	315
2017.4월	34	158

(단위 : 건)

4. 도시・주거 환경 정비사업 추진

□ 금촌2동제2지구, 율목지구, 문산3리지구 뉴스테이 추진

○ 추진상황

∙ 2017. 4.20 : 정비계획 변경에 따른 도시계획・경관 공동위원회 개최

○ 향후계획

∙ 2017. 5.   : 정비계획 변경 고시

□ 용주골 창조문화밸리 프로젝트 추진

○ 추진상황

∙ 2017. 3.14 : 2017년 제2차 지방재정 중앙 투자사업 심사 신청

○ 향후계획

∙ 2017. 5.   : 2017년 제2차 지방재정 중앙 투자사업 심사

건축과 소관

2017 주요업무 추진상황

【건 축 과 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8급		9급		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
19	18	0	0	1	1	4	5	5	7	6	3	3	2	4

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
건축과장		시설5급	유문석	∙건축과 업무 총괄	2014. 7.14	2년10월
건 축 행정팀	팀 장	시설6급	이현기	∙건축행정팀 업무총괄	2016.10.10	7월
	주무관	시설7급	신영욱	∙주거환경개선사업	2014. 1. 1	3년 4월
	주무관	시설7급	윤정상	∙이행강제금 부과, 부설주차장	2016. 8. 8	9월
	주무관	시설관리8급	정주연	∙서무, 회계, 예산	2016. 8. 8	9월
	주무관	시설9급	조재현	∙불법건축물 지도관리	2017. 2. 7	3월

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
건 축 관리팀	팀 장	시설6급	남동우	∙건축관리팀 업무총괄	2015. 7.27	1년 9월
	주무관	시설7급	석지영	∙건축물대장 표시변경 및 전산화	2016. 8. 8	9월
	주무관	시설7급	최승환	∙건축신고(운정, 교하), 가설, 공작물	2014.12. 1	2년 5월
	주무관	시설7급	김형욱	∙건축신고(교하,상·하지석, 야당,교하,금촌),공작물	2015. 7.27	1년 9월
건 축 민원1팀	팀장	시설6급	박기정	∙건축민원1팀 업무총괄	2016. 2.11	1년 3월
	주무관	시설7급	김영운	∙건축허가(파주,금촌)	2015. 7.27	1년 9월
	주무관	시설7급	신동하	∙건축허가(문산,조리)	2015. 2.16	2년 3월
	주무관	시설9급	김숙정	∙건축허가(탄현,군내), 건축사관리	2015.11. 9	1년 6월
건 축 민원2팀	팀 장	시설6급	임기석	∙건축민원2팀 업무총괄	2016. 3. 2	1년 2월
	주무관	시설6급	배성진	∙건축허가(야당,법원,월롱)	2016. 2.11	1년 3월
	주무관	시설8급	송현주	∙건축허가(교하,목동,야당)	2014. 8. 5	2년 9월
	주무관	시설8급	권기록	∙건축허가(와동,연다산, 적성)	2013.11.25	3년 5월

Ⅱ. 2017 주요업무 추진실적

1. 건축신고 효력상실 사전예고제 추진실적

○ 행정기관 방문횟수 단축으로 시민편의 제공

○ 건축주의 재산상 손실비용 방지

(단위 : 건)

읍면동 년도별	계	문산	조리	법원	파주	광탄	탄현	월롱	적성	파평	교하 금촌 권역
합계	44	0	1	5	12	0	0	0	0	0	26
2016	15	0	1	5	0	0	0	0	0	0	9
2017	29	0	0	0	12	0	0	0	0	0	17

2. 건축물품질 무한돌봄사업 추진실적

○ 품질관리의 사각지대인 소규모 건축물 품질향상

○ 간접적인 감리비용 지원효과(연면적 100㎡ 기준 1백만원)

(단위 : 건)

읍면동 년도별	계	문산	조리	법원	파주	광탄	탄현	월롱	적성	파평	교하 권역	금촌 권역
합계	1,250	67	67	63	70	166	143	86	79	49	410	50
2016	1,113	61	51	56	62	150	124	77	66	42	377	47
2017	137	6	16	7	8	16	19	9	13	7	33	3

3. 건축사와 함께 하는 무료건축상담실 운영실적

○ 건축사 재능기부에 따른 무료상담으로 주민불편 해소

○ 양질의 건축서비스 제공으로 시 건축행정에 대한 시민의 신뢰 향상

(단위 : 건)

월별 년도별	계	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
합계	61	2	8	9	10	7	5	5	8	7
2016	57		6	9	10	7	5	5	8	7
2017	4	2	2	-

차량등록사업소 소관

2017 주요업무 추진상황

【차량등록사업소 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8급		9급		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
16	16	0	0	1	1	3	3	8	8	2	2	2	2	4

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
차량등록사업소	소 장	행정5급	조종화	∙차량등록사업소 업무 총괄	2015. 7. 3	1년10월
차량등록	팀 장	행정6급	송인숙	∙차량등록업무 총괄	2016. 2.11	1년 2월
	주무관	행정7급	김선아	∙건설기계 등록	2016. 8. 8	9월
	주무관	행정7급	정옥순	∙예산, 회계, 차령초과	2017. 2. 7	3월
	주무관	행정8급	채세라	∙서무, 운행정지, 멸실, 자동차등록위반 과태료	2016. 8. 8	9월
	주무관	행정8급	변혜진	∙자동차등록	2014. 7. 1	2년 10월
	주무관	행정9급	박지영	∙건설기계, 이륜차등록	2016. 2.11	1년 2월
	주무관	행정9급	유지안	∙자동차등록	2016.10.10	7월

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
차량세무	팀 장	세무6급	황치연	∙차량세무업무 총괄	2016. 2.11	1년 2월
	주무관	세무7급	신재하	∙자동차 압류, 영치관리	2015. 7.27	1년 9월
	주무관	세무7급	염정한	∙자동차 의무보험 관리	2016. 8. 8	9월
	주무관	행정7급	노형미	∙자동차 검사 관리	2015. 1.16	2년 3월
특별사법경찰	팀 장	해양 수산6급	이민규	∙특별사법경찰팀 총괄	2014.11. 3	2년 6월
	주무관	세무7급	이지혜	∙무보험운행 사법처리	2016. 1. 1	1년 3월
	주무관	세무7급	김영숙	∙무보험운행 사법처리	2015. 7. 1	1년10월
	주무관	행정7급	배상기	∙무단방치 행정·사법처리	2016.10.10	7월

Ⅱ. 2017 주요업무 추진실적

1. 다양한 행정서비스로 민원편의 도모

□ 추진현황

○ 멸실 대상 차량 일제조사 (2017. 1. 1. ~ 2017. 4.30.) : 18,711대

∙ 멸실인정 전담팀 구성 : 4명 (반장-차량등록팀장, 반원-3명)

∙ 사용본거지 확인 및 사망자 확인 등 멸실 총괄 : 차량등록팀

∙ 3년간 보험가입 여부 및 검사 여부 확인 : 차량세무팀

∙ 3년간 운행사실 확인 : 특별사법경찰팀

○ 자동차 검사 안내문 발송 : 4,158건

○ 의무보험 안내문 발송 : 2,388건

○ 상속이전등록 안내문 발송 : 173건

○ 무단방치차량 처리 통한 도시미관 정비                (단위: 건)

민원	경고	견인처리	자진처리	방치 아님
126	15	49	50	12

□ 추진계획

○ 멸실 대상 차량 안내문 발송 : 5월초 발송 예정

○ 보험 가입촉구서 매월발송(현행 회차별 1회에서 최고 6회 추가발송)

○ 자동차 검사전 안내문 추가발송

(종전 자동차관리법에 따라 검사경과후 안내문만 발송)

2. 자동차과태료 체납액 정리율 제고

□ 추진현황

○ 체납액 징수현황 (2017. 1. 1 ～ 2017. 4.30)           (단위: 천원)

구 분	징수결정액		징수액		체납액		징수율 (%)
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
현년도	8,265	636,722	4,131	158,901	4,134	477,821	24.9

□ 체납액 징수 추진 실적과년도 체납분 징수과 이관

○ 부동산 압류 및 예고 : 34명/ 90건/ 17,671천원

○ 자동차 압류 : 1,969명/ 5,338건/ 893,063천원

○ 경⋅공매 부동산 교부 청구 : 71명/ 413건/ 122,002천원

○ 30만원 이상 체납자 번호판 영치 및 예고 : 676명/ 1,204건/441,341천원

○ 전화 징수독려 : 8,054건/ 719,576천원

○ 자동차 검사 사전안내문 발송 : 14,620건

○ 청산종결 법인등 과세자료 정비 : 12건/ 9,126천원

□ 향후 추진계획

○ 차량말소 통한 과태료 체납 최소화

○ 자동차, 부동산, 각종 채권등 압류 및 예고

○ 팀별 협업을 통한 행정 효율화로 징수활동 강화

(소재수사와 불법주기 민원처리 출장시 체납독려 및 번호판영치)

○ 납기 전,후 직원별 전화 징수독려 실적관리

도로관리사업소 소관

2017 주요업무 추진상황

【도로관리사업소 소관】

Ⅰ. 기본현황

1. 인력현황

(단위 : 명)

계		4급		5급		6급		7급		8급		9급		기타 (청경, 상용, 무기계약, 일용 등)
정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	현원
18	18	0	0	1	1	4	4	4	5	5	4	5	4	12

※ 기타직 인원은 총계에 포함하지 않음

2. 분장사무

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
도로관리사업 소 장		시설5급	피영일	∙도로관리사업소 업무 총괄	2016. 3. 2	1년 1월
도 로 관리팀	팀 장	시설6급	조웅휘	∙도로관리업무 총괄	2016. 8. 8	8월
	주무관	공업7급	송춘석	∙도로점용허가(금촌, 운정), 도로점용료 부과 및 체납관리	2017. 2. 7	3월
	주무관	행정7급	장현자	∙예산, 회계, 계약	2015. 7.27	1년 9월
	주무관	행정7급	송현주	∙서무, 부당이득금 소송	2017. 2. 7	3월
	주무관	시설9급	송민선	∙도로점용허가(조리,문산,파평, 적성), 과적단속 및 접도구역	2015.11. 9	1년 5월
	주무관	행정9급	남궁경진	∙도로점용허가(교하,탄현,광탄), 부당이득금 소송	2014.10. 6	2년 6월

담 당 팀	직 위	직 급	성 명	분 장 사 무	현부서 임용일	재직 기간
도 로 보수1팀	팀 장	시설6급	김달수	∙도로보수 1팀 업무 총괄	2015. 7.27	1년 9월
	주무관	시설7급	김경준	∙ 설해대책, 임차장비 연간단가계약, 자전거도로 유지보수	2014. 8. 5	2년 8월
	주무관	시설8급	김명준	∙ 도로시설물 유지관리(운정,교하, 금촌지역, 가드레일),소규모 주민숙원사업	2017. 2. 7	3월
	주무관	시설9급	최소영	∙도로시설물 유지관리(조리,기타 남부권, 반사경), 수로원관리 및 각종 요금 납부, 구상금 소송 도로시설물 배상	2017. 2. 7	3월
도 로 보수2팀	팀 장	시설6급	김진영	∙도로보수 2팀 업무 총괄	2016. 2.11	1년 3월
	주무관	시설7급	어윤천	∙도로표지판 관리, 군 방호벽 정비사업 추진	2014. 8. 5	2년 8월
	주무관	기계 운영8급	정훈용	∙도로굴착허가, 미불용지보상	2011.12.19	5년 5월
	주무관	시설9급	한광선	∙읍, 면(1팀 구역 제외) 도로 시설물유지관리 및 민원처리, 구상금소송(읍,면),도로시설물 배상, 제한차량 운행허가	2016. 2.11	1년 3월
구조물 관리팀	팀 장	공업6급	이수환	∙구조물관리 업무 총괄	2015. 7.27	1년 9월
	주무관	공업8급	이호중	∙운정신도시 도로구조물 인수인계, 터널, 공동구, 지하차도 유지관리	2015.11. 9	1년 5월
	주무관	시설8급	강수	∙도로구조물(교량) 안전 점검 및 보수·보강사업	2014.10. 6	2년 6월

Ⅱ. 2017 주요업무 추진실적

1. 신속한 도로유지 보수체계

□ 추진배경

○ 효율적인 도로관리로 깨끗하고 편안한 도로환경 조성

□ 신속한 도로유지보수(권역별 연간단가)

○ 권역별 유지보수 개요 및 처리현황(2017년)

(단위 : 천원)

일련 번호	사 업 명	위 치	처리현황	사업기간	사업비	비고
총계	12건
1	1지구 (금촌1,2,3동)	금촌동	34개소	2017. 1.11 ～ 12.31	100,000
2	2지구 (교하동)	교하동	14개소	2017. 1.11 ～ 12.31	100,000
3	3지구 (운정1,2,3동)	운정동	27개소	2017. 1.11 ～ 12.31	100,000
4	4지구 (조리읍)	조리읍	12개소	2017. 1.11 ～ 12.31	100,000
5	5지구 (탄현면, 월롱면)	탄현면, 월롱면	25개소	2017. 1.11 ～ 12.31	100,000
6	6지구 (문산읍)	문산읍	18개소	2017. 1.11 ～ 12.31	100,000
7	7지구 (파주읍, 광탄면)	파주읍, 광탄면	32개소	2017. 1.11 ～ 12.31	100,000
8	8지구 (법원읍, 파평면, 적성면)	법원읍, 파평면, 적성면	23개소	2017. 1.11 ～ 12.31	100,000
9	가드레일, 난간, 반사경 유지보수	파주시 일원	가드레일 12경간 휀스 20경간	2017. 1.11 ～ 12.31	90,000
10	차선도색	파주시 일원	5,685㎡	2017. 1.11 ～ 12.31	500,000
11	도로표지판 정비	파주시 일원	16개소	2017. 1.13 ～ 12.31	80,000
12	건설폐기물 처리	파주시 일원	폐콘 115톤 폐아스콘 55톤	2017. 1.24 ～ 12.31	50,000

2. 원활한 교통소통을 위한 제설작업 추진

□ 추진배경

○ 신속하고 완벽한 제설작업을 통한 안전한 도로환경 조성

□ 추진실적(2016년 ~ 2017년)

○ 사 업 비 : 1,115,000천원

(임차장비 : 733 / 염화칼슘 및 소금 : 382)

○ 기상현황 및 제설추진(2016.11.15 ~ 2017. 3.15)

∙ 기상현황 : 대설주의보 2회, 총강설량 20.2㎝, 일최대적설량 7㎝

∙ 제설추진 : 17회

□ 추진계획

○ 제설기간 : 2017.11.15 ~ 2018. 3.15 (4개월)

○ 도로현황 : 149개 노선, 726㎞

○ 장비현황 : 150대

(단위 : 대)

총계	보유장비				임차장비				시설관리공단
	살포기 (대형)	살포기 (소형)	보도용	굴삭기	15톤 덤프	소형 화물차	굴삭기	살수차	다목적차량	살수차
150	44	26	5	1	43	12	9	8	1	1

○ 제설제 현황

(단위 : 톤)

총 계			염화칼슘			소 금			염 수			비고
확보	사용	잔량	확보	사용	잔량	확보	사용	잔량	확보	사용	잔량
10,490	3,586	6,904	7,967	3,171	4,796	1,963	245	1,718	560	170	390