맑은물환경사업단

보   고   순   서

□ 주요업무 추진계획
【상수도 분야】
○ 깨끗한 물 공급을 위한 노후 상수도 시설 교체			67
○ 물 복지 실현을 위한 상수도 보급 확대			67
○ 상수도5단계 확장사업			68
【하수도 분야】
○ 공공하수처리시설 건설		69
○ 청정(淸淨)도시 구현을 위한 하수관로 정비		70
○ 맞춤형 물사랑 파주人 아카데미 운영		71
【환경시설 분야】
○ 쾌적한 거리환경 조성으로 신뢰받는 청소행정 구현		72
○ 안정적인 폐기물 처리를 위한 시설개선 추진		73
○ 산업단지 입주기업 환경 인프라 조성		74
○ 쾌적한 도시조성을 위한 환경기초 시설 선진화		75
【도시경관 분야】
○ 안전하고 쾌적한 고품격 도시경관 조성		76
○ 불법주정차 및 노점 없는 밝고 안전한 거리조성		77

상수도 분야 주요업무 추진계획

1		깨끗한 물 공급을 위한 노후 상수도시설 교체

◈ 믿고 마시는 안전한 수돗물 공급

◈ 노후 상수도관 교체로 깨끗한 수돗물 공급

□ 깨끗한 물 공급을 위한 노후 상수도시설 교체

□ 상수도관 교체 (3,308백만원)

∙ 6개 지역 노후 수도관 교체공사 (L=22km)

* 법흥리(통일초 인근), 축현리(탄현중 인근), 법원리(율곡중 인근)

가야리(법원여중 인근), 금촌동(금촌초 인근), 봉일천리(읍사무소 인근)

□ 계량기 교체 (880백만원)

∙ 파주시 전지역 7,587전

* 내구연수 50mm이하 8년, 50mm이상 6년

□ 노후주택 녹슨 상수도관 교체 지원 사업 (138백만원)

∙ 노후주택 옥내급수설비 교체 (270세대)

* 문산 도우빌라, 법원 율곡아파트, 금촌 장안하나아파트

2		물 복지 실현을 위한 상수도 보급 확대

◈ 취약지역 수돗물 공급으로 물 복지 실현

◈ 소화전 보강으로 화재진화 골든타임 확보

□ 급수 취약지역 상수도 공급

□ 상수도관 확장 시행 (900백만원)

∙ 5개 지역 6,382가구(주택 6,018, 공장 364)에 수돗물 공급

∙ 상수도관 매설 L=9km

* 문산읍 당동리, 탄현면 금산리, 월롱면 능산리, 상지석동, 야당동

□ 소방용수시설 보강사업

□ 소화전 보강 설치 (277백만원)

∙ 주거 및 공장 밀집지역 등 70개소에 소화전 설치

3		상수도5단계 확장사업

◈ 상수도 사용량 증가에 따른 안정적인 수돗물 공급

◈ 민북지역 GOP 등 군소초 수돗물 공급

□ 사업개요

□ 위    치 : 파주읍 파주리, 민북지역(진동면 하포리)

□ 사업규모

∙파주읍계통 : 배수지(V=4,000㎥) 1개소, 가압장(Q=13,000㎥/일) 1개소,                    상수도관(D500∼D600mm) L=2.06km

∙민북계통 : 배수지(V=1,300㎥) 1개소, 가압장(Q=2,300㎥/일) 1개소,                    상수도관(D150∼D300mm) L=12.24km

□ 사 업 비 : 147억원

□ 사업기간 : 2016. 1. ∼ 2020. 6.

(현재 도시관리계획 결정 및 실시계획인가 절차 이행 중)

□ 수혜가구

□ 파주읍계통 : 7천 세대, 14천 명

□ 민북계통 : 3백 세대, 8백 명 / 군 4개 대대, 3천 명

※ 배수지현황                                        (단위:㎥/일, ㎥, 백만원)

배수지	시설용량	제 원					준공	총사업비	비 고
계	295,300		142,364					95,194
문산	96,000	V=	33,064		체류시간	8.3hr	‘99. 9.27		정수지
교하	65,500	V=	32,800		체류시간	12.1hr	‘08.12.19	23,259	배드민턴장, 족구장, 화장실
법원	6,000	V=	4,500		체류시간	19.1hr	‘08.12.19	3,839	산불감시원대기 헬기 계류장
월롱	10,000	V=	6,000		체류시간	13.6hr	‘13. 6.28	47,305	야외공연장, 씨름장, 공원
광탄	10,900	V=	6,000		체류시간	14.4hr	‘09.10.30	5,047	테니스장
탄현	9,900	V=	5,000		체류시간	13.5hr	‘12. 8.16	5,337	궁도(국궁)장
적성	97,000	V=	55,000		체류시간	12.1hr	‘12. 8.16	10,407	소규모 운동기구

하수도 분야 주요업무 추진계획

1		공공하수처리시설 건설

◈ 하수처리구역 확대를 통한 주거환경 개선 및 공중보건 향상

◈ 생활하수 적정처리로 하천 수질개선

□ 전체현황(하수처리장)

□ 운 영 중 : 19개소(157,720톤/일)

∙공공하수 14개소 157,300톤/일, 소규모 5개소 420톤/일

□ 계속사업 : 5개소(2,430톤/일)

∙증설(광탄)      ∙ 신설(용미, 어유지리, 영장리, 두포리)

□ 신규사업 : 6개소(17,220톤/일)

∙개량 : 4개소 17,000톤/일 (문산, 파주, 법원, 광탄)

∙신설 : 2개소    220톤/일 (객현리, 조산리)

구분	사업명		사업량 (톤/일)	사 업 비(억원)				사업기간	비 고
				총사업비	기투자	‘18년	향후
계	11개			1,028	177	250	601
계속	광탄증설		400	93	9	30	54	‘16∼’19	‘18년 착공
	어유지리		480 L=7㎞	82	44	16	22
	용미		700 L=18㎞	229	110	42	77	‘16∼’19	설계중
	영장리		480 L=18㎞	227	7	77	143	‘17∼’20
	두포리		370 L=8㎞	120	7	40	73
신규	개량	문산	7,500	67		10	57	‘18∼’19	‘18년 설계 착수
		파주	4,500	49		10	39
		법원	3,000	38		10	28
		광탄	2,000	30		7	23
	조산리		60	9		4	5
	객현리		160 L=8㎞	84		4	80	‘18∼’21

※ 하수시설 보급률 93.6% → 2018년 93.7%

2		청정(淸淨]도시 구현을 위한 하수관로 정비

◈ 체계적인 하수관로 정비로 시민편의 중심의 하수서비스 강화

◈ 생활하수 적정처리를 통한 시민의 삶의 질 향상

□ 전체현황(하수관로)

□ 운영중

∙임대형(BTL) : L=227㎞, 배수설비 9,783가구, 펌프장 61개소

∙자체운영 : L=330㎞, 배수설비 9,955가구, 펌프장 47개소

□ 사업중 : 3개소(계속 2개소, 신규 1개소)

구분	사업명	사업량 (㎞)	사업비 (억원)				사업기간	비고
			총사업비	기투자	‘18년	향후
계	3개소	86.1	709	189	102	418
계속	금촌 (조리․월롱)	30	228	182	19	27	‘16~’20	착공
	운정 (교하․대동)	44	373	7	73	293	‘17~’21
신규	노후관로	12.1	108	-	10	98	‘18~’21	설계

※ 하수관로 보급률 82% → 2018년 82.5%

3		맞춤형 물사랑 파주人 아카데미 운영

◈ 물에 대한 관심과 이해로 생활 속 물사랑 실천 유도

◈ 지속가능한 물환경 보전을 위한 시민 관심 제고

□ 물사랑 맞춤형 홍보 강화

□ 물사랑 파주人 아카데미 추진 : 18회 / 8.9백만원

∙운영기간 : 2018. 4월 ～ 11월

∙모집인원 : 540명/년

□ 운영방법 : 문산정수장 및 운정물재생센터, 하수처리수

재이용시설 견학

□ 주요내용

∙초중고, 사회단체 등 눈높이에 맞춘 교육 및 홍보

∙수돗물의 생산, 하수처리공정 등 현장견학을 통한 물의

소중함 이해

∙수질오염의 원인 및 하수처리 필요성 홍보

□ 기대효과

∙물사랑 서포터즈 활동을 통한 1인당 물소비량 감소

∙상․하수도정책 신뢰성 확보

환경시설 분야 주요업무 추진계획

1		쾌적한 거리환경 조성으로 신뢰받는 청소행정 구현

◈ 음식물류폐기물 개선방안 연구를 통한 음식물처리 시스템 선진화 구축

◈ 청결활동을 통한 시민운동 확산 및 쾌적한 거리환경 조성

□ 음식물류폐기물 종량제 시행방안 연구용역

□ 연구대상 : 음식물류폐기물 종량제 방식 연구

□ 사 업 비 : 15,000천원

□ 연구내용 : 공동주택내 RFID기기 내구연한 종료(2017.10월,

2018.10월)에 따른 음식물종량제 처리방식 연구용역

□ 기대효과 : 음식물류폐기물처리 개선방안 연구를 통해 보다 효율적인 수수료 부과방식, 예산절감 및 시민편익 증가

□ 쾌적한 거리환경 조성

□ 골목길 입양사업

∙행정력이 미치기 어려운 도로청소 사각지역(골목길)을 단체 또는 기관에서 입양하여 관리

□ 행복홀씨 입양사업

∙다중집합장소 및 공공시설 등 일정장소를 지역주민 및 단체에 입양하여 자율적으로 환경정화 및 꽃 등 식물식재로 관리

□「내 집 앞, 내 가게 앞 청소하기」캠페인 활성화

□ 생활폐기물 수거함 설치 및 운영

∙대상지역 : 불특정 다수인의 통행이 많은 전철역, 버스정류장 일원

∙사 업 비 :  30,000천원

∙사업내용 : 생활쓰레기 수거함 90개(45세트) 설치

∙기대효과 : 길거리 쓰레기 투기 방지를 통한 도시미관 개선 및 쾌적한 주거환경 조성

2		안정적인 폐기물 처리를 위한 시설개선 추진

◈ 노후화된 소각시설(15년 이상)의 기술진단 실시로

시설물 개선 및 안정적인 효율적 운영방안 도출

□ 시설현황

구 분	파주시 환경관리센터(소각시설)
소 재 지	탄현면 방촌로 1213-52
시설용량	200톤/일(100톤/일 × 2기)
가 동 일	1호기(‘02. 7월) / 2호기(‘03. 2월)

□ 그간 추진사항

□ 2017. 11. : 파주시 환경관리센터(소각시설) 기술진단 계획수립

□ 2017. 12. : ‘18년 본예산 반영 및 기술진단 신청

∙ 진단기관 : 한국환경공단(8개월 소요)

∙ 진단범위 : 현황조사, 현상진단, 시설개선․효율화 방안 및

시설관리방안 등

∙ 진 단 비 : 214,810천원(VAT 포함)

□ 향후계획

□ 2018.  1. : 기술진단 수립 및 보고(공단 → 환경부)

□ 2018.  2. : 기술진단 일정 통보(공단 → 파주시)

□ 2018.  3. : 진단 실시

□ 2018. 11. : 진단 완료

□ 기대효과

□ 시설․공정․운영진단을 실시하여 시설개선 대책 및 운영

효율화 방안 제시

□ 진단결과에 따른 대보수 시 국비 지원 가능

3		산업단지 입주기업 환경 인프라 조성

◈ LG디스플레이 P10공장 증설에 따른 공공폐수처리시설 확충으로 기업하기 편한 환경조성 및 수질오염 방지

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 파주LCD 공공폐수처리시설 설치사업(4단계)

□ 위    치 : 월롱면 엘씨디로 305(덕은리 1229)

□ 기    간 : 2016년 ∼ 2018년

□ 사 업 비 : 837억원(국비 586, 원인자부담금 251)

□ 시설용량 : 50,000톤/일(토목, 건축, 기계, 전기, 제어, 조경)

□ 그간 추진사항

□ 2014.10.13 : 공공폐수처리시설 기본계획(변경) 승인

□ 2015.11.18 : 설치사업 협약(파주시 ↔ 한국환경공단 ↔ LG디스플레이)

□ 2015.12.31 : 입찰안내서 작성 용역 착수

□ 2016. 5.12 : 입찰안내서 검토완료(한강유역환경청)

□ 2016. 5.31 : 입찰공고

□ 2016.11.16 : 공사 착공(GS건설 컨소시엄)

□ 2017. 9. 1 : 실시설계 검토완료(한강유역환경청)

□ 2018. 1월현재 : 지하구조물 공사완료, 상부 구조물·유입관로· 관리동 공사중

□ 향후계획

□ 2018. 5 : 시운전 개시

□ 2018.11 : 공사 준공

4		쾌적한 도시 조성을 위한 환경기초시설 선진화

◈ 환경순환센터 시설현대화 ⇒ 운영효율화

◈ 구조물 지하화 ⇒ 악취해소, 주민편익시설 제공

□ 시설현황

□ 위    치 : 파주시 통일로 1089-100 일원 (파주읍 봉암리)

□ 부지면적 : 39,936㎡ (약 12,000평)

□ 시설용량 : 610 톤/일 ( 분뇨 220, 가축분뇨 200, 음식물 110, 축분혼합 80 )

□ 민간제안 사업계획(안) - BTO방식

□ 법적근거 :「사회기반시설에 대한 민간투자법」제9조

□ 시설용량 : 450 톤/일 ( 분뇨 45, 가축분뇨 210, 음식물 65, 하수슬러지 130 )

□ 총투자비 : 997억원 (민간사업비 392, 건설보조금 605)

□ 처리방식

∙병합바이오가스화(분뇨, 가축분뇨, 음식물) + 슬러지건조화

∙바이오가스 슬러지건조에 사용, 건조 후 슬러지 연료판매

□ 공사기간 : 착수일로부터 36개월

□ 운영기간 : 사용개시일로부터 15년

□ 추진사항 및 계획

□ 2017.06.02. 민간제안서 접수

□ 2018.07.        제안서 검토 의뢰 (파주시→공공투자관리센터)

□ 2019.03.        제3자공고

□ 2019.10.        공사착공

□ 2022.10.        공사준공 및 운영개시

도시경관분야 주요업무 추진계획

1		안전하고 쾌적한 고품격 도시경관 조성

◈ 선진 옥외광고 문화 정착을 위한 광고물 시책 추진

◈ 신속하고 지속적인 불법광고물 정비

□ 선진 옥외광고 문화 조성

□ 불법광고물 부착방지 시트 및 현수막게시대 신설

∙ 부착방지 시트 :  1,000개소(130백만원)

∙ 현수막게시대 : 10개소(100백만원)

□ 불법‧미관저해‧노후간판 개선, 예쁜간판 공모전 우수작품 설치

∙ 사업량 : 50개 업소(100백만원)

□ 간판문화학교 운영

∙ 대    상 : 옥외광고업자 및 공무원(1회, 13백만원)

∙ 교육내용 : 옥외광고물 법령 및 현장학습 등

□ 불법광고물 정비로 쾌적한 생활환경 조성

□ 불법광고물 365일 단속․정비 추진

∙휴일 없이 365일 지속적이고 체계적인 정비․단속 실시

∙17개 정비반(시1, 읍‧면9, 동7) 34명

□ 불법광고물 테마정비

∙월별 테마를 정해 집중적이고 지속적인 단속으로 재발생 억제

□ 불법광고물 수거보상제 실시

∙ 참여자격 : 파주시 주민 65세이상, 기초수급, 차상위계층

∙ 예    산 : 27백만원

2		불법주정차 및 노점 없는 밝고 안전한 거리조성

◈ 주차공간 확충을 통한 안전하고 편리한 주차환경 조성

◈ 올바른 주차문화 조성으로 교통소통 개선

◈ 밝고 안전한 거리환경 조성

□ 주차공간 확충 및 주차환경개선 사업추진

□ 전통시장 공영주차장 조성

∙금촌통일시장 : 3층 4단 철골주차장 150여면(4,106백만원)

∙광탄경매시장 : 노외주차장 35면(460백만원)

□ 주차환경개선 사업추진

∙사전 무인정산기 및 거점센터 설치(120백만원)

∙대 상 : 주차장 4개소(금촌2, 금촌3, 문산1, 문산자유시장)

□ 공영주차장 유지관리 및 보수

∙시설보수 및 차선도색 연간단가(286백만원)

∙주차장 청결·유지관리 민간위탁 : 대한노인회(76백만원)

□ 올바른 주차문화 조성으로 교통소통 개선

□ 특별단속구간 지정 운영 확대

∙급속한 도시성장 및 자동차 증가로 불법주정차 민원증가

부족한 단속인력 효율적 활용

∙파주경찰서와 협의를 통한 교통체증 유발 및 불법주정차

민원 다수지역 선정

∙고정형CCTV 운영시간 탄력적 연장 운영

- 09:00〜18:00 □ 일반 단속지역

- 09:00〜21:00 □ 야간 집중 단속지역

- 07:00〜23:00 □ 상습불법주정차 지역

※ ‘17년 시범운영 : 운정신도시 내 대형마트 주변

□ 밝고 안전한 거리환경 조성

□ 노점상․노상적치물 지도 단속

∙단속반 : 3개반 8명(자체반 1, 용역반 2)

∙사업비 : 361백만원

□ 가로․보안등 확충 및 사전정비

∙4개 권역 연간단가공사, 현장처리기동대(3개반 6명)

∙사업비 : 932백만원

□ 지방도(357, 359호선) 기전시설 정비

∙지방도 지하차도 터널등 조도개선

∙사업비 : 62백만원

□ 지방도 터널 환경 정비

∙지방도 터널 등기구, 벽면, 바닥 등 환경정비

∙사업비 : 24백만원