부   의   안   건

7월 호우피해 공공시설 복구(관광지 및 관광시설) 예비비 사용내역 보고

파     주     시

7월 호우피해 공공시설 복구(관광지 및 관광시설) 예비비 사용내역 보고

의 안 번 호			제출연월일 : 2025. 1. 3. 제 출 자 : 파 주 시 장

□ 제안이유

○ 2024년 7월 호우피해 공공시설(관광지 및 관광시설) 복구 중 시비 부담금에 대한 예산을 예비비로 편성하여 사용하고「파주시 예비비 지출 승인에 관한 조례」제3조제1항에 따라 사용 내역을 보고하고자 함

□ 주요내용

○ 근    거 :「파주시 예비비 지출 승인에 관한 조례」제3조(예비비 지출 보고)

○ 예산액 : 1,017,063천원(예비비 : 792,971천원)

- 마장호수 산책로 : 208,263천원 / 국비50%104,132, 도비20%41,654, 시비30%62,477(예비비)

- 제3땅굴 관광지 : 111,866천원 / 국비50%55,933, 도비20%22,374, 시비30%33,559(예비비)

- 임진각 평화곤돌라 적십자로 법면 : 316,885천원 / 시비100%316,885(예비비)

- 임진강변 생태탐방로 : 380,050천원 / 시비100%380,050(예비비)

○ 집행액 : 58,932천원

○ 예비비 사용 : 58,932천원

□ 예산 집행사항(`24.12.31.기준)

○ 집행실적

사 업 명	집 행 일	집행액(천원)	세부 내역
제3땅굴 호우피해 복구 실시설계용역	`24. 11. 5.	9,500	호우피해 구간 측량 및 기본 및 실시설계
마장호수 호우피해 복구 실시설계용역	`24. 11. 7.	14,415	호우피해 구간 조사측량 및 기본 및 실시설계
곤돌라 호우피해복구 실시설계용역	`24. 12. 24.	35,017	호우피해 구간 조사측량 및 실시설계
합 계		58,932

○ 집행계획

사 업 명	집 행 일	집행액(천원)	세부 내역
임진강변 생태탐방로 호우피해 복구공사 실시설계용역	`25. 1.	37,178	호우피해 구간 측량, 기본 및 실시설계
마장호수 호우피해 복구공사	`25. 3.	193,848	돌망태옹벽 복구 75㎡
			토공(성토) 채움 150㎡
			식생매트 복구 및 설치
			배수구조물 설치
			데크 난간 등 복구
			기존 구조물 철거 등 177m
제3땅굴 호우피해 복구공사	`25. 3.	102,100	조경석 헐기 및 쌓기 222ton
			무개수로관 설치 79m
			거적덮기, 토사운반, 터파기, 되메우기 등
곤돌라 호우 피해복구 공사	`25. 3.	261,000	비탈면보강공 60공
			절토사면녹화 1,471㎡
			흄관접합및부설 6m
			L형옹벽 24.5m
			콘크리트·아스팔트 포장 등
생태탐방로 복구공사	`25. 3.	342,872	낙석방지책 복구
			식생블럭 축조, 수로관 설치
			토사운반 및 마대 쌓기 등
			데크 설치
합 계		936,998

□ 추진경과

○ 2024.  7. 16. ∼ 18.  호우피해 발생

○ 2024.  7. 19. ∼ 29.  공공시설 피해조사 및 국가재난관리시스템 입력

○ 2024.  7. 30. ∼ 8. 2.  중앙합동조사단 피해조사 실시

○ 2024.  8. 23. 호우피해 복구계획 통보(중앙재난안전대책본부)

○ 2024.  9.  2. 호우피해 복구계획 통보(경기도)

○ 2024.  9.  5. 호우피해 복구계획 수립(파주시)

○ 2024.  9. 26. 예비비 지출 승인 통보(예산법무과 → 관광과)

○ 2024. 10. 29. 생태탐방로 호우 피해복구 공사 실시설계 용역 착수

○ 2024. 11.  5. 실시설계 완료(제3땅굴 주차장 호우피해 복구)

○ 2024. 11.  7. 실시설계 완료(마장호수 호우피해 복구)

○ 2024. 11.  8. 일상감사 완료(마장호수 호우피해 복구)

○ 2024. 11. 11. 일상감사 완료(제3땅굴 주차장 호우피해 복구)

○ 2024. 12. 20. 실시설계 완료(곤돌라 호우피해 복구)

소관 부서		관광과
입안자	관광과장	한 윤 자
	관광개발1팀장	이 형 규
	관광개발2팀장	이 상 훈
	관광협력팀장	지 은 주
	담 당 자	황 석 현(4724)
		박 현 지(5186)
		신 화 용(5196)
		이 상 우(8344)