부   의   안   건

7월 호우피해 공공시설 복구(관광지 및 관광시설) 예비비 사용내역 보고

파     주     시

7월 호우피해 공공시설 복구(관광지 및 관광시설) 예비비 사용내역 보고

의 안 번 호			제출연월일 : 2025. 8. 21. 제 출 자 : 파 주 시 장

□ 제안이유

○ 2024년 7월 호우피해 공공시설(관광지 및 관광시설) 복구 중 시비 부담금에 대한 예산을 예비비로 편성하여 사용하고「파주시 예비비 지출 승인에 관한 조례」제3조제1항에 따라 사용 내역을 보고하고자 함

□ 주요내용

○ 근    거 :「파주시 예비비 지출 승인에 관한 조례」제3조(예비비 지출 보고)

○ 예산액 : 1,017,063천원(예비비 : 792,971천원)

- 마장호수 산책로 : 208,263천원 / 국비50%104,132, 도비20%41,654, 시비30%62,477(예비비)

- 제3땅굴 관광지 : 111,865천원 / 국비50%55,933, 도비20%22,374, 시비30%33,558(예비비)

- 임진각 평화곤돌라 적십자로 법면 : 316,885천원 / 시비100%316,885(예비비)

- 임진강변 생태탐방로   : 380,050천원 / 시비100%380,050(예비비)

○ 집행액 : 728,279천원

○ 예비비 사용 : 591,216천원

□ 예산 집행사항(`25. 6. 31.기준)

○ 집행실적

사 업 명	집 행 일	집행액(천원)	세부 내역
제3땅굴 호우피해 복구 실시설계용역	`24.11. 5.	9,500	호우피해 구간 조사측량 및 기본 및 실시설계
마장호수 호우피해 복구 실시설계용역	`24.11. 7.	14,415	호우피해 구간 조사측량 및 기본 및 실시설계
곤돌라 호우피해복구 실시설계용역	`24.12.24.	35,091	호우피해 구간 조사측량 및 실시설계
임진강변 생태탐방로 수해복구 실시설계용역	`25. 1.16.	34,515	호우피해 구간 조사측량 및 실시설계
마장호수 호우피해 복구공사 재해예방 기술지도 용역	`25. 4. 15.	726	재해예방 기술지도 용역
마장호수 호우피해 복구 공사	`25. 4. 17.	166,741	돌망태옹벽 및 데크난간 등 복구 1식 (관급자재 포함)
곤돌라 호우피해 복구 재해예방 기술지도 용역	`25. 6. 4.	1,280	재해예방 기술지도 용역
곤돌라 호우피해 복구 공사	`25. 6. 18.	240,661	비탈면 및 L형 옹벽 등 보강 1식 (관급자재 포함)
제3땅굴 호우피해 복구 공사 관급자재	`25. 6. 24.	4,423	무개수로관 41본
임진강변 생태탐방로 수해복구 공사	`25. 6. 25.	219,647	낙석방지책 및 데크 등 복구 1식 (관급자재 포함)
임진강변 생태탐방로 수해복구 재해예방 기술지도 용역	`25. 6. 27.	1,280	재해예방 기술지도 용역
합 계		728,279

○ 집행계획

사 업 명	집 행 일	집행액(천원)	세부 내역
제3땅굴 호우피해 복구공사	`25. 7.	78,713	조경석 헐기 및 쌓기 및 무개수로관 설치 등 복구 1식
임진강변 생태탐방로 수해복구 공사 관급자재	`25. 7.	17,548	레미콘 28㎡ / 콘크리트블록 164㎡
합 계		96,261

□ 추진경과

○ 2024.  7. 16. ∼ 18.  호우피해 발생

○ 2024.  7. 19. ∼ 29.  공공시설 피해조사 및 국가재난관리시스템 입력

○ 2024.  7. 30. ∼ 8. 2.  중앙합동조사단 피해조사 실시

○ 2024.  8. 23. 호우피해 복구계획 통보(중앙재난안전대책본부)

○ 2024.  9.  2. 호우피해 복구계획 통보(경기도)

○ 2024.  9.  5. 호우피해 복구계획 수립(파주시)

○ 2024.  9. 26. 예비비 지출 승인 통보(예산법무과 → 관광과)

○ 2024. 11.  5. 실시설계 완료(제3땅굴 주차장 호우피해 복구)

○ 2024. 11.  7. 실시설계 완료(마장호수 호우피해 복구)

○ 2024. 11.  8. 일상감사 완료(마장호수 호우피해 복구)

○ 2024. 11. 11. 일상감사 완료(제3땅굴 주차장 호우피해 복구)

○ 2024. 12. 20. 실시설계 완료(곤돌라 호우피해 복구)

○ 2025.  1. 10. 실시설계 완료(생태탐방로 호우피해 복구)

○ 2025.  1. 16. 계약심사 완료(곤돌라 호우피해 복구)

○ 2025.  1. 20. 계약심사 완료(생태탐방로 호우피해 복구)

○ 2025.  2. 13. 공사 착공(생태탐방로 호우피해 복구)

○ 2025.  2. 17. 공사 착공(곤돌라 호우피해 복구)

○ 2025.  2. 20. 공사 착공(마장호수 호우피해 복구)

○ 2025.  2. 21. 선급금 지급(생태탐방로 호우피해 복구)

○ 2025.  3.  7. 선급금 지급(곤돌라 호우피해 복구)

○ 2025.  4.  1. 공사 착공(제3땅굴 주차장 호우피해 복구)

○ 2025.  4.  9. 공사 준공(마장호수 호우피해 복구)

○ 2025.  5. 17. 공사 준공(곤돌라 호우피해 복구)

○ 2025.  6. 12. 공사 준공(생태탐방로 호우피해 복구)

○ 2025.  6. 30. 공사 준공(제3땅굴 주차장 호우피해 복구)

소관 부서		관광과
입안자	관광과장	한 윤 자
	관광개발1팀장	김 길 모
	관광개발2팀장	이 상 훈
	관광협력팀	지 은 주
	담 당 자	황 석 현(4724)
		신 화 용(5196)
		홍 현 기(5194)
		이 상 우(8344)