부   의   안   건

7월 호우피해 공공시설 복구(수내천 등 재해복구 9개소) 예비비 사용내역 보고

파     주     시

7월 호우피해 공공시설 복구(수내천 등 재해복구 9개소) 예비비 사용내역 보고

의 안 번 호			제출연월일 : 2025. 8. 21. 제 출 자 : 파 주 시 장

□ 제안이유

○ 2024년 7월 호우피해 공공시설(수내천 재해복구공사 등 9개소) 복구 중 시비 부담금에 대한 예산을 예비비로 편성하여 사용하고「파주시 예비비 지출 승인에 관한 조례」제3조제1항에 따라 사용 내역을 보고하고자 함.

□ 주요내용

○ 근    거 :「파주시 예비비 지출 승인에 관한 조례」제3조(예비비 지출 보고)

○ 예산액 : 2,283,024천원

- 국비 782,108천원[1,907,554천원, ‘25년 편성 예정], 도비 600,373천원

시비 900,543천원[252,543(예비비) / 648,000(특별교부세)]

○ 집행액 : 639,073천원 [국비 341,386천원, 도비 119,264천원, 예비비 178,423]

○ 예비비 사용 : 178,423천원

□ 공공시설복구 사업 내역

○ 객식천 등 8개소 재해복구 공사

- 사업량 : 호안(석축)설치 등 8개소    - 복구비 : 525,591천원

시설명 (시설구분)	복구계획		비고
	복구 내역	금액(천원)
합 계		525,591
객식천	석축 H=3.0~3.5m, L=49.9m	66,442
동막동천	석축 H=3.5m, L=22m, con’c포장 A=18㎡	50,705
선고개천	석축 H=3m, L=50m, con’c포장 A=40㎡	53,502
지내울천	석축 H=2.0~2.5m L=81m	81,337
배운리천	석축 H=2.5m L=35m 돌망태 L=45.5m	82,491
관동천	석축 H=2.5~3.0m L=52m	65,523
노패개울1천	석축 H=3.5~4.0m L=37m	59,838
방축천	석축 H=3.0m, L=52m	65,753

○ 수내천 재해복구사업

- 사업량 : 호안정비(식생블럭 등) L=1,730m, 토사제방 복구 L=4,061m, 세월교(3개소)

- 복구비 : 3,664,987천원

시설명 (시설구분)		단위	복구계획			비고
			물량	단가(천원)	금액(천원)
합 계			3,664,987
수내천 (소하천)	성토	㎥	2,478	36	91,240
	성토	㎥	1,542	36	56,776
	세월교	m	20	2,532	50,652
	세월교	m	15	2,532	37,989
	세월교	m	15	2,532	37,989
	성토	㎥	5,436	36	200,154
	성토	㎥	8,128	36	299,273
	식생블록	㎡	480	396	190,162
	식생블록	㎡	480	396	190,162
	식생블록	㎡	680	396	269,396
	식생블록	㎡	680	396	269,396
	식생블록	㎡	480	396	190,162
	식생블록	㎡	680	396	269,396
	식생블록	㎡	1,600	396	633,874
	식생블록	㎡	440	396	174,315
	식생블록	㎡	1,400	396	554,639
	설계	1식			149,412

□ 추진경과

○ 2024.  7. 16. ∼ 18.  호우피해 발생

○ 2024.  7. 19. ∼ 29.  공공시설 피해조사 및 국가재난관리시스템 입력

○ 2024.  7. 30. ∼ 8. 2.  중앙합동조사단 피해조사 실시

○ 2024.  9.  9. 호우피해 복구계획 확정(파주시)

○ 2024.  9. 26. 예비비 지출 승인 통보(예산법무과 → 하천관리과)

○ 2024. 12.  5. 수내천 재해복구공사 실시설계용역 착수 (발주: ‘24. 11. 6.)

○ 2025.  2. 26. 객식천 등 재해복구 공사 8개소 실시설계용역 완료착수:‘24.11.29.

- 동막동천 외 2개소 재해복구공사 실시설계용역(착수: ‘24. 11. 29. /완료: ‘25. 2. 26.)

- 객식천 외 1개소 재해복구공사 실시설계용역(착수: ‘24. 11. 29. /완료: ‘25. 2. 25.)

- 선고개천1 외 2개소 재해복구공사 실시설계용역(착수: ‘24. 11. 29. /완료: ‘25. 2. 25.)

○ 2025.  5. 30. 객식천 등 재해복구 공사 8개소 공사 준공

- 객식천 재해복구 공사 (착공: ‘25. 3. 10. / 준공: ‘25. 4. 23.)

- 동막동천 재해복구 공사 (착공: ‘25. 3. 24. / 준공: ‘25. 5. 21.)

- 선고개천1 재해복구 공사 (착공: ‘25. 3. 25. / 준공: ‘25. 5. 14.)

- 지내울천1 재해복구 공사 (착공: ‘25. 3. 27. / 준공: ‘25. 5. 30.)

- 배운리천2 재해복구 공사 (착공: ‘25. 3. 26. / 준공: ‘25. 5. 29.)

- 관동천1 재해복구 공사 (착공: ‘25. 3. 13. / 준공: ‘25. 4. 28.)

- 노패개울1천2 재해복구 공사 (착공: ‘25. 3. 25. / 준공: ‘25. 5. 16.)

- 방축천1 재해복구 공사 (착공: ‘25. 3. 12. / 준공: ‘25. 5. 12.)

소관 부서		하천관리과 (☏940-4671)
입안자	하천관리과장	마 주 형
	하천관리팀장	이 용 국
	담 당 자	심 현 섭